Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

22. 11. 2022 года.                                                        Дело № А40-191464/22-43-1494

Резолютивная часть решения объявлена 17. 11. 2022 года.

Решение изготовлено в полном объеме 22. 11. 2022 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы ФИО1, единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО " ГК " Сибирьэнергоинжиниринг " (ОГРН 

<

***>)

к ООО " СМ Инновации " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 1 565 155 руб. 30 коп. – суммы неотработанного аванса,

с участием представителей: от истца – ФИО2, доверенность № 170 от 29.12.2021 г., от ответчика – не явился.

Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителя, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 1 565 155 руб. 30 коп. – суммы неотработанного аванса, на основании статей 309, 310, 708, 1102, 1103 ГК РФ.

Истец направил представителя в судебное заседание, который иск поддержал, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении; представил истребованные судом документы; предъявил подлинники документов, имеющихся в деле в виде копий; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не представил отзыв на исковое заявление; документы, опровергающие иск не предъявил; расчет истца не оспорил; представителя в судебное заседание не направил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке, в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва ответчика и представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Между ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (Истец) и ООО «СМ Инновации» (Ответчик) 25.06.2019 был заключен Договор субподряда № 876ГК-НК на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проекту «ТЭЦ-2. Реконструкция (замена) оборудования энергоблоков ст. № 1 и ст. № 2» шифр ТЭЦ-2-ЭН-1, в соответствии с которым Ответчик принял на себя обязательства в сроки, предусмотренные Договором, выполнить, предусмотренные Договором (Приложение № 2 к Договору) строительно-монтажные работы по подготовке поверхности и нанесению огнезащитного покрытия на металлоконструкции Главного корпуса 1-й очереди Норильской ТЭЦ-2, в соответствии с Техническим заданием (Приложения № 1 к Договору) и передать результат Работ Истцу, в порядке, предусмотренном Договором.

Согласно п. 4.2.1 Договора (в редакции Дополнительного соглашения № 5 от 19.06.2020 г. к Договору) срок окончания выполнения работ Ответчиком и передача результата работ Истцу - 31.12.2020.

Результат Работ, согласно п. 2.1. Договора, должен соответствовать требованиям Договора, Технической документации, Проектной и Рабочей документации, Нормативно-технических актов и нормативно-правовых актов.

Передача Результата Работ, в соответствии с условиями пунктов 12.10 и- 12.11 Договора, осуществляется Ответчиком посредством направления в адрес Истца письменного уведомления о готовности к сдаче Результата Работ по Договору с последующим подписанием Истцом и Ответчиком Акта приемки-передачи результата Работ по Договору. При этом, обязательными условиями для подписания Сторонами Акта приемки-передачи результата Работ по Договору являются: выполнение Ответчиком Работ по Договору в полном объеме и в соответствии с требованиями Договора (Проекта); предоставление Ответчиком Истцу полного комплекта Исполнительной документации по Договору.

Однако, в нарушение условий Договора, обязательства по выполнению комплекса Работ, предусмотренных Договором, Ответчиком в полном объеме не исполнены, результат Работ в порядке, предусмотренном Договором, Истцу не передан.

На основании п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результата заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и с требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований- в соответствии с обычаями делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

В соответствии с условиями п. 19.4 Договора, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным применимым правом (законодательством Российской Федерации), уведомив об этом Субподрядчика в письменном виде,

В силу п. 2 ст. 405, п. 3 ст. 708 ГК РФ, в случае нарушения подрядчиком конечного срока работ, а также иных установленных договором сроков, заказчик праве отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с п. 2 ст. 450.1 ГК РФ, в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, когда такой отказ допускается, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

Согласно п. 19.5 Договора, уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вручается Субподрядчику за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения Договора.

В соответствии с условиями п. 19.6 Договора, при получении уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, Субподрядчик обязан в срок не позднее 8 (восьми) рабочих дней с даты расторжения Договора, вернуть Подрядчику сумму авансовых платежей по неисполненным Субподрядчиком обязательствам на дату расторжения Договора, за вычетом сумм, причитающихся Субподрядчику за работы (часть работ), фактически выполненные к моменту расторжения Договора и принятые Подрядчиком.

Уведомлением за исх. № СИБЭИ/ЕВ-01-09/5-91 от 02.02.2022 Истец уведомил Ответчика о расторжении Договора № 876ГК-НК от 25.06.2019 в одностороннем порядке с 17.02.2022 с одновременным требованием в срок, не позднее 8 (восьми) рабочих дней с даты расторжения Договора (с 17.02.2022) возвратить ранее уплаченные Истцом и неотработанные Ответчиком авансовые платежи, посредством их перечисления по реквизитам Истца, указанным в уведомлении.

В установленные сроки, изложенные Истцом в уведомлении за исх. № СИБЭИ/ЕВ-01-09/5-91 от 02.02.2022 о расторжении Договора, требования в добровольном порядке Ответчиком не были удовлетворены, ответа на данное уведомление в адрес Истца не поступало.

Истцом, в соответствии с условиями п. 6.1 Договора, в период действия Договора, в адрес Ответчика платежными поручениями № 5650 от 08.07.2019, № 5879 от 16.07.2019 была произведена выплата авансового платежа в общем размере 11 144 656 рублей 31 копейка, в том числе НДС 20%.

Сторонами, в период действия Договора, был произведен частичный зачет вышеуказанного авансового платежа в размере 7 795 680 рублей 06 копеек, в том числе НДС 20%, путем зачета пропорциональных сумм из сумм платежей, причитающихся Ответчику за фактически выполненные объемы работ в соответствии с п. 6.1 Договора, согласно следующих подтверждающих документов:

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 30.10.2019 г., Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 30.10.2019 г., на сумму 2 371 078 рублей 15 копеек, в том числе НДС 20%; сумма зачтенного аванса составила 711 323 рубля 45 копеек, в том числе НДС 20% (счет № 19/11-1 от 19.11.2019 г., выставленный ООО «СМ Инновации»);

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 2 от 25.12.2019г., Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 2 от 25.12.2019 г., на сумму 4 270 341 рубль 38 копеек, в том числе НДС 20%; сумма зачтенного аванса составила 1 281 102 рубля 41 копейка, в том числе НДС 20% (счет № 25/12 от 25.12.2019 г., выставленный ООО «СМ Инновации»);

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 3 от 29.02.2020 г.; Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 3 от 29.02.2020 г., на сумму 2 024 167 рублей 46 копеек, в том числе НДС 20%; сумма зачтенного аванса составила 607 250 рублей 24 копейки, в том числе НДС 20%) (счет № 29/02 от 29.02.2020 г., выставленный ООО «СМ Инновации»);

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 4 от 31.03.2020 г., Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 4 от 31.03.2020 г., на сумму 1 843 377 рублей 65 копеек, в том числе НДС 20%; сумма зачтенного аванса составила 553 013 рублей 29 копеек, в том числе НДС 20% (счет № 31/03 от 31.03.2020 г., выставленный ООО «СМ Инновации»);

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 5 от 30.04.2020 г., Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 5 от 30.04.2020 г., на сумму 1 684 848 рублей 14 копеек, в том числе НДС 20%; сумма зачтенного аванса составила 673 939 рублей 25 копеек, в том числе НДС 20% (счет № 30/04 от 30.04.2020 г., выставленный ООО «СМ Инновации»);

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 6 от 01.07.2020 г., Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 6 от 01.07.2020 г., на сумму 1 851 509 рублей 66 копеек, в том числе НДС 20%; сумма зачтенного аванса составила 555 452 рублей 90 копеек, в том числе НДС 20% (счет № 01/07-1 от 01.07.2020 г., выставленный ООО «СМ Инновации»);

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 7 от 30.11.2020 г., Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 7 от 30.11.2020 г., на сумму 846 036 рублей 60 копеек, в том числе НДС 20%; сумма зачтенного аванса составила 761 432 рубля 94 копейки, в том числе НДС 20% (счет № 3 0/11 от 3 0. И .2020 г., выставленный ООО «СМ Инновации»);

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) №, 1 от 31.10.2020 г., Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 31.10.2020 г., на сумму 2 946 850 рублей 64 копеек, в том числе НДС 20%; сумма зачтенного аванса составила 2 652 165 рублей 58 копеек, в том числе НДС 20%) (в соответствии с письмом исх. № ФД-02/11-20 от 02.11.2020 г. от ООО «СМ Инновации» со стоимости выполненных работ по Договору субподряда № 1886ГК-НК (II) от 19.10.2020 за отчетный период с 01.10.2020 по 31.10.2020 по Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 1 от 31.10.2020 был произведен зачет аванса, ранее выплаченного по Договору субподряда № 876ГК-НК от 25.06.2019).

Таким образом, с учетом произведённых сторонами частичных зачетов авансового платежа в период действия Договора в соответствии с п. 6.1. Договора, размер неотработанного Ответчиком авансового платежа составил 3 348 976  рублей 25 копейки, в том числе НДС 20%.

При этом, за выполненные Ответчиком и принятые Истцом работы, подтвержденные вышеуказанными документами, в период действия Договора, Истцом в адрес Ответчика были произведены платежи, в соответствии с условиями п. 6.7. Договора, в общем размере 8 258 708 рублей 67 копеек, в т.ч. НДС 20%, что подтверждается платежными поручениями № 13294 от 29.11.2019№ 15233 от 27.12.2019, № 1257 от 24.01.2020, № 4874 от 24.03.2020, № 6358 от 21.04.2019, 8061 от 28.05.2020, № 12336 от 07.08.2020.

В связи с неисполнением Ответчиком требований, изложенных в уведомлении Истца за исх. № СИБЭИ/ЕВ-01-09/5-91 от 02.02.2022 о расторжении Договора, а также с учетом наличия между Истцом и Ответчиком встречных требований по Договору, Истцом в адрес Ответчика было направлено Заявление за исх. № СИБЭИ/ЕВ-01-09/5-494 от 1.6.05.2022 о зачете встречных требований по Договору.

В соответствии с заявлением Истца за исх. № СИБЭИ/ЕВ-01-09/5-494 от 16.05.2022 о зачете встречных требований по Договору, в соответствии со ст. 410 ГК РФ, обязательство Ответчика перед Истцом по возврату неотработанного авансового платежа по Договору субподряда № 876ГК-НК от 25.06.2019 было уменьшено на сумму 1 783 820 рублей 95 копеек, в том числе НДС 20%). Остаток задолженности Ответчика перед Истцом по возврату неотработанного авансового платежа по Договору субподряда № 876ГК-НК от 25.06.2019 составил 1 565 155 рублей 30 копеек, в том числе НДС 20%.

Согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ и п. 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» стороны не вправе требовать возмещения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, но не исключает возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала.

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Правила, предусмотренные указанной статьей, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Исходя  из смысла указанной  нормы, обязательства из неосновательного обогащения возникают при одновременном наличии трех условий: факту приобретения или сбережения имущества, то есть увеличения стоимости  собственного  имущества приобретателя, присоединения к нему новых ценностей или сохранение того  имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества; приобретение или сбережение имущества за  счет другого лица, а также отсутствие правовых оснований приобретения или сбережения имущества одним лицом за  счет другого.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Требование истца о взыскании неотработанного аванса в сумме 1 565 155 руб. 30 коп. – законное, обоснованное, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины, в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ, относятся на Ответчика. 

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 401, 420-424, 431-434, 450, 452, 453, 702, 709, 711, 720, 740, 746, 753, 1102, 1103, 1107 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ООО " СМ Инновации " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " ГК " Сибирьэнергоинжиниринг " (ОГРН 

<

***>) 1 565 155 руб. 30 коп. – суммы неотработанного аванса и расходы по уплате госпошлины в сумме 28 652 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья

ФИО1