АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А48-8686/2018

г. Орел

29 августа 2019 года

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Подриги Н.В. при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Домсервис» (302004, 

<

...>, ОГРН 

<

***>) к некоммерческой организации «Региональный фонд  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  Орловской области» (302006, 

<

...>, ОГРН 

<

***>) об  обязании выполнить гарантийные работы,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора:  

1. общества с ограниченной ответственностью «Центурион» (

<

...>, лит. А, пом. 3Н; ОГРН 

<

***>);  

2. общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное  управление -2» (302030, 

<

...>, лит. П, пом. 4, ОГРН  

<

***>),  

3. Департамент строительства топливно-энергетического комплекса, жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области (302021,  

<

...>, каб. 242; ОГРН 

<

***>),  

руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить: 

Обязать некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (302006,  

<

...>, ОГРН 

<

***>) в течение 80 календарных дней со  дня вступления в законную силу решения суда выполнить гарантийные работы по  капитальному ремонту многоквартирного дома № 36 по улице Салтыкова Щедрина в  городе Орле:  

1. выполнить работы по фасаду дома 

- устранить дефекты отслоения штукатурных и окрасочных слоев (30% от  поверхности фасада);  

- ликвидировать вертикальные и горизонтальные трещины (от 20% до 30% на всей  площади фасада);  

- устранить разрушение и отслоение штукатурного слоя карниза (на 50%  поверхности);  

- устранить разрушение штукатурки и отделочных слоев нижней части плит  балконов в количестве 25 штук, что составляет 40% от всех балконов;  

- устранить разрушение отделочных слоев цоколя (20% от всей площади); - окрасить фасад по всей площади; 

2. исправить недостатки (дефекты) кровельного покрытия крыши над квартирами   №№ 11, 12, 19, 20, 27, 32, 41, 50, 62, 64, связанные с протечками в этих квартирах, а также  выполнить переустановку снегозадерживающих устройств в соответствии с требованиями  СП 17.13330.2011; установить заново защитные фартуки в соответствии с требованиями  СП 17.13330.2011; осуществить перемонтаж водоприемных воронок в соответствии с  требованиями строительных норм и правил; выполнить крепление листов  металлопрофиля к обрешетке по всей площади кровли и между собой в соответствии со  строительными нормами и правилами; устранить нарушения по примыканию листов  металлопрофиля к дымоходным трубам; устранить имеющиеся нарушения гидроизоляции  по всей площади кровли;  

3. выполнить дополнительное крепление металлических колпаков на вентканалах  по всему дому в соответствии с требованиями строительных норм и правил;  

4. провести повторную огнезащитную обработку составом «ПИРИЛАКС 3000»  деревянных элементов чердачного помещения кровли (балки и стропила чердачного  помещения) всего дома.  

Взыскать с некоммерческой организации «Региональный фонд капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области»  (302006, 

<

...>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Домсервис» (302004, 

<

...>, ОГРН 

<

***>) государственную пошлину в размере 6 000 руб., расходы за  проведение судебной экспертизы в размере 51 792 руб.  

Выдать исполнительный лист. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый  Арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской  области в течение одного месяца с момента его принятия.  

Судья Н.В. Подрига