АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 365 http://www.udmurtiya.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А71- 9584/2019

г. Ижевск

24 января 2025 года

Руководствуясь ст. ст. 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики  

Р Е Ш И Л :

1. Исковые требования удовлетворить частично. 

2. Обязать Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное управление специального строительства" (ОГРН 1022302390461, ИНН 2315078029) в течение 90 календарных дней со дня вступления в законную силу настоящего решения устранить следующие недостатки, допущенные при строительстве многоквартирного дома № 43 по ул. 30 лет Победы города Ижевска Удмуртской Республики:  

- выполнить работы по устройству гидроизоляции и заделке трещин балконных плит в квартирах №№ 167, 258, 259, 265, 344, 405, 421, 471, в соответствии с СП 29.13330.2011 «Полы» путём выполнения обмазочной поверхностной гидроизоляции балконных плит из полимерных материалов глубокого проникновения на основе цемента;  

- выполнить в квартирах № 112, 115, 242, 340, 344, 369, 415, 417 работы по устранению трещин в стенах квартир путём расшивки трещин, заделки трещин штукатурной смесью на основе акрила (при раскрытии трещины более 10 мм) можно заполнить трещину монтажной пеной), шпатлеванием и окраской стены от угла до угла в тон окрашенных и неремонтируемых поверхностей или сменой обоев по всему помещению, где выполнялись работы;  

- устранить трещины и отслоения окрасочного и шпаклевочного слоев цоколя здания у подъезда № 1 и нежилого помещения «Ателье» путём расчистки старого слоя штукатурки, повторного оштукатуривания стен цоколя и окраске от угла до угла в тон окрашенных и неремонтируемых поверхностей;  

- восстановить вертикальную гидроизоляцию с наружной стороны стен подвала у подъезда № 1 (ПВНС) путём выполнения гидроизоляции стен изнутри нанесением специальных составов глубокого проникновения, а так же монтажа кровли с устройством гидроизоляции или герметизации стыков листов профнастила;  

- выполнить работы по монтажу канализационных труб в подвале подъезда № 6 с надлежащим уклоном трубопроводов путём демонтажа трубопроводов канализации и выполнения монтажа вновь с обеспечением уклона труб не менее 1% в сторону выпуска; при необходимости выполнить демонтаж и монтаж вновь выпусков канализации от здания до колодца;  

- выполнить работы по проектированию и переносу опор наружного освещения №№ №№ 13;14;15;16;17, и кабельной линии КЛ-0,4 многоквартирного жилого дома № 43 с кадастровым номером 18:26:010070:21 из охранной зоны КЛ-6 кВ РП-18-ТП-562 и согласованию изменений в ГУАИГ г. Ижевска, с внесением данных на архитектурную съемку города Ижевска.  

 -устранить причины промерзания и подтверждённые дефекты в квартирах №№ 3,11,15,26,30,36,42,53,54,59,65,70,72,77,78,91,102,107,115,120,127,132,155,164,  

167,173,177,185,199,205,217,225,228,242,246,255,270,275,276,290,291,293,296,305, 309,311,315,316,318,321,326,336,340,342,344,350,353,364,368,369,374,377,380,381,  

382,383,390,392,393,396,401,402,405,410,411,413,415,417,418,421,423,425,449,460, 473, в комнате консьержа в 6 подъезде на 1 этаже путем применения способов, отраженных в дополнениях № 2 от 20.09.2023 к экспертному заключению № 498-02/2020-ЭКС общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Алан».  

3. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

4. В случае неисполнения п. 2 резолютивной части настоящего решения суда в течение 90 календарных дней с момента вступления в законную силу судебного акта взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (ОГРН 1022302390461 ИНН 2315078029) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное управление № 813" (ОГРН 1151832027115, ИНН 1841059290) судебную неустойку в порядке п. 1 ст. 308.3 ГК РФ: первые 7 дней не исполнения решения суда – 50 руб. 00коп. за каждый день; с 8 по 14 календарный день не исполнения решения суда – 100 руб. 00 коп. за каждый день; с 15 по 21 календарный день не исполнения решения суда – 200 руб. 00 коп. за каждый день; с 22 по 28 календарный день не исполнения решения суда – 300 руб. 00коп. за каждый день; с 29 календарного дня не исполнения решения суда – 500 руб. 00 коп. за каждый день.  

5.Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (ОГРН 1022302390461 ИНН 2315078029) в пользу Товарищества собственников недвижимости "Академический" г. Ижевск (ОГРН 1181832025682, ИНН 1831192430) 6000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 100000 руб. 00 коп. в возмещение судебных расходов на проведение судебных экспертиз.  

 6. Вернуть Товариществу собственников недвижимости "Академический" г. Ижевск (ОГРН 1181832025682, ИНН 1831192430) с депозитного счета Арбитражного суда Удмуртской Республики 27500 руб. 00 коп., излишне оплаченных за проведение судебной экспертизы платежным поручением № 236 от 12.11.2020, по представлении в суд соответствующего заявления, содержащего банковские реквизиты счета.  

7. Вернуть Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства» (ОГРН 1022302390461 ИНН 2315078029) с депозитного счета Арбитражного суда Удмуртской Республики 7500 руб. 00 коп., излишне оплаченных за проведение судебной экспертизы платежным поручением № 7128 от 30.10.2020, по представлении в суд соответствующего заявления, содержащего банковские реквизиты счета.  

8. Взыскать с Товарищества собственников недвижимости "Академический" г. Ижевск (ОГРН 1181832025682, ИНН 1831192430) в доход федерального бюджета 58924 руб. 00 коп. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.  

Судья Н.А. Трубицына