АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Томск Дело № А67- 6260/2022 29.06.2023 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 30.05.2023 года. 

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Д.А.Гребенникова,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «ТехноРесурс» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Восточная транснациональная компания» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 4 640 000 руб. задолженности по договору поставки оборудования с шеф-монтажными и пусконаладочными работами от 03.07.2019 № ВТК-00588, 464 000 руб. пени  за период с 07.07.2020 по 31.03.2022,  

третьи лица – 1. финансовый управляющий ФИО2 ФИО3 (ИНН 

<

***>, 2. ООО «Казтрейд» ИНН 

<

***>,  

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕХНОВЕК" 427436, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ВОТКИНСК,  УЛ. 6 КИЛОМЕТР КАМСКОЙ Ж/Д ПЛ-КА СИВА.  

при участии в судебном заседании:  

от истца – не явился (без участия); от ответчика – ФИО4 по доверенности от 12.01.2023 (паспорт); от третьих лиц – не явились (извещены).  Установил: 

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноРесурс» (далее – истец)  обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Томской области к обществу с  ограниченной ответственностью «Восточная транснациональная компания» (далее – ООО  «ВТК», ответчик) о взыскании о взыскании 4 640 000 руб. задолженности по договору  поставки оборудования с шеф-монтажными и пусконаладочными работами от 03.07.2019 №  ВТК-00588 (далее – договор № ВТК-00588), а также 464 000 руб. пени за период с 07.07.2020  по 31.03.2022.  

Исковые требования истец основывает на статьях 309, 506, 454, 486, 516  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), мотивируя неоплатой  ответчиком поставленного товара, пеня начислена за нарушение сроков оплаты товара на  основании пункта 14.3 упомянутого договора № ВТК-00588. Истец в дополнительных  пояснениях указал, что директор ООО «ТехноРесурс» ФИО2 не мог  подписывать представленные в материалы дела уведомления об уступке прав требования по  состоянию здоровья, в подтверждение чего представил копии медицинских документов.  

Ответчик представил отзыв на иск, в котором исковые требования не признал.  Сообщил, что задолженность у него отсутствует, так как обязательство по оплате по  договору № ВТК-00588 в размере 4 640 000,00 руб. ООО «ВТК» исполнило в полном объеме  путем осуществления 08.12.2020 зачета однородных встречных взаимных требований в  одностороннем порядке с ООО «КазТрейд», которому право требования уплаты указанной  задолженности было передано на основании его с ООО «ТехноРесурс» договора уступки от  14.09.2020. Ответчик был проинформирован о заключении данного договора уступки между  указанными лицами уведомлениями цедента и цессионария.  

Кроме того, в дополнении к отзыву ответчик полагал, что неисполненное истцом  обязательство перед ответчиком по уплате штрафных санкций повлекло сальдирование  взаимных предоставлений и, как следствие, прекращение обязательств перед истцом, просил  в удовлетворении иска отказать.  

Истец через мой арбитр 24.04.2023 представил следующие пояснения. Штрафные  санкции (пени, неустойки) в процедуре банкротства погашаются в установленной  очередности, а именно после погашения текущих платежей (ст. 134 Закона о банкротстве), а  также задолженности кредиторов включенных в реестре требований кредиторов в части  основного долга по третьей очереди удовлетворения. Таким образом, в случае применения  салидирования будет нарушены права остальных кредиторов. По условиям договора  поставки оборудования с шеф-монтажными и пусконаладочными работами № ВТК-00588 от  03.07.2019г. установлена обязанности поставщика поставить Групповые замерные установки  Т-ГЗУ-М1 -40-8-400, в количестве 2 шт., общей стоимостью 23 200 000,00 руб. в срок30.07.2019г. Поставка товара произведена по товарной накладной № 101 от 02.09.2019г.  Согласно штампа на TH № 101 от 02.09.2019г. отметка ООО «ВТК» о получении товара стоит  19.11.2019г. Однако, в материалах дела имеется письма ООО «ТехноРесурс» исх. № 453 от  23.09.2019г., согласно которому ООО «ТехноРесурс» просит ООО «ВТК» согласно договору   № ВТК-00588 от 03.07.2019г. обеспечить прием специалистов для устранения замечаний по  АГЗУ, таким образом, стоит предположить, что оборудование ООО «ВТК» получено не  19.11.2019г., в сентябре 2019г.  

В соответствии с условиями договора оплата должна быть произведена 80% - в  течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной, оставшаяся часть в  течении 30 календарных дней с даты подписания сторонамиприемки результатов  эксплуатационных испытаний под нагрузкой и достижения гарантированных показателей.  Оплата произведена 24.12.2019г. на сумму 18560000,00 руб. Оплата зарезервированной  суммы ответчиком в срок не произведена. По условиям договора за нарушение сроков  оплаты предусмотрены пени в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы, таким образом,  сумма пени за нарушение сроков оплаты составляет: • 18560000*0,1%*5 (период с  20.12.2019г. по 24.12.2019г.)=92800,00 руб. • 4640000,00 руб. *0,1%*633 (период с  07.07.2020г. по 31.03.2022г.)=464000,00 руб. Таким образом, сумма пени за нарушение  сроков оплаты составляет 556800,00 руб.  

По договору № ВТК-00633 от 05.03.2019г. вменение суммы пени за нарушение сроков  поставки товара в размере 1001416,50 руб. не возможно, в связи с тем, что между ООО  «ТехноРесурс» и ООО «ВТК» 15.11.2022г. заключено соглашение о расторжении Договора  поставки оборудования с шеф-монтажными и пусконаладочными работами № ВТК-00633 от  05.03.2019г. Таким образом, применение штрафных санкций за не своевременному поставку  не возможно. По договору материально-технических ресурсов № ВТК 00611 от 14.02.2019г.  поставка произведена в полном объеме, оплата поставки также осуществлена в полном  объеме, ответчик в рамках данного договора с исковыми требованиями о взыскании санкций  за несвоевременную поставку не обращался.  

В рамках настоящего договора № ВТК-00588 от 03.07.2019г. был составлен протокол   № 5 от 18.05.2020г. совместного совещания по производству и оплате LUMP и ПНР  измерительных установок «Т»-ГЗУ-М на КП № 7 ФИО5 ООО «ВТК»,  подписанного между сторонами ООО «ВТК» и ООО Завод НГО «Техновек», согласно  

которому было принято решение: ООО «ТехноРесурс» (ООО Завод НГО «Техновек»)  согласовывает проведение ПНР силами персонала ООО «ВТК» с предоставление  дистанционных консультаций от ООО Завод НГО «Техновек», из условий договора  исключается оплата за проведение ШМР и ПНР измерительных установок. Таким образом,  соглашение между сторонами было достигнуто.  

Третьим лицом - финансовым управляющим ФИО2  ФИО3 в отзыве сообщено, что ФИО2 находился на  лечении в различных медицинских учреждениях, возможность подписания ФИО2 договора уступки прав требования между ООО «ТехноРесурс» и ООО  «КазТрейд», датированного 14.09.2020, исключена.  

Третьи лица - ООО «КазТрейд» и ООО «Завод нефтегазового оборудования  «Техновек» о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом извещены,  явку своих представителей не обеспечили, извещены. Согласно положениям части 3, 5 статьи  156 АПК РФ судебное заседание проведено без участия представителей истца и третьих лиц.  

В судебном заседании ответчик поддержал заявленные требования в полном объеме  по основаниям указанным в исковом заявлении, пояснил, что исковая давность не подлежит  применению к требованию ответчика о взыскании неустойки, поскольку ответчик  добросовестно полагал, что уступка прав требования состоялась, заявил о зачете ООО  «КазТрейд» , и до момента получения информации о состоянии здоровья ФИО2  в рамках настоящего дела не мог заявить о сальдировании требования истца. В свою очередь,  указание истцом в своем пояснении по делу от 13.03.2023 о возможности применения пени  вследствие нарушения ответчиком сроков оплаты поставленного товара в сумме 18 560 000  руб., произведенное фактически 24.12.2019, совершено за пределами определяемого в  соответствии с пунктом 1 статьи 196 Гражданского кодекса РФ срока исковой давности, о  применении которого заявил ответчик на основании статьи 41 Арбитражного  процессуального кодекса РФ и пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса РФ.  

Заслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, оценив доводы и  доказательства, представленные истцом и ответчиком, третьим лицом в обоснование своих  требований и возражений, суд приходит к выводу о том, что исковые требования не  подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

По условиям договора № ВТК-00588 между ООО «ТехноРесурс» и ООО «ВТК»  (пункт 2.1.) поставщик обязуется поставить оборудование в количестве, определенном в  Приложении № 1 к договору, выполнить шеф-монтажные и пуско-наладочные работы в  отношении поставляемого по договору оборудования, а покупатель обязуется принять  исполненное, и оплатить в соответствии с условиями договора.  

Пунктом 4.1.1. Договора № ВТК-00588 установлено, что оплата фактически  поставленного оборудования производится покупателем банковским переводом на  расчетный счет Поставщика в размере 80% от стоимости оборудования в срок не позднее 30  календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12, на  основании оригинала счет- фактуры Поставщика. Оплата остальных 20% стоимости  оборудования производится в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами  Акта приемки результатов эксплуатационных испытаний под нагрузкой и достижения  гарантированных показателей, предусмотренных приложением к договору ВТК-00588, в  результате пуско-наладочных работ.  

Во исполнение п. 3.1. договора № ВТК-00588 ООО «ТехноРесурс» поставило ООО  «ВТК» оборудование - групповая замерная установка Т-ГЗУ-М1-40-8-400 (2 шт.) на общую  сумму 23 200 000,00 руб., в т.ч. НДС (20%) в размере 866 666,67 руб. В свою очередь,  ответчиком оплата поставленного оборудования на сумму 18 560 000,00 руб.  

В материалы дела представлено дополнительное соглашение № 1 от 20.08.2020 к  договору № ВТК-00588, которым, внесены изменения в условия договора № ВТК-00588, в  соответствии которыми срок выполнения покупателем обязательств по оплате  зарезервированных денежных средств считается наступившим. Так, в соответствии с  

подпунктами 4.1., 4.1.2. договора № ВТК-00588 (в редакции указанного Дополнительного  соглашения № 1) оплата зарезервированных 20% стоимости поставляемого оборудования  производится покупателем банковским переводом на счёт поставщика в течение 30  календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения № 1 к Договору № ВТК- 00588.  

Также в материалы дела представлен договор уступки прав требования по договору   № ВТК-00588, в соответствии с которым ООО «КазТрейд» перешло право требования к ООО  «ВТК» на сумму 4 640 000,00 руб. по данному договору.  

Межу истцом и ответчиком также заключен договором № ВТК-00588 установлена  обязанность истца поставить Групповые замерные установки договором № ВТК-00633  установлена обязанность истца поставить 4 позиции товара общей стоимостью 23 124 425,09  руб., выполнить шеф-монтажные и пуско-наладочные работы в отношении поставляемого по  договору товар.  

Пунктом 5.1 договора установлен срок поставки товара – не позднее 20.03.2019, в  указанный срок поставщиком оборудование поставлено не было. Применяя  предусмотренную пунктом 14.2. договора № ВТК-00633 ответственность в виде пени в  размере 0,1 процента от стоимости непоставленного в срок товара за каждый день  просрочки.  

Кроме того между истцом и ответчиком заключен договор № ВТК-00611 и  спецификацией № 1 от 14.02.2019. В соответствии с которым установлена обязанность истца  поставить 18 позиций товара общей стоимостью 21 924 864 руб. в срок не позднее 30  календарных дней с момента подписания спецификации № 1 сторонами, то есть не позднее  16.03.2019. Пунктом 8.2. договора установлена ответственность в виде пени в размере 0,1  процента от стоимости непоставленного в срок товара за каждый день просрочки (но не  более 10 процентов).  

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 09.12.2021 (резолютивная  часть от 06.12.2021) по делу А71-5022/2021 ООО «ТехноРесурс» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, 

<

...>. оф. 2) признано банкротом, открыто  конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО6.  

Конкурсным управляющим истца в адрес ответчика была направлена претензия от  21.12.2021 с просьбой оплатить имеющуюся задолженность, ответчиком представлен отказ в  удовлетворении указанной претензии (исх. № 266/09 от 09.02.2022), согласно которому  ответчик указывает на то, что задолженность отсутствует, в связи с тем, что 24.09.2020 от  ООО «ТехноРесурс» и ООО «КазТрейд» поступили уведомления о заключении между  указанными лицами договора уступки прав требования по договору № ВТК-00588, в  соответствии с которым ООО «КазТрейд» перешло право требования к ООО «ВТК» на  сумму 4 640 000,00 руб.  

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.  Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий  не допускаются (статья 310 ГК РФ).  

Согласно статье 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец,  осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный  срок или сроки производимые или закупаемые товары покупателю для использования в  предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным,  домашним и иным подобным использованием.  

Согласно пункту 1 статьи 454 ГК РФ продавец обязуется передать товар в  собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и  уплатить за него определенную денежную сумму (цену). В силу пункта 5 статьи 454 ГК РФ  по общему правилу к договорам поставки применяются общие положения о купле-продаже.  

Согласно пункту 1 статьи 486 ГК РФ покупатель должен оплатить товар  непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено  законом или договором.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 486 ГК РФ, если покупатель своевременно не  оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе  потребовать оплаты товара. Согласно статье 516 ГК РФ покупатель оплачивает  поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных  договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то  расчеты осуществляются платежными поручениями.  

Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется  получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не  оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты  поставленных товаров от покупателя.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 314 ГК РФ если обязательство предусматривает  или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно  быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения  обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных  законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или  соответственно в любой момент в пределах такого периода.  

В силу статьи 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты  нарушенного гражданского права. Неустойкой признается определенная законом или  договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае  просрочки исполнения (статья 330 ГК РФ).  

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений. В силу части 3 статьи 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на  которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую  сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.  

Согласно выписок из единого государственного реестра юридических лиц директором  и единственным учредителем (участником) как ООО «КазТрейд», так и ООО «ТехноРесурс»  являлся ФИО2  

В ответе на запрос суда от 16.01.2023 Федеральное государственное бюджетное  научное учреждение «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и  реабилитологии» 02.02.2023 сообщило, на указанные в запросе даты (14.09.2020 и  21.09.2020) не имел физической возможности подписывать какие-либо документы.  

Таким образом, доводы истца о том, что в договоре уступки прав требования от  14.09.2020 по договору ВТК-00588 и уведомлениях стоит не собственноручная подпись  ФИО2 являются обоснованными. В связи с чем, указанный договор уступки прав  требования от 14.09.2020 нельзя считать заключенным, а направленные в адрес ООО «ВТК»  уведомления ООО «ТехноРесурс» от 21.09.2020 № 6071/20, ООО «КазТрейд» № 502 от  21.09.2020 подписаны не уполномоченными лицами.  

При отсутствии факта перехода прав требования к ООО «КазТрейд» исполнение  ответчиком обязательств путем осуществления 08.12.2020 зачета однородных встречных  взаимных требований в одностороннем порядке с ООО «КазТрейд» нельзя считать  ненадлежащим.  

В то же время, добросовестность ответчика при исполнении обязательства путем его  прекращения зачетом посредством уведомления цессионария подтверждается отсутствием у  ответчика оснований для сомнения в полномочиях единоличных исполнительных органов  юридических лиц (цедента и цессионария) на момент получения уведомлений о заключении  договора уступки.  

Переписка между сторонами договора, в том числе исполненная с использованием  электронных сервисов, с учетом пунктов 3, 4 статьи 1 ГК РФ свидетельствует о  добросовестном поведении стороны по делу, неоднократно получающей от другой стороны о  юридически значимых событиях, касающихся исполнения договора. Направление  электронных сообщений, писем посредством электронной почты соответствует обычаям  делового оборота и не противоречит гражданскому законодательству Российской  Федерации, если стороны обмениваются информацией по указанному адресу в рамках  существующих правоотношений и принадлежность адреса электронной почты стороне  договора бесспорна (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от  15.02.2019 по делу № А11-3596/2018).  

Данный подход также отражен в Постановлении Президиума ВАС РФ от 12.11.2013   № 18002/12 по делу № А47-7950/2011, содержащем правовую позицию, в соответствии с  которой даже отсутствие соглашения между сторонами об обмене информацией в  электронной форме при доказывании неправомерных действий автоматически не делает  недопустимым доказательством всю соответствующую электронную информацию.  

В пункте 21.2 Договора № ВТК-00588 стороны определили, что уведомления могут  направляться сторонами с использованием различных способов связи, в том числе  электронной почтой, по реквизитам, указанным в договоре. В связи с этим между ООО  «ВТК» и ООО «ТехноРесурс» в рамках договорных отношений осуществлялся обмен  информацией, в том числе посредством электронного документооборота. Полученные в ходе  такой электронной переписки сообщения следует считать письменными документами,  подписанными лицом, от которого такие сообщения исходят, поскольку в соответствии с  частью 2 статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»  простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством  использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования  электронной подписи определенным лицом. По выводу, аналогичному приведенному в  Постановлении Президиума ВАС РФ № 18002/12, каждое сообщение, отправленное с  учетной записи электронной почты, доступ к которой осуществляется путем введения логина  и пароля от нее в определенной информационно-телекоммуникационной сети, признается  электронным документом, подписанным простой электронной подписью того лица, которое  является владельцем данной учетной записи и известно в таковом качестве, пока им не  доказано иное. При отправке сообщения по электронной почте для его адресата формируется  определенный набор реквизитов, среди которых есть и информация об отправителе  сообщения, что и позволяет считать информацию, содержащуюся в электронном сообщении,  электронным документом.  

В пункте 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 «О  некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской  Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» указано, что в случае  направления уведомления об уступке должнику первоначальным кредитором, по смыслу  абзаца 2 пункта 1 статьи 385, пункта 1 статьи 312 ГК РФ исполнение, совершенное  должником в пользу указанного в уведомлении нового кредитора, по общему правилу,  считается предоставленным надлежащему лицу, в том числе в случае недействительности  договора, на основании которого должна была производиться уступка.  

Согласно пункту 21 указанного Постановления по смыслу статьи 385 ГК РФ  уведомление о переходе права должно содержать сведения, позволяющие с достоверностью  идентифицировать нового кредитора, определить объем перешедших к нему прав, а если  указанных в уведомлении сведений недостаточно для совершения должником исполнения  новому кредитору, должник, по общему правилу, вправе исполнить обязательство  первоначальному кредитору или приостановить исполнение и потребовать представления  соответствующих сведений от первоначального кредитора.  

В то же время, Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120  «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского  

кодекса Российской Федерации» (п.14) отражено, что в силу положений, предусмотренных  статьями 312, 382, 385 Гражданского кодекса РФ, должник при предоставлении ему  доказательств перехода права (требования) к новому кредитору не вправе не исполнять  обязательство данному лицу. Кодекс не предусматривает обязательность предоставления  должнику в качестве доказательства перемены кредитора соглашения, на основании  которого цедент принял обязательство передать право (требование) цессионарию.  Достаточным доказательством является уведомление должника цедентом о состоявшейся  уступке права (требования) либо предоставление должнику акта, которым оформляется  исполнение обязательства по передаче права (требования), содержащегося в соглашении об  уступке права (требования).  

Тем не менее, ООО «ВТК», действуя добросовестно с должной осмотрительностью,  приняло необходимы меры по получению от первоначального кредитора сведений,  позволяющих с достоверностью идентифицировать нового кредитора, и, принимая во  внимание совпадение конечных бенефициаров договора об уступке в одном лице,  надлежащим уведомило ООО «КазТрейд» о прекращении зачетом требований по спорному  договору.  

Учитывая субъективную невозможность узнавания ответчиком фактов (как  неосведомленным лицом, действовавшим без реального учета этих обстоятельств), исходя из  доктрины видимости права, учиненное должником исполнение цессионарию является  надлежащим и прекращает его обязательство, несмотря на судьбу уступки.  

Кроме того, ответчик ссылается на том, что ввиду отсутствия у ФИО2  после 26.03.2020 физической возможности подписывать какие-либо документы, исходя из  части 3.1. статьи 70 АПК РФ также не является заключенным истцом и ответчиком и не  подлежит применению дополнительное соглашение № 1 по договору ВТК-00588, что истцом  не оспаривается и несогласие с таким обстоятельством не вытекает из иных доказательств. В  силу применения условий о сроках и порядке оплаты товара, установленных договором   № ВТК-00588, срок исполнения ответчиком обязательства по оплате зарезервированных  денежных средств в размере 20% стоимости поставляемого оборудования (4 640 000 руб.) не  наступил, а оплата производится в течение 30 календарных дней с даты подписания  сторонами Акта приемки результатов эксплуатационных испытаний под нагрузкой и  достижения гарантированных показателей, предусмотренных приложением к договору, то  есть после выполнения поставщиком шеф-монтажных и пуско-наладочных работ. По  причине неработоспособности поставленного по договору оборудования, отраженной в  представленном ответчиком Протоколе проведения испытаний от 08.04.2021,  гарантированные показатели в работе оборудования не достигнуты, а шеф-монтажные и  пуско-наладочные работы по договору считать выполненными не представляется  возможным.  

Несмотря на незамедлительное уведомление истца о недостижении гарантированных  показателей и предложении устранить замечания и дефекты товара, ООО «ТехноРесурс» к  выполнению договорных обязательств по обеспечению качества товара, а также по  выполнению шеф-монтажных, пуско-наладочных работ не приступало, в связи с чем  основания требования оплаты ООО «ВТК» зарезервированных сумм стоимости товара в  размере 4 640 000,00 руб. отсутствуют, а штрафные санкции за нарушение сроков оплаты  применению не подлежат.  

Абзацем 2 пункта 1 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что с даты принятия решения о признании  должника банкротом и об открытии конкурсного производства срок исполнения возникших  до открытия конкурсного производства денежных обязательств должника считается  наступившим. При этом на обязательства контрагентов должника такие последствия не  распространяются. Это означает, что в условиях невозможности осуществления  принудительного взыскания долга по обязательству, срок исполнения которого не наступил,  конкурсный управляющий имеет возможность реализовать дебиторскую задолженность в  

соответствии со статьями 139, 140 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, получив до  ликвидации денежный эквивалент за свой актив (Определение Судебной коллегии по  экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30.06.2017 по делу № 304-ЭС17-1977).  Однако, конкурсным управляющим ООО «ТехноРесурс» такие меры предприняты не были.  

Необходимо учитывать, что между ООО «ВТК» и ООО «ТехноРесурс» также были  заключены договор поставки материально-технических ресурсов № ВТК-00611 от 14.02.2019  (далее – договор № ВТК-00611) и договор поставки оборудования с шеф-монтажными и  пусконаладочными работами № ВТК-00633 от 05.03.2019 (далее – договор № ВТК-00633).  Оборудование по данным договорам приобреталось покупателем в целях его использования  в рамках выполнения одного и того же проекта работ в отношении нефтяного  месторождения, перечисленные договоры заключались на основании представленных ООО  «ТехноРесурс» коммерческих предложений, и, несмотря на подписание нескольких  документов (в силу волевой обусловленности со стороны поставщика на заключение  отдельных договоров), в действительности воля сторон (статья 431 ГК РФ) была направлена  на установление между сторонами единой договорной связи с двумя встречными  обязанностями осуществить характерное исполнение: со стороны истца – поставка товаров с  выполнением работ, а со стороны ответчика – их оплата. В рассматриваемом случае сделки  совершены в непродолжительный период времени между ними, имеют неразрывную связь,  единую экономическую мотивацию (хозяйственную цель), и, несмотря на отсутствие  договорных условий, связывающих исполнение договоров, наличествует связь по  субъектному составу, однородному предмету и направленности действий на один объект с  достижением взаимосвязанного результата, а также исходя из согласованного поведения  сторон при исполнении сделок.  

Истец подтвердил указанную позицию, подчеркивая в своем письме от 07.04.2022  исх. № 101 единство «всех действующих договоров поставки МТР, проведения ШМР и ПНР,  заключенных между ООО «ТехноРесурс» и ООО «ВТК»», определяя их в качестве  «долгосрочного контракта на поставку оборудования».  

В рамках выполнения обязанностей по перечисленным договорам истцом  неоднократно были нарушены сроки поставки товаров. В соответствии со статьями 330, 331  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) неустойкой (штрафом, пеней)  признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в  частности в случае просрочки исполнения.  

Ответчиком представлен следующий рассчет неустойки по спорным договорам  Согласно пункту 5.1 договора № ВТК-00588 срок поставки товара – не позднее 30.07.2019  года, поставка была осуществлена 19.11.2019 года, что подтверждается товарной накладной   № 101, тем самым срок поставки был нарушен истцом на 112 дней.  

Применяя предусмотренную пунктом 14.2. договора № ВТК-00588 ответственность в  виде пени в размере 0,1 процента от стоимости непоставленного в срок товара за каждый  день просрочки ООО «ВТК» потребовало уплаты пени в размере 2 598 400 руб., направив в  адрес ООО «ТехноРесурс» претензию № 2981/09 от 02.12.2019 (что подтверждается  уведомлением о вручении). Истцом требования по претензии удовлетворены не были.  

Договором № ВТК-00633 установлена обязанность истца поставить 4 позиции товара  общей стоимостью 23 124 425,09 руб., выполнить шеф-монтажные и пуско-наладочные  работы в отношении поставляемого по договору товар.  

Пунктом 5.1 договора установлен срок поставки товара – не позднее 20.03.2019, в  указанный срок поставщиком оборудование поставлено не было. Применяя  предусмотренную пунктом 14.2. договора № ВТК-00633 ответственность в виде пени в  размере 0,1 процента от стоимости непоставленного в срок товара за каждый день просрочки  ООО «ВТК» потребовало уплаты пени:  

позиция 1 в приложении № 1 к договору № ВТК-00633 - Блок БВР-5-21-С-Т-3-0-1-1-1- 1-80 стоимостью 5 066 760,00 руб. фактически поставлен 29.04.2019 (что подтверждается  

товарной накладной № 56), срок поставки нарушен на 40 дней, размер пени составил  202 670,40 руб.;  

позиция 2 в приложении № 1 к договору № ВТК-00633 - Блок БВР-5-21-С-Т-3-0-1-1-1- 1-80 стоимостью 5 066 760,00 руб., фактически поставлен 06.05.2019 (что подтверждается  товарной накладной № 57), срок поставки нарушен на 47 дней, размер пени составил 238  137,72 руб.;  

позиция 3 в приложении № 1 к договору № ВТК-00633 - Блок БВР-6-21-С-Т-3-0-1-1-1- 1-80 стоимостью 5 853 167,54 руб., фактически поставлен 06.05.2019 (что подтверждается  товарной накладной № 57), срок поставки нарушен на 47 дней, размер пени составил 275  098,87 руб.;  

позиция 4 в приложении № 1 к договору № ВТК-00633 - Блок БВР-8-21-С-Т-3-0-1-1-1- 1-80 стоимостью 7 137 737,55 руб., фактически поставлен 29.04.2019 (что подтверждается  товарной накладной № 56), срок поставки нарушен на 40 дней, размер пени составил 285  509,50 руб.  

Общий размер пени за нарушение срока поставки товара по договора № ВТК-00633  составил 1 001 416,50 руб., был указаны в претензии № 2982/09 от 02.12.2019, направленной в  адрес ООО «ТехноРесурс» (что подтверждается уведомление о вручении). Истцом  требования по претензии удовлетворены не были.  

Договором № ВТК-00611 и спецификацией № 1 от 14.02.2019 к нему установлена  обязанность истца поставить 18 позиций товара общей стоимостью 21 924 864 руб. в срок не  позднее 30 календарных дней с момента подписания спецификации № 1 сторонами, то есть не  позднее 16.03.2019. В указанный срок товар поставлен не был. Применяя предусмотренную  пунктом 8.2. договора № ВТК-0011 ответственность в виде пени в размере 0,1 процента от  стоимости непоставленного в срок товара за каждый день просрочки (но не более 10  процентов) ООО «ВТК» потребовало уплаты пени:  

позиция 1 в спецификации № 1 к договору № ВТК-00611 - Вагон-дом душевая на раме,  1 шт. стоимостью 1 058 280,00 руб., фактически поставлен 01.07.2019 (что подтверждается  товарной накладной № 69), срок поставки нарушен на 107 дней, размер пени составил  105 828,00 руб.;  

позиция 2 в спецификации № 1 к договору № ВТК-00611 - Вагон-дом жилой на 2  человека, 1 шт. стоимостью 871 080 руб., фактически поставлен 08.06.2019 (что  подтверждается товарной накладной № 60), срок поставки нарушен на 84 дня, размер пени  составил 73 170,72 руб.;  

позиция 3 в спецификации № 1 к договору № ВТК-00611 - Вагон-дом жилой на 4  человека, 2 шт. стоимостью 1 693 200 руб., фактически поставлен 08.06.2019 (что  подтверждается товарной накладной № 61), срок поставки нарушен на 84 дня, размер пени  составил 142 228,80 руб.;  

позиция 4 в спецификации № 1 к договору № ВТК-00611 - Вагон-дом жилой на 4  человека, 2 шт. стоимостью 1 711 680 руб., фактически поставлен 01.07.2019 (что  подтверждается товарными накладными №№ 65, 66), срок поставки нарушен на 107 дней,  размер пени составил 171 168 руб.;  

позиция 5 в спецификации № 1 к договору № ВТК-00611 - Вагон-дом Медпункт на  раме, 1 шт. стоимостью 880 404 руб., фактически поставлен 01.07.2019 (что подтверждается  товарной накладной № 67), срок поставки нарушен на 107 дней, размер пени составил  88 040,40 руб.;  

позиция 6 в спецификации № 1 к договору № ВТК-00611 - Вагон-дом офис, 1 шт.  стоимостью 822 000 руб., фактически поставлен 08.06.2019 (что подтверждается товарной  накладной № 60), срок поставки нарушен на 84 дня, размер пени составил 69 048 руб.;  

позиция 7 в спецификации № 1 к договору № ВТК-00611 - Вагон-дом Санузел на раме,  1 шт. стоимостью 935 640 руб., фактически поставлен 01.07.2019 (что подтверждается  товарной накладной № 67), срок поставки нарушен на 107 дней, размер пени составил  93 564,00 руб.;  

позиция 8 в спецификации № 1 к договору № ВТК-00611 - Здание мобильное на раме  Помещение для обогрева персонала 4000х2450х2650, 5 шт. стоимостью 2 187 600 руб.,  фактически поставлено 21.03.2019 (что подтверждается товарными накладными №№ 8, 9),  срок поставки нарушен на 5 дней, размер пени составил 10 938 руб.;  

позиция 9 в спецификации № 1 к договору № ВТК-00611 - Блок-бокс операторной 6х6  ТУ 3683-002-12705148-2013, 1 шт. стоимостью 1 291 440 руб., фактически поставлено  01.07.2019 (что подтверждается товарной накладной № 70), срок поставки нарушен на 107  дней, размер пени составил 129 144 руб.;  

позиция 10 в спецификации № 1 к договору № ВТК-00611 - Блок-бокс операторной 6х6  ТУ 3683-002-12705148-2013, 1 шт. стоимостью 1 282 200 руб., фактически поставлено  12.06.2019 (что подтверждается товарной накладной № 64), срок поставки нарушен на 88  дней, размер пени составил 112 833,60 руб.;  

позиция 11 в спецификации № 1 к договору № ВТК-00611 - Вагон-дом проходная  КПП, 1 шт. стоимостью 809 640 руб., фактически поставлено 12.06.2019 (что подтверждается  товарной накладной № 63), срок поставки нарушен на 88 дней, размер пени составил  71 248,32 руб.;  

позиция 12 в спецификации № 1 к договору № ВТК-00611 - Вагон-дом проходная  КПП, 1 шт. стоимостью 819 000 руб., фактически поставлено 01.07.2019 (что подтверждается  товарной накладной № 71), срок поставки нарушен на 107 дней, размер пени составил 81 900  руб.;  

позиция 13 в спецификации № 1 к договору № ВТК-00611 - Вагон-дом проходная  КПП, 1 шт. стоимостью 819 000 руб., фактически поставлено 01.07.2019 (что подтверждается  товарной накладной № 72), срок поставки нарушен на 107 дней, размер пени составил 81 900  руб.;  

позиция 14 в спецификации № 1 к договору № ВТК-00611 - Вагон-дом офис, 1 шт.  стоимостью 1 734 180 руб., фактически поставлено 01.07.2019 (что подтверждается товарной  накладной № 68), срок поставки нарушен на 107 дней, размер пени составил 173 418 руб.;  

позиция 15 в спецификации № 1 к договору № ВТК-00611 - Вагон-дом Склад для  хранения спецодежды, 2 шт. стоимостью 1 711 680 руб., фактически поставлено 01.07.2019  (что подтверждается товарными накладными №№ 65, 66), срок поставки нарушен на 107  дней, размер пени составил 171 168 руб.;  

позиция 16 в спецификации № 1 к договору № ВТК-00611 - Вагон-дом Склад для  хранения спецодежды, 1 шт. стоимостью 846 600 руб., фактически поставлено 12.06.2019  (что подтверждается товарной накладной № 63), срок поставки нарушен на 88 дней, размер  пени составил 74 500,80 руб.;  

позиция 17 в спецификации № 1 к договору № ВТК-00611 - Здание мобильное Цех  сварочный с помещением производственным и помещением бытовым 6000х2450х2700 на  раме ТУ 5363-001-39691983-2015, 1 шт. стоимостью 1 297 680 руб., фактически не  поставлено, срок поставки нарушен на момент претензии на 177 дней, размер пени составил  129 768 руб.;  

позиция 18 в спецификации № 1 к договору № ВТК-00611 - Здание мобильное Цех  слесарный 6000х2450х2700 на раме ТУ 5363-001-39691983-2015, 1 шт. стоимостью 1 153 560  руб., фактически не поставлено, срок поставки нарушен на момент претензии на 177 дней,  размер пени составил 115 356 руб.  

Общий размер пени за нарушение сроков поставки товара по договору № ВТК-00611  составил 1 895 222,64 руб., был указаны в претензии № 2980/09 от 02.12.2019, направленной в  адрес ООО «ТехноРесурс» (что подтверждается уведомление о вручении).  

Общая сумма предъявленных ООО «ВТК» 02.12.2019 претензионных требований об  уплате ООО «ТехноРесурс» пени в связи с нарушением установленных договорами № ВТК- 00588, № ВТК-00633 и № ВТК-00611 сроков поставки составила 5 495 039,14 руб.  

Расчет пени по каждому договору судом проверен и признан правильным Истцом  требования по претензии удовлетворены не были. Истцом об уменьшении неустойки в  

порядке ст. 333 ГК РФ не заявлено. Кроме того размер неустойки, 0,1 % является  общепринятым в деловом обороте и с учетом отсутствия исполнения обязанностей по  проведению монтажных работ соответствует последствиям исполнения обязательства.  

Довод истца о невозможности применения штрафных санкций за просрочку поставки  по договору № ВТК-00633 по причине заключения сторонами соглашения от 15.11.2022 о  расторжении договора несостоятелен, так как указанным соглашением стороны  урегулировали прекращение обязательств по договору отказом от их исполнения, но  соглашение не затрагивало обязательств, прекращенных исполнением, в том числе судьбы  санкций за просрочку.  

Доводы истца о фактической передаче оборудования ответчику ранее дат получения  товара указанных в товарных накладных судом не принимается поскольку истец правомерно  принял оборудование после устранения ответчиком недостатков данного оборудования, что  в частности подтверждается сведения изложенными в пояснения истца от 14.04.2023.  

Истец указывает на невозможность зачета предъявленных ответчиком истцу  штрафных санкций, поскольку истец признан банкротом, требование ответчика к истцу об  уплате пени не относится к текущим. Довод истца относительно невозможности зачета в  данном случае суд отклоняет. По смыслу сформировавшейся правоприменительной  правовой позиции сальдирование может иметь место после возбуждения процедуры  несостоятельности (банкротства) должника, в рамках нескольких взаимосвязанных  договоров и при прекращении договорных отношений полностью или в части (определения  Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2021 № 305-ЭС19-17221 и от 29.01.2018 №  304-ЭС17-14946). Сальдирование имеет место тогда, когда в рамках одного договора (либо  нескольких взаимосвязанных договоров) определяется завершающая обязанность сторон при  прекращении договорных отношений полностью (либо их отдельного этапа). Сопоставление  обязанностей сторон из одних отношений и осуществление арифметических (расчетных)  операций с целью определения лица, на которого возлагается завершающее исполнение (с  суммой такого исполнения), не может быть квалифицировано как зачет и не подлежит  оспариванию как отдельная сделка по правилам статьи 61.3 Закона о банкротстве, так как в  данном случае отсутствует такой квалифицирующий признак, как получение заказчиком  какого-либо предпочтения - причитающуюся поставщику итоговую денежную сумму  уменьшает он сам своим ненадлежащим исполнением основного обязательства, а не  покупатель, констатировавший расчетную операцию сальдирования (определение Судебной  коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 08.04.2021   № 308-ЭС19-24043). Соответственно в подобной ситуации не возникают встречные  обязанности, а формируется лишь единственная завершающая обязанность одной из сторон  договора.  

В отличие от классического зачета, урегулированного указанными статьями ГК РФ,  где юридический эффект связан именно с заявлением управомоченной стороны о зачете,  автоматическое прекращение обязательств (сальдирование) восходит к воле сторон,  выраженной при заключении договоров, требования по которым прекращаются при их  совпадении друг с другом.  

Кроме возможности сальдирования в рамках одного договора, также подобным  образом могут сопоставляться обязанности сторон, зафиксированные в разных договорах,  фактически являющихся элементами одного правоотношения, искусственно раздробленного  на несколько договорных связей для удобства сторон или по причине нормативных  предписаний в соответствующей сфере отношений (определения Верховного Суда  Российской Федерации от 28.10.2019 № 305-ЭС19-10064, от 15.10.2020 № 302-ЭС20-1275).  

Учитывая положения пункта 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от  29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского  кодекса Российской Федерации об исковой давности», а также принимая во внимание  добросовестность ответчика, обоснованного полагавшего до момента получения  информации от ФНКЦ РР (в рамках ознакомления с материалами дела 11.02.2023), что зачет  

требований истца по оплате задолженности по договору № ВТК-00588 и своих требований об  уплате истцом пени за нарушение сроков поставки состоялся 08.12.2020, суд считает что  срок исковой давности по требованиям ООО «ВТК» не пропущен, поскольку ответчик  действуя добросовестно узнал о том, что надлежащим лицом которому можно заявить о  сальдировании является ответчик, а не ООО «КазТрейд», только после получения в рамках  настоящего дела сведений о состоянии здоровья ФИО2  

Таким образом, в качестве даты следует принимать волеизъявление стороны о  предъявлении требования к сальдированию, совершенное ответчиком 13.03.2023 в отзыве на  исковое заявление в пределах срока исковой давности.  

В результате сопоставления обязанности ответчика по оплате зарезервированной  части стоимости поставленного оборудования в сумме 4 640 000 руб. с обязанностью истца  по оплате пени за нарушением сроков поставки товаров в сумме 5 495 039,14 руб.  обязательство ответчика является прекращенным по результатам произведенного  сальдирования, исковые требования ООО «ТехноРесурс» являются необоснованными.  

В свою очередь, указание истцом в своем пояснении по делу от 13.03.2023 о  возможности применения пени вследствие нарушения ответчиком сроков оплаты  поставленного товара в сумме 18 560 000 руб., произведенное фактически 24.12.2019,  совершено за пределами определяемого в соответствии с пунктом 1 статьи 196 Гражданского  кодекса РФ срока исковой давности, о применении которого заявил ответчик на основании  статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ и пункта 2 статьи 199 Гражданского  кодекса РФ.  

Кроме того согласно расчету истца общий размер неустойки начисленной за  нарушение сроков оплаты ответчиком составляет 556800,00 руб., что не препядствует  сальдированию обязательств на сумму 4 640 000 руб. при начисленной неустойке в размере  5 495 039,14 руб.  

В связи с сальдированием суммы основного долга, отсутствием шеф монтажных  работы, требование истца о взыскании пени является не обоснованным и также не подлежит  удовлетворению.  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-175 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать полностью. Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия 

(изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Томской области.  

 Судья Д.А. Гребенников 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 23.01.2023 4:50:00

Кому выдана Гребенников Дмитрий Александрович