Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-25973/2020  «29» апреля 2021 года  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Чуриковой Н.В. при  

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кисловой С.И., 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 110, 167 - 170, Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Обязать акционерное общество «Волгомост» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в течение 14 дней с момента вступления решения арбитражного суда  

Волгоградской области в силу исполнить гарантийные обязательства по  

государственному контракту на выполнение работ по строительству объекта:  

«Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового  

перехода через реку Волга в городе Волгограде. Второй пусковой комплекс» от  

03.07.2009 № 215-09 на а именно: 1. Левобережный подход ПК-1-15,32 - ПК 10+22: 

1) Устранить продольные и поперечные трещины в асфальтобетонном  

покрытии -НЗОп.м.; 

2) Восстановить горизонтальную разметку от поверхности покрытия на  

локальных участках - 15 м2. 2. Автомобильная дорога "Волжский - Ленинск": 

1) Устранить продольные и поперечные трещины в асфальтобетонном  

покрытии - 350 п.м.; 

2) Устранить сколы на лицевой поверхности бортового камня БР 100.30.18-63  

п.м.; 

3) Устранить отслаивание горизонтальной разметки от поверхности покрытия  

на локальных участках - 20 м2; 4) Устранить просадку дорожной одежды на тротуаре ПК6+70-1 м2. 3. Съезд № 1 транспортной развязки на ПК11+00: 

1) Устранить продольные и поперечные трещины в асфальтобетонном  

покрытии общей протяженностью - 3100 п.м. 

2) Устранить сколы на лицевой поверхности бортового камня БР100.30.18-  

26 п.м.; 

3) Устранить отслаивание горизонтальной разметки на локальных участках40 м2.  4. Съезд № 2 транспортной развязки на ПК11+00:  

1) Устранить сколы на лицевой поверхности бортового камня БР100.30.18-2  

п.м.; 

2) Устранить разрушение верхнего слоя покрытия в результате потери зерен  

минерального материала в месте установки дождеприемного колодца - 1шт. 5. Съезд № 3 транспортной развязки на ПК11+00: 

1) Устранить сколы на лицевой поверхности бортового камня БР100.30.18-4  

п.м. 6. Съезд № 4 транспортной развязки на ПК 11+00: 

1) Устранить разрушение верхнего слоя покрытия в результате потери зерен  

минерального материала в местах обора проб из покрытия в количестве Зшт.; 

2) Устранить сколы на лицевой поверхности бортового камня БР100.30.18-16  

п.м. 7. Съезд № 5 транспортной развязки на ПК11+00: 

1) Устранить сколы на лицевой поверхности бортового камня БР100.30.18-12  

п.м.; 

2) Устранить разрушение верхнего слоя покрытия в результате потери зерен  

отдельных зерен минерального материала в местах обора проб из покрытия в  

количестве 2 шт.; 

3) Устранить разрушение верхнего слоя покрытия в результате  

механического воздействия - 3 м2. 8. Съезд № 6 транспортной развязки на ПК11+00: 1) Устранить продольную трещину в асфальтобетонном покрытии – 100 п.м.; 

2) Устранить просадку асфальтобетонного покрытия вокруг  

дождеприемного колодца - 2,3 м2; 

3) Устранить отслаивание горизонтальной разметки на локальных участках-3  

м2. 9. Съезд № 7 транспортной развязки на ПК11+00: 

1) Устранить поперечную трещину в асфальтобетонном покрытии на ПКЗ+62 -  

65,2 п.м.; 

2) Устранить отслаивание горизонтальной разметки на локальных участках7м2.  10. Левобережный подход ПК11+34 - ГЖ21+22 :  

1) Устранить продольные трещины в асфальтобетонном покрытии,  

протяженностью - 1470 п.м.; 

2) Устранить разрушение верхнего слоя покрытия в результате потери зерен  

отдельных зерен минерального материала в местах обора проб из покрытия в  

количестве 4 шт.; 

3) Устранить отслаивание горизонтальной разметки на локальных участках14м2.  11. Левобережная эстакада  

1) Устранить шелушение лицевой поверхности цоколя под барьерное  

ограждение верхового пролётного строения 100%; 

2) Устранить скол карнизного блока в пролёте ОП4-ОП5 верховая сторона0,5 м2.  12. Левобережный подход ПК27+84 - ПК43+86:  

1) Устранить продольные и поперечные трещины в асфальтобетонном  

покрытии протяженностью 220 п.м. на левой полосе движения по ходу пикетажа и  

1350 п.м. на правой стороне движения по ходу пикетажа - 1570 п.м.; 

2) Устранить трещины в асфальтобетонном покрытии технической полосы  

в местах установки стоек барьерного ограждения - 100 %; 

3) Устранить отслаивание горизонтальной разметки на локальных участках - 

5м. 13. Мостовой переход через р. Ахтуба: 

1) Устранить трещины в покрытии из литой полимеробитумной  

асфальтобетонной смеси образующие замкнутый контур в 15 местах на площади 5 м2;  2) Устранить продольные трещины в асфальтобетонном покрытии - 4,5  

п.м.; 

3) Устранить разрушение асфальтобетонного покрытия в результате потери  

им отдельных зерен минерального материала - 1 м2; 

4) Устранить отслаивание горизонтальной разметки на локальных участках  

-15 м2. 14. Правобережный подход ПК58+22 - ПК65+00: 

1) Устранить продольные трещины в асфальтобетонном покрытии – 670  

п.м.; 

2) Устранить разрушение верхнего слоя покрытия в результате потери  

зерен отдельных зерен минерального материала в местах обора проб из покрытия - 3  

шт.; 

 3) Устранить отслаивание горизонтальной разметки на локальных участках - 20  

м2. 

15. Съезд № 2 транспортной развязки на ПК55+00:  

1) Устранить продольные трещины в асфальтобетонном покрытии455п.м.;  2) Устранить трещины в асфальтобетонном покрытии (тротуар) – 6 п.м.  

16. Съезд № 3 транспортной развязки на ПК55+00:  

1) Устранить сколы на лицевой поверхности бортового камня БР100.30.18- 5  

п.м. 

17. Съезд № 4 транспортной развязки на ПК55+00:  

1) Устранить трещины в асфальтобетонном покрытии (площадка ожидания) -  

40 п.м. 

18. Съезд № 6 транспортной развязки на ПК55+00:  1) Устранить трещины в асфальтобетонном покрытии - 70 п.м.  

19. Съезд № 7 транспортной развязки на ПК55+00:  

1) Устранить разрушение верхнего слоя покрытия в результате потери  

отдельных зерен минерального материала на площади - 27 м2; 

2) Устранить разрушение бетонной обоймы бортового камня БР100.20.8-47  

п.м. 

20. Правобережная эстакадная часть моста черз р. Ахтуба: Устранить  

шелушение лицевой поверхности цоколя под барьерное ограждение верховое  

пролётное строение 100%. 21. Шпунтовая подпорная стенка № 2: 

1) Устранить поверхностную коррозию металла лицевой поверхности  

шпунтового ряда 100%. 22. Левобережная эстакадная часть моста через р. Ахтуба: 

1) Устранить шелушение лицевой поверхности цоколя под барьерное  

ограждение верховое пролётное строение 100%; 

2) Устранить размыв конуса на опоре № 9-5 м3.  23. Путепровод на ПК 10+53:  

1) Устранить шелушение лицевой поверхности цоколя под барьерное  

ограждение верховое пролётное строение 100%; 

2) Устранить в пролёте ОП1-ОП2 низовая сторона скол карнизного блока-0,5  

24. Водопропускная труба на ПК58: 1) Устранение шелушения площадки растекания на входном оголовке 100%. 25. Шумозащитные экраны: 

1) Устранить подмыв свайного фундамента в районе съезда № 4 левобережная  транспортная развязка объёмом 4 м3;  

2) Восстановить отсутствующие прижимные планки в районе  деформационного шва на оп. № 8 моста через р. Ахтуба - 3 шт.  

26. Высадить 133 сосны, 23 куста сирени, а также 12700 м2 газона  находящегося в неудовлетворительном состоянии, характеризующимся полным  усыханием.  

27. Восстановить систему полива расположенную в зеленой зоне  транспортной развязки на ПК 11+00.  

Взыскать с акционерного общества «Волгомост» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской  области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы связанные с проведением по  делу судебной экспертизы в размере 96 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской  области.  

Судья Н.В. Чурикова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебногодепартамента

Дата 09.10.2020 7:02:52Кому выдана Чурикова Наталья Владимировна