Арбитражный суд Волгоградской области  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

город Волгоград 

«06» апреля 2023 года Дело № А12-32822/2022  

Резолютивная часть решения объявлена 03 апреля 2023 года Полный текст решения изготовлен 06 апреля 2023 года 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Васюковой Е.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козленковой В.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению комитета по  строительству и жилищно – коммунальному хозяйству администрации  Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 404143, 

<

...>, кабинет 1.1) к обществу с ограниченной ответственностью  «Светосервис - Волгоград» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, юридический адрес:  400107, 

<

...>/11) о взыскании  неустойки,  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 01.01.2023 № 2, от ответчика – ФИО2, представитель по доверенности от 20.07.2022 № 14021 , 

УСТАНОВИЛ:

комитет по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству администрации  Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области (далее – истец,  комитет) обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к  обществу с ограниченной ответственностью «Светосервис-Волгоград» (далее – ответчик)  

о взыскании неустойки по муниципальному контракту от 27.05.2022 № 7/22 на  выполнение работ по восстановлению освещения улично-дорожной сети населенных  пунктов Волгоградской области в 2022 году в размере 53 201 руб. 23 коп.  

Требования истца мотивированны тем, что ответчиком был нарушен срок  предоставления сведений о привлечении к исполнению контракта субъектов малого  предпринимательства, в связи с чем произведено начисление неустойки.  

Ответчиком представлен отзыв на исковое заявление с возражениями относительно  заявленных требований. Ответчик указывает, что отсутствуют основания для взыскания  штрафа, поскольку по неденежным обязательствам не может быть начислена неустойка,  кроме того, постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 введен мораторий на  начисление финансовых санкций.  

Изучив представленные документы, оценив доводы сторон, суд считает требования  заявителя не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, между комитетом по строительству и жилищно –  коммунальному хозяйству администрации Среднеахтубинского муниципального района  Волгоградской области (заказчик) и ООО «Светосервис - Волгоград» (Подрядчик)  

заключен муниципальный контракт от 27.05.2022 № 7/22 на выполнение работ по  восстановлению освещения улично-дорожной сети населенных пунктов Волгоградской  области в 2022 году.  

Согласно условиям п. 1.1 контракта Подрядчик обязуется своевременно на  условиях настоящего Контракта выполнить работы по восстановлению освещения  улично-дорожной сети населенных пунктов Волгоградской области в 2022 году (далее -  работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ  и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Контракта.  

Цена контракта составила 6 435 823 руб. 95 коп. (п. 2.1 контракта). 

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 4.1 контракта, в соответствии с  которым, работы, предусмотренные контрактом, выполняются с даты заключения  контракта по 12.09.2022.  

Во исполнение п. 3.4.13 контракта подрядчик обязан привлечь к исполнению  контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства (далее -  СМП) (субподрядчики, соисполнители), социально ориентированных некоммерческих  организаций в объеме 25% от цены контракта.  

По условиям п. 3.4.14 контракта, подрядчик в срок не более 5 рабочих дней со дня  заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:  декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к СМП, копию  заключенного договора.  

В связи с нарушением Подрядчиком срока предоставлении документации о  привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа СМП Заказчиком  произведено начисление неустойки за период с 27.05.2022 по 14.10.2022 в общем размере  53 201 руб. 23 коп.  

Заказчиком в адрес Подрядчика было направлено требование (претензия) от  18.10.2022 № 1852 об оплате неустойки.  

Неисполнение требования об оплате неустойки послужило основанием для  обращения в суд с настоящим иском.  

Порядок судебной защиты нарушенных либо оспариваемых прав и законных  интересов осуществляется в соответствии со статьями 11, 12 Гражданского кодекса  Российской Федерации (далее – ГК РФ) и статьей 4 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).  

В силу пункта 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из  оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий  граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими  актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают  гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и  обязанности возникают из неосновательного обогащения.  

Статья 307 ГК РФ предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник)  обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то:  передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную  деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а  кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.  

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,  иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с  обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за  исключением случаев, предусмотренных законом.  

Согласно статье 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении  договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда  

содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми  актами (пункты 1, 4 статьи 422 ГК РФ).  

Из анализа условий контракта и фактических правоотношений сторон следует, что  они соответствуют обязательствам подряда и подлежат регулированию нормами главы 37  ГК РФ с учетом норм Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию  другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а  заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (часть 1 статьи 702 ГК РФ).  

Согласно пункту 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному  контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных  нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со  строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного  характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а  государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и  оплатить их или обеспечить их оплату.  

По пункту 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые  предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять  выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора,  ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об  этом подрядчику.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются  начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в  договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы  (промежуточные сроки).  

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не  предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального  и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  

Как следует из материалов дела, между сторонами заключен контракт от 27.05.2022   № 7/22 на выполнение работ по восстановлению освещения улично-дорожной сети  населенных пунктов Волгоградской области в 2022 году.  

Во исполнение п. 3.4.13 контракта подрядчик обязан привлечь к исполнению  контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства (далее -  СМП) (субподрядчики, соисполнители), социально ориентированных некоммерческих  организаций в объеме 25% от цены контракта.  

По условиям п. 3.4.14 контракта, подрядчик в срок не более 5 рабочих дней со дня  заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:  декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к СМП, копию  заключенного договора.  

Согласно условиям п. 3.4.16 контракта, в течение 10 рабочих дней со дня оплаты  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с  субподрядчике соисполнителем подрядчик должен представлять заказчику следующие  документы: копии документов поставленного товара, выполненной работы, оказанной  услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;  копии платежных поручений.  

Согласно условиям п. 3.4.18. контракта Подрядчик несет гражданско-правовую  ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение  условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том  числе: за представление документов, указанных в пунктах 3.4.14. - 3.4.16. настоящего  раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или  

представление таких документов с нарушением установленных сроков; за непривлечение  субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.  

Комитетом было выставлено требование (претензия) от 12.09.2022 № 1626 об плате  штрафа за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков  из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных  некоммерческих организаций на сумму 77 813 руб. 79 коп.  

В ответ на требование ООО «Светосервис - Волгоград» письмом от 20.09.2022   № 10/840 направило в адрес Комитета копии договоров субподряда из числа субъектов  малого предпринимательства, счета-фактуры и платежные поручения: договор поставки  от 24.05.2022 № 35/22, заключенный с ООО Торговый Дом Стройхималъянс»; договор  поставки от 04.05.2022 № 03-СС-2022, заключенный с ООО «Компания Светстрой»;  договор поставки от 07.06.2022 № 250/0622, заключенный с ООО «НПО «Завод Резерв».  

Письмом от 10.10.2022 № 1809 Заказчик сообщил Подрядчику о необходимости  представить документацию во исполнение п. 3.4.13 контракта, поскольку из  представленных ранее документов невозможно определить, какие именно товары и на  какую сумму закупались в рамках представленных договоров.  

Письмом от 14.10.2022 № 10/954 ООО «Светосервис - Волгоград» направило в  адрес Комитета документы о приобретении материалов у субъектов малого  предпринимательства ООО «Торговый Дом Стройхимальянс», ООО «Компания  Светстрой», ООО «НПО «Завод Резерв» для выполнения работ по контракту от 27.05.2022   № 7/22.  

В связи с нарушением Подрядчиком срока предоставлении документации о  привлечении к исполнению контракта субподрядчиков Заказчиком произведено  начисление неустойки за период с 27.05.2022 по 14.10.2022 в общем размере 53 201 руб.  23 коп.  

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством,  банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или  договором.  

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пенями) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить  кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения.  

В силу статей 330 - 332 ГК РФ взыскание неустойки как способа защиты  применяется тогда, когда такая возможность предусмотрена законом (законная неустойка)  либо договором (договорная неустойка).  

В соответствии с пунктами 6, 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки  исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе  гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет  поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со  дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения  обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на  дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены  контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму,  пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом  (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных  поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если  законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.  

Аналогичные условия согласованы в п.п. 7.9 – 7.10 контракта. 

В соответствии с пунктом 42.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ начисленные  поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек  (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и  2020, 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в  случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783  утверждены Правила о списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю),  но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением  или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом (далее -  Правила № 783).  

Пунктом 2 Правил № 783 предусмотрено, что списание начисленных и  неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам,  обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по  которым:  

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке  исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы,  услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами;  

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с  возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств,  повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой  коронавирусной инфекции;  

в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с  существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем  невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем);  

г) обязательства не были исполнены в полном объеме по причине возникновения  при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих  невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с мобилизацией в  Российской Федерации, введением политических или экономических санкций  иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении  Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических  лиц (далее - санкции), и (или) с введением иностранными государствами,  государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными  (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных  объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (далее - меры  ограничительного характера).  

Согласно подпункту «а» пункта 3 Правил № 783 списание начисленных и  неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком, если общая  сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5  процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных  сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных подпунктами  «в» - «д» настоящего пункта.  

Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в  соответствии с пунктом 3 данных правил распространяется на принятую к учету  задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее  возникновения и осуществляется заказчиком на основании решения о списании  начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), указанного в пункте 9  этих же правил, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения (пункт 11  Правил № 783).  

Основанием для принятия решения о списании неустойки в случае, приведенном  выше, является исполнение поставщиком обязательств (за исключением гарантийных  обязательств) по контракту в полном объеме, подтвержденное актом приемки или иным  документом (подпункт «а» пункта 5 Правил № 783).  

При этом положения части 42.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ носит императивный  характер (т.е. обязательной к исполнению), прямо предписывая действия заказчика при  определенных обстоятельствах  

По смыслу приведенных положений, списание начисленных и неуплаченных сумм  неустоек в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных  контрактом, при соблюдении указанных в них условий являются именно обязанностью  государственного (муниципального) заказчика, а не правом.  

При этом несовершение заказчиком действий по учету возникшей задолженности,  а равно наличие спора относительно начисленной неустойки не может трактоваться как  условие, препятствующее списанию неустойки, поскольку подобные антикризисные меры  были установлены специально для защиты поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  государственных (муниципальных) контрактов.  

При рассмотрении иска заказчика о взыскании штрафных санкций по  государственному контракту суд вправе самостоятельно устанавливать наличие  оснований для применения мер государственной поддержки.  

Данный правовой подход изложен в пункте 40 Обзора судебной практики  применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  утвержденного Президиумом ВС РФ 28.06.2017, и неоднократно отражался в  определениях Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, в том числе в  Определениях от 14.08.2018 № 305-ЭС18-5712, от 30.10.2018 № 305-ЭС18-10724, от  18.07.2019 № 305-ЭС19-5287).  

При этом материалами дела подтверждается и сторонами не оспаривается, что  обязательства, предусмотренные контрактом, исполнены подрядчиком в полном объеме и  что размер неустойки не превышает 5% от цены контракта.  

В соответствии с пунктом 11 Правил № 783 списание неустоек распространяется на  принятую к учету задолженность поставщика независимо от срока ее возникновения.  

При таких обстоятельствах, начисленная истцом неустойка подлежит списанию.  

С учетом изложенного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для  удовлетворения требования истца о взыскании неустойки.  

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные  лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны.  

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований комитета по строительству и жилищно –  коммунальному хозяйству администрации Среднеахтубинского муниципального района  Волгоградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отказать.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья Е.С. Васюкова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 09.02.2023 9:52:00Кому выдана Васюкова Елена Сергеевна