АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А66-17959/2024

г.Тверь

10 марта 2025 года

(резолютивная часть решения от 27 февраля 2025 года)

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Борцовой Н.А., при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Ужко А.В., с участием представителей истца – ФИО1, ответчика – ФИО2, рассмотрев в судебном заседании дело по иску федерального казенного учреждения "Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина "Москва - Санкт-Петербург" Федерального дорожного агентства", г. Великий Новгород, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ответчику обществу с ограниченной ответственностью "Скайвей", г. Тверь, (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 

с участием третьего лица: государственного казенного учреждения Тверской области "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области", г. Тверь, 

об обязании устранить гарантийные дефекты,

УСТАНОВИЛ:

Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина "Москва - Санкт-Петербург" Федерального дорожного агентства", г. Великий Новгород, (далее - истец, Управление) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Скайвей", г. Тверь, (далее - ответчик, Общество) об обязании Общества не позднее 30 апреля 2025 года устранить дефекты конструктивных элементов автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-132 "Золотое кольцо" Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - ФИО3 - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль:

1. На участке км 1167+223 - км 1172+617:

- многочисленные раскрытые необработанные продольные и поперечные трещины;

- раскрытый осевой шов;

- повреждения (выбоины) на участке полосы движения;

2. На участке км 1176+920 - км 1179+643:

- многочисленные раскрытые необработанные продольные и поперечные трещины;

- не обработаны эмульсией места отбора проб;

- коллейность на участке полосы отвода движения км 1178+755 - км 1178+969 (слева);

- повреждения (выбоины) на участке полосы движения;

3. На участке км 1197+032 - км 1198+545:

- многочисленные раскрытые необработанные продольные и поперечные трещины;

- коллейность на участке полосы отвода движения км 1198+545 - км 1197+787 (слева);

4. На участке км 1222+963 - км 1230+448:

- многочисленные раскрытые необработанные продольные и поперечные трещины;

- раскрытый осевой шов;

- повреждение (выбоины) на участке полосы движения.

Третьим лицом при подаче иска Управление указало государственное казенное учреждение Тверской области "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области", г. Тверь (далее - третье лицо, Дирекция).

Рассмотрение  дела в судебном заседании назначено на 27 февраля 2025 года.

Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном сайте арбитражных судов в общедоступной автоматизированной системе «Картотека арбитражных дел» в сети «Интернет» (http://kad.arbitr.ru). 

К дате судебного заседания  от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому истец просит обязать общество с ограниченной ответственностью "ТДК 97", г. Тверь, (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в срок до 30 апреля 2025 года, выполнить гарантийные обязательства, предусмотренные государственным контрактом №10/2020-ИС от 20 апреля 2020 года, а именно: устранить дефекты конструктивных элементов автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь - Хрустальный - Рязань - ФИО3 - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль:

 1. на участке км 1167+223-км 1172+617:

- раскрытые продольные и поперечные трещины путем обработки битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;

- раскрытый осевой шов путем обработки битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;

- повреждения (выбоины) на участке полосы движения заделать горячим асфальтобетоном;

2. на участке км 1176+920 - км 1179+643:

- раскрытые продольные и поперечные трещины путем обработки битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;

- не обработанные места отбора контрольных проб обработать битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;

- колейность на участке полосы отвода движения км 1178+755 - км 1178+969 (слева) путем фрезерования и укладки верхнего слоя покрытия;

- повреждения (выбоины) на участке полосы движения заделать горячим асфальтобетоном;

3. на участке км 1197+032 - км 1198+545:

- раскрытые продольные и поперечные трещины путем обработки битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;

- колейность на участке полосы отвода движения км 1198+545 - км 1197+787 (слева) путем фрезерования и укладки верхнего слоя покрытия;

4. на участке км 1222+963 - км 1230+448 ФАД Р-132 «Золотое кольцо»:

- раскрытые продольные и поперечные трещины путем обработки битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;

- раскрытый осевой шов путем обработки битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;

- повреждения (выбоины) на участке полосы движения заделать горячим асфальтобетоном.

Ходатайство судом удовлетворено. Результаты рассмотрения ходатайства изложены в протоколе судебного заседания.

Ответчик письменный отзыв не представил, наличие гарантийных обязательств подтвердил, однако полагает, что Управление не является стороной государственного контракта №10/2020НС от 20 апреля 2020 года, поэтому не вправе требовать устранения дефектов.

Из материалов дела следует, что между государственным казенным учреждением Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Скайвей» (Подрядчик) 20 апреля 2020 года подписан государственный контракт №10/2020-ИС на выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тверь - Ржев на участках км 8+526 - км 16+000, км 40+400 -км 42+000, км 59+300 – км 62+000, км 66+300 км 72+000 в Калининском и Старицком районах Тверской области  (далее Контракт), по условиям которого  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить весь комплекс ремонтных работ на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тверь - Ржев на участках км 8+526 - км 16+000, км 40+400 - км 42+000, км 59+300 км 62+000, км 66+300 - км 72+000 в Калининском и Старицком районах Тверской области (далее Объект) в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №5 к Контракту) и в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту). 

Согласно пункту 1.2 Контракта Заказчик обязуется обеспечить финансирование выполненных работ в размере и формах, предусмотренных Контрактом, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 13.02.2020 № 56-пп «О Государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы»), код бюджетной классификации расходов Российской Федерации 104.0409.5810310020.244. 

Цена Контракта составляет 110 140 468-31 рублей, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 110 140 468-31 рублей, в том числе налог на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Порядок приемки работ определен пунктом 2.9 Контракта.

По условиям Контракта приемке подлежат все работы, товары (материалы), являющиеся Предметом оплаты по Контракту в соответствии с конкретными показателями и товарными знаками товаров (материалов), поставляемых для выполнения работ (Приложение №2 к Контракту) и Ведомостью объемов и стоимости работ, поставляемых товаров (материалов) (Приложение № 1 к Техническому заданию), а также скрытые работы и ответственные конструкции, в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. №827 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ 21 октября 2011 г.) с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 859 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 12 декабря 2011 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. № 159 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 18 сентября 2012 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. № 135 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 13 октября 2015 г.), СП. 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91», СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» (утв. Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 № НА-18/266). Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ.

Подрядчик письменно, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, и представляет необходимую отчетную документацию: акты освидетельствования скрытых работ; акты освидетельствования ответственных конструкций; акты лабораторных испытаний; -акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); накопительную ведомость выполненных работ; общий и специальный журналы работ; реестр исполнительной документации за отчетный период,  счет счет-фактуру.

Вся исполнительная документация предоставляется на бумажном (оригиналы количестве 2-х экземпляров), а также на электронном носителе в формате .pdf. К каждой приемке работ Подрядчик представляет фотоматериалы по выполненным за отчетный период работам, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов, в то числе актов на скрытые работы, в количестве, не менее 2-х фотографий на каждый вид работ в соответствии с п. 2.3.2 Контракта. 

Заказчик и Подрядчик производят ежемесячную приемку-сдачу выполненных работ в отчетном периоде. Подрядчиком оформляются Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

В соответствии с разделом 3 Контракта  началом работ является дата заключения Контракта; окончание работ - 05 мая 2020 года.

Согласно пункту 7.1 Контракта после окончания работ Подрядчик передает Заказчику Гарантийный паспорт по форме Приложения 1 к Распоряжению Минтранса России от 07.05.2003 № ИС-414-р, которым предусмотрены гарантийные сроки по соответствующим конструктивным элементам согласно Техническому заданию.

Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта. 

Продолжительность проведения работ по устранению выявленных разрушений и дефектов не засчитывается в гарантийный срок. 

Пунктом 7.3 Контракта стороны согласовали, что в случае, если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом. 

При обнаружении признаков разрушений, дефектов Заказчик письменно извещает Подрядчика об их характере, местоположении, объеме и указывает срок, в течение которого Подрядчик обязан произвести освидетельствование выявленных недостатков и внести свои предложения по срокам выполнения и составу работ по их ликвидации. 

Для участия в составлении акта освидетельствования, фиксирующего недостатки, согласования состава работ, порядка и сроков устранения недостатков, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. В случае неявки Подрядчика срок, состав и порядок работ по устранению выявленных недостатков устанавливаются Заказчиком в одностороннем порядке и являются обязательными для исполнения Подрядчиком. Заказчик вправе привлекать специалистов иных организаций для участия в составлении акта освидетельствования. 

Подрядчик должен в срок, указанный в извещении Заказчика, в письменном виде, внести на рассмотрение Заказчика свои предложения, и немедленно, по получении согласования своих предложений, приступить к выполнению работ. При наличии разногласий между Сторонами о сроке, составе и порядке работ по устранению выявленных недостатков, Подрядчик обязан руководствоваться указаниями Заказчика. После полного устранения недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Стороны составляют акт об устранении недостатков.

Пунктом 18.1.1 предусмотрено, что Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 06 июня 2020 года, в части гарантийных обязательств - до их полного исполнения. 

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика (пункт 18.1.2.).

Работы по Контракту выполнены Обществом, приняты Заказчиком, Объект принят в эксплуатацию  межведомственной приемочной комиссией.

Обществу выдан гарантийный паспорт на законченный ремонтом Объект «Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тверь - Ржев на участках км 8+526 - км 16+000, км 40+400 -км 42+000, км 59+300 – км 62+000, км 66+300 км 72+000 в Калининском и Старицком районах Тверской области».

На основании распоряжения №190-р от 24 июля 2020 года Территориального управления  Федерального агентства по управлению государственным имуществом  в Тверской области автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль -Кострома - Иваново - Владимир -Гусь - Хрустальный- Рязань - ФИО3 - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль (далее -- ФАД Р-132 «Золотое кольцо»), в том числе участок км 1165+846 - км 1230+448 (предыдущие наименование автомобильная дорога «Тверь-Ржев» км 73+533 - км 8+450) передана в собственность Российской Федерации из государственной собственности Тверской области. 

Письмом от 04 июля 2024 года  № 18/02-4163 Управление уведомило Общество (на официальную электронную почту) о необходимости 09 июля 2024 года принять участие в комиссии по освидетельствованию гарантийного участка Объекта по государственному контракту № 10/2020-ИС.

В связи с неявкой 09 июля 2024 года представителей Общества, освидетельствование гарантийного участка Объекта произведено Управлением  с участием представителей государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области».

Управлением составлен акт от 09 июля 2024 года освидетельствования участков км 1167+223 - км 1172+617, км 1176+920 - км 1179+643, км 1197+032 - км 1198+545, км 1222+963 - км 1230+448 ФАД Р-132 «Золотое кольцо», в соответствии с которым выявлены следующие дефекты:

1. На участке км 1167+223 - км 1172+617 ФАД Р-132 «Золотое кольцо»:  многочисленные раскрытые необработанные продольные и поперечные трещины;  раскрытый осевой шов; - повреждения (выбоины) на участке полосы движения; 

2. На участке км 1176+920 - км 1179+643 ФАД Р-132 «Золотое кольцо»: многочисленные раскрытые необработанные продольные и поперечные трещины; не обработаны эмульсией места отбора проб,  коллейность на участке полосы отвода движения км 1178+755 - км 1178+969 (слева);повреждения (выбоины) на участке полосы движения;

 3. На участке км 1197+032 - км 1198+545 ФАД Р-132 «Золотое кольцо»:  многочисленные раскрытые необработанные продольные и поперечные трещины; коллейность на участке полосы отвода движения км 1198+545 - км 1197+787 (слева);

4. На участке км 1222+963 - км 1230+448 ФАД Р-132 «Золотое кольцо»:  многочисленные раскрытые необработанные продольные и поперечные трещины;  раскрытый осевой шов; повреждение (выбоины) на участке полосы движения. 

Управлением Подрядчику установлен срок для устранения указанных дефектов - до 10 августа 2024 года. 

Письмом от 12 июля 2024 года №18/02-4344 акт освидетельствования направлен Обществу (на официальную электронную почту). 

Письмом от 08 октября 2024 года №18/02-6303 Управление  уведомило Общество (на официальную электронную почту) о необходимости 15 октября 2024 года принять повторное участие в комиссии по освидетельствованию гарантийного участка Объекта по государственному контракту №10/2020-ИС.

В связи с неявкой 15 октября 2024 года представителей Общества,  освидетельствование гарантийного участка Объекта произведено с участием представителей общества с ограниченной ответственностью «ЕТС». 

По результатам освидетельствования составлен акт, согласно которому по состоянию на 15 октября 2024 года Подрядчиком  не выполнены работы по устранению дефектов в соответствии с актом освидетельствования от 09 июля 2024 года.

 Ссылаясь на то, что в соответствии со статьями 382, 385, 387 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 6 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» произошла перемена лица на стороне государственного заказчика по государственному контракту № 10/2020-ИС, Подрядчиком выявленные недостатки выполненных работ в рамках Контракта устранены не были,  истец  обратилось в суд с настоящим иском.

Проанализировав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

 В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

 Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Указанная норма закона содержит перечень юридических фактов, с которыми связано возникновение гражданских прав и обязанностей, как по воле субъекта  гражданского права, так и помимо его воли. В частности, одним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей  является договор.

Право требования истца основано на ненадлежащем исполнении  ответчиком государственного контракта №10/2020-ИС от 20 апреля 2020 года на выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тверь - Ржев на участках км 8+526 - км 16+000, км 40+400 -км 42+000, км 59+300 – км 62+000, км 66+300 км 72+000 в Калининском и Старицком районах Тверской области, который  по своей правовой природе является договором подряда, отношения по которому регулируются нормами  главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации параграфами 1, 5,  а также Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Согласно пункту 2 статьи 763 Гражданского еодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям - обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В силу статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации  подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможности эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Статьей 722 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы. 

При этом презюмируется, что при обычной  надлежащей эксплуатации предмета, явившегося результатом работ, недостаток, появившийся в течение гарантийного срока, возникает в связи с ненадлежащем исполнением подрядчиком  своих обязательств.

Согласно пункту 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Пунктом 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Согласно гарантийному паспорту на законченный ремонтом объект  «Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тверь - Ржев на участках км 8+526 - км 16+000, км 40+400 -км 42+000, км 59+300 – км 62+000, км 66+300 км 72+000 в Калининском и Старицком районах Тверской области» гарантийный срок  на верхний слой покрытия составляет 5 лет.

Общество принимает на себя обязательства  устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

Как следует из имеющихся в материалах дела документов, на основании распоряжения №190-р от 24 июля 2020 года Территориального управления  Федерального агентства по управлению государственным имуществом  в Тверской области автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль -Кострома - Иваново - Владимир -Гусь - Хрустальный- Рязань - ФИО3 - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль (далее - ФАД Р-132 «Золотое кольцо»), в том числе участок км 1165+846 - км 1230+448 (предыдущие наименование автомобильная дорога «Тверь-Ржев» км 73+533 - км 8+450) передана в собственность Российской Федерации из государственной собственности Тверской области. 

Распоряжением Территориального управления  Федерального агентства по управлению государственным имуществом  в Тверской области №216-р от 25 августа 2020 года  автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль -Кострома - Иваново - Владимир -Гусь - Хрустальный- Рязань - ФИО3 - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль (далее - ФАД Р-132 «Золотое кольцо»), в том числе участок км 1165+846 - км 1230+448 переданы в оперативное управление федеральному казенному учреждению "Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина "Москва - Санкт-Петербург" Федерального дорожного агентства", г. Великий Новгород.

 С переменой собственника имущества и лица, в чьем оперативном управлении находится это имущество, гарантийные обязательства Подрядчика по Контракту не прекращаются. В свою очередь полномочия государственного казенного учреждения Тверской области "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области", г. Тверь в отношении спорного объекта прекращены.

Следовательно, Управление является надлежащим истцом по делу. Возражения  Общества в этой части являются необоснованными.

Учитывает суд и то обстоятельство, что требование об устранении недостатков, возникших в течение гарантийных сроков, было направлено в адрес Подрядчика и государственным казенным учреждением Тверской области "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области", г. Тверь, однако недостатки устранены не были. 

Наличие заявленных истцом недостатков в выполненных ответчиком работах подтверждается представленными в материалах дела актами от 09 июля 2024 года освидетельствования участков км 1167+223 - км 1172+617, км 1176+920 - км 1179+643, км 1197+032 - км 1198+545, км 1222+963 - км 1230+448 ФАД Р-132 «Золотое кольцо», актом от 15 октября 2024 года  и не оспаривается ответчиком по делу. Недостатки обнаружены в пределах гарантийного срока.

В силу статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений. В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с пунктом 5 статьи 720  Гражданского кодекса Российской Федерации при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Вместе с тем, со стороны ответчика ходатайства о проведении по настоящему делу экспертизы не поступало.

Оценка доказательств производится по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Системный анализ имеющихся в деле документов в их совокупности, позволяют суду сделать вывод о том, что выявленные недостатки, являются дефектами, допущенными ответчиком при осуществлении выполнения работ в рамках спорного Контракта. Доказательств иного ответчиком суду не представлено.

В силу части 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

       С учетом вышеизложенного, заявленные исковые требования о  возложении на Общество обязанности выполнить гарантийные обязательства, предусмотренные государственным контрактом №10/2020-ИС от 20 апреля 2020 года, а именно: устранить дефекты конструктивных элементов автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь - Хрустальный - Рязань - ФИО3 - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич – Ярославль согласно перечню подлежат удовлетворению. 

В силу статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения. 

Суд, считает возможным согласиться с предложенным Управлением сроком устранения дефектов до 30 апреля 2025 года 

Исковые требования удовлетворяются в полном объеме.

Расходы по уплате государственной  по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации    относятся на Общество.

Руководствуясь статьями  167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "ТДК 97", г. Тверь, (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в срок до 30 апреля 2025 года, выполнить гарантийные обязательства, предусмотренные государственным контрактом №10/2020-ИС от 20 апреля 2020 года, а именно: устранить дефекты конструктивных элементов автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь - Хрустальный - Рязань - ФИО3 - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль:

 1. на участке км 1167+223-км 1172+617:

- раскрытые продольные и поперечные трещины путем обработки битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;

- раскрытый осевой шов путем обработки битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;

- повреждения (выбоины) на участке полосы движения заделать горячим асфальтобетоном;

2. на участке км 1176+920 - км 1179+643:

- раскрытые продольные и поперечные трещины путем обработки битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;

- не обработанные места отбора контрольных проб обработать битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;

- колейность на участке полосы отвода движения км 1178+755 - км 1178+969 (слева) путем фрезерования и укладки верхнего слоя покрытия;

- повреждения (выбоины) на участке полосы движения заделать горячим асфальтобетоном;

3. на участке км 1197+032 - км 1198+545:

- раскрытые продольные и поперечные трещины путем обработки битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;

- колейность на участке полосы отвода движения км 1198+545 - км 1197+787 (слева) путем фрезерования и укладки верхнего слоя покрытия;

4. на участке км 1222+963 - км 1230+448 ФАД Р-132 «Золотое кольцо»:

- раскрытые продольные и поперечные трещины путем обработки битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;

- раскрытый осевой шов путем обработки битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;

- повреждения (выбоины) на участке полосы движения заделать горячим асфальтобетоном.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТДК 97", г. Тверь, (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 50 000  рублей государственной пошлины в установленном порядке.

Исполнительные листы выдать взыскателям в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после  вступления решения в законную силу.

       Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд город Вологда в течение месяца со дня его принятия.

Судья                                                                                                    Н.А. Борцова