Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-28785/19

24 мая 2019 года

г.Москва

Резолютивная часть решения объявлена 20 мая 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 24 мая 2019 года.

 Арбитражный суд Московской области в составе:  председательствующий судья А.О. Уваров ,при ведении протокола судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по  иску Комитета лесного хозяйства Московской области   (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 143407, 

<

...>)

к ООО "ЛЕСНЫЕ ПРОСТОРЫ" (ИНН 5032217848, ОГРН 1155032010770,адрес143033, Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-2,участок 1, 1а, ооо нтц "форум-нт":)

о взыскании неустойки в размере 1800000 за период с 17.09.2016 по 17.09.2017,

При участии в судебном заседании- согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

Комитет лесного хозяйства Московской области обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к   ООО "ЛЕСНЫЕ ПРОСТОРЫ" (далее – "Общество", "ответчик") о взыскании  1 800 000 рублей неустойки за нарушение ответчиком условий договора о сроках представления проекта освоения лесов в период с 17.09.2016г. по 17.06.2017 г. (12 месяцев).

    Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в части по следующим основаниям.

    Как следует из материалов дела, 10.03.2016 г. между Комитетом лесного хозяйства Московской области  (арендодатель) и ООО "ЛЕСНЫЕ ПРОСТОРЫ" (арендатор) заключен договор аренды лесного участка КН 50:20:0040648:2891, для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных водных объектов, сроком до 09.03.2065 г.

     16 марта 2016 года произведена государственная регистрация договора аренды.

      На дату заключения договора аренды   форма типового договора аренды лесного участка установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2015 N 1003, которая предусматривает включение в него условий, указанных в п. 11 настоящего договора, т.е. арендатор имеет право приступить к использованию лесного участка после заключения договора, подписания сторонами акта приема-передачи лесного участка, форма которого предусмотрена приложением N 6 к настоящему договору, получения положительного заключения (государственной или муниципальной) экспертизы проекта освоения лесов и подачи лесной декларации.

В соответствии с пп. "г" п. 11 договора арендатор обязан в течение 6 месяцев со дня его заключения (то есть до 17.09.2016 г.) разработать и представить арендодателю проект освоения лесов для проведения государственной экспертизы, а также не позднее чем за 6 месяцев до окончания срока действия проекта освоения лесов разработать и представить арендодателю проект освоения лесов на следующий срок для проведения государственной экспертизы.

В соответствии с пп. "б" п. 13 договора арендатор, за нарушение условий договора уплачивает арендодателю неустойку, в том числе, за нарушение срока разработки и представления арендодателю проекта освоения лесов для проведения государственной или муниципальной экспертизы, предусмотренного пп. "г" п. 11 договора или использование лесного участка без проекта освоения лесов - 50 000 руб. (для физического лица или индивидуального предпринимателя) или 150 000 руб. (для юридического лица) за каждый полный календарный месяц просрочки по истечении установленного срока.

В нарушение вышеуказанных условий договора Общество обратилось в Комитет с заявлением о проведении экспертизы проекта освоения лесов по использованию арендованного лесного участка 29.09.2016, т.е. по истечении 6-месячного срока.

На представленный проект экспертная комиссия 09.08.2017 г. выдала отрицательное заключение, которым срок представления проекта на повторную экспертизу определен не был.

В последствии Общество неоднократно представляло на утверждение Комитета проект освоения лесов.

27.10.2017 г, 29.11.2017 г., 08.08.2018 г., 22.02.2018 г., Комитет выдавал отрицательное заключение, которым срок представления проекта на повторную экспертизу определен не был.

Приказом Комитета от 13.09.2018 г. утверждено положительное заключение государственной экспертизы проекта освоения лесов, представленного ответчиком.

Поскольку Комитетом не были установлены  сроки представления проекта на повторную экспертизу, отсутствия соответствующих условий в договоре аренды, суд приходит к выводу, что нарушение сроков представления проекта освоения лесов носило однократный характер, срок нарушен ответчиком не более одного месяца. в связи с чем, неустойка подлежит начислению в размере 150 000 рублей.

 Довод Общества об отсутствии оснований для взыскания неустойки, поскольку  ответчик не пропущен полный календарный месяц для предоставления проекта освоения лесов, судом отклоняется, поскольку в нарушение договора арендатором в установленный договором шестимесячный срок не был разработан и представлен арендодателю проект освоения лесов.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ЛЕСНЫЕ ПРОСТОРЫ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Комитета лесного хозяйства Московской области   (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 150 000 рублей неустойки.

    В удовлетворении остальной части иска отказать.

   Взыскать с  ООО "ЛЕСНЫЕ ПРОСТОРЫ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 5 500 рублей государственной пошлины.

Судья                                                         А.О. Уваров