АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

Р Е Ш Е Н И Е

 Именем Российской Федерации

Дело № А40-194519/23-80-1551

г. Москва

08 ноября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 октября 2023 года Полный текст решения изготовлен 08 ноября 2023 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Председательствующего судьи Пронина А.П., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

истец ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСФЕРА"  (117312, 

<

...> № 8   № 9 № 11, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.01.2013, ИНН:  

<

***>)  

ответчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "РЕГИОНЖИЛСТРОЙ" (119121, 

<

...>, ПОМЕЩЕНИЕ I, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  23.05.2017, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 16 158 146 руб. 30 коп. в заседании приняли участие: от истца: ФИО2 по доверенности от 11.07.2022 г. от ответчика: ФИО3 по доверенности от 06.09.2023 г. 

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСФЕРА"  обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЖИЛСТРОЙ" о взыскании  задолженности в размере 15 477 557 руб. 80 коп. и процентов за пользование чужими  денежными средствами в размере 680 588 руб.  

Истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме. 

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, по доводам,  изложенным в отзыве на иск.  

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы сторон, исследовав и  оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые  требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, между ООО «РегионЖилСтрой»  (субподрядчик) заключен и действует договор подряда № 11/04-2022 от 11.04.2022 г. на  выполнение комплекса работ по устройству навесного вентилируемого фасада на  объекте: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по  адресу: г. Москва, район Солнцево, ул. Родниковая, влд.5А, корпус А-1» (далее –  договор).  

В соответствии с пунктом 4.1 договора, предварительная общая цена договора  составляет 123 826 489 руб. 09 коп.  

Дополнительным соглашением № 2 от 01.03.2023 г. к договору стороны  установили твердую цену подлежащих выполнению работ по договору в размере 121  887 504 руб. 19 коп. Приложением № 1 к указанному дополнительному соглашению  (Протокол изменения договорной цены) стороны определили общий объем и стоимость  подлежащих выполнению работ по договору.  

Кроме того, тем же дополнительным соглашением к договору (пункт 3  дополнительного соглашения № 2 от 14.03.2023 г.) стороны установили срок  выполнения работ по договору – до 31 марта 2023 года.  

Дополнительным соглашением № 1 от 04.10.2022 года к договору (в редакции  дополнительного соглашения № 1/1 от 01.03.2023 г.) стороны договорились о  выполнении субподрядчиком дополнительного объема работ по Договору на сумму 12  174 085 руб. 07 коп.  

Состав и стоимость дополнительных работ по договору определены протоколом  договорной цены на выполнение дополнительных работ (приложение № 1 к  дополнительному соглашению № 1/1 от 01.03.2023 г. к договору).  

Тем же дополнительным соглашением к договору стороны установили срок  выполнения дополнительных работ по договору – до 31 марта 2023 года (пункт 3  дополнительного соглашения).  

Все работы договору подряда были выполнены истцом надлежащим образом и  переданы ответчику, как заказчику работ.  

Все работы были сданы уполномоченным представителям ООО  «РегионЖилСтрой», между уполномоченными представителями были составлены и  подписаны исполнительные схемы о выполнении физических объемов работ по  договору, а также акты скрытых работ, работы приняты без замечаний.  Исполнительная документация по выполненным работам также была передана  подрядчиком уполномоченным представителям генподрядчика.  

В ходе выполнения работ генподрядчик и подрядчик составили и подписали  следующие акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о  стоимости выполненных работ по форме КС-3:  

- Акт КС-2 и Справка КС-3 № 1 от 25.05.2022 г. на сумму 38 558 342,42 рублей;  - Акт КС-2 и Справка КС-3 № 2 от 24.06.2022 г. на сумму 15 655 347,24 рублей;  - Акт КС-2 и Справка КС-3 № 3 от 25.07.2022 г. на сумму 23 972 039,40 рублей;  - Акт КС-2 и Справка КС-3 № 4 от 25.08.2022 г. на сумму 6 516 149,02 рублей;  

- Акт КС-2 и Справка КС-3 № 5 от 09.09.2022 г. на сумму 5 432 660,29 рублей;  - Акт КС-2 и Справка КС-3 № 6 от 26.09.2022 г. на сумму 4 649 435,22 рублей;  - Акт КС-2 и Справка КС-3 № 7 от 10.10.2022 г. на сумму 8 548 674,65 рублей;  - Акт КС-2 и Справка КС-3 № 8 от 25.10.2022 г. на сумму 5 424 337,45 рублей;  - Акт КС-2 и Справка КС-3 № 9 от 10.11.2022 г. на сумму 4 178 220,59 рублей;  - Акт КС-2 и Справка КС-3 № 10 от 23.12.2022 г. на сумму 9 042 297,91 рублей;  

- Акт КС-2 и Справка КС-3 № 1 от 23.12.2022 г. на сумму 12 174 085,07 рублей  (выполнение дополнительных объемов работ по дополнительному соглашению № 1 от  04.10.2022 г. к договору).  

23.12.2022 года генподрядчик и субподрядчик составили и подписали итоговый  акт о завершении работ по договору (копия акта прилагается), в соответствии с  

которым стороны подтвердили надлежащее выполнение субподрядчиком всего объема  работ по договору, а также надлежащее оформление всей документации по  выполненным работам (исполнительная документация, документация о качестве  материалов и комплектующих).  

Всего стоимость выполненных работ по спорному договору составила – 134 061  589 руб. 26 коп., из которых стоимость основного объема работ по договору – 121 887  504 руб. 19 коп., стоимость дополнительных работ – 12 174 085,07 рублей (по  дополнительному соглашению № 1 от 04.10.2022 г. к договору).  

В соответствии с пунктом 4.4.1 договора, оплата выполненных субподрядчиком  работ осуществляется генподрядчиком в размере 95% от стоимости работ, указанной в  акте о приемке выполненных работ, в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта  выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (с учетом гарантийного  удержания в размере 5%).  

В соответствии с пунктом 4.4.6 договора, денежная сумма в размере 3% от  стоимости выполненных работ оплачивается генподрядчиком в течение 10 рабочих  дней с момента подписания сторонами акта завершения работ по договору. Денежная  сумма в размере 2% от стоимости выполненных работ удерживается генподрядчиком в  качестве обеспечения выполнения субподрядчиком гарантийных обязательств до  истечения гарантийного срока (гарантийное удержание).  

23.12.2022 года сторонами составлен и подписан итоговый акт о выполнении  всего комплекса работ по договору, следовательно срок оплаты денежной суммы в  размере 3% от стоимости выполненных работ наступил 13.01.2023 г.  

Срок оплаты гарантийного удержания в размере 2% от стоимости выполненных  работ не наступил.  

Кроме того, в соответствии с пунктом 4.4.4 договора, субподрядчик оплачивает  услуги генподрядчика, связанные с координацией работ и услуги по содержанию  строительной площадки (генподрядные услуги) в размере 3% от суммы выполненных  работ.  

Гарантийное удержание по договору (2% от стоимости выполненных работ)  составляет 4 072 477 руб. 59 коп.  

Стоимость генподрядных услуг по договору (3% от стоимости выполненных  работ) составляет 6 108 716 руб. 39 коп.  

Следовательно, общая стоимость выполненных работ, подлежащая оплате  генподрядчиком по спорному договору (за вычетом гарантийного удержания и  удержания стоимости генподрядных услуг) составляет 127 358 509 руб. 80 коп.  

Однако, оплата генподрядчиком выполненных работ была осуществлена не в  полном объеме. Оплата выполненных работ была произведена генподрядчиком на  общую сумму 111 880 952 руб.  

В результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств, принятых по  договору, образовалась задолженность в размере 15 477 557 руб. 80 коп.  

В нарушение требований ст. 65 АПК РФ доказательств перечисления суммы  задолженности полностью или в части ответчик суду не представил.  

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник)  обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то:  передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право  требовать от должника исполнения его обязанности.  

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона  и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев,  предусмотренных законом.  

На основании изложенного, требование истца о взыскании с ответчика  задолженности в размере 15 477 557 руб. 80 коп. обоснованно и подлежит  удовлетворению.  

В соответствии со ст. 395 ГК РФ истец вправе начислить проценты за  пользование чужими денежными средствами, поэтому требование истца о взыскании  процентов в размере 680 588 руб. обоснованно и подлежит удовлетворению. Расчет  судом проверен, ответчиком не оспорен.  

Доводы отзыва ответчика признаны судом необоснованными и не  состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела,  представленным в дело доказательствам.  

В соответствии со статьями 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на  ответчика.  

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 307, 309, 310, 395 ГК РФ,  руководствуясь ст.ст. 102, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "РЕГИОНЖИЛСТРОЙ" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСФЕРА" задолженность в размере 15 477 557  (Пятнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) руб.  80 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 680 588  (Шестьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят восемь) руб., а также расходы по  оплате государственной пошлины в размере 103 791 (Сто три тысячи семьсот  девяносто один) руб.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия.  

Судья Пронин А.П.