Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12

http://tambov.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №А64-6720/2020

04 декабря 2020 года

г. Тамбов

 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи А.В. Истомина,   

рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по иску

муниципального бюджетного учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения», г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к 

обществу с ограниченной ответственностью «Стинэк», г. Тамбов                                       (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 21 935,05 руб.

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства и озеленения» (далее МБУ Дирекция благоустройства и озеленения», Дирекция, Заказчик, истец)  обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью «Стинэк» (далее – ООО «Стинэк», Подрядчик, ответчик) о взыскании неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по гражданско - правовому договору (контракту) №0164200003020000125_53068 на выполнение работ по благоустройству сквера по бульвару Энтузиастов ( в границах ул. Карла Маркса и ул. Социалистическая) за период с 09.07.2020 по 22.07.2020 в сумме 21 935,05 руб., а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.

С учетом положений ч.ч. 1, 2 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ) настоящее дело подлежало рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Положениями ч 5 ст. 228 АПК РФ закреплено, что суд рассматривает дело в порядке упрощённого производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных им для представления доказательств и иных документов.

Исковое заявление к рассмотрению в порядке упрощенного производства судом принято 22.09.2020, о чем вынесено определение. 

Этим же определением, лицам участвующим в деле указано на необходимость в установленные судом сроки представить в арбитражный суд и направить друг другу соответствующие доказательства (документы по существу заявленных требований и возражений).

На момент вынесения окончательного судебного акта по делу, арбитражный суд располагал сведениями о получении истцом и ответчиком ко дню принятия решения копии определения о принятии искового заявления к производству.

Несмотря на это, в сроки установленные судом ответчиком возражений по иску ответчиком не заявлено. 

В соответствии с ч.1 ст. 131 АПК РФ ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.

Согласно ч. 4 ст. 131 АПК РФ, в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

Согласно ч. 3 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле о чем указано судом в определении от 13.07.2020 о принятии искового заявления к производству. 

Положениями ч. 3.1. ст. 70 АПК РФ закреплено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Признав требования истца обоснованными, 12.11.2020 суд вынес решение в виде резолютивной части, которым заявленные истцом требования удовлетворил в полном объеме. 

27.11.2020 ответчиком подана апелляционная жалоба на указанное решение, что по мнению суда является основанием для изготовления мотивированного решения по настоящему делу для оценки в дальнейшем судом апелляционной инстанции доводов жалобы и выводов суда первой инстанции.       

Удовлетворяя заявленные истцом требования, суд исходил из следующего. 

03.03.2020 между Дирекцией (Заказчик) и ООО «Стинэк» (Подрядчик) по итогам проведения электронного аукциона заключен гражданско-правовой договор (контракт) №0164200003020000125_53068 на выполнение работ по благоустройству сквера по бульвару Энтузиастов (в границах ул. Карла Маркса и ул. Социалистическая) (далее -Контракт), по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству сквера в соответствии с проектной документацией, локально-сметным расчетом и в полном соответствии с документацией о закупке, которые Заказчик  обязуется принять и оплатить Работы в соответствии с положениями Контракта (п.п. 1.1. – 1.2. Контракта). 

Цена Контракта составляет – 11 059 687, 80 руб., в том числе НДС 1 843 281,30 руб. (2.1. Контракта).

Срок выполнения работ определен с момента заключения Контракта и до 01.08.2020 (п. 4.2. Контракта). 

Контрактом определено, что гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 36 месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (п.п. 8.1.-8.2. Контракта).

Контрактом определены условия об обеспечении в том числе гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств могут (может) обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет (п. 9.3. Контракта).

В соответствии с п. 9.2. Контракта размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 0,5% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 57 008,70 руб. (п. 9.2. Контракта).

Согласно п. 7.8 Контракта, в случае установления требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке выполненных работ, осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 44-Фз в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом. 

Оформление документа о приемке выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. Гарантийные обязательства предоставляются не позднее чем за два рабочих дня до даты принятия выполненных работ.

Акт сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ сторонами согласован без разногласий 13.07.2020, тогда как обеспечение гарантийных обязательств в виде банковской гарантии №ЭБГ-А5-0000-2020-0240, Подрядчиком представлено 22.07.2020. 

Согласно п. 10.3 Контракта, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Общая сумма начисления штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.      

Указывая на нарушение Подрядчиком условий Контракта в части несоблюдения срока предоставления обеспечения гарантийных обязательств, Заказчик 29.07.2020 направил в адрес Подрядчика требование об оплате  неустойки в размере 21 935,05 руб., начисленной за период с 09.07.2020 по 22.07.2020. 

Оставленное без удовлетворение требование Заказчика о намерении урегулировать спор в досудебном порядке, явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском. 

Исследовав представленные в дело доказательства, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных истцом требований. 

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. 

Разрешая спор, арбитражный суд признал, что спорные правоотношения сторон возникли в рамках исполнения гражданско-правовой договор (контракт) №0164200003020000125_53068 на выполнение работ по благоустройству сквера по бульвару Энтузиастов (в границах ул. Карла Маркса и ул. Социалистическая) от 03.03.2020. 

В силу п. 2 ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В силу статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

Цена Контракта составляет – 11 059 687, 80 руб., в том числе НДС 1 843 281,30 руб. (2.1. Контракта).

Срок выполнения работ определен с момента заключения Контракта и до 01.08.2020 (п. 4.2. Контракта). 

Контрактом определено, что гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 36 месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (п.п. 8.1.-8.2. Контракта).

Контрактом определены условия об обеспечении в том числе гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств могут (может) обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет (п. 9.3. Контракта).

В соответствии с п. 9.2. Контракта размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 0,5% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 57 008,70 руб. (п. 9.2. Контракта).

Согласно п. 7.8 Контракта, в случае установления требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке выполненных работ, осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 44-Фз в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом. 

Оформление документа о приемке выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. Гарантийные обязательства предоставляются не позднее чем за два рабочих дня до даты принятия выполненных работ.

Акт сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ сторонами согласован без разногласий 13.07.2020, тогда как обеспечение гарантийных обязательств в виде банковской гарантии №ЭБГ-А5-0000-2020-0240, Подрядчиком представлено 22.07.2020. 

Согласно п. 10.3 Контракта, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Общая сумма начисления штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.      

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

В силу пункта 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст.422).

Требование о взыскании неустойки по Контракту за период с 09.07.2020 по 22.07.2020 в размере 21 935,05 руб., заявлено истцом обоснованно и подлежит удовлетворению. 

Расчёт неустойки, судом проверен и признан обоснованным и арифметически верным.

Статьей 9 АПК РФ закреплено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Указанная норма Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации закрепляет общее правило о бремени доказывания. Содержание данного правила определяется действием принципа состязательности в арбитражном процессе.

Последствием неисполнения этой юридической обязанности (непредставление доказательств) может стать принятие судом решения, которое не будет соответствовать интересам стороны, не представившей доказательства в полном объеме.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что исковые требования заявлены обосновано и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнести на ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 102, 110, 112, 167-170, 226-229 АПК РФ, Арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стинэк», г. Тамбов                                       (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального бюджетного учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения», г. Тамбов                                              (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по гражданско - правовому договору (контракту) №0164200003020000125_53068 на выполнение работ по благоустройству сквера по бульвару Энтузиастов ( в границах ул. Карла Маркса и ул. Социалистическая) за период с 09.07.2020 по 22.07.2020 в сумме 21 935,05 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.

2. Исполнительный лист истцу выдать по его заявлению после вступления решения в законную силу.

3. Направить лицам, участвующим в деле, решение заказным письмом с уведомлением о вручении.

4. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: Воронеж, ул. Платонова, д. 8, через Арбитражный суд Тамбовской области.

 

Судья                                                                                                   А.В. Истомин