Арбитражный суд Хабаровского края

<

...>, www.khabarovsk.arbitr.ru

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Дело № А73-14688/2025

г. Хабаровск

10 декабря 2025 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи М.А. Оржеховской

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Корень

рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 681000, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «СП-Плюс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 123112, г. Москва, мун. округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, апартамент 6)

об обязании выполнить работы

при участии в судебном заседании:

от истца – не явился, извещен надлежащим образом,

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СП-Плюс» об обязании в течение пятнадцати календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу восстановить поврежденное имущество фасад объекта капитального строительства «Стадион «Авангард». Реконструкция», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, ул. Комсомольская, 24, путем выполнения работ по восстановлению фасадных панелей соответствующего типа и цвета по оси 131-132/Г; 81-82/В, ось 81/А-Б,ось 82/А-Б (Восточная трибуна), 180-179/Г Западная трибуна, ось 155-156/Г Южная трибуна, фасадных панелей и обрешётки по оси А (Виколор) «Стадион «Авангард». Реконструкция».

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании 01.12.2025 объявлен перерыв до 10.12.2025 в 12 часов 40 минут.

Ответчиком заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения по делу №А73-14688/2025.

Истцом и ответчиком представлено ходатайство о рассмотрении и утверждении мирового соглашения в отсутствие представителей.

Установив, что мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, арбитражный суд считает возможным его утвердить, а производство по делу прекратить в силу части 2 статьи 150 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 49, 140, 141, частью 2 статьи 150, статьями 151, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л

Утвердить мировое соглашение, заключенное между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 681000, 

<

...>) и обществом с ограниченной ответственностью «СП-Плюс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 123112, г. Москва, мун. округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, апартамент 6) по делу №А73-14688/2025 в следующей редакции:

«Настоящее мировое соглашение заключается между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре» (далее - «Истец»), в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава с одной стороны и обществом с ограниченной ответственностью «СП-Плюс» (далее - «Ответчик»), в лице ФИО2, действующего на основании Устава, далее совместно именуемыми «Стороны», являющиеся Сторонами судебного дела № А73-14688/2025 по исковому заявлению Истца к Ответчику об обязании восстановить поврежденное имущество при выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции объекта капитального строительства «Стадион «Авангард». Реконструкция» на основании муниципального контракта № 30 от 23.08.2024, на следующих условиях:

1.	Настоящее Мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со ст. ст. 41, 49, 139, 140 АПК РФ, а также с учетом ст. 101 АПК РФ в целях устранения по обоюдному согласию возникшего спора, явившегося причиной предъявления указанного выше иска. По настоящему Мировому соглашению Стороны согласуют следующее:

2.	Ответчик обязуется в срок не позднее 31.12.2025 безвозмездновосстановить поврежденное имущество фасад объекта капитальногостроительства «Стадион «Авангард». Реконструкция», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, ул. Комсомольская, 24, путем выполнения работ по восстановлению фасадных панелей соответствующего типа и цвета по оси 131-132/Г; 81-82/В, ось 81/А-Б,ось 82/А-Б (Восточная трибуна), 180-179/Г Западная трибуна, ось 155-156/Г Южная трибуна, фасадных панелей и обрешётки по оси А (Виколор) «Стадион «Авангард». Реконструкция», а именно:

- устройство лесов - 89 м2;

- демонтаж панелей фасада в осях 180-179 (Западная трибуна) - 19,2 м2;

- демонтаж парапетной крышки - 2,3 м2;

- устройство лесов - 124 м2;

- демонтаж панелей фасада в осях 155-156/Г (Южная трибуна) - 19,2 м2;

- демонтаж парапетной крышки - 8,9 м2;

- устройство лесов - 32,4 м2;

- демонтаж панелей фасада в осях 131-132 (Восточная трибуна) - 14.4 м2;

- демонтаж парапетной крышки - 5,8 м2;

- устройство лесов - 89 м2;

- демонтаж панелей фасада в осях 81-82 (Восточная трибуна) - 155,52 м2;

- демонтаж парапетной крышки - 4,6 м2;

- устройство лесов — 7,2 м2;

- демонтаж панелей фасада в осях 81 (Восточная трибуна) - 14,4 м2;

- демонтаж парапетной крышки - 2,3 м2;

- монтаж фасадных панелей - 222,72 м2;

- монтаж парапетной крышки - 23,29 м2;

- изготовление новых панелей - 24 шт.;

- демонтаж поврежденных фасадных плит (виколор) по оси А - 34,56 м2;

- устройство фасадных плит (виколор) по оси А - 34,56 м2;

- устройство обрешетки для панелей (виколор) по оси А - 115,2 м2;

3. Ответчик обязуется в срок до 31.12.2025 оформить и передать Истцу по акту приема-передачи работ результат выполненных работ, определённых пунктом 2 настоящего Мирового соглашения.

4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Ответчиком обязательств, принятых на себя по настоящему Мировому соглашению, Истец оставляет за собой право подачи заявления в Арбитражный суд Хабаровского края о выдаче исполнительного листа на понуждение к восстановлению поврежденного имущества при выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции объекта капитального строительства «Стадион «Авангард». Реконструкция» на основании муниципального контракта № 30 от 23.08.2024, указанного в пункте 2 настоящего Мирового соглашения.

5.	Судебные расходы, связанные с гражданским делом № А73-14688/2025, Сторонами друг другу не возмещаются и возлагаются исключительно на ту Сторону, которая их понесла.

6.	Стороны просят Арбитражный суд Хабаровского края утвердитьнастоящее Мировое соглашение, а производство по делу прекратить. Последствия прекращения производства по делу № А73-14688/2025 в связи с заключением Мирового соглашения, предусмотренные статьей 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам разъяснены и понятны.

7. «Стороны» гарантируют, что настоящее Соглашение не нарушает права и законные интересы третьих лиц и не противоречит закону.

8. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для Арбитражного суда Хабаровского края.

9.	Настоящее мировое соглашение вступает в силу с даты егоутверждения Арбитражным судом Хабаровского края».

Производство по делу № А73-14688/2025 прекратить.

Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение месяца со дня принятия определения.

Кассационная жалоба подается в арбитражный суд кассационной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья 	М.А. Оржеховская