ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

672007, г. Чита, ул. Ленина, 145  http://4aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А19-6874/2021

г. Чита

14 января 2025  года

Резолютивная часть постановления объявлена 9 января 2025 года

Полный текст постановления изготовлен 14 января 2025 года

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи   Скажутиной Е.Н.,

судей Венедиктовой Е.А., Бушуевой Е.М.,

при ведении протокола судебного заседания  секретарем Размахниной Е.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании посредством системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Регионэнергострой»  на  решение   Арбитражного суда Иркутской области  от 9 декабря  2021 года по делу по делу № А19-6874/2021 по иску общества с ограниченной ответственностью «Евросибэнерго-Инжиниринг» к обществу с ограниченной ответственностью «Регионэнергострой» о взыскании 1240020 руб., по встречному иску  о взыскании 1122084,06 руб.

при участии   в судебном заседании:

от ООО «Регионэнергострой»: ФИО1 – представитель по доверенности от 26.07.2024,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Евросибэнерго-Инжиниринг»  обратилось в арбитражный суд  Иркутской области к обществу с ограниченной ответственностью «Регионэнергострой»  с требованиями, уточненными в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о взыскании неустойку в размере 7316015,74 руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Регионэнергострой» обратилось в арбитражный суд со встречным иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Евросибэнерго-Инжиниринг»  задолженности в размере 1122084,06 руб. за выполненные работы по договору строительного подряда № 46/19 от 20.06.2019.

Решением Арбитражного суда  Иркутской области от 09 декабря 2021  года первоначальные и встречные  исковые требования удовлетворены,  в результате зачета встречных денежных обязательств с общества с ограниченной ответственностью «Регионэнергострой» в пользу общества с ограниченной ответственностью "Евросибэнерго-Инжиниринг»  взыскано 6193931 руб. 68 коп.,  1179 руб.  судебных расходов, связанных с оплатой государственной пошлины.

Ответчик, не согласившись с принятым судебным актом, в апелляционной жалобе просит его отменить в части взыскания неустойки.

Определением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2022 производство по делу было приостановлено  до вступления в законную силу судебного акта, принятого Арбитражным судом Иркутской области по делу №А19-22136/2021. Определением от 20.06.2024 производство по делу возобновлено.

В материалы дела от истца и ответчика поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения следующего содержания:

« ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании Устава, с одной стороны, ООО «РЭС», в лице генерального директора ФИО3, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях урегулирования спора по делу № А19-6874/2021, рассматриваемому Четвертым арбитражным апелляционным судом, руководствуясь статьями 139-141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1.                  В рамках рассмотрения дела № А19-6874/2021 по исковому заявлению ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» к ООО «РЭС» о взыскании суммы неустойки по договору строительного подряда № 46/19 от 20.06.2019 г. (далее - договор) в размере 7316015,74 руб., по встречному исковому заявлению ООО «РЭС» к «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» о взыскании задолженности в размере 1122084,06 руб. за выполненные работы по тому же договору Стороны договорились:

2.                  ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» признает задолженность перед ООО «РЭС» по оплате выполненных и принятых работ по подписанным актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 №№ 15-19 от 31.07.2020 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 8 от 31.07.2020 в размере 1122084,06 руб., с учетом частично оплаченной суммы в размере 4422281,14 руб. на основании платёжного поручения № 3249 от 17.11.2020 и зачета стоимости давальческого материала на основании подписанного универсального передаточного документа №63 от 01.06.2021 на сумму 1220262,80 руб.

3.                  ООО «РЭС» признает неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору за период с 31.12.2020 по 31.12.2021 в размере 7316015,74 руб.

4.                  Настоящим мировым соглашением Стороны договорились произвести зачет встречных однородных требований по суммам, указанным в пунктах 2 и 3 настоящего мирового соглашения, в размере 1122084,06 руб.

5.                  После проведения зачета встречных однородных требований размер задолженности ООО «РЭС» перед ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» составляет 6193931,68 руб.

6.                  ООО «РЭС» обязуется перечислить сумму, указанную в пункте 5 настоящего мирового соглашения, в течение 120 календарных дней с момента утверждения Четвертым арбитражным апелляционным судом настоящего мирового соглашения, по реквизитам «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг», указанным в пункте 7 настоящего мирового соглашения. Прекращение обязательства по оплате неустойки допускается иным незапрещенным законом способом.

7.                  Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель: ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»

ИНН 

<

***>

Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823

р/с 

<

***>

к/с 30101810200000000823

8.                  Расходы по оплате услуг представителей Сторон, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

9.                  Сумма госпошлин, уплаченных Сторонами при обращении в суд, на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежит возврату из федерального бюджета.

10.Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

11.Заключая настоящее мировое соглашение, Стороны подтверждают, что не имеют более друг к другу никаких требований, кроме предусмотренных настоящим мировым соглашением, и после выполнения его условий считают свои обязательства по Договору выполненными в полном объёме.

12.Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст. 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны.

13.Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и один экземпляр представляется в материалы дела № А19-6874/2021.

14.На основании изложенного, Стороны ходатайствуют об утверждении настоящего мирового соглашения и о прекращении производства по делу № А19-6874/2021 на основании ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». 

В судебном заседании представитель ООО «Регионэнергострой»  поддержал ходатайства об утверждении мирового соглашения.

Частями 4, 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса. Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Согласно части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса.

Исследовав материалы дела, проверив условия мирового соглашения на их соответствие закону, суд приходит к выводу, что данное мировое соглашение не противоречит закону, иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем, подлежит утверждению на основании статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что в случае утверждения мирового соглашения арбитражный суд прекращает производство по делу.

Повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается (часть 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

С учетом изложенного, мировое соглашение подлежит утверждению, решение Арбитражного суда Иркутской области  от 09 декабря 2021 года по делу №А19-6874/2021 - отмене на основании пункта 3 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а производство по делу - прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, мировое соглашение подлежит утверждению судом в согласованной сторонами редакции.

Согласно абзацу 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.

По иску ООО «ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг» размер государственной пошлины при подаче иска составил 59580 руб., при подаче иска госпошлина уплачена по платежному поручению №697 от 11.03.2021 в размере 25400 руб.,

При подаче встречного иска ООО «Регионэергострой» уплачена государственная пошлина по платежному поручению №5259 от 22.06.2021 в размере 24221 руб.,

Таким образом, с ООО «ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг» в доход бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 4390 руб., обществу «Регионэнергострой»  подлежит возврату из федерального бюджета государственная пошлина в размере 12110,50 руб.

При подаче апелляционной жалобы ООО «Региоэнергострой» была уплачена государственная пошлина по платежному поручению №11795 от 28.12.2021 в размере 3000 руб., следовательно, ООО «Регионэнергострой» подлежит возврату из федерального бюджета государственная пошлина в размере 1500 руб.

Руководствуясь статьями  138 - 141, 150, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Иркутской области от 09 декабря 2021  года по делу №А19-6874/2021 отменить.

Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и обществом с ограниченной ответственностью «Регионэнергострой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), вместе именуемые «Стороны» на следующих условиях:

1. «В рамках рассмотрения дела №А19-6874/2021 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» к обществу с ограниченной ответственностью «Регионэнергострой» о взыскании суммы неустойки  по договору строительного подряда №46/19 от 20.06.2019 (далее-договор) в размере 7316015,74 руб., по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Регионэнергострой» к обществу с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» о взыскании задолженности в размере 1122084,06 руб. за выполненные работы по тому же договору стороны договорились:

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» признает задолженность перед обществом с ограниченной ответственностью «Регионэнергострой» по оплате выполненных и принятых работ по подписанным актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 №№15-19 от 31.07.2020 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №8 от 31.07.2020 в размере 1122084,06 руб., с учетом частично оплаченной суммы в размере 4422281,14 руб. на основании платежного поручения № 3249 от 17.11.2020 и зачета стоимости давальческого материала на основании подписанного универсального передаточного документа №63 от 01.06.2021 на сумму 1220262,80 руб.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Регионэнергострой» признает неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору за период с 31.12.2020 по 31.12.2021 в размере 7316015,74 руб.

4. Настоящим мировым соглашением Стороны договорились произвести зачет встречных однородных требований по суммам, указанным в пунктах 2 и 3 настоящего мирового соглашения, в размере 1122084,06 руб.

5. После проведения зачета встречных однородных требований размер задолженности общества с ограниченной ответственностью «Регионэнергострой» перед  обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»   составляет   6193931, 68 руб.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Регионэнергострой» обязуется перечислить сумму, указанную в пункте 5 настоящего мирового соглашения, в течение 120 календарных дней с момента утверждения Четвертым арбитражным апелляционным судом настоящего мирового соглашения, по реквизитам общества с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг», указанным в пункте 7 настоящего мирового соглашения. Прекращение обязательств по оплате неустойки допускается иным незапрещенным законом способом.

7. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель: ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»

ИНН 

<

***>

Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823

р/с 

<

***>

к/с 30101810200000000823

8. Расходы по оплате услуг представителей Сторон, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

9. Сумма госпошлин, уплаченных сторонами при обращении в суд, на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежит возврату из федерального бюджета.

Производство по делу №А19-6874/2021 прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 4390 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Регионэнергострой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение встречного иска в размере 12110,50 руб., уплаченную по платежному поручению №5259 от 22.06.2021.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Регионэнергострой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  из федерального бюджета государственную пошлину за апелляционную жалобу в размере 1500 руб., уплаченную по платежному поручению №11795 от 28.12.2021.  

    Постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня принятия путём подачи жалобы через суд первой инстанции.

Председательствующий:                                                                  Е.Н. Скажутина

Судьи:                                                                                                 Е.А. Венедиктова

                                                                                                                 Е.М. Бушуева