Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

28. 07. 2020 года.                                            Дело № А40-335461/19-43-2614

Резолютивная часть решения объявлена 15. 07. 2020 года.

Решение изготовлено в полном объеме 28. 07. 2020 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО " ОргТрубопроводСервис " (ОГРН 

<

***>)

к ООО " Специализированная строительная компания  " Газрегион " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 106 616 951 руб. 99 коп., в том числе: 104 767 764 руб. 36 коп. – долга, 1 849 187 руб. 63 коп. – неустойки,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № 2019-219 от 11.11.2019 г., от ответчика – не явился.

Изучив имеющиеся в деле документы, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 106 616 951 руб. 99 коп., в том числе: 104 767 764 руб. 36 коп. – долга, 1 849 187 руб. 63 коп. – неустойки, на основании статей  309, 310, 330, гл.37  ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал предъявленный иск по основаниям изложенным в исковом заявлении, с учётом заявления об увеличении размера исковых требований, представил истребованные судом документы; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, представил отзыв на исковое заявление, в котором иск в заявленной сумме не признал, не оспаривая факт имеющейся задолженности и её размер; истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил; расчет истца оспорил по основаниям изложенным в отзыве; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо иных ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом и ответчиком, в отсутствие представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом и ответчиком обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Из материалов дела усматривается, что  21 ноября 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Ответчик, ООО «ССК «Газрегион», Подрядчик) и Общество с ограниченной ответственностью «ОргТрубопроводСервис» (Истец, ООО «ОргТрубопроводСервис», Субподрядчик) заключили Договор № 3-СГМ-2017/СС-2.7/55/27-2017 на выполнение работ по пневматическим испытаниям, осушке и заполнению азотом полости трубопроводов Объектов, входящих в Этап 2.7 «КС-6 «Сковородинская» - «КС-7 «Сивакинская» км 1636 - км 1817,9» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код "стройки 033-2000973).

Согласно пункту 1.1. Договора, Субподрядчик на условиях настоящего Договора в соответствии со Специальной рабочей инструкцией (СРИ), собственными и/или привлеченными силами и средствами, проведет пневматические испытания, осушку и заполнение азотом полости трубопроводов объектов, входящих в Этап 2.7 «КС-6 «Сковородинская» - «КС-7 «Сивакинская» км 1636 - км 1817,9» в составе стройки «Магистральный газопровод" «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973) (далее все объекты именуются - Объект).

Субподрядчик работы, предусмотренные пунктом 1.1. Договора, выполнил качественно, в установленные Договором (с учетом Дополнительных соглашений) сроки, что подтверждается подписанным без замечаний обеими Сторонами следующими Справками о стоимости выполненных работ и затрат: № 1 от 28.02.2019 за период работы с 01.02.2019 по 28.02.2019 на сумму 53 396 600 руб. 40 коп., № 2 от 31.03.2019 за период работы с 01.03.2019 по 31.03.2019 на сумму 25 464 339 руб. 60 коп., № 3 от 30.04.2019 за период работы с 01.04.2019 по 30.04.2019 на сумму 29 294 648 руб. 40 коп., № 4 от 31.05.2019 за период работы с 01.05.2019 по 31.05.2019 на сумму 44 411 288 руб. 40 коп., № 5 от 30.06.2019 за период работы с 01.06.2019 по 30.06.2019 на сумму 59 399 335 руб. 20 коп., № 6 от 31.07.2019 за период работы с 01.07.2019 по 31.07.2019 на сумму 18 055 970 руб. 40 коп., № 7 от 30.09.2019 за период работы с 01.09.2019 по 30.09.2019 на сумму 57 721 340 руб. 40 коп.

Всего выполнено работ на сумму 287 743 522 руб. 80 коп. (в том числе НДС 20 %).

В соответствии с условиями Договора (пункт 3.1.) Подрядчик перечислил Субподрядчику аванс в размере 138 148 640 руб. 00 коп. (платежное поручение № 14687 от 22.12.2017). Также Подрядчик платежным поручением № 13786 от 24.10.2018 дополнительно перечислил как аванс денежные средства в размере 20 000 000 руб. 00 коп.

В соответствии с пунктом 3.4.3. Договора (в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 01.04.2019) Стороны Договора подписали Акты прекращения обязательств зачетом встречных однородных требований: № 92 от 30.06.2019 на сумму 8 116 441 руб. 05 коп., № 105 от 31.07.2019 на сумму 2 014 013 руб. 10 коп., № 115 от 31.08.2019 на сумму 2 778 055 руб. 89 коп.

Всего по состоянию на 05 декабря 2019 г. Подрядчик во исполнение взятых на себя обязательств по Договору перечислил Субподрядчику денежные средства на сумму 171 057 150  руб. 04 коп.

Акты № 1-4 Подрядчик оплатил полностью, Акт № 5 - частично, на сумму 18 490 273 руб. 24 коп., Акт № 6-7 не оплачены.

Как следует из пункта 3.2.5. Договора, оплата выполненных работ производится Подрядчиком на основании подписанной Сторонами о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в течение 10 дней после получения целевых финансовых средств от Генподрядчика, но не позднее 80 (восьмидесяти) дней с даты подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3».

Срок оплаты по Акту № 5 истек 18 сентября 2019 г., Срок оплаты по Акту № 6 истек 19 октября 2019 г., Срок оплаты по Акту № 7 истекает 19 декабря 2019 г.

По состоянию на 05 декабря 2019 г. задолженность ООО «ССК «Газрегион» по Договору № 3-СГМ-2017/СС-2.7/55/27-2017 от 21 ноября 2017 г. составляет 58 965 032 руб. 36 коп. (без учета Акта № 7 от 30.09.2019).

Пунктом 15.1. Договора установлено, что спорные вопросы, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров, направления претензии. Срок рассмотрения претензии - 15 дней с момента ее получения.

ООО «ОргТрубопроводСервис» заказным письмом с уведомлением и описью вложения направило претензию (исх. № 55-727 от 13.11.2019) в адрес ООО «ССК «Газрегион», которая была получена по адресу (местонахождению) и почтовому адресу Ответчика 18 и 25 ноября 2019 г. соответственно (почтовые идентификаторы 1151641024116 и 11551641024123).

ООО «ССК «Газрегион» претензию проигнорировало, денежные средства в размере 58 965 032 руб. 36 коп. на расчетный счет ООО «ОргТрубопроводСервис» не перечислило.

Согласно пункту 14.7. Договора, в случае, если Субподрядчик нарушил сроки выполнения работ, оговоренные в Статье 4 Договора, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,01 % от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10 % от стоимости невыполненных в срок Работ.

21 ноября 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Ответчик, ООО «ССК «Газрегион», Подрядчик) и Общество с ограниченной ответственностью «ОргТрубопроводСервис» (Истец, ООО «ОргТрубопроводСервис», Субподрядчик) заключили Договор №4-СГМ-2017/СС-2.8/55/28-2017 на выполнение работ по пневматическим испытаниям, осушке и заполнению азотом полости трубопроводов Объектов: «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.8. Участок «КС-7 «Сивакинская - Белогорск» км 1817,9-тсм 1970,45 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973.0011).

Согласно пункту 1.1. Договора, Субподрядчик на условиях настоящего Договора, в соответствии со Специальной рабочей инструкцией (СРИ), собственными и/или привлеченными силами и средствами, проведет пневматические испытания, осушку и заполнение азотом полости трубопроводов на объектах, входящих в Этап 2.8. «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок»КС-7 «Сивакинская» - Белогорск» км 1817,9 - км 1970,45 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973.0011), в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 033-2000973).

Цена Работ Субподрядчика является твердой и определена Сторонами на основании Рабочей (проектно-сметной) документации. В соответствии с Приложением № 3 к Договору составляет 207 221954,00 рубля, без НДС. НДС начисляется дополнительно по ставке, предусмотренной НК РФ» (пункт 1.1. Дополнительного соглашения № 2 от 28 января 2019 года к Договору субподряда № 4-СГМ-2017/СС-2.8/55/28-2017 от 21.11.2017 года).

Субподрядчик работы, предусмотренные пунктом 1.1. Договора, выполнил качественно, в установленные Договором (с учетом Дополнительного соглашения № 2 от 28.01.2019) сроки, что подтверждается подписанным без замечаний обеими Сторонами следующими Справками о стоимости выполненных работ и затрат: № 1 от 30.06.2018 за период работы с 01.06.2018 по 30.06.2018 на сумму 44 168 708 руб. 62 коп., в т.ч. НДС (18%), № 2 от 30.09.2018 за период работы с 01.09.2018 по 30.09.2018 на сумму 24 972 486,32 руб., в т.ч. НДС (18%), № 3 от 31.10.2018 за период работы с 01.10.2018 по 31.10.2018 на сумму 43 251 282,22 руб., в т.ч. НДС (18%), № 4 от 30.11.2018 за период работы с 01.11.2018 по 30.11.2018 на сумму 16 558 708,72 руб., в т.ч. НДС (18%), № 5 от 31.12.2018 за период работы с 01.12.2018 по 31.12.2018 на сумму 60 582 002 руб. 40 коп., в т.ч. НДС (18%), № 6 от 31.03.2019 за период работы с 01.03.2019 по 31.03.2019 на сумму 35 713 894 руб. 80 коп., в т.ч. НДС (20 %), № 7 от 31.05.2019 за период работы с 01.05.2019 по 31.05.2019 на сумму 20 206 834 руб. 80 коп.

Всего выполнено работ на сумму 245 453 917 руб. 88 коп. (в т.ч. НДС по ставке 18 % и 20 %).

В соответствии с условиями Договора (пункт 3.1.) Подрядчик перечислил Субподрядчику аванс в размере 122 138 038 руб. 00 коп. (платежное поручение № 14689 от 22.12.2017).

Также Подрядчик платежными поручениями № 2393 от 18.02.2018, № 17280 от 26.12.2018, № 3332 от 12.03.2019, № 4199 от 26.03.2019, № 5018 от 12.04.2019, № 6359 от 17.05.2019, № 12918 от 24.09.2019, № 13593 от 03.10.2019 частично оплатил выполненные работы по Договору на общую сумму 77 513 147 руб. 88 коп.

Всего Подрядчик перечислил денежные средства на сумму 199 651185,88 руб.

Акты № 1-5 Подрядчик оплатил полностью, Акт № 6 - частично, на сумму 10 117 997 руб. 60 коп., Акт № 7 не оплачен.

Как следует из пункта 3.2.5. Договора, оплата выполненных работ производится Подрядчиком на основании подписанной Сторонами о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в течение 10 дней после получения целевых финансовых средств от Генподрядчика, но не позднее 80 дней с даты подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

Срок оплаты по Акту № 6 истек 19 июня 2019 г., Срок оплаты по Акту № 7 истек 19 июля 2019 г.

Задолженность ООО «ССК «Газрегион» по Договору № 4-СГМ-2017/СС-2.8/55/28-2017 от 21 ноября 2017 г. составляет 45 802 732 руб. 00 коп. (задолженность по Акту № 6 в размере 25 595 897,20 + задолженность по Акту № 7 в размере 20 206 834,80).

Пунктом 15.1. Договора установлено, что спорные вопросы, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров, направления претензии. Срок рассмотрения претензии - 15 дней с момента ее получения.

ООО «ОргТрубопроводСервис» заказным письмом с уведомлением и описью вложения направило претензию (исх. № 55-728 от 13.11.2019) в адрес ООО «ССК «Газрегион», которая была получена по адресу (местонахождению) и почтовому адресу Ответчика 18 и 25 ноября 2019 г. соответственно (почтовые идентификаторы 1151641024116 и 11551641024123)

ООО «ССК «Газрегион» претензию проигнорировало, денежные средства в размере 45 802 732 руб. 00 коп. на расчетный счет ООО «ОргТрубопроводСервис» не перечислило.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Требование истца о взыскании долга в сумме 104 767 764 руб. 36 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Неустойка одновременно является способом обеспечения обязательства и одной из форм гражданско-правовой ответственности.

Основанием для применения неустойки является факт неправомерного поведения стороны в обязательстве.

Согласно пункту 14.7. Договора, в случае, если Субподрядчик нарушил сроки выполнения работ, оговоренные в Статье 4 Договора, на срок свыше 30 календарных дней, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,01 % от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10 % от стоимости невыполненных в срок Работ.

Требование истца о взыскании неустойки в сумме 1 849 187 руб. 63 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика  в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ.

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ООО " Специализированная строительная компания  " Газрегион " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " ОргТрубопроводСервис " (ОГРН 

<

***>) 106 616 951 руб. 99 коп., в том числе: 104 767 764 руб. 36 коп. – долга, 1 849 187 руб. 63 коп. – неустойки и расходы по уплате госпошлины в сумме 200 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья                                                           О.В. Романов