Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

28. 11. 2023 года.                                          Дело № А40-144030/23-43-1154

Резолютивная часть решения объявлена 23. 11. 2023 года.

Решение изготовлено в полном объеме 28. 11. 2023 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы ФИО1, единолично,

протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО " Новые технологии " (ОГРН 

<

***>)

к ООО " ИНЖСПЕЦСТРОЙ " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 3 817 000 руб. 00 коп. – неустойки,

с участием представителей: от истца – ФИО2, адвокат, доверенность б/н от 101.03.2022г., от ответчика – не явился.  

Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителя, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 3 817 000 руб. 00 коп. – неустойки, на основании статей 12, 309, 310, 330, 331 ГК РФ.

Истец направил представителя в судебное заседание, который иск поддержал, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении; представил истребованные судом документы; предъявил подлинники документов, имеющихся в деле в виде копий; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не представил отзыв на исковое заявление; документы, опровергающие иск не предъявил; расчет истца не оспорил; представителя в судебное заседание не направил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке, в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва ответчика и представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Из материалов дела усматривается, что между истцом - обществом с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (истец, Генподрядчик) и ответчиком - обществом с ограниченной ответственностью "Инжспецстрой" (ответчик, Субподрядчик) заключен договор субподряда № 78-СМР-1062/19-СП1 от 10 июня 2019 г. 

По условиям заключенного Договора Субподрядчик принял на себя обязательство по выполнению работ по строительству тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

...>.

Дата начала Работ по Договору: 10 июня 2019 года.

Дата окончания Работ по Договору: 08 октября 2019 года.

Субподрядчиком выполнение работ было завершено 01 апреля 2021 года, что подтверждается подписанным сторонами Актом о приемке выполненных работ № 5 (форма КС-2) от 01.04.2021 г.

Просрочка за период с 09.10.2019 года по 01.04.2021 года составляет 541 день.

В соответствии с п. 8.2. Договора, в случае несвоевременного выполнения Работ по Объекту (нарушение срока начала и окончания выполнения Работ по Объекту, а также промежуточных сроков) Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку (пени) в размере 0,1 % от общей цены Работ по Объекту, определенной в Договоре, за каждый день просрочки выполнения Работ.

В соответствии с п. 2.1. Договора цена Договора составляет 7 739 269 рублей 88 копеек, в т.ч. НДС.

За допущенную Субподрядчиком просрочку выполнения работ подлежит начислению неустойка.

Размер неустойки за период с 09.10.2019 года до даты подписания сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ (Акт №5 от 01.04.2021 года) составляет 4 186 945 рублей 01 копейка.

Расчет неустойки: 7 739 269,88 р. х 0,1% х 541 день = 4 186 945 рублей 01 копейка.

Таким образом, у ООО "Инжспецстрой" возникла перед ООО "Новые технологии" задолженность по уплате договорной неустойки за период с 09.10.2019 по 01.04.2021 в размере 4 186 945 рублей 01 копейка.

Ранее Субподрядчик (ООО "Инжспецстрой") обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с Генерального подрядчика (ООО "Новые технологии") задолженности по Договору в размере 369 944 рубля 61 копейка.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04 мая 2023 года по делу № А40-10698/2023-3-84 Субподрядчику было отказано в иске о взыскании с Генподрядчика суммы задолженности по Договору в размере 369 944 рубля 61 копейка, в связи с зачетом встречных однородных требований Генподрядчика и Субподрядчика, задолженность Генподрядчика перед Субподрядчиком за выполненные по Договору работы в размере 369 944 рубля 61 копейка зачтена в счет погашения задолженности Субподрядчика (ООО "Инжспецстрой") перед Генподрядчиком (ООО "Новые технологии") по оплате неустойки за просрочку выполнения работ по Договору.

Наличие задолженности ответчика перед истцом в заявленном размере подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 04 мая 2023 года по делу № А40-10698/2023-3-84, таким образом, исковые требования истца основаны на обстоятельствах, подтвержденных вступившим в законную сиу решением суда, имеющим преюдициальное значение.

В соответствии со ст. 410 ГК РФ Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

После произведенного частичного зачета встречных требований, обязательство ООО "Новые технологии" перед ООО "Инжспецстрой" по оплате 369 944 рубля 61 копейка за выполненные по Договору работы, заявленные к взысканию с ООО "Новые технологии" в рамках дела № А40-10698/2023-3-84, рассматриваемого Арбитражным судом города Москвы, прекратилось, при этом задолженность ООО "Инжспецстрой" перед ООО "Новые технологии" по выплате неустойки за период просрочки выполнения работ с 09.10.2019 по 01.04.2021 в размере 4 186 945 рублей 01 копейка уменьшилась в связи с частичным зачетом на сумму 369 944 рубля 61 копейка и составляет 3 809 261 рублей 13 копеек ( расчет: 4 186 945,01 - 369 944,61 = 3 817 000,4 рублей).

Таким образом, после произведенного частичного зачета встречных требований, задолженность ООО «Инжспецстрой» по уплате неустойки за период с 09.10.2019 по 01.04.2021 в связи с допущенной просрочкой выполнения работ по Договор ООО «Инжспецстрой» перед ООО "Новые технологии" составляет 3 817 000 рублей 40 копеек.

Размер неустойки судом проверен, установлено, что арифметически и методологически выполнен верно в соответствии с условиями заключенного между сторонами договора.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает пли позволяет определить день его исполнения пли период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Требование истца о взыскании неустойки в сумме 3 817 000 руб. 00 коп. – законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика, в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ. 

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ООО " ИНЖСПЕЦСТРОЙ " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " Новые технологии " (ОГРН 

<

***>) 3 817 000 руб. 00 коп. – неустойки и расходы по уплате госпошлины в сумме 42 085 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья

ФИО1