Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-128328/2022

12 октября 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  26 сентября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  12 октября 2023 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи Сухаревской Т.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания             ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "АБПО-Проект" (адрес:  450037, республика Башкортостан, Уфа город, Октября 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.06.2015, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Газстройтех" (адрес:  194044, 

<

...>, литер А, офис 6 (помещение 13-Н этаж 4), ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.03.2013, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 

при участии

- от истца:  представитель ФИО2 по доверенности от 26.12.2022

- от ответчика: представитель ФИО3 по доверенности от 12.12.2022

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "АБПО-Проект" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Газстройтех" о взыскании 1 890 720 руб. долга по договору от 26.10.2020 № 201/2020; 2 258 400 руб. долга по договору от 26.10.2020 № 202/2020; 222 611,65 руб. неустойки по договору от 26.10.2020 № 201/2020; 265 901,95 руб. неустойки по договору от 26.10.2020 № 202/2020.

Определением суда от 22.12.2022 исковое заявление принято к рассмотрению в общем порядке искового производства, назначено предварительное судебное заседание и судебное заседание.

В судебном заседании 22.06.2023 присутствовали представители истца и ответчика.

Протокольным определением  суда от 22.06.2023 судебное заседание отложено судом по ходатайству истца.

В судебном заседании 27.07.2023 присутствовали представители истца и ответчика.

Ответчик в судебном заседании просил суд приобщить к материалам дела дополнительные доказательства.

Судом ходатайство ответчика удовлетворено.

В судебном заседании, ввиду отсутствия возражений сторон, против рассмотрения дела по существу в настоящем судебном заседании, суд, в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посчитал возможным завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Протокольным определением  суда от 27.07.2023 судебное заседание отложено.

В судебном заседании 15.08.2023 присутствовали представители истца и ответчика.

Истец уточнил исковые требования, просил суд взыскать 424 080 руб. долга по договору от 26.10.2020 № 201/2020; 2 258 400 руб. долга по договору от 26.10.2020 № 202/2020; 89 439,94 руб. неустойки по договору от 26.10.2020 № 201/2020; 476 304,40 руб. неустойки по договору от 26.10.2020 № 202/2020.

Судом в порядке статьи 49 АПК РФ приняты уточненные исковые требования.

Протокольным определением  суда от 15.08.2023 судебное заседание отложено судом по ходатайству ответчика.

В судебном заседании 26.09.2023 присутствовали представители истца и ответчика.

Ответчик просил суд приобщить к материалам дела отзыв на уточненное исковое заявление, содержащий контр-расчет задолженности.

Судом ходатайство ответчика удовлетворено.

Арбитражный суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству и поскольку от лиц, участвующих в деле, не поступило возражений относительно продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, с учетом обстоятельств дела, суд, завершив предварительное судебное заседание в порядке статей 136-137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), рассмотрел исковое заявление по существу.

Исследовав материалы дела, арбитражным судом установлены следующие обстоятельства.

Между ООО «АБПО-Проект» и ООО «Газстройтех» 26.10.2020 заключен договор №201/2020, по условиям которого ООО «Газстройтех», субподрядчик по договору, поручил, а ООО «АБПО-Проект», субсубподрядчик по договору, принял на себя обязательства выполнить проектно-изыскательские работы по объекту ПИР будущих лет «Реконструкция промплощадки Курского ЛПУМГ» (пункт 1.1).

В соответствии с пунктом 1.3. договора №201/2020 Субсубподрядчик выполняет сбор исходных данных (далее - СИД) и работы по инженерным изысканиям (далее - ИИ) для разработки проектной и рабочей (в том числе сметной) документации (далее - ПД и РД), оформляет отчеты по СИД и ИИ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, сводов правил и строительных норм и правил, а также в соответствии с требованиями ПАО «Газпром».

Обязательства субсубподрядчика считаются исполненными после утверждения разработанной проектной документации субподрядчиком, при необходимости, положительных заключений соответствующих экспертных органов согласно пункту 1.4 договора №201/2020.

Согласно пункту 2.1. договора №201/2020 цена договора составила 9 897 600 руб. (с учетом НДС). Срок окончания работ 31.12.2021 (пункт 4.2.).

Пунктом 5.2. установлен порядок оплаты по договору:

- 30% от стоимости соответствующего этапа работ оплачивается субподрядчиком в качестве авансирования перед каждым этапом работ;

- оставшиеся 70% оплачиваются субподрядчиком на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, при наличии счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Согласно пункту 5.3 договора № 201/2020 субподрядчик оплачивает выполненные субсубподрядчиком и принятые субподрядчиком работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет субсубподрядчик в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ.

Сторонами в приложении № 4 к договору №201/2020 согласован график погашения авансов.

Согласно данному графику, стоимость работ по этапу СИД составила 336 000 руб., размер аванса 100 800 руб.; стоимость работ по этапу ИИ составила 2 793 600 руб., размер аванса            838 080 руб.; стоимость работ по этапу ОТР составила 600 000 руб., размер аванса составил  180 000 руб.

Ответчик платежными поручениями от 10.12.2020 № 6900 на сумму 1 118 880 руб., от 01.02.2021 № 543 на сумму 720 000 руб., от 20.10.2021 № 5228 на сумму 977 760 руб., от 01.11.2021 № 5499 на сумму 488 880 руб. произвел оплату авансовых платежей в размере           3 305 520 руб.

Разделом 36 приложения №1 к договору № 201/2020 «Порядок сдачи работ» задания на проектирование стороны определили следующий порядок сдачи работ. Отчет по результатам работ по сбору исходных данных (далее - отчет СИД) предоставляется в 4-х экземплярах на бумажных носителях и 4-х экземплярах на электронных носителях (пункт 36.6 приложения №1)

Субсубподрядчик выполняет сбор исходных данных и работы по инженерным изысканиям для разработки проектной и рабочей (в том числе сметной) документации (далее - ПД и РД), оформляет отчеты по СИД и ИИ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, сводов правил и строительных норм и правил, а также в соответствии с требованиями ПАО «Газпром» (пункт1.1. договора №201/2020).

Согласно пункту 36.7 раздела 36 приложения №1 отчеты по результатам выполнения инженерных изысканий предоставляется в 4-х экземплярах на бумажных носителях и 4-х экземплярах на электронных носителях.

Разделом 8 договора № 201/2020 установлено, что в течение 5 рабочих дней по завершении этапа работ по СИД и ИИ, определенного Календарным планом, Субсубподрядчик сопроводительным письмом предоставляет на проверку субподрядчику разработанные отчеты по СИД и ИИ, согласованные субподрядчиком, 2 экземпляра, подписанного Субсубподрядчиком со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, счет-фактуру, оформленные надлежащим образом.

В соответствии с календарным планом выполнения ПИР по объекту «Реконструкция промплощадки Курского ЛПУМГ» (приложение № 6 к договору №201/2020) процесс выполнения работ по договору состоял из 5 этапов, для каждого из которых устанавливалось сроки начала и окончания. Для этапов с первого по третий «сбор исходных данных», «комплексные инженерные изыскания» и «основные технические решения» дата начала работ определялась с 26.10.2020 г., дата окончания - 30.12.2020.

Также между сторонами  заключен договор от 26.10.2020  №202/2020 по условиям которого ООО «Газстройтех», субподрядчик по договору, поручил, а ООО «АБПО-Проект», субсубподрядчик по договору, принял на себя обязательства выполнить проектно-изыскательские работы по объекту ПИР будущих лет «Реконструкция промплощадки Брянского ЛПУМГ» (пункт 1.1).

Согласно пункту 2.1. договора №«201/2020 цена договора составила 12 072 000 руб. (с учетом НДС). Срок окончания работ 31.12.2021. (пункт 4.2.).

Пунктом 5.2. установлен порядок оплаты по договору:

- 30% от стоимости соответствующего этапа работ оплачивается субподрядчиком в качестве авансирования перед каждым этапом работ;

- оставшиеся 70% оплачиваются субподрядчиком на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, при наличии счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Согласно пункту 5.3 договора № 202/2020 субподрядчик оплачивает выполненные субсубподрядчиком и принятые субподрядчиком работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет субсубподрядчик в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ.

Сторонами в приложении № 4 к договору № 202/2020 согласован график погашения авансов.

Согласно данному графику, стоимость работ по этапу СИД составила 420 000 руб., размер аванса 126 000 руб.; стоимость работ по этапу ИИ составила 3 942 000 руб., размер аванса           1 047 000 руб.; стоимость работ по этапу ОТР составила 600 000 руб., размер аванса составил 180 000 руб.

Ответчик платежными поручениями от 25.12.2020 № 7181 на сумму 676 500 руб., от 28.01.2021 № 450 на сумму 677 100 руб., от 01.02.2021 № 544 на сумму 900 000 руб. произвел оплату авансовых платежей в размере 2 253 600 руб.

Разделом 37 приложения №1 к договору №202/2020 «Порядок сдачи работ» Задания на проектирование стороны определили следующий порядок сдачи работ. Отчет по результатам работ по сбору исходных данных (далее - отчет СИД) предоставляется в 4-х экземплярах на бумажных носителях и 4-х экземплярах на электронных носителях (пункт 3 7.6 приложения №1)

Субсубподрядчик выполняет сбор исходных данных и работы по инженерным изысканиям для разработки проектной и рабочей (в том числе сметной) документации (далее - ПД и РД), оформляет отчеты по СИД и ИИ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, сводов правил и строительных норм и правил, а также в соответствии с требованиями ПАО «Газпром» (п.1.1. договора №202/2020).

Согласно пункту 37.7 раздела 37 Приложения №1 отчеты по результатам выполнения инженерных изысканий предоставляется в 4-х экземплярах на бумажных носителях и 4-х экземплярах на электронных носителях.

Разделом 8 договора № 202/2020 установлено, что в течение 5 рабочих дней по завершении этапа работ по СИД и ИИ, определенного Календарным планом, Субсубподрядчик сопроводительным письмом предоставляет на проверку Субподрядчику разработанные отчеты по СИД и ИИ, согласованные Субподрядчиком, 2 экземпляра, подписанного Субсубподрядчиком со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, счет-фактуру, оформленные надлежащим образом.

В соответствии с календарным планом выполнения ПИР по объекту «Реконструкция промплощадки Брянского ЛПУМГ» (приложение №6 к договору №202/2020) процесс выполнения работ по договору состоял из 5 этапов, для каждого из которых устанавливалось сроки начала и окончания. Для этапов с первого по третий «сбор исходных данных», «комплексные инженерные изыскания» и «основные технические решения» дата начала работ определялась с 26.10.2020, дата окончания - 30.12.2020.

Согласно представленным истцом актам сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ по договору № 201/2020:  от 30.12.2020 №1, от 30.12.2020 №2 и от 30.12.2020 №3 субсубподрядчик сдал работы на общую сумму 3 729 600 руб.

По договору № 202/2020 в соответствии с актами от 30.12.2020 №1, от 30.12.2020  №2, от 30.12.2020 №3 субсубподрядчик сдал работы на общую сумму 4 512 000 руб.

Ответчиком выполненные работы в полном объеме оплачены не были, в результате чего образовалась задолженность.

Истец направил в адрес ответчика претензию с требованием об уплате долга по договорам, которая была оставлена без удовлетворения. Указанные обстоятельства явились истцу основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, указал, что истец не исполнил обязательства по передаче результата работ по договорам в надлежащем качестве и надлежащим способом, а также указал на неприменение истцом Постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022  № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».

Заслушав доводы сторон и оценив представленные в материалах дела доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 702 ГК РФ к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные Главой 37 ГК РФ, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. 

Согласно статье 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Обязанность оплатить результат работы возникает у заказчика при условии, что работа выполнена надлежащим образом (статья 711 ГК РФ).

Материалами дела подтверждается выполнение истцом обязательств по договору.

Оспаривая сумму задолженности, ответчик доказательств нарушения порядка учета поступивших денежных средств, в материалы дела не представил.

Ссылка ответчика на то, что Общество не передало исполнительную документацию, подлежит отклонению судом, поскольку указанное обстоятельство не является основанием для освобождения заказчика от оплаты фактически выполненных работ.

По смыслу статьи 726 ГК РФ, отказываясь принимать и оплачивать переданные результаты подрядных работ по причине не передачи подрядчиком исполнительной документации, заказчик обязан доказать, что отсутствие такой документации исключает возможность использования принятого им объекта по прямому назначению. В иных случаях заказчик не лишен возможности истребовать необходимые документы у подрядчика, а выполненные работы обязан оплатить. Однако ответчик не доказал, что отсутствие названной документации препятствует использованию результата работ.

Таким образом, Учреждение не доказало наличие недостатков, которые препятствовали приемке и оплате выполненных работ.

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Истцом заявлено требование о взыскании 89 439,94 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 201/2020 за период с 30.12.2020 по 14.08.2023 и 476 304,40 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по договору            № 202/2020 за период с 30.12.2020 по 14.08.2023.

Ответчик возражал относительно порядка начисления истцом штрафных санкций, а также указал на неприменение истцом  Постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», в связи с чем представил контр-расчет.

Суд счел верной позицию ответчика в данной части и признал обоснованным  контр-расчет ответчика.

В соответствии со ст. 190 ГК РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

Пунктом 5.3. договоров установлено, что субподрядчик оплачивает выполненные субсубподрядчиком и принятые субподрядчиком работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ. 

Срок окончания работ 31.12.2021 (п. 4.2. договоров). Сроки окончания работ по каждому этапу работ установлены Приложением №6 к договору.

Согласно п. 8.6 договоров, субподрядчик осуществляет приемку выполненных работ по этапам согласно Календарному плану в порядке, установленном пунктом 8.2. договора.

Календарным планом предусмотрены различные сроки окончания работ по каждому этапу. Работа по конкретному этапу работ считается принятой Субподрядчиком с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских по конкретному этапу (п, 8.10. договоров).

Основанием для оплаты по договору является акт сдачи-приемки выполненных работ.

Истцом неверно определено начало течения срока исполнения обязательства ответчика по оплате. С учетом положений пункта 5.3 договоров платеж производится в течение 30 дней с даты подписания акта. Следовательно, дата, с которой подлежат начислению проценты, исчисляется со дня, следующего за днем окончания 30 дневного периода для оплаты.

Согласно пунктам 1, 3 Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» (опубликовано 01.04.2022) введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.

 По смыслу Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 ограничения  по кругу лиц не установлено.

Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ, неустойка (статья 330 ГК РФ), а также иные финансовые санкции, не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие. В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория.

Учитывая  изложенное, исковые требования в части взыскания процентов  подлежат частичному удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика на основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и взыскиваются в пользу истца пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Газстройтех" в пользу общества с ограниченной ответственностью "АБПО-Проект"  424 080 руб. долга по договору от 26.10.2020 № 201/2020; 2 258 400 руб. долга по договору от 26.10.2020 № 202/2020; 63 989,59 руб. неустойки по договору от 26.10.2020 № 201/2020; 340 770,89 руб. неустойки по договору от 26.10.2020 № 202/2020; 37 296 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "АБПО-Проект"  из федерального бюджета 6 947 руб. излишне уплаченной государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 08.06.2022 № 575.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сухаревская Т.С.