РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-42327/23-110-352

г. Москва

23 мая 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 03 мая 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 23 мая 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  "ФСК МОДУЛЬ" (143916, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛАШИХА ГОРОД, 11-Я ЛИНИЯ (НИКОЛЬСКО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ МКР. УЛИЦА, ДОМ 58, ОГРН: 1165001051742,) к Государственному казенному учреждению города Москвы "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ" (127051, ГОРОД МОСКВА, ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, ДОМ 30, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 5, ОГРН: 1077746304470,) о взыскании 5 301 775,44 руб.,

 

при участии:

от истца – Коваженков  М.В. по дов.  от  24.01.2023, Тапейцин В.Н. , гендиректор, Тапейцина  А.В. по дов.  от  25.04.2023

от ответчика- Дубовая Х.С. по дов.  от  09.01.2023, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью  "ФСК МОДУЛЬ" обратилось с иском к Государственному казенному учреждению города Москвы "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ" о взыскании 5 252 132,32 руб. задолженности по государственному контракту от 31.10.2022 №126/22, 49 643,12 руб. неустойки.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, 31.10.2022 между Государственным казенным учреждением города Москвы "Технический центр Департамента культуры города Москвы" (ПСУ "Технический центр Департамента культуры города Москвы"), именуемое в дальнейшем "Заказчик" и Обществом с ограниченной ответственностью "ФСК МОДУЛЬ" (ООО "ФСК МОДУЛЬ"),  именуемое в дальнейшем "Подрядчик" был заключен Государственный контракт №126/22 от 31.10.2022 на выполнение работ по текущему ремонту помещений и входных групп Департамента культуры города Москвы по адресам: ул. Петровка, д.17, стр. 9; ул. Петровка, д. 17, стр. 11; ул. Петровка, д. 17, стр. 13, в соответствии с которым Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту помещений и входных групп Департамента культуры города Москвы по адресам: ул. Петровка, д. 17, стр. 9; ул. Петровка, д. 17, стр. 11; ул. Петровка, д. 17, стр. 13 (далее -работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Цена Контракта составляет 5 872 266 (Пять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 978 711 (Девятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек (далее - Цена Контракта).

Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Оплата по Контракту осуществляется на основании электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Исполнение обязательства Подрядчиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.

Сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта: 30 (Тридцать) календарных дней с даты заключения Контракта.

Подрядчик в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после окончания завершения этапа выполнения работ, указанного в Графике выполнения работ (Календарном плане), представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, и электронный структурированный Документ о приемке, подписанные Подрядчиком.

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в настоящей статье Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании, либо направляет подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ и сроком их устранения. В случае получения мотивированного отказа от Заказчика Подрядчик устраняет причины, указанные в таком мотивированном отказе, и представляет Заказчику электронный структурированный Документ о приемке повторно.

После выполнения обязательств по Контракту, но не позднее даты окончания срока действия Контракта, Стороны подписывают электронный структурированный Документ о приемке (по форме согласно Приложению № 2 к Контракту), который является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиком.

Подписанный Заказчиком и Подрядчиком, электронный структурированный Документ о приемке стоимости этапа работ является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

В соответствии с п. 7.1 Государственного Контракта № 126/22 от 31.10.2022 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №-570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» и иным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 7.7.2 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

В соответствии с п. 7.8 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

В соответствии с п. 7.10 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

К настоящему Государственному Контракту № 126/22 от 31.10.2022, между Заказчиком и Исполнителем было составлено и подписано Приложение № 1 к Контракту № 126/22:

Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту помещений и входных групп Департамента культуры города Москвы по адресам: ул. Петровка, д. 17, стр. 9; ул. Петровка, д. 17, стр. 11; ул. Петровка, д. 17, стр. 13.

Подрядчиком были выполнены работы по текущему ремонту помещений и входных групп Департамента культуры города Москвы по адресам: ул. Петровка, д. 17, стр. 9; ул. Петровка, д. 17, стр. 11; ул. Петровка, д. 17, стр. 13, что подтверждается направленными в адрес Заказчика для подписания КС -2 (акты о приемке выполненных работ) и КС-3 (Справки о стоимости выполненных работ и затрат), а также актами направленными Заказчику в Единой информационной системе (ЕИС).

Однако Заказчиком приемка была произведена частично.

28.12.2022 Заказчик отказал Подрядчику в приемке выполненных работ на основании не уплаты штрафа за просрочку выполнения работ.

29.12.2022 Заказчик направил в адрес Подрядчика счета на оплату штрафа.

29.12.2022 Подрядчик оплатил штраф и предоставил Заказчику следующие исполненные Платежные документы (прилагаем к настоящему Исковому заявлению):

Платежное поручение № 403299 от 29.12.2022 на сумму 11 672 рублей 48 копеек;

Платежное поручение № 403301 от 29.12.2022 на сумму 2 745 рублей 62 копейки;

Платежное поручение № 403302 от 29.12.2022 на сумму 7 599 рублей 98 копеек.

30.12.2022 ООО «ФСК МОДУЛЬ» направило следующие закрывающие документы на выполнение работ по текущему ремонту помещений и входных групп Департамента культуры города Москвы ул. Петровка, д. 17, стр. 9, ул. Петровка, стр. 11, ул. Петровка, д. 17, стр. 13 по Договору № 126/22 от 31.10.2022:

КС-2№ 1-1 от 29.12.2022;

КС-2№ 1-2 от 29.12.2022;

КС-2№ 1-3 от 29.12.2022;

КС-3 от 29.12.2022;

Реестры исполнительной документации;

АОСР с сертификатами;

Договор на вывоз мусора;

Сертификаты на продукцию;

Паспорта на изделия;

УПД подтверждения товара.

О получении вышеуказанной документации свидетельствует отметка на Сопроводительном письме от 29.12.2022 № 688-2022.

30.12.2022 Исходя из сведений, которые содержатся в Единой информационной системе (ЕИС), Заказчиком приняты и оплачены работы по текущему ремонту помещений и входных групп Департамента культуры города Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр. 13 на сумму 378 706 (триста семьдесят восемь тысяч семьсот шесть) рублей 44 копейки, что подтверждается следующим документом, подписанным с двух сторон и размещенным в Единой информационной системе (ЕИС), а именно:

1.    Счет-фактура № 000000101 от 29.12.2022 на сумму 378 706,44 руб.; В бумажном виде Заказчиком были подписаны:

1.         Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1-3 от 29.12.2022 на сумму 378 706,44 руб.;

2.         Справка стоимости выполненных работ по форме КС-3 № 1 от 29.12.2022 на сумму 378 706,44 руб.

Однако, Заказчик тем же днем 30.12.2022 безосновательно отклонил в ЕИС Второй Документ о приемке, а именно Счет-фактуру № 00000102 от 30.12.2022 на сумму 5 252 132 (пять миллионов двести пятьдесят две тысячи сто тридцать два) рубля 32 копейки.

25.01.2023 При совместном проведении Заказчиком приемки выполненных работ с представителем от Подрядчика ООО «ФСК МОДУЛЬ» и представителями Департамента культуры (пользователями объектов) был составлен и подписан с трех сторон Акт № б/н от 25.01.2023, содержащий сведения об устранении выявленных недостатков, которые устранены Подрядчиком в полном объеме.

30.01.2023 Государственный Заказчик, в Единой информационной системе (ЕИС) в нарушение требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», разместил принятое от 19.01.2023 незаконное решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, а именно после прекращения действия Государственного Контракта № 126/22 от 31.10.2022.

31.01.2023 При дополнительном совместном проведении Заказчиком приемки выполненных работ с представителем от Подрядчика ООО «ФСК МОДУЛЬ» и представителями Департамента культуры (пользователями объектов) был составлен и подписан с трех сторон Акт № б/н от 31.01.2023 в соответствии с которым установлено, что недостатки устранены в полном объеме, о чем дополнительно ООО «ФСК МОДУЛЬ» направило Письмо № 116-2023 от 31.01.2023 в адрес Заказчика об устранении выявленных дефектов в ходе выполнения работ.

06.02.2023 ООО «ФСК МОДУЛЬ» направило в адрес Заказчика Возражение на решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в котором требовало отменить Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, а также оплатить выполненные работы.

10.02.2023 от Заказчика был получен ответ на вышеуказанное Возражение, в котором последний сообщил, что основания для отмены Решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта отсутствуют.

Таким образом, фактически Подрядчиком были закуплены материалы и выполнены работы по текущему ремонту помещений и входных групп Департамента культуры города Москвы ул. Петровка, д. 17, стр. 9, ул. Петровка, стр. 11, ул. Петровка, д. 17, стр. 13 на сумму 5 630 838 (пять миллионов шестьсот тридцать тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 76 копеек, что подтверждается составленными Заказчиком по согласованию с куратором объекта документами по форме КС-2 и КС-3.

30.12.2023 ООО «ФСК МОДУЛЬ» разместило в ЕИС подписанную со своей стороны Счет-фактуру № 00000102 от 30.12.2022 на общую сумму 5 252 132 (пять миллионов двести пятьдесят две тысячи сто тридцать два) рубля 32 копейки за выполнение работ по текущему ремонту помещений и входных групп Департамента культуры города Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр.9, ул. Петровка, д. 17, стр. 11.

Однако, Заказчиком, вышеуказанный документ был отклонен, не был подписан, а также по нему не была произведена оплата.

Исходя из вышеизложенного, ООО «ФСК МОДУЛЬ», в соответствии с пунктами 4.1, 4.3, 7.1, 7.7.2, 7.8, 7.10 Государственного Контракта № 126/22 от 31.10.2022, ввиду направления 29.12.2022 в адрес Заказчика всей отчетной документации, содержащей в себе информацию о надлежаще выполненных работах, а также размещение вышеуказанной информации в Единой информационной системе (ЕИС), начисляет неустойку, начиная с 20.01.2023 по 22.02.2023.

В соответствии с п. 7.7.2 Размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств Заказчика по Контракту составляет 5 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

Итого сумма неустойки по состоянию на 22.02.2023 года составляет: 44 643,12+5000,00 = 49 643 (Сорок девять тысяч шестьсот сорок три) рубля 12 копеек.

До настоящего времени Государственным казенным учреждением города Москвы "Технический центр Департамента культуры города Москвы" не выполнены обязательства по оплате задолженности и неустойки (пеней, штрафов) за выполненные

Истцом работы, на общую сумму 5 301 775,44 (Пять миллионов триста одна тысяча семьсот семьдесят пять) рублей 44 копейки.

В соответствии с частью 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с частью 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с частью 1 статьи 781 ГК РФ Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

При  этом суд считает доводы ответчика несостоятельными,  поскольку они не подтверждены документально .

Как пояснил  Подрядчик,  сам заказчик долго согласовывал материалы,  необходимость замены которых возникла в связи с отсутствием согласованных материалов иностранного производства. Кроме того,  заказчик о зачете не заявлял,  встречный иск не предъявил.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.   110, 123, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с   Государственного казенного учреждения города Москвы "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ" (ОГРН: 1077746304470)  в пользу  общества с ограниченной ответственностью  "ФСК МОДУЛЬ" (ОГРН: 1165001051742) 5 252 132 руб. 32 коп. задолженности, 49 643 руб. 12 коп. неустойки,  49 509 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

 

Судья:

А.В. Мищенко