ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-232464/22-5-1740

20 июля 2023года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения оглашена 02 июня 2023 года

Полный текст решения изготовлен 20 июля 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Киселевой Е.Н., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Добрыгиным А.В.

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску Общества с ограниченной ответственностью «ММК Континент» (140204, Московская область, Воскресенск город, Виноградово поселок, Центральная улица, дом 16, корпус В, ОГРН: 1185022001889, дата присвоения ОГРН: 26.03.2018, ИНН: 5005065233)

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «Горсвязь» (117342, город Москва, Бутлерова улица, дом 17Б, этаж/помещение/комната/офис/к. 3/XII/86/5/107, ОГРН: 1107746348874, дата присвоения ОГРН: 29.04.2010, ИНН: 7705916620)

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Пиллар-Строй» (115522, город Москва, Пролетарский проспект, дом 17, корпус 1, э 1 п II ком 2 оф А4С, ОГРН: 1197746178013, Дата присвоения ОГРН: 11.03.2019, ИНН: 7724467963)

о взыскании долга в размере 581 054 руб. 54 коп., из них 429 257 руб. 40 коп.- долг по договору № 13ГС/2021 от 01.09.2021 года, 151 797 руб. 14 коп. – неустойка

по встречному иску: Общества с ограниченной ответственностью «Горсвязь» (117342, город Москва, Бутлерова улица, дом 17Б, этаж/помещение/комната/офис/к. 3/XII/86/5/107, ОГРН: 1107746348874, дата присвоения ОГРН: 29.04.2010, ИНН: 7705916620)

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «ММК Континент» (140204, Московская область, Воскресенск город, Виноградово поселок, Центральная улица, дом 16, корпус В, ОГРН: 1185022001889, дата присвоения ОГРН: 26.03.2018, ИНН: 5005065233)

о взыскании неустойки в размере 390 266 руб. 47 коп.

в заседании приняли участие:

согласно протоколу судебного заседания

в судебном заседании 26.05.2023г., судом в порядке ст. 163 АПК РФ, был объявлен перерыв до 02.06.2023г. до 10 час. 45 мин. 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ММК Континент» обратилось в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Горсвязь» о взыскании задолженности в размере 590 270 руб. 57 кон., в том числе: 429 257 руб. 40 коп. долг по договору № 13/ГС/2021 от 01.09.2021г., а также 161 013 руб. 17 коп. неустойка за нарушение срока оплаты, с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик ненадлежащим образом исполняет обязательства по оплате выполненных работ.

Определением от 11.01.2023г., судом, в порядке ст. 132 АПК РФ, принят к производству встречный иск Общества с ограниченной ответственностью «Горсвязь» к Обществу с ограниченной ответственностью «ММК Континент» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 390 266 руб. 47 коп.

Встречные требования мотивированы ненадлежащим исполнением истцом обязательств по договору в части соблюдения сроков выполнения работ.

Определением от 26.04.2023г. судов в порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Пиллар-Строй» (115522, город Москва, Пролетарский проспект, дом 17, корпус 1, э 1 п II ком 2 оф А4С, ОГРН: 1197746178013, Дата присвоения ОГРН: 11.03.2019, ИНН: 7724467963).

Истец заявленные требования поддержал, против удовлетворения встречного иска возражал.

Ответчик, заявленные требования не признал по доводам, изложенным в письменном отзыве на иск, встречные исковые требования поддержал.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, о времени и месте проведения судебного заседания извещен должным образом в порядке ст. ст. 121-123 АПК РФ, судебное заседание проводится в отсутствие лица, участвующего в деле, в порядке ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что первоначальные и встречные исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «Горсвязь» (подрядчик, ответчик) и ООО «ММК Континет» (субподрядчик, истец) был заключен договор № 13/ГС/2021 от 01.09.2021г., в соответствии с п. 1.1 которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительно-монтажные работы, в соответствии с заказом ответчика и условиями договора.

При этом согласно п. 1.3 договора ответчик обязался своевременно принимать и оплачивать результаты выполненных истцом работ.

Пунктом 1.2 договора установлено, что конкретный перечень работ по договору, объекты, на которых они выполняются, сроки их выполнения и стоимость определяются в заказах к договору, являющихся его неотъемлемой частью.

Так, стороны 01.09.2021г. согласовали следующие заказы:

Заказ-наряд № 1 на сумму 679 257 руб. 40 коп.;

Заказ-наряд № 2 на сумму 599 705 руб. 00 коп.;

Заказ-наряд № 3 на сумму 712 993 руб. 40 коп.;

Заказ-наряд № 4 на сумму 738 795 руб. 00 коп.;

Заказ-наряд № 5 на сумму 630 000 руб. 00 коп.

Работы были выполнены истцом своевременно и в полном объеме, что подтверждается подписанным обеими сторонами справкой о стоимости выполненных работ № 1 (форма КС-3) от 31.10.2021г. и актом о приемке выполненных работ № 1 (форма КС-2) от 31.10.2021г. Претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало, акт и справка подписаны последним без замечаний.

Всего истец выполнил работ на общую сумму 679 257 руб. 40 коп.

В соответствии с п. 8.2 договора ответчик обязуется оплатить истцу выполненные работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания КС-2 и КС-3.

С учетом того, что документы были подписаны 31.10.2021г., то последним днем оплаты считается 12.11.2021г.

Между тем, ответчик произвел первую частичную оплату на сумму 100 000 руб. 00 коп. платежным поручением № 78 от 26.01.2022г., а вторую частичную оплату на сумму 150 000 руб. 00 коп. платежным поручением № 512 от 25.05.2022 г. Иных платежей от ответчика не поступало.

Таким образом, как указывает истец, задолженность ответчика за выполненные работы по договору составляет 429 257 руб. 40 коп.

Согласно п. 11.2 договора в случае нарушения подрядчиком сроков оплаты выполненных работ, он обязан выплатить субподрядчику по его письменному требованию неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательства, но не более 10 % от суммы задолженности.

Согласно расчету истца размер неустойки составляет 161 013 руб. 17 коп. за период с 16.10.2021г. по 07.09.2022г.

Согласно ст. 13 договора, стороны пытаются решить все возникающие разногласия путем переговоров, а в случае недостижения взаимного согласия стороны обращаются в Арбитражный суд г. Москвы, с соблюдением обязательного претензионного порядка, при этом срок ответа на претензию составляет 10 дней с момента со получения.

06 сентября 2022г. истец направил ответчику претензию, которая оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения, в связи с чем, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом 1 ст. 711 ГК РФ установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с п.п. 1 и 4 ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Возражая против удовлетворения исковых требований ответчик указал, что не оспаривает факт выполнения истцом работ (наличия задолженности) на сумму 429 257 руб. 40 коп. Вместе с тем, ответчик не согласен с приведенным истцом расчетом неустойки, поскольку акты КС-2 и справки КС-3 подписаны ответчиком в системе электронного документооборота 21.01.2022г. согласно данным ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур».

Таким образом, по мнению ответчика, срок на оплату работ начинает исчисляться с 21.01.2022г. и истекает 04.02.2022г., то есть начисление неустойки правомерно с 05.02.2022г.

Согласно контррасчету ответчика, размер неустойки за период с 05.02.2022г. по 15.11.2022г. с учетом произведенных платежей и установленного договором ограничения размера неустойки 10%, составляет 57 925 руб. 74 коп.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой (штрафом, пеней), которой, согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Расчет и контррасчет сторон судом проверены и признаны неверными.

В соответствии с п. 8.2 договора оплата выполненных работ по договору производится в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, если иной срок не установлен законом.

Акт КС-2 и справка КС-3 № 1 от 31.10.2021г. была направлена истцом через электронную систему документооборота и получена ответчиком 22.12.2021г. Документация подписана ответчиком 21.01.2022г.

Суд считает правомерным исчислять срок на оплату в 10 рабочих дней от 22.12.2021г., то есть по 12.01.2022г.

Таким образом, неустойка подлежит начислению с 13.01.2022г. по заявленную истцом дату – 07.09.2022г. При этом, необходимо учитывать произведенную ответчиком частичную оплату 26.01.2022г. на сумму 100 000 руб. и 25.05.2022г. на сумму 150 000 руб., с исключением периода действия моратория, введенного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 №497 «О введении моратория на возбуждении дел о банкротстве по заявлениям подаваемым кредиторами» с 01.04.2022г. по 01.10.2022г.

Согласно произведенному судом расчету, размер подлежащей начислению и взысканию с ответчика неустойки составляет 46 582 руб. 07 коп. за период с 13.01.2022г. по 31.03.2022г. Оснований для освобождения ответчика от ответственности за нарушение срока оплаты или снижения размера неустойки, судом не установлено.

Начисление истцом неустойки с 16.10.2021г. исходя из факта направления ответчику фотоотчета, является необоснованным и противоречащим положениям п. 8.2 договора.

При изложенных обстоятельствах, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в части долга в размере 429 257 руб. 40 коп., неустойки в размере 46 582 руб. 07 коп. В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

Ответчиком заявлены встречные исковые требования о взыскании с истца неустойки за нарушение срока выполнения работ в размере 390 266 руб. 47 коп.

В обоснование встречных требований ответчик указывает, что согласно п. 6.1 договора, субподрядчик по завершении выполнения отдельных этапов и/или всех работ, предусмотренных заказом, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения их выполнения уведомляет по электронной почте подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ с указанием даты и времени сдачи-приемки результата работ и направляет в адрес подрядчика акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные со стороны субподрядчика.

Таким образом общий срок, в течение которого субподрядчиком выполнялись работы, исчисляется до момента фактического предоставления субподрядчиком акта приемки, вне зависимости от того, каким числом датирован сам акт.

Согласно п. 11.7 договора, в случае нарушения субподрядчиком сроков выполнения работ или сроков устранения недостатков в выполненных работах по настоящему договору, субподрядчик обязан выплатить подрядчику по его письменному требованию неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств.

В процессе исполнения обязательств ООО «ММК Континет» были допущены существенные нарушения сроков выполнения работ. В связи с тем, что работы выполнялись и оплачивались в рамках отдельных, не связанных между собою Заказ-нарядов, расчет неустойки также приводится отдельно по каждому нарушению.

Так, 01.09.2021г. стороны согласовали Заказ-наряд №1, согласно п. 1 которого субподрядчику поручено выполнение работ, перечень которых оформлен в виде таблицы. Общая стоимость работ, как следует из подытога таблицы, составляет 679 257,40 рублей. В качестве конечного срока выполнения работ в п. 2 Заказ-наряда стороны предусмотрели 15.09.2021г.

Между тем, фактически выполнение указанных работ окончено субподрядчиком 22.12.2021, что подтверждается датой направления ООО «ММК Континет» акта приемки в адрес ООО «Горсвязь», указанной в системе электронного документооборота АО «ПФ «СКБ Контур».

Таким образом период просрочки исполнения работ по Заказу №1 от 01.09.2021г. составил 98 календарных дней, в связи с чем, за период с 16.09.2021г. по 22.12.2021г. подлежит начислению неустойка в размере 66 567,23 рублей.

Также, 01.09.2021г. стороны согласовали стороны согласовали Заказ-наряд № 2 на сумму 599 705 руб. 00 коп., Заказ-наряд № 3 на сумму 712 993 руб. 40 коп., Заказ-наряд № 4 на сумму 738 795 руб. 00 коп. и Заказ-наряд № 5 на сумму 630 000 руб. 00 коп.

Срок выполнения работ согласован сторонами в п. 2 Заказ-нарядов и составляет по Заказ-наряду № 4 и Заказ-наряду № 5 – 15.09.2021г., по Заказ-наряду № 4 и Заказ-наряду № 5 – 30.09.2021г.

Между тем, в отведенный срок указанные работы субподрядчиком не были выполнены. 21.01.2022, в связи со значительным нарушением срока выполнения работ, руководствуясь ст. 715 ГК РФ, ООО «Горсвязь» в одностороннем порядке отказалось от соответствующих Заказов, уведомив субподрядчика о своем решении письмом, направленным по электронной почте.

Таким образом период просрочки исполнения работ по Заказ-наряду №2 и № 3 от 01 сентября 2021г. составил 128 календарных дней, в связи с чем, за период с 16.09.2021г. по 21.01.2022г. подлежит начислению неустойка:

- в размере 76 762,24 рублей по заказ-наряду № 2;

- в размере 91 263,16 рублей по заказ-наряду № 3;

Период просрочки исполнения работ по Заказ-наряду № 4 и № 5 от 01 сентября 2021г. составил 113 календарных дней, в связи с чем, за период с 01.10.2021г. по 21.01.2022г. подлежит начислению неустойка:

- в размере 83 483,84 рублей по заказ-наряду № 4;

- в размере 71 190 рублей по заказ наряду № 5.

Поскольку истец требования ответчика об оплате неустойки не исполнил, ответчик обратился в суд со встречным иском.

Возражая против удовлетворения встречных исковых требований истец указал, что подрядчик нарушил сроки передачи документации необходимой для того, чтобы субподрядчик мог начать производство работ. Как следует из письма, полученного посредствам электронной почты, подрядчик передал субподрядчику всю необходимую документацию по заказ-наряду № 1 22.09.2022г., что на 7 дней позже конечного срока выполнения работ. По заказ-нарядам №№ 2-5 документация не передавалась.

С учетом задержки исполнения Подрядчиком обязанное! и по предоставлению необходимой документации сроки начала п конца работ соответственно сдвигаются па 15 дней: срок-начала работ - 23.09.2021 г., а конечный срок выполнения работ - 07.10.2021 г.

При этом, работы на объекте МО, Кашира, Садовая ул., в районе д. 32А были закончены 30.09.2021г., фотоотчет был отправлен 06.10.2021г.

Работы на объекте МО, Кашира, ул. Ильича, в районе д. 13 были закопчены 30.09.2021г., фотоотчет был отправлен 06.10.2021г.

Работы на объекте МО, г.о. Домодедово, г. Домодедово, микрорайон были закончены 25.10.2021г., фотоотчет был отправлен 04.11.2021г.

Работы на объекте МО, г.о. Люберцы, р.н. Томилино были закончены 20.10.2021г., фотоотчет был отправлен 04.11.2021г.

Субподрядчик по завершении выполнения отдельных этапов и/или всех работ, предусмотренных заказом, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момент завершения их выполнения уведомляет по электронной почте подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ с указанием даты и времени сдачи-приемки результата работ и направляет в адрес подрядчика акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные со стороны субподрядчика. Подрядчик осуществляет приемку результата выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления субподрядчиком им результата выполненных работ и документов (п. 6.1. договора). При этом к уведомлению о завершении выполнения отдельного вида работ субподрядчик в обязательном порядке прилагает фотоотчет, выполненный в соответствии заказом (п. 1) и с соблюдением требований регламента по фотоотчету.

Также истец пояснил, что работы по заказ-нарядам №№ 2-5 выполнены третьим лицом по самостоятельному договору с ответчиком до согласования заказ-нарядов №№ 2-5 с истцом, что следует из рабочего чата.

Между тем, суд отмечает, что в материалах дела отсутствуют бесспорные доказательства выполнения третьим лицом именно тех работ, которые предусмотрены спорными заказ-нарядами.

Однако, суд учитывает довод истца об отсутствии у ответчика в течение длительного периода, а именно до обращения истца с настоящим иском в суд, интереса к выполнению работ по заказ-нарядам №№ 2-5.

Кроме того, в соответствии с п. 1.5. договора, работы выполняются субподрядчиком из материалов подрядчика. В этом случае давальческие материалы передаются подрядчиком и принимаются субподрядчиком по накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15.

Любые отступления, и том числе отступления от требований, указанных в Заказе, проектной (рабочей) документации, технических условиях, исходной документации и согласованиях уполномоченных организаций (органов власти), в одностороннем порядке субподрядчиком не допускаются (п. 1.6. договора).

Для выполнения субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим договором, подрядчик обязуется до начала работ предоставить субподрядчику необходимую документацию (п. 4.1 договора).

Для выполнения субподрядчиком работ, предусмотренных договором, подрядчик обязуется определять совместно с субподрядчиком в период строительства объемы выполненных надлежащим образом работ и подписывать акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), составленные на основании утвержденной рабочей документации и фактически выполненных работ.

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ в соответствии с требованиями проектной документации и получить подтверждение от заказчика по следующим пунктам: оборудование получено, работы по монтажу завершены, фотоотчет по монтажу принят заказчиком, оборудование сдано на склад заказчика. Подрядчик несет гарантийную ответственность за выполненные работы и предоставленные материалы в течении 24 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ (п. 1 Заказов №№ 1-5 от 01.09.2022г.).

Документация необходимая субподрядчику для выполнения работ по Заказам №№ 2-5 от 01.09.2021г. подрядчиком передана не была, в связи с чем, в силу п. 3.19 договора, субподрядчик не имел права приступать к производству работ на объектах.

Так, например, ордер (разрешение) - документ, являющийся основанием для проведения земляных работ с заглублением более 0,5м, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве, согласно п. 1.1. Постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 г. №284-ПП, является тем документом без которого невозможно приступить к строительным земляным работам.

В силу п. 2 ст. 401 ГК РФ, отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Пунктом 1 ст. 406 ГК РФ предусмотрен, что кредитор, считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных договором, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Достаточных и допустимых доказательств, опровергающих установленные и фактические обстоятельства дела, а также доводы истца суду не представлено.

Доводы ответчика о том, что какая-либо документация для выполнения работ подрядчиком не предоставляется и не является необходимой, опровергаются условиями договора, а также письмом ответчика от 22.09.2021г. о передаче объекта в СМР (предоставлении документации для выполнения работ).

Также суд считает, что в рассматриваемом случае, с учетом фактических обстоятельств дела, сам по себе факт не обращения истца к ответчику в порядке ст. 716 ГК РФ, не является основанием для отклонения его доводов о встречном неисполнении обязательств по договору и отсутствии у ответчика интереса к выполнению спорных работ.

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу об отсутствии вины истца в нарушении сроков выполнения работ по заказ-нарядам № 2-5, и об отсутствии оснований для применения к нему меры гражданско-правовой ответственности в виде неустойки в размере 323 699 руб. 24 коп.

В отношении требований ответчика о взыскании неустойки за просрочку исполнения работ по Заказу №1 от 01.09.2021г. суд отмечает следующее.

Ответчик указывает, период просрочки составил 98 календарных дней, в связи с чем, за период с 16.09.2021г. по 22.12.2021г. подлежит начислению неустойка в размере 66 567,23 рублей.

Между тем, суд считает расчет подлежащим корректировке исходя из доводов истца о предоставлении документации для выполнения работ 22.09.2021г., в связи с чем, срок выполнения работ составил 13.10.2021г.

Доводы истца о фактическом выполнении работ ранее составления и направления акта, что подтверждается фотоотчетом, судом отклоняются как несоответствующие условиям договора.

Таким образом, согласно расчету суда, обоснованным размером неустойки за просрочку исполнения работ по Заказу №1 от 01.09.2021г. является 47 548 руб. 02 коп. Оснований для освобождения истца от ответственности за нарушение срока выполнения работ или снижения размера неустойки, судом не установлено.

При изложенных обстоятельствах, суд считает встречные исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в части 47 548 руб. 02 коп. неустойки. В остальной части встречные исковые требования удовлетворению не подлежат.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обязательства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований.

Расходы по оплате госпошлины распределены в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Согласно п. 5 ст. 170 АПК РФ, резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований, указание на распределение между сторонами судебных расходов, срок и порядок обжалования решения. При полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.

В связи с чем судом в резолютивной части решения производится зачет встречных исковых требований.

С учетом изложенного, на основании ст. ст. 307, 309, 310, 330, 333, 702, 708, 711, ГК РФ и руководствуясь ст. ст. 11, 12, 65, 110, 132, 167-171, 176 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Горсвязь» (ОГРН: 1107746348874, ИНН: 7705916620) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ММК Континент» (ОГРН: 1185022001889, ИНН: 5005065233) долг 429 257 (четыреста двадцать девять тысяч двести пятьдесят семь) руб. 40 коп., неустойку 46 582 (сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят два) руб. 07 коп.

В остальной части исковых требований отказать.

 

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ММК Континент» (ОГРН: 1185022001889, ИНН: 5005065233) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Горсвязь» (ОГРН: 1107746348874, ИНН: 7705916620) неустойку 47 548 (сорок семь тысяч пятьсот сорок восемь) руб. 02 коп., а также 1 299 (одна тысяча двести девяносто девять) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части встречных исковых требований отказать.

 

Произвести зачет встречных требований, в результате которого

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Горсвязь» (ОГРН: 1107746348874, ИНН: 7705916620) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ММК Континент» (ОГРН: 1185022001889, ИНН: 5005065233) задолженность 426 992 (четыреста двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто два) руб. 45 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ММК Континент» (ОГРН: 1185022001889, ИНН: 5005065233) в доход федерального бюджета Российской Федерации 2 872 (две тысячи восемьсот семьдесят два) руб. 00 коп. госпошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Горсвязь» (ОГРН: 1107746348874, ИНН: 7705916620) в доход федерального бюджета Российской Федерации 11 933 (одиннадцать тысяч девятьсот тридцать три) руб. 00 коп. госпошлины.

 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

 

Судья                                                                                              Е.Н. Киселева