Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград  «21 февраля 2023г. Дело № А12-14487/2022  

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Суханова А.А., при ведении протокола  судебного заседания помощником судьи Баниной Т.И., рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по исковому заявлению федерального государственного унитарного  предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (129515, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  публичному акционерному обществу «Россети Юг» (344002, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  понуждении исполнить обязательства и взыскании неустойки.  

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора - Управления Федеральной антимонопольной службы по  Волгоградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 400005, 

<

...>) прокуратуры Волгоградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, 400075, 

<

...>), ООО «Машкомплект»  (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, 603001, Нижегородская обл., г. нижний  Новгород, ул. Рождественская д.18, п.3) Нижне-Волжское управление федеральной  службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ИНН 3444046034  ОГРН: 

<

***>, 400074, 

<

...>)  

по встречному исковому заявлению публичного акционерного общества «Россети Юг»  (344002, 

<

...>, ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к федеральному государственному унитарному  предприятию «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (129515, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об  обязании подписать акты об осуществлении технологического присоединения,  

при участии в судебном заседании: 

от истца по первоначальному иску – ФИО1, представитель по доверенности № 1 от  28.12.2022, диплом обозревался.  

от ответчика –ФИО2, представитель по доверенности № 25-23 от 01.01.2023;  ФИО3, представитель по доверенности № 566-22 от 01.01.2023, диплом обозревался,  ФИО4, представитель по доверенности № 409 от 01.01.2023г., диплом  обозревался,  

от третьих лиц - не явились, извещены. 

Руководствуясь статьями 102, 110, 112, 167 - 170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции  

решил:

Первоначальный иск удовлетворить в части. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Юг» (344002, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления решения суда в законную  силу исполнить в натуре обязательства, установленные Договорами об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям № 34-1-19-00489483/13-552-19  от 16.09.2020, № 34-1-19-00489701/13- 550-19 от 16.09.2020, № 34-1-19-00492815/13-18-20  от 16.09.2020, № 34-1-19-00489607/13- 518-19 от 16.09.2020, № 34-1-19-00489713/13-55119 от 16.09.2020, № 34-1-19-00489035/13- 554-19 от 16.09.2020, № 34-1-19-00489709/13549-19 от 16.09.2020, заключенными с федеральным государственным унитарным  предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (129515, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) , а  именно: осуществить комплекс мероприятий для обеспечения II (второй) категории  надежности электроснабжения следующие объектов Федерального государственного  унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ИНН /  ОГРН: 

<

***>/

<

***>):  

- техническое здание ПРС-3, находящееся по адресу: Россия, Волгоградская  область, Чернышковский район, территория ФИО5 ской сельской администрации, 0,6  км западнее х. ФИО5, на земельном участке кадастровый номер № 34:33:110008:0005  (Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям   № 34-1-19-00489035/13-554-19 от 16.09.2020);  

- объект НЦТВ Романовка, находящийся по адресу: Россия, Волгоградская область,  Жирновский район, с. Романовка, промышленная зона северной части села, участок 2, на  земельном участке кадастровый номер № 34:07:010003:178 (Договор об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям № 34-1-19-00489713/13-551-19 от  16.09.2020);  

 - объект НЦТВ Мирный, находящийся по адресу: Россия, 

<

...>, на земельном участке кадастровый  номер № 34:20:110101:764 (Договор об осуществлении технологического присоединения  к электрическим сетям № 34-1-19-00489701/13-550-19 от 16.09.2020);  

- объект РТС Успенка, находящийся по адресу: Россия, Волгоградская область,  Нехаевский район, в 4.2 м от х. Успенка, ул. Центральная, 67, на земельном участке  кадастровый номер № 34:17:010003:0006 (Договор об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям № 34-1-19-00489709/13-549-19 от 16.09.2020);  

- объект НЦТВ Образцы, находящийся по адресу: Россия, Волгоградская область,  Фроловский район, п. Образцы, на земельном участке кадастровый номер   № 34:32:010006:1415; (Договор об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям № 34-1-19- 00489607/13-548-19 от 16.09.2020);  

- объект НЦТВ Новониколаевский, находящийся по адресу: Россия, 

<

...>, на  земельном участке кадастровый номер № 34:20:030105:1021 (Договор об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям № 34-1-19-00492815/13-18-20 от  16.09.2020);  

- объект НЦТВ Комсомольский, находящийся по адресу: Россия, 

<

...> на земельном участке  кадастровый номер № 34:23:130001:386 (Договор об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям № 34-1-19-00489483 от 16.09.2020)путем:  

а) проектирования и строительства линий электропередач (ЛЭП) до границ  земельных участков Федерального государственного унитарного предприятия  «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ИНН / ОГРН: 

<

***>/

<

***>):  

- кадастровый номер № 34:33:110008:0005, категория земель: Земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,  информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,  безопасности и земли иного специального назначения, площадью 19 000 кв. м,  располагающегося по адресу: Волгоградская область, р-н. Чернышковский, х. ФИО5  (Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям   № 34-1-19-00489035/13-554-19 от 16.09.2020);  

- кадастровый номер № 34:07:010003:178, категория земель: Земли населённых  пунктов, площадью 400 кв. м, располагающегося по адресу: Волгоградская область, р-н  Жирновский, с. Романовка, промышленная зона северной части села, участок № 2  (Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям   № 34-1-19- 00489713/13-551-19 от 16.09.2020);  

- кадастровый номер № 34:20:110101:764, категория земель: Земли населённых  пунктов, площадью 340 кв. м, располагающегося по адресу: Волгоградская обл., р-н  Новониколаевский, п. Мирный, ул. Крайняя, 7а (Договор об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям № 34-1-19-00489701/13-550-19 от  16.09.2020);  

- кадастровый номер № 34:17:010003:0006, категория земель: Земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,  информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,  безопасности и земли иного специального назначения, площадью 31 093 кв. м,  располагающегося по адресу: Волгоградская обл., р- н Нехаевский, х. Успенка.  Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  улица Центральная, 67. Участок находится примерно в 4,2 км от ориентира по  направлению на северо-восток (Договор об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям № 34-1-19-00489709/13-549-19 от 16.09.2020);  

- кадастровый номер № 34:32:010006:1415, категория земель: Земли населённых  пунктов, площадью 195 кв. м, располагающегося по адресу: Волгоградская обл., р-н  Фроловский, п. Образцы (Договор об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям № 34-1-19-00489607/13-548-19 от 16.09.2020);  

- кадастровый номер № 34:20:030105:1021, категория земель: Земли населённых  пунктов, площадью 324 кв. м, располагающегося по адресу: Волгоградская обл., 

<

...> (Договор об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям № 34-1-19-00492815/13-18-20 от  16.09.2020); - с кад. № 34:23:130001:386, категория земель: Земли населённых пунктов,  площадью 195 кв. м, располагающегося по адресу: Волгоградская обл., 

<

...> (Договор об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям № 34-1-19-00489483 от 16.09.2020).  

Типы проектируемых ЛЭП - кабельных или воздушных линий, конструктивные  особенности, трассы прохождения, способы строительства, сечения проводников, точки  присоединения, протяженности ЛЭП и центры питания определить в проекте, исключая  применение в качестве независимых резервных источников питания (центров питания)  ПАО «Россети Юг» либо иных территориальных сетевых организаций (при  необходимости): автономные резервные источники питания электрической энергией в  виде дизель-генераторных установок (ДГУ), дизельных электростанций (ДЭС),  бензиновых генераторов в любой конфигурации и с любыми техническими решениями, в  

том числе использование ДГУ, ДЭС, бензиновых генераторов с системами  бесперебойного питания;  

б) осуществления технологического присоединения энергопринимающих  устройств по II (второй) категории надежности электроснабжения и подключения  резервных вводов объектов Федерального государственного унитарного предприятия  «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ИНН / ОГРН: 

<

***>/

<

***>) к независимым резервным источникам электроснабжения (объектам  электросетевой инфраструктуры ПАО «Россети Юг» (ИНН / ОГРН: 

<

***>/

<

***>), иных территориальных сетевых организаций при необходимости) с  подписанием актов об осуществлении технологического присоединения после  выполнения полного комплекса мероприятий для обеспечения II (второй) категории  надежности электроснабжения объектов Федерального государственного унитарного  предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ИНН / ОГРН:  

<

***>/

<

***>);  

Взыскать с ПАО «Россети Юг» (ИНН / ОГРН: 

<

***>/

<

***>) в  пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Российская  телевизионная и радиовещательная сеть» (ИНН / ОГРН: 

<

***>/

<

***>)  неустойку за просрочку исполнения обязательств по договорам № 34-1-19-00489483/13552-19 от 16.09.2020, № 34-1-19-00489701/13-550-19 от 16.09.2020, № 34-1-1900492815/13-18-20 от 16.09.2020, № 34-1-19-00489607/13-518-19 от 16.09.2020, № 34-1-1900489713/13-551-19 от 16.09.2020, № 34-1-19-00489035/13-554-19 от 16.09.2020, № 34-119-00489709/13-549-19 от 16.09.2020 в сумме 65 583 руб. 07 коп., неустойку в размере 35  руб. 76 коп. ( по каждому из договоров) за каждый день просрочки начиная с 06.12.2022г.  до момента исполнения обязательств по договорам № 34-1-19-00489483/13-552-19 от  16.09.2020, № 34-1-19-00489701/13-550-19 от 16.09.2020, № 34-1-19-00492815/13-18-20 от  16.09.2020, № 34-1-19-00489607/13-518-19 от 16.09.2020, № 34-1-19-00489713/13-551-19 от  16.09.2020, № 34-1-19-00489035/13-554-19 от 16.09.2020, № 34-1-19-00489709/13-549-19 от  16.09.2020, судебную неустойку в случае неисполнения судебного акта, вступившего в  законную силу, в размере 100 000 руб. единовременно по каждому договору об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям - № 34-1-1900489483/13-552-19 от 16.09.2020, № 34-1-19-00489701/13-550-19 от 16.09.2020, № 34-119- 00492815/13-18-20 от 16.09.2020, № 34-1-19-00489607/13-518-19 от 16.09.2020, № 34-119- 00489713/13-551-19 от 16.09.2020, № 34-1-19-00489035/13-554-19 от 16.09.2020, № 341-19- 00489709/13-549-19 от 16.09.2020, судебную неустойку в размере 10 000 руб. за  каждую неделю по каждому договору об осуществлении технологического присоединения  к электрическим сетям- № 34-1-19-00489483/13-552-19 от 16.09.2020, № 34-1-1900489701/13- 550-19 от 16.09.2020, № 34-1-19-00492815/13-18-20 от 16.09.2020, № 34-1-1900489607/13- 518-19 от 16.09.2020, № 34-1-19-00489713/13-551-19 от 16.09.2020, № 34-119-00489035/13- 554-19 от 16.09.2020, № 34-1-19-00489709/13-549-19 от 16.09.2020;  расходы по уплате государственной пошлины в размере 44 000 руб.  

В удовлетворении требований в остальной части отказать. В удовлетворении встречных требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в установленный законом срок в Двенадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.  

СУДЬЯ А.А.Суханова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 09.12.2021 9:38:47Кому выдана Суханова Анна Алексеевна