Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-19182/2024

24 декабря 2024 г.

г. Ханты-Мансийск

Резолютивная часть решения объявлена 10 декабря 2024 г.

Полный текст решения изготовлен 24 декабря 2024 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Кубасовой Э.Л., при ведении протокола заседания секретарем Махмудовой М.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Администрации города Мегиона (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 07.07.1997, адрес: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания Нефтеотдача» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>, панель 18) о взыскании 3 999 998 руб. 99 коп.

в заседании суда приняли участие представители:

от истца –  не явились,

от ответчика – ФИО1 по доверенности от 30.01.2024 (с использованием системы веб-конференции),

установил:

Администрация города Мегиона (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания Нефтеотдача» (далее - ответчик) о взыскании  неустойки по 49-ти муниципальным контрактам на приобретение квартир в общей сумме 3 999 998 руб. 99 коп, в том числе:

1.         по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000491 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 74 731,24 рублей;

2.         по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000492 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 74 731,24 рублей;

3.         по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000493 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 74 731,24 рублей;

4.         по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000494 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 74 731,24 рублей;

5.         по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000495 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 74 731,24 рублей;

6.         по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000496 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 76 929,22 рублей;

7.         по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000497 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 74 731,24 рублей;

8.         по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000498 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 76 929,22 рублей;

9.         по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000499 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 76 929,22 рублей;

10.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000500 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 76 929,22 рублей;

11.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000501 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 76 929,22 рублей;

12.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000502 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 76 929,22 рублей;

13.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000503 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 76 929,22 рублей;

14.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000504 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 76 929,22 рублей;

15.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000505 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 76 929,22 рублей;

16.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000506 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 76 929,22 рублей;

17.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000507 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 76 929,22 рублей;

18.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000511 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 74 731,24 рублей;

19.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000512 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 74 731,24 рублей;

20.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000513 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 74 731,24 рублей;

21.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000514 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 74 731,24 рублей;

22.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000515 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 74 731,24 рублей;

23.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000516 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 78 028,20 рублей;

24.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000517 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 78 028,20 рублей;

25.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000518 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 80 226,18 рублей;

26.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000519 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 80 226,18 рублей;

27.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000520 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 80 226,18 рублей;

28.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000521 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 79 127,19 рублей;

29.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000522 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 79 127,19 рублей;

30.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000523 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 81 325,17 рублей;

31.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000524 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 81 325,17 рублей;

32.     по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000527 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 76 929,22 рублей;

33.     по муниципальному контракту от 05.12.2023 №0187300004523000554 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 76 382,31 рублей;

34.     по муниципальному контракту от 05.12.2023 №0187300004523000555 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 76 382,31 рублей;

35.     по муниципальному контракту от 05.12.2023 №0187300004523000556 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 81 998,66 рублей;

36.     по муниципальному контракту от 05.12.2023 №0187300004523000557 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 86 491,74 рублей;

37.     по муниципальному контракту от 05.12.2023 №0187300004523000558 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 123 559,63 рублей;

38.     по муниципальному контракту от 05.12.2023 №0187300004523000559 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 137 038,86 рублей;

39.     по муниципальному контракту от 18.12.2023 №0187300004523000569 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 78 628,85 рублей;

40.     по муниципальному контракту от 18.12.2023 №0187300004523000570 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 120 189,82 рублей;

41.     по муниципальному контракту от 13.02.2024 №0187300004523000592 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 76 382,31 рублей;

42.     по муниципальному контракту от 13.02.2024 №0187300004523000593 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 76 382,31 рублей;

43.     по муниципальному контракту от 13.02.2024 №01873000045^3000595 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 112 326,93 рублей;

44.     по муниципальному контракту от 13.02.2024 №0187300004523000596 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 112 326,93 рублей;

45.     по муниципальному контракту от 13.02.2024 №0187300004523000597 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 112 326,93 рублей;

46.     по муниципальному контракту от 13.02.2024 №0187300004523000594 за период с 01.04.2024 по 22.05.2024 в размере 79 752,12 рублей;

47.     по муниципальному контракту от 08.04.2024 №0187300004524000059 за период с 01.05.2024 по 22.05.2024 в размере 62 331,78 рублей;

48.     по муниципальному контракту от 08.04.2024 №0187300004524000060 за период с 01.05.2024 по 22.05.2024 в размере 62 331,78 рублей;

49.     по муниципальному контракту от 22.04.2024 №0187300004524000084 за период с 01.05.2024 по 22.05.2024 в размере 62 331,78 рублей.

В качестве правового обоснования для удовлетворения заявленных требований истец указал статьи 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Определением от 24.09.2024 иск принят к производству, предварительное и основанное судебные заседания назначены на 11.11.2024. 

От ответчика в суд поступил отзыв (зарегистрирован канцелярией суда 08.11.2024).

От истца подступили письменные возражения на отзыв (зарегистрированы канцелярией суда 05.12.2024).

Определением суда от 11.11.2024 судебное разбирательство назначено на 10.12.2024.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте заседания суда в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично путем опубликования определения арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», истец явку представителя в судебное заседание  не обеспечил. 

Неявка или уклонение лиц, участвующих в деле, от участия при рассмотрении дела не свидетельствует о нарушении предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации гарантий защиты и не может служить препятствием для рассмотрения дела по существу.

Представитель ответчика в судебном заседании иск не признал, поддержал доводы отзыва. 

В силу статей 71, 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности.

Оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Суд, исследовав с учетом требований статей 65, 67, 68, 71 АПК РФ материалы дела, приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, между истцом (заказчик) и ответчиком (поставщик) были заключены сорок девять муниципальных контрактов на приобретение квартир, которые будут созданы в будущем.

Договоры аналогичны по своему содержанию, отличие по предмету, цене контракта, а также размером суммы обеспечения исполнения контракта. 

Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе заключения и исполнения контракта, за исключением случаев, установленных и (или) документацией о закупке и предусмотренных законодательством Российской Федерации (пункт 2.1 контрактов).

На основании пункта 8.8 контрактов, в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Ответчик в нарушение подпункта 3.4. пункта 3 муниципальных контрактов, не передал заказчику созданное имуществ в течение 10 рабочих дней после получения поставщиком документа о государственной регистрации права собственности на имущество по Акту приема-передачи жилого помещения. 

Фактически жилые помещения переданы истцу 23.05.2024, что подтверждено актами приема-передачи жилых помещений.

Истец начислил договорную неустойку, в соответствии с пунктом 8.8 контрактов, за период просрочки с 01.04.2024 по 22.05.2024, размер которой в общей сумме составил 3 999 998 руб. 99 коп. 

Истец направил в адрес ответчика требование об уплате пеней от 15.07.2024 исх.№09/3922,  а также вручил ответчику указанную претензию нарочно.

Поскольку в добровольном порядке ответчик требования не исполнил, истец обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с настоящим иском.

Контракты являются смешанными договорами, правоотношения по которым регулируются нормами раздела 3 части 1, параграфов 1, 7 главы30 ГК РФ (общие положения об обязательствах, общие положения о купле – продаже, продажа недвижимости), Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), а так же условиями заключенных контрактов.

По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество (пункт 1 статьи 549 ГК РФ).

Контракты являются заключенными, поскольку имеют все необходимые данные, предмет определен, существенные условия согласованы, установленный законом порядок заключения соблюден.

Согласно статье 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить  за него определенную денежную сумму (цену).

В соответствии со статьёй 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса (пункт 1 статьи 457 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент:

вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;

предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом (пункт 1 статьи 458 ГК РФ).

Ответчик в нарушение подпункта 3.4. пункта 3 муниципальных контрактов, не передал заказчику созданное имуществ в течение 10 рабочих дней после получения поставщиком документа о государственной регистрации права собственности на имущество по Акту приема-передачи жилого помещения. 

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Согласно статье 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В силу статьи 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

В силу статьи 10 Закона № 214-ФЗ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки. 

На основании части 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

На основании пункта 8.8 контрактов, в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За нарушение договорного обязательства истец на основании пункта 8.8 контракта начислил ответчику неустойку за период 01.04.2024 по 22.05.2024 в общей сумме 3 999 998 руб. 99 коп. (расчет листы дела 10-12).

В подпункте «а» пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 указано, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке: если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «в» - «д» настоящего пункта.

Муниципальный контракт

сумма неустойки, руб.

сумма контракта, руб.

5% от суммы контракта

1. по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000491

74 731,24

2 694 636,00

134 731,80

2.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000492 

74 731,24

2 694 636,00

134 731,80

3.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000493 

74 731,24

2 694 636,00

134 731,80

4.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000494

74 731,24

2 694 636,00

134 731,80

5.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000495

74 731,24

2 694 636,00

134 731,80

6.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000496

76 929,22

2 773 890,00

138 694,50

7. по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000497

74 731,24

2 694 636,00

134 731,80

8.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000498

76 929,22

2 773 890,00

138 694,50

9.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000499

76 929,22

2 773 890,00

138 694,50

10. по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000500

76 929,22

2 773 890,00

138 694,50

11.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000501

76 929,22

2 773 890,00

138 694,50

12.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000502

76 929,22

2 773 890,00

138 694,50

13.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000503

76 929,22

2 773 890,00

138 694,50

14.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000504

76 929,22

2 773 890,00

138 694,50

15.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000505

76 929,22

2 773 890,00

138 694,50

16.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000506

76 929,22

2 773 890,00

138 694,50

17.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000507

76 929,22

2 773 890,00

138 694,50

18.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000511

74 731,24

2 694 636,00

134 731,80

19.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000512

74 731,24

2 694 636,00

134 731,80

20.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000513

74 731,24

2 694 636,00

134 731,80

21.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000514

74 731,24

2 694 636,00

134 731,80

22.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000515

74 731,24

2 694 636,00

134 731,80

23.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000516

78 028,20

2 813 517,00

140 675,85

24.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000517

78 028,20

2 813 517,00

140 675,85

25.по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000518

80 226,18

2 892 771,00

144 638,55

26. по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000519

80 226,18

2 892 771,00

144 638,55

27. по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000520

80 226,18

2 892 771,00

144 638,55

28. по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000521

79 127,19

2 853 144,00

142 657,20

29. по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000522

79 127,19

2 853 144,00

142 657,20

30. по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000523

81 325,17

2 932 398,00

146 619,90

31. по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000524

81 325,17

2 932 398,00

146 619,90

32. по муниципальному контракту от 10.10.2023 №0187300004523000527

76 929,22

2 773 890,00

138 694,50

33. по муниципальному контракту от 05.12.2023 №0187300004523000554

76 382,31

2 773 890,00

138 694,50

34. по муниципальному контракту от 05.12.2023 №0187300004523000555

76 382,31

2 773 890,00

138 694,50

35.по муниципальному контракту от 05.12.2023 №0187300004523000556

81 998,66

2 956 682,50

147 834,13

36. по муниципальному контракту от 05.12.2023 №0187300004523000557

86 491,74

3 118 692,50

155 934,63

37. по муниципальному контракту от 05.12.2023 №0187300004523000558

123 559,63

4 455 275,00

222 763,75

38. по муниципальному контракту от 05.12.2023 №0187300004523000559

137 038,86

4 941 305,00

247 065,25

39. по муниципальному контракту от 18.12.2023 №0187300004523000569

78 628,85

2 835 175,00

141 758,75

40. по муниципальному контракту от 18.12.2023 №0187300004523000570

120 189,82

4 333 767,50

216 688,38

41. по муниципальному контракту от 13.02.2024 №0187300004523000592

76 382,31

2 754 170,00

137 708,50

42. по муниципальному контракту от 13.02.2024 №0187300004523000593

76 382,31

2 754 170,00

137 708,50

43. по муниципальному контракту от 13.02.2024 №01873000045^3000595

112 326,93

4 050 250,00

202 512,50

44. по муниципальному контракту от 13.02.2024 №0187300004523000596

112 326,93

4 050 250,00

202 512,50

45. по муниципальному контракту от 13.02.2024 №0187300004523000597

112 326,93

4 050 250,00

202 512,50

46. по муниципальному контракту от 13.02.2024 №0187300004523000594

79 752,12

2 875 677,50

143 783,88

47. по муниципальному контракту от 08.04.2024 №0187300004524000059

62 331,78

5 312 368,00

265 618,40

48. по муниципальному контракту от 08.04.2024 №0187300004524000060

62 331,78

5 312 368,00

265 618,40

49.по муниципальному контракту от 08.04.2024 №0187300004524000084

62 331,78

5 312 368,00

265 618,40

Из приведенной таблицы следует, что по муниципальным контрактам начисленная неустойка, которую истец просит взыскать с ответчика, меньше 5 процентов от цены контракта.

Таким образом, неустойка по муниципальным контрактам в размере 3 999 998 руб. 99 коп.; подлежит списанию заказчиком в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783.

Исходя из заявленных предмета и основания исковых требований, установленных фактических обстоятельств и применения названных норм права, исковые требования подлежат отклонению. 

Статьёй 112 АПК РФ установлено, что вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

Поскольку в силу пункта 1 статьи 333.37. Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины, ее распределение судом не производится.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа в сроки, предусмотренные частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 25.12.2023  с учетом положений статьи 113 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

решил:

исковые требования Администрации города Мегиона оставить без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца после принятия решения.  Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через суд, принявший решение.  

Судья                                                                                                 Э.Л.Кубасова