Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-14876/2018

«18»

июля

2019 года

Резолютивная часть решения объявлена  

«15»

июля

2019 года

Решение изготовлено в полном объеме   

«18»

июля

2019 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» к предпринимателю ФИО2 о взыскании 97 178 рублей

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3 по доверенности

от ответчика: ФИО2 лично, ФИО4 по доверенности

от третьего лица: ФИО5, ФИО6 по доверенности

установил.  

Муниципальное казенное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» обратилось в суд с иском к предпринимателю ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения в сумме 97 178 рублей.

Определением суда от 13.05.2019 года к участию в деле в качестве третьего лица привлечена Администрация городского округа «Город Калининград».

Судом установлено.

Между МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» (заказчик) и предпринимателем ФИО2 (подрядчик) был заключен муниципальный контракт от 13.03.2018 года № 0335300000218000039.

По условиям контракта подрядчик обязался выполнить работы по ремонту и обустройству тротуара по ул. Дрожжевая в районе школы № 29 и детского сада № 131 в г. Калининграде в соответствии с технической документацией, а также условиями контракта и действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами. В соответствии с пунктом 3.1 контракта его цена согласована 1 005 948,56 рублей. Дополнительным соглашением от 10.05.2018 года № 1 к контракту стоимость работ увеличена до 1 106 390,56 рублей (+ 100 442 рубля). 

Работы по контракту приняты заказчиком по актам от 15.05.2018 года № 01, 02 и оплачены по платежному поручению от 17.05.2018 года № 73587 рублей в сумме 1 077 547 рублей.

25.05.2018 года между сторонами подписано соглашение о расторжении контракта в связи с несоответствием фактических объемов работ с проектными.

Между МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» (заказчик) и предпринимателем ФИО2 (подрядчик) был заключен муниципальный контракт от 25.01.2018 года № 0335300000217000618.

По условиям контракта подрядчик обязался выполнить работы по ремонту  тротуара к детской поликлинике по ул. Садовой 7-13 в г. Калининграде в соответствии с технической документацией, а также условиями контракта и действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами. В соответствии с пунктом 3.1 контракта его цена согласована 679 659,94 рублей. Дополнительным соглашением от 10.05.2018 года № 1 к контракту стоимость работ увеличена до 690 505,94 рублей (+ 10 846 рублей). 

Работы по контракту приняты заказчиком по актам от 14.05.2018 года № 01, 02 и оплачены по платежному поручению от 17.05.2018 года № 73586 рублей в сумме 679 659,94  рублей.

25.05.2018 года между сторонами подписано соглашение о расторжении контракта в связи с несоответствием фактических объемов работ с проектными.

16.08.2018 года специалисты контрольно-ревизионного управления Администрации городского округа «Город Калининград» совместно с представителями заказчика и подрядчика провели контрольный замер выполненных работ по двум контрактам, по итогам которого были составлены акты.

Контрольным обмером выполненных работ по ремонту и обустройству тротуара по ул. Дрожжевой в г. Калининграде установлено завышение объемов работ на сумму 18 907 рублей, допущенные  результате невыполнения работ по устройству бетонного основания при установке бортовых камней бетонных БР 100.10.15 и БР 100.20.8 - 5,11 куб.м; регулировке люков колодцев и камер 1 шт.

Контрольным обмером выполненных работ по ремонту и обустройству тротуара по ул. Садовой 7-13 в г. Калининграде установлено завышение объемов работ на сумму 78 271 рублей, допущенные  результате завышения объема бетона при устройстве бетонного основания при установке бортовых камней бетонных БР 100.10.15 и БР 100.20.8 - 4,73 куб.м.; завышения объема щебня при устройстве основания щебоночного под асфальтобетонное покрытие тротуара - 17,87 куб.м.

24.09.2018 года заказчик направил подрядчику претензию с требованием возвратить излишне уплаченные за работы 97 178 рублей по двум контрактам. 

В связи с тем, что денежные средства подрядчиком в сумме 97 178 рублей возвращены не были, заказчик обратился в суд с настоящим иском. 

Ответчик требования не признал.

Ответчик заявил о проведении по делу судебной строительно-технической экспертизы. В связи с высокой стоимостью работ по экспертизе (от 75 000 рублей до 138 000 рублей) экспертиза по делу не проводилась.

Возражения ответчика были сведены к тому, что выводы о завышении объема работ по устройству основания щебоночного под асфальтобетонное покрытие тротуара  на 17,87 куб.м. по ул. Садовой 7-13 сделано только по итогам замеров толщины слоя щебня в двух кернах (вырубках);  итоги замеров неправомерно учтены при расчете стоимости завышения объемов работ ко всей площади тротуара; в других местах толщина слоя щебня может соответствовать требованиям технической документации.

Суд полагает, что требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Акты контрольного замера от 16.08.2018 года подписаны ответчиком без замечаний, кроме возражений по регулировке люков колодцев и камер при обмере объемов работ по ул. Дрожжевой в г. Калининграде (замечание учтено истцом при расчете).

В соответствии с пунктом 12.5.2. СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги» в процессе строительства покрытия и основания следует контролировать качество асфальтобетона всех слоев основания и покрытия по показателям кернов (вырубок) в трех местах на 7000 кв.м.

Представителями сторон не оспаривалось, что замеры слоев основания асфальтобетона проводились в  двух кернах (вырубках).

При площади покрытия тротуара 500 кв.м. достаточно было произвести только одну вырубку для контроля. 

Проверка слоев основания асфальтобетона, в том числе, щебеночного  по итогам замеров в двух кернах (вырубках) соответствует строительным правилам.

Требования истца в части неосновательного обогащения на основании положений статьи 1102 ГК РФ в сумме 97 178 рублей подлежат удовлетворению как подтвержденные материалами дела.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 305391501600034) в пользу Муниципального казенного учреждения «Городское дорожное строительство и ремонт» городского округа «Город Калининград» (ОГРН 

<

***>) неосновательное обогащение в сумме 97 178 рублей, в доход Федерального бюджета госпошлину  в сумме 3887 рублей.

Решение может быть обжаловано в  месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья                    О.Н.Шкутко