АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б http://ivanovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А17-6147/2022

г. Иваново

07 августа 2024 года

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Ерохиной Я.Л.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Муравьевой Я.М.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

индивидуального предпринимателя ФИО1  (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об урегулировании разногласий по договорам технологического присоединения, 

третье лицо – общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  «Армада»,  

при участии в судебном заседании: 

представителей истца ФИО2 (доверенность от 04.05.2024), ФИО3  (доверенность от 11.02.2021),  

представителей ответчика ФИО4 (доверенность от 18.10.2022), ФИО5  (доверенность от 28.05.2024),  

руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Урегулировать разногласия, возникшие между публичным акционерным обществом  «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и индивидуальным  предпринимателем ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН  

<

***>) при заключении договоров об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям.  

Принять договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим  сетям в следующей редакции:  

ДОГОВОР № 371024691 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

г. Иваново « » 2024 г. 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1. Сетевая организация Публичное акционерное общество «Россети Центр и 

Приволжье» (сокращенное наименование ПАО «Россети Центр и Приволжье»), ОГРН  

<

***>, именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице директора филиала ПАО  «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» ФИО6, действующего на  основании доверенности, принимает на себя обязательства по осуществлению технологического  присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое  присоединение) многоэтажной жилой застройки, в том числе по обеспечению готовности  объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию)  к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами  в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им  объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов  электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:  

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 149 кВт;  категория надежности II (вторая);  

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  присоединение 0,4 кВ;  

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.  

Заявитель ИП ФИО1, ОГРНИП 

<

***>, именуемая в  дальнейшем заявителем, обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в  соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям (далее - договор). Сетевая организация и заявитель являются сторонами  договора (далее - стороны).  

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения многоэтажной  жилой застройки (высотная застройка) по адресу: 

<

...>, кадастровый  номер земельного участка 37:24:030101:456.  

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к  электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не более 15  метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут  располагаться) присоединяемые объекты заявителя.  

4. Технические условия являются неотъемлемой частью договора. 

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего  договора.  

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет  шесть месяцев со дня заключения настоящего договора.  

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

6. Сетевая организация обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по  выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому  присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также  урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены  присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;  

в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им  технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем,  провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих  устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения  энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);  

не позднее 120 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в  абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего  договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к  электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при  участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его  заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения  энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже)  

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств  на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного  документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой  организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной  квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в  течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий,  предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации  

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в  согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности  технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия  технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.  

8. Заявитель обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по  выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению от  точки присоединения объекта заявителя и в пределах границ участка, на котором расположены  присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;  

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств  на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому  

присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в  технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и  представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения,  обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего  электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии),  релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация  не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую  организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с  законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка  проектной документации является обязательной);  

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств  сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения  энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ);  

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения  энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи)  напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо  представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения  указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического  присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть  и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой  организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со  дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном  кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности  присоединения к электрическим сетям;  

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства  по оплате расходов на технологическое присоединение;  

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при  технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых  применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и  более источников электроснабжения.  

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок  и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического  присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия  технических условий.  

III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется с применением  стандартизированной тарифной ставки в соответствии с постановлением Департамента энергетики  и тарифов Ивановской области № 46-э/1 от 24.11.2023г. и составляет 14 091,09 рублей  (четырнадцать тысяч девяносто один рубль 09 коп.), кроме того НДС 20 % в сумме 2 818,22  рублей, всего 16 909,31 рублей (шестнадцать тысяч девятьсот девять рублей 31 коп.).  

Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке:  

(10 834,25 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на  покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией  технических условий (ТУ) Заявителю)  

+ 3 256,84 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на  покрытие расходов сетевой организации на выдачу акта об осуществлении технологического  присоединения Заявителю  

= 14 091,09 руб. (без НДС). Всего с учетом 20% НДС - 16 909,31 руб. 

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в  порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической  энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской  Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа  к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил  недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в  

электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам  администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил  технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической  энергии, объектов по производству электрической энергии, а также  объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к  электрическим сетям":  

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5  рабочих дней (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением  требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федерального закона «О  государственном оборонном заказе», - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой  организацией счета на оплату технологического присоединения;  

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней  со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;  

в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней  со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;  

г) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней  со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического  присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности  присоединения к электрическим сетям.  

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое  присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой  организации.  

IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ  

И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН. 

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки  присоединения энергопринимающих устройств заявителя.  

V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН. 

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или  в судебном порядке.  

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем  договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор.  

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по  технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен  поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных  очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме  выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по  договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий  по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по  требованию сетевой организации по решению суда.  

17. Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому  присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку,  равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за  исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое  присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения  0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока  осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может  превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за  год просрочки.  

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому  присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной  договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью  принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего  пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.  

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору  

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение  

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой  

силы, возникших после подписания сторонами настоящего договора и оказывающих  

непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.  

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении  

настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской  

Федерации. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

21. Настоящий договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета для  

внесения платы (части платы) за технологическое присоединение.  

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Сетевая организация: ПАО «Россети Центр и Приволжье» 

Юридический адрес: 603950, РФ, 

<

...>  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>  

Филиал «Ивэнерго» Адрес: 153000, РФ, 

<

...>. Заявитель: ИП ФИО1 ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***> 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Сетевая организация: Заявитель: 

директор филиала_________ФИО6 ___________Г.В. ФИО1  

Приложение 1 

к договору № 371024691 от ______ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье» 

(филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - « Ивэнерго») 

 № 102-36/58/371024691 " " 20 г. 

Сетевая организация: филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».  Заявитель: ИП ФИО1.  

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: КЛ 0,4 кВ и ВРУ-0,4 кВ для  

электроснабжения многоэтажной жилой застройки. 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых  

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:  

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) по адресу: 

<

...>,  

кадастровый номер земельного участка 37:24:030101:456. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя  

составляет 149 кВт. 

3.1. Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт;  3.2. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя 149 кВт.  

4. Категория надежности II (вторая). 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  

присоединение 0,4 кВ. 6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024г. 

7. Точки присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по  

точкам присоединения: 

7.1. точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и  

Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.1) от вновь построенной ТП от вновь построенного  

участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» до ВРУ – 0,4 кВ многоквартирного жилого дома  

-149 кВт. 

7.2. точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и  

Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.2) от вновь построенной ТП от вновь построенного  

участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» до ВРУ – 0,4 кВ многоквартирного жилого дома  -149 кВт.  

8. Основной источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от  ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» (ячейка фид.631 или 634).  

9. Резервный источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от  ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» (ячейка фид.620).  

10. Обязательства Сетевой организации: 

10.1. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-15» с III секции шин (ячейка  фид.631 или 634) до I секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе:  

- прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением  провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 1440 м.;  

- прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с  бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной  трубой в скважине длиной 2500 м.  

10.2. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-14» со II секции шин (ячейка  фид.620) до II секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе:  

- прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением  провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 3370 м.;  

- прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с  бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной  трубой в скважине длиной 7640 м.  

10.3. Для электроснабжения объекта максимально приближенно к земельному участку  заявителя построить двухтрансформаторную и более подстанцию (за исключением РТП)  мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. Электрическую  схему ТП и комплектацию оборудования определить на стадии проектирования.  

10.4. В ТП выполнить монтаж и наладку оборудования 6 и 0,4 кВ, установить два силовых  трансформатора необходимой мощности напряжением 6/0,4кВ и предусмотреть заземляющие  ножи с блокировкой на всех присоединениях и сборных шинах 6 кВ.  

10.5. Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную  мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП с I секции шин до ВРУ-0,4 кВ, в  траншее многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до  200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 170 м.  

10.6. Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную  мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП со II секции шин до ВРУ-0,4, в траншее  многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 170 м.  

10.7. Место строительства ТП и трассы линий согласовать с заинтересованными  организациями.  

10.8. По техническим условиям выполнить проект. 

10.9. Направить уведомление в Центральное управление Федеральной службы по  экологическому, технологическому и атомному надзору (ул. Калинина, 9/21) о готовности на ввод  в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства.  

11. Обязательства Заявителя: 

11.1. Электроснабжение ВРУ-0,4 кВ объекта выполнить от вновь построенной ТП по  кабелям необходимого сечения с использованием кабельных линий 0,4 кВ, проложенных сетевой  организацией до данного ВРУ-0,4.  

11.2. В ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя выполнить равномерное распределение нагрузки по  фазам и по точкам присоединения.  

11.3. Выполнить монтаж приборов учета на границе балансового разграничения в  соответствии с ПУЭ и ППРФ № 442 от 04.05.2012 года с применением электронных счетчиков  класса точности не менее 0,5S. Трансформаторы тока пломбируемые, класс точности 0,5S. В  соответствии с пунктом 136 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 для  установки прибора учета необходимо обратиться к гарантирующему поставщику.  

11.4. Выполнить защиту цепей учета от несанкционированного доступа с возможностью их  пломбирования. Провод (кабель) от точки присоединения, а также от измерительных  трансформаторов до приборов учета не должен иметь ответвлений, соединений, повреждений  изоляции и должен быть доступен для визуального контрольного осмотра по всей длине.  

11.5. При необходимости, освещение дворовой территории выполнить от МОП жилого  дома. Предусмотреть автоматическое включение и отключение освещения.  

11.6. Учет электроэнергии квартир выполнить в соответствии с ПУЭ с применением  электронных счетчиков класса точности 2,0 и выше.  

11.7. При наличии токоприемников I (первой) категории надежности предусмотреть  установку автономного источника электроснабжения. Схема включения автономного источника  должна исключать возможность подачи от него напряжения в распределительную сеть ПАО  «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».  

11.8. Для однофазных токоприемников предусмотреть защиту от повышения фазного  напряжения выше допустимого.  

11.9. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, выполнить разработку  проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими  нормами и правилами. Разработанную проектную документацию на электроснабжение  представить в филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».  

11.10. Проектом определить и в случае необходимости выполнить комплекс технических  мероприятий, исключающих возможность отклонения нормируемых показателей качества  электрической энергии на границе балансовой принадлежности с Сетевой организацией от  нормативных (вследствие подключения электроустановок Заявителя), соответствующих  требованиям ГОСТ 32144-2013, во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных  режимах работы прилегающих сетей.  

11.11. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению  энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта направить в Сетевую организацию  уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных  действующим законодательством и обеспечить доступ представителей филиала «Ивэнерго» для  проведения осмотра электроустановок Заявителя.  

11.12. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок получить в установленном  законодательством порядке.  

12. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

12.1. Электроустановки должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и  СНиП.  

12.2. На устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты,  иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и  требованиям изготовителя.  

12.3. После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить  присоединяемую электроустановку уполномоченному представителю Филиала ПАО «Россети  Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» для осмотра.  

12.4. Работы проводить с привлечением квалифицированного персонала. 

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня  заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.  

Директор филиала «Ивэнерго» ФИО6 

ДОГОВОР № 371024689 ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

г. Иваново « » 2024 г. 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1. Сетевая организация Публичное акционерное общество «Россети Центр и 

Приволжье» (сокращенное наименование ПАО «Россети Центр и Приволжье»), ОГРН  

<

***>, именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице директора филиала ПАО  «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» ФИО6, действующего на  основании доверенности, принимает на себя обязательства по осуществлению технологического  присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое  присоединение) многоэтажной жилой застройки, в том числе по обеспечению готовности  

объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию)  к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами  в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им  объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов  электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:  

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 149 кВт; категория надежности II (вторая); 

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  присоединение 0,4 кВ;  

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.  

Заявитель ИП ФИО1, ОГРНИП 

<

***>, именуемая в  дальнейшем заявителем, обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в  соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям (далее - договор). Сетевая организация и заявитель являются сторонами  договора (далее - стороны).  

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения многоэтажной  жилой застройки (высотная застройка) по адресу: 

<

...>, кадастровый  номер земельного участка 37:24:030101:458.  

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к  электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не более 15  метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут  располагаться) присоединяемые объекты заявителя.  

4. Технические условия являются неотъемлемой частью договора. 

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего  договора.  

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет  шесть месяцев со дня заключения настоящего договора.  

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

6. Сетевая организация обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по  выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому  присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также  урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены  присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;  

в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им  технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем,  провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих  устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения  энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);  

не позднее 120 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в  абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего  договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к  электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при  участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его  заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения  энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже)  

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств  на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного  документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой  организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной  квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в  течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий,  предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации  

7.Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный  срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического  присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий.  При этом дополнительная плата не взимается.  

8.Заявитель обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по  выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению от  точки присоединения объекта заявителя и в пределах границ участка, на котором расположены  присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;  

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств  на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому  присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в  технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и  представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения,  обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего  электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии),  релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация  не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую  организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с  законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка  проектной документации является обязательной);  

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств  сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения  энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ);  

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения  энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи)  напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо  представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения  указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического  присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть  и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой  организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со  дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном  кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности  присоединения к электрическим сетям;  

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства  по оплате расходов на технологическое присоединение;  

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при  технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых  применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и  более источников электроснабжения.  

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок  и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического  присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия  технических условий.  

III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.  

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется с применением  стандартизированной тарифной ставки в соответствии с постановлением Департамента энергетики  и тарифов Ивановской области № 46-э/1 от 24.11.2023г. и составляет 14 091,09 рублей  (четырнадцать тысяч девяносто один рубль 09 коп.), кроме того НДС 20 % в сумме 2 818,22  рублей, всего 16 909,31 рублей (шестнадцать тысяч девятьсот девять рублей 31 коп.).  

Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке:  

(10 834,25 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на  покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией  технических условий (ТУ) Заявителю)  

+ 3 256,84 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на  покрытие расходов сетевой организации на выдачу акта об осуществлении технологического  присоединения Заявителю  

= 14 091,09 руб. (без НДС). Всего с учетом 20% НДС - 16 909,31 руб. 

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в  порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической  энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской  Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа  к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил  недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в  электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам  администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил  технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической  энергии, объектов по производству электрической энергии, а также  объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к  электрическим сетям":  

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5  рабочих дней (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением  требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федерального закона «О  государственном оборонном заказе», - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой  организацией счета на оплату технологического присоединения;  

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней  со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;  

в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней  со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;  

г) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней  со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического  присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности  присоединения к электрическим сетям.  

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое  присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой  организации.  

IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ  

И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН. 

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки  присоединения энергопринимающих устройств заявителя.  

V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН. 

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или  в судебном порядке.  

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем  договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор.  

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по  технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен  поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных  очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме  выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по  договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий  по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по  требованию сетевой организации по решению суда.  

17. Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому  присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку,  равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за  исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое  присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения  0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока  

осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может  

превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за  

год просрочки. 

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому  

присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной  

договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью  

принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего  

пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты. 

18.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору  

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

19.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение  

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой  

силы, возникших после подписания сторонами настоящего договора и оказывающих  

непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.  

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении  

настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской  

Федерации. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

21.Настоящий договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета для внесения  

платы (части платы) за технологическое присоединение. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Сетевая организация: ПАО «Россети Центр и Приволжье» 

Юридический адрес: 603950, РФ, 

<

...>  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>  

Филиал «Ивэнерго» Адрес: 153000, РФ, 

<

...>. Заявитель: ИП ФИО1 ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***> 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Сетевая организация: Заявитель: 

директор филиала_________ФИО6 ___________Г.В. ФИО1  

Приложение 1 

к договору № 371024689 от _______ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье» 

(филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - « Ивэнерго ») 

 № 102-36/58/371024689 " " 20 г. 

Сетевая организация: филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».  Заявитель: ИП ФИО1.  

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: КЛ 0,4 кВ и ВРУ-0,4 кВ для  

электроснабжения многоэтажной жилой застройки. 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых  

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:  

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) по адресу: 

<

...>,  

кадастровый номер земельного участка 37:24:030101:458. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя  

составляет 149 кВт. 

3.1. Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт;  3.2. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя 149 кВт.  

4. Категория надежности II (вторая). 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  

присоединение 0,4 кВ. 6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024г. 

7. Точки присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по  точкам присоединения:  

7.1. точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и  Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.1) от вновь построенной ТП от вновь построенного  участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» до ВРУ – 0,4 кВ многоквартирного жилого дома  -149 кВт.  

7.2. точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и  Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.2) от вновь построенной ТП от вновь построенного  участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» до ВРУ- 0,4 кВ многоквартирного жилого дома149 кВт.  

8. Основной источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от  ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» (ячейка фид.631 или 634).  

9. Резервный источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от  ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» (ячейка фид.620).  

10. Обязательства Сетевой организации: 

10.1. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-15» с III секции шин (ячейка  фид.631 или 634) до I секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе:  

- прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением  провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 1290 м.;  

- прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с  бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной  трубой в скважине длиной 2500 м.  

10.2. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-14» со II секции шин (ячейка  фид.620) до II секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе:  

- прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением  провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 3020 м.;  

- прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с  бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной  трубой в скважине длиной 7640 м.  

10.3. Для электроснабжения объекта максимально приближенно к земельному участку  заявителя построить двухтрансформаторную и более подстанцию (за исключением РТП)  мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. Электрическую  схему ТП и комплектацию оборудования определить на стадии проектирования.  

10.4. В ТП выполнить монтаж и наладку оборудования 6 и 0,4 кВ, установить два силовых  трансформатора необходимой мощности напряжением 6/0,4кВ и предусмотреть заземляющие  ножи с блокировкой на всех присоединениях и сборных шинах 6 кВ.  

10.5. Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную  мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП с I секции шин до ВРУ-0,4 кВ, в  траншее многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до  200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 250 м.  

10.6. Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную  мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП со II секции шин до ВРУ-0,4, в траншее  многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 250 м.  

10.7. Место строительства ТП и трассы линий согласовать с заинтересованными  организациями.  

10.8. По техническим условиям выполнить проект. 

10.9. Направить уведомление в Центральное управление Федеральной службы по  экологическому, технологическому и атомному надзору (ул. Калинина, 9/21) о готовности на ввод  в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства.  

11. Обязательства Заявителя: 

11.1. Электроснабжение ВРУ-0,4 кВ объекта выполнить от вновь построенной ТП по  кабелям необходимого сечения с использованием кабельных линий 0,4 кВ, проложенных сетевой  организацией до данного ВРУ-0,4.  

11.2. В ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя выполнить равномерное распределение нагрузки по  фазам и по точкам присоединения.  

11.3. Выполнить монтаж приборов учета на границе балансового разграничения в  

соответствии с ПУЭ и ППРФ № 442 от 04.05.2012 года с применением электронных счетчиков  класса точности не менее 0,5S. Трансформаторы тока пломбируемые, класс точности 0,5S. В  соответствии с пунктом 136 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 для  установки прибора учета необходимо обратиться к гарантирующему поставщику.  

11.4. Выполнить защиту цепей учета от несанкционированного доступа с возможностью их  пломбирования. Провод (кабель) от точки присоединения, а также от измерительных  трансформаторов до приборов учета не должен иметь ответвлений, соединений, повреждений  изоляции и должен быть доступен для визуального контрольного осмотра по всей длине.  

11.5. При необходимости, освещение дворовой территории выполнить от МОП жилого  дома. Предусмотреть автоматическое включение и отключение освещения.  

11.6. Учет электроэнергии квартир выполнить в соответствии с ПУЭ с применением  электронных счетчиков класса точности 2,0 и выше.  

11.7. При наличии токоприемников I (первой) категории надежности предусмотреть  установку автономного источника электроснабжения. Схема включения автономного источника  должна исключать возможность подачи от него напряжения в распределительную сеть ПАО  «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».  

11.8. Для однофазных токоприемников предусмотреть защиту от повышения фазного  напряжения выше допустимого.  

11.9. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, выполнить разработку  проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими  нормами и правилами. Разработанную проектную документацию на электроснабжение  представить в филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».  

11.10. Проектом определить и в случае необходимости выполнить комплекс технических  мероприятий, исключающих возможность отклонения нормируемых показателей качества  электрической энергии на границе балансовой принадлежности с Сетевой организацией от  нормативных (вследствие подключения электроустановок Заявителя), соответствующих  требованиям ГОСТ 32144-2013, во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных  режимах работы прилегающих сетей.  

11.11. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению  энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта направить в Сетевую организацию  уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных  действующим законодательством и обеспечить доступ представителей филиала «Ивэнерго» для  проведения осмотра электроустановок Заявителя.  

11.12. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок получить в установленном  законодательством порядке.  

12. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

12.1. Электроустановки должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и  СНиП.  

12.2. На устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты,  иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и  требованиям изготовителя.  

12.3. После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить  присоединяемую электроустановку уполномоченному представителю Филиала ПАО «Россети  Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» для осмотра.  

12.4. Работы проводить с привлечением квалифицированного персонала. 

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня  заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.  

Директор филиала «Ивэнерго» ФИО6 

ДОГОВОР № 371024692 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

г. Иваново « » 2024 г. 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1. Сетевая организация Публичное акционерное общество «Россети Центр и 

Приволжье» (сокращенное наименование ПАО «Россети Центр и Приволжье»), ОГРН  

<

***>, именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице директора филиала ПАО  «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» ФИО6, действующего на  основании доверенности, принимает на себя обязательства по осуществлению технологического  присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое  присоединение) многоэтажной жилой застройки, в том числе по обеспечению готовности  объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию)  к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами  в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им  объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов  электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:  

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 149 кВт; категория надежности II (вторая); 

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  присоединение 0,4 кВ;  

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт. 

Заявитель ИП ФИО1, ОГРНИП 

<

***>, именуемая в  дальнейшем заявителем, обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в  соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям (далее - договор). Сетевая организация и заявитель являются сторонами  договора (далее - стороны).  

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения многоэтажной  жилой застройки (высотная застройка) по адресу: 

<

...>, кадастровый  номер земельного участка 37:24:030101:464.  

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к  электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не более 15  метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут  располагаться) присоединяемые объекты заявителя.  

4. Технические условия являются неотъемлемой частью договора. 

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего  договора.  

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет  шесть месяцев со дня заключения настоящего договора.  

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

6. Сетевая организация обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по  выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому  присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также  урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены  присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;  

в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им  технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем,  провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих  устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения  энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);  

не позднее 120 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в  абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего  договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к  электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при  участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его  заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения  энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже)  

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств  на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного  документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой  организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной  

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в  течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий,  предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации  

7.Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный  срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического  присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий.  При этом дополнительная плата не взимается.  

8.Заявитель обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по  выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению от  точки присоединения объекта заявителя и в пределах границ участка, на котором расположены  присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;  

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств  на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому  присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в  технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и  представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения,  обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего  электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии),  релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация  не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую  организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с  законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка  проектной документации является обязательной);  

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств  сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения  энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ);  

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения  энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи)  напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо  представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения  указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического  присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть  и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой  организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со  дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном  кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности  присоединения к электрическим сетям;  

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства  по оплате расходов на технологическое присоединение;  

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при  технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых  применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и  более источников электроснабжения.  

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок  и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического  присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия  технических условий.  

III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.  

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется с применением  стандартизированной тарифной ставки в соответствии с постановлением Департамента энергетики  и тарифов Ивановской области № 46-э/1 от 24.11.2023г. и составляет 14 091,09 рублей  (четырнадцать тысяч девяносто один рубль 09 коп.), кроме того НДС 20 % в сумме 2 818,22  рублей, всего 16 909,31 рублей (шестнадцать тысяч девятьсот девять рублей 31 коп.).  

Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке:  

(10 834,25 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на  покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией  технических условий (ТУ) Заявителю)  

+ 3 256,84 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на  покрытие расходов сетевой организации на выдачу акта об осуществлении технологического  присоединения Заявителю  

= 14 091,09 руб. (без НДС). Всего с учетом 20% НДС - 16 909,31 руб. 

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в  порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической  энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской  Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа  к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил  недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в  электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам  администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил  технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической  энергии, объектов по производству электрической энергии, а также  объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к  электрическим сетям":  

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5  рабочих дней (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением  требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федерального закона «О  государственном оборонном заказе», - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой  организацией счета на оплату технологического присоединения;  

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней  со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;  

в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней  со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;  

г) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней  со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического  присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности  присоединения к электрическим сетям.  

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое  присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой  организации.  

IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ  

И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН. 

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки  присоединения энергопринимающих устройств заявителя.  

V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН. 

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или  в судебном порядке.  

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем  договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор.  

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по  технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен  поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных  очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме  выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по  договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий  

по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по  требованию сетевой организации по решению суда.  

17. Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому  присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку,  равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за  исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое  присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения  0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока  осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может  превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за  год просрочки.  

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому  присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной  договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью  принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего  пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.  

18.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору  Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

19.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение  обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после подписания сторонами настоящего договора и оказывающих  непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.  

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении  настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской  Федерации.  

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

21.Настоящий договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета для внесения  платы (части платы) за технологическое присоединение.  

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Сетевая организация: ПАО «Россети Центр и Приволжье» 

Юридический адрес: 603950, РФ, 

<

...>  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>  

Филиал «Ивэнерго» Адрес: 153000, РФ, 

<

...>. Заявитель: ИП ФИО1 ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***> 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Сетевая организация: Заявитель: 

директор филиала_________ФИО6 ___________Г.В. ФИО1  

Приложение 1 

к договору № 371024692 от ________ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье» 

(филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - « Ивэнерго ») 

 № 102-36/58/371024692 " " _________ 20 _____ г. 

Сетевая организация: филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».  Заявитель: ИП ФИО1.  

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: КЛ 0,4 кВ и ВРУ-0,4 кВ  

для электроснабжения многоэтажной жилой застройки. 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых  

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:  

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) по адресу: 

<

...>,  

кадастровый номер земельного участка 37:24:030101:464. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя  составляет 149 кВт.  

3.1. Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт;  

3.2. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя 149 кВт. 4. Категория надежности II (вторая). 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  присоединение 0,4 кВ.  

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024г. 

7. Точки присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по  точкам присоединения:  

7.1. точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и  Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.1) от вновь построенной ТП от вновь построенного  участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» до ВРУ – 0,4 кВ многоквартирного жилого дома  -149 кВт.  

7.2. точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и  Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.2) от вновь построенной ТП от вновь построенного  участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» до ВРУ – 0,4 кВ многоквартирного жилого дома  -149 кВт.  

8. Основной источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от  ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» (ячейка фид.631 или 634).  

9. Резервный источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от  ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» (ячейка фид.620).  

10. Обязательства Сетевой организации: 

10.1. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-15» с III секции шин (ячейка  фид.631 или 634) до I секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе:  

- прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением  провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 1290 м.;  

- прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с  бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной  трубой в скважине длиной 2500 м.  

10.2. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-14» со II секции шин (ячейка  фид.620) до II секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе:  

- прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением  провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 3020 м.;  

- прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с  бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной  трубой в скважине длиной 7640 м.  

10.3. Для электроснабжения объекта максимально приближенно к земельному участку  заявителя построить двухтрансформаторную и более подстанцию (за исключением РТП)  мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. Электрическую  схему ТП и комплектацию оборудования определить на стадии проектирования.  

10.4. В ТП выполнить монтаж и наладку оборудования 6 и 0,4 кВ, установить два силовых  трансформатора необходимой мощности напряжением 6/0,4кВ и предусмотреть заземляющие  ножи с блокировкой на всех присоединениях и сборных шинах 6 кВ.  

10.5. Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную  мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП с I секции шин до ВРУ-0,4 кВ, в  траншее многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до  200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 210 м.  

10.6. Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную  мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП со II секции шин до ВРУ-0,4, в траншее  многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 210 м.  

10.7. Место строительства ТП и трассы линий согласовать с заинтересованными  организациями.  

10.8. По техническим условиям выполнить проект. 

10.9. Направить уведомление в Центральное управление Федеральной службы по  экологическому, технологическому и атомному надзору (ул. Калинина, 9/21) о готовности на ввод  

в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства.  

11. Обязательства Заявителя: 

11.1. Электроснабжение ВРУ-0,4 кВ объекта выполнить от вновь построенной ТП по  кабелям необходимого сечения с использованием кабельных линий 0,4 кВ, проложенных сетевой  организацией до данного ВРУ-0,4.  

11.2. В ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя выполнить равномерное распределение нагрузки по  фазам и по точкам присоединения.  

11.3. Выполнить монтаж приборов учета на границе балансового разграничения в  соответствии с ПУЭ и ППРФ № 442 от 04.05.2012 года с применением электронных счетчиков  класса точности не менее 0,5S. Трансформаторы тока пломбируемые, класс точности 0,5S. В  соответствии с пунктом 136 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 для  установки прибора учета необходимо обратиться к гарантирующему поставщику.  

11.4. Выполнить защиту цепей учета от несанкционированного доступа с возможностью их  пломбирования. Провод (кабель) от точки присоединения, а также от измерительных  трансформаторов до приборов учета не должен иметь ответвлений, соединений, повреждений  изоляции и должен быть доступен для визуального контрольного осмотра по всей длине.  

11.5. При необходимости, освещение дворовой территории выполнить от МОП жилого  дома. Предусмотреть автоматическое включение и отключение освещения.  

11.6. Учет электроэнергии квартир выполнить в соответствии с ПУЭ с применением  электронных счетчиков класса точности 2,0 и выше.  

11.7. При наличии токоприемников I (первой) категории надежности предусмотреть  установку автономного источника электроснабжения. Схема включения автономного источника  должна исключать возможность подачи от него напряжения в распределительную сеть ПАО  «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».  

11.8. Для однофазных токоприемников предусмотреть защиту от повышения фазного  напряжения выше допустимого.  

11.9. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, выполнить разработку  проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими  нормами и правилами. Разработанную проектную документацию на электроснабжение  представить в филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».  

11.10. Проектом определить и в случае необходимости выполнить комплекс технических  мероприятий, исключающих возможность отклонения нормируемых показателей качества  электрической энергии на границе балансовой принадлежности с Сетевой организацией от  нормативных (вследствие подключения электроустановок Заявителя), соответствующих  требованиям ГОСТ 32144-2013, во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных  режимах работы прилегающих сетей.  

11.11. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению  энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта направить в Сетевую организацию  уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных  действующим законодательством и обеспечить доступ представителей филиала «Ивэнерго» для  проведения осмотра электроустановок Заявителя.  

11.12. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок получить в установленном  законодательством порядке.  

12. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

12.1. Электроустановки должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и  СНиП.  

12.2. На устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты,  иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и  требованиям изготовителя.  

12.3. После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить  присоединяемую электроустановку уполномоченному представителю Филиала ПАО «Россети  Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» для осмотра.  

12.4. Работы проводить с привлечением квалифицированного персонала. 

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня  заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.  

Директор филиала «Ивэнерго» ФИО6 

ДОГОВОР № 371024687 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

г. Иваново « »  2024 г.  

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1. Сетевая организация Публичное акционерное общество «Россети Центр и 

Приволжье» (сокращенное наименование ПАО «Россети Центр и Приволжье»), ОГРН  

<

***>, именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице директора филиала ПАО  «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» ФИО6, действующего на  основании доверенности, принимает на себя обязательства по осуществлению технологического  присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое  присоединение) многоэтажной жилой застройки, в том числе по обеспечению готовности  объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию)  к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами  в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им  объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов  электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:  

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 149 кВт;  категория надежности II (вторая);  

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  присоединение 0,4 кВ;  

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт. 

Заявитель ИП ФИО1, ОГРНИП 

<

***>, именуемая в  дальнейшем заявителем, обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в  соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям (далее - договор). Сетевая организация и заявитель являются сторонами  договора (далее - стороны).  

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения многоэтажной  жилой застройки (высотная застройка) по адресу: 

<

...>, кадастровый  номер земельного участка 37:24:030101:490.  

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к  электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не более 15  метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут  располагаться) присоединяемые объекты заявителя.  

4. Технические условия являются неотъемлемой частью договора. 

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего  договора.  

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет  шесть месяцев со дня заключения настоящего договора.  

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

6. Сетевая организация обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по  выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому  присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также  урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены  присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;  

в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им  технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем,  провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих  устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения  энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);  

не позднее 120 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в  абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего  

договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к  электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при  участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его  заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения  энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже)  

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств  на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного  документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой  организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной  квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в  течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий,  предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации  

7.Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный  срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического  присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий.  При этом дополнительная плата не взимается.  

8.Заявитель обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по  выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению от  точки присоединения объекта заявителя и в пределах границ участка, на котором расположены  присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;  

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств  на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому  присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в  технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и  представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения,  обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего  электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии),  релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация  не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую  организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с  законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка  проектной документации является обязательной);  

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств  сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения  энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ);  

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения  энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи)  напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо  представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения  указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического  присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть  и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой  организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со  дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном  кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности  присоединения к электрическим сетям;  

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства  по оплате расходов на технологическое присоединение;  

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при  технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых  применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и  более источников электроснабжения.  

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок  и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического  присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия  технических условий.  

III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.  

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется с применением  стандартизированной тарифной ставки в соответствии с постановлением Департамента энергетики  и тарифов Ивановской области № 46-э/1 от 24.11.2023г. и составляет 14 091,09 рублей  (четырнадцать тысяч девяносто один рубль 09 коп.), кроме того НДС 20 % в сумме 2 818,22  рублей, всего 16 909,31 рублей (шестнадцать тысяч девятьсот девять рублей 31 коп.).  

Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке: 

(10 834,25 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на  покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией  технических условий (ТУ) Заявителю)  

+ 3 256,84 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на  покрытие расходов сетевой организации на выдачу акта об осуществлении технологического  присоединения Заявителю  

= 14 091,09 руб. (без НДС). Всего с учетом 20% НДС - 16 909,31 руб. 

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в  порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической  энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской  Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа  к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил  недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в  электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам  администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил  технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической  энергии, объектов по производству электрической энергии, а также  объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к  электрическим сетям":  

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5  рабочих дней (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением  требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федерального закона «О  государственном оборонном заказе», - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой  организацией счета на оплату технологического присоединения;  

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней  со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;  

в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней  со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;  

г) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней  со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического  присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности  присоединения к электрическим сетям.  

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое  присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой  организации.  

IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ  

И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН. 

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки  присоединения энергопринимающих устройств заявителя.  

V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

СТОРОН. 

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или  в судебном порядке.  

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем  договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор.  

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по  технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен  поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных  очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме  выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по  договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий  по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по  требованию сетевой организации по решению суда.  

17. Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому  присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку,  равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за  исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое  присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения  0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока  осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может  превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за  год просрочки.  

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому  присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной  договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью  принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего  пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.  

18.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору  Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

19.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение  обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после подписания сторонами настоящего договора и оказывающих  непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.  

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении  настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской  Федерации.  

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

21.Настоящий договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета для внесения  платы (части платы) за технологическое присоединение.  

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Сетевая организация: ПАО «Россети Центр и Приволжье» 

Юридический адрес: 603950, РФ, 

<

...>  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>  

Филиал «Ивэнерго» Адрес: 153000, РФ, 

<

...>. Заявитель: ИП ФИО1 ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***> 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Сетевая организация: Заявитель: 

директор филиала_________ФИО6 ___________Г.В. ФИО1  

Приложение 1 

к договору № 371024687 от _________ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье» 

(филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - « Ивэнерго ») 

 № 102-36/58/371024687 " " ___________ 20 _____ г. 

Сетевая организация: филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».  Заявитель: ИП ФИО1.  

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: КЛ 0,4 кВ и ВРУ-0,4 кВ для  электроснабжения многоэтажной жилой застройки.  

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых  осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:  многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) по адресу: 

<

...>,  кадастровый номер земельного участка 37:24:030101:490.  

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя  составляет 149 кВт.  

3.1. Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт;  

3.2. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя 149 кВт.  4. Категория надежности II (вторая).  

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  присоединение 0,4 кВ.  

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024г. 

7. Точки присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по  точкам присоединения:  

7.1. точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и  Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.1) от вновь построенной ТП от вновь построенного  участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» до ВРУ - 0,4 кВ многоквартирного жилого дома  -149 кВт.  

7.2. точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и  Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.2) от вновь построенной ТП от вновь построенного  участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» до ВРУ – 0,4 кВ многоквартирного жилого дома  -149 кВт.  

8. Основной источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от  ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» (ячейка фид.631 или 634).  

9. Резервный источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от  ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» (ячейка фид.620).  

10. Обязательства Сетевой организации: 

10.1. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-15» с III секции шин (ячейка  фид.631 или 634) до I секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе:  

- прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением  провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 1440 м.;  

- прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с  бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной  трубой в скважине длиной 2500 м.  

10.2. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-14» со II секции шин (ячейка  фид.620) до II секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе:  

- прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением  провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 3370 м.;  

- прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с  бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной  трубой в скважине длиной 7640 м.  

10.3. Для электроснабжения объекта максимально приближенно к земельному участку  заявителя построить двухтрансформаторную и более подстанцию (за исключением РТП)  мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. Электрическую  схему ТП и комплектацию оборудования определить на стадии проектирования.  

10.4. В ТП выполнить монтаж и наладку оборудования 6 и 0,4 кВ, установить два силовых  трансформатора необходимой мощности напряжением 6/0,4кВ и предусмотреть заземляющие  ножи с блокировкой на всех присоединениях и сборных шинах 6 кВ.  

10.5. Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную  мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП с I секции шин до ВРУ-0,4 кВ, в  траншее многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до  200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 260 м.  

10.6. Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную  

мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП со II секции шин до ВРУ-0,4, в траншее  многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 260 м.  

10.7. Место строительства ТП и трассы линий согласовать с заинтересованными  организациями.  

10.8. По техническим условиям выполнить проект. 

10.9. Направить уведомление в Центральное управление Федеральной службы по  экологическому, технологическому и атомному надзору (ул. Калинина, 9/21) о готовности на ввод  в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства.  

11. Обязательства Заявителя: 

11.1. Электроснабжение ВРУ-0,4 кВ объекта выполнить от вновь построенной ТП по  кабелям необходимого сечения с использованием кабельных линий 0,4 кВ, проложенных сетевой  организацией до данного ВРУ-0,4.  

11.2. В ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя выполнить равномерное распределение нагрузки по  фазам и по точкам присоединения.  

11.3. Выполнить монтаж приборов учета на границе балансового разграничения в  соответствии с ПУЭ и ППРФ № 442 от 04.05.2012 года с применением электронных счетчиков  класса точности не менее 0,5S. Трансформаторы тока пломбируемые, класс точности 0,5S. В  соответствии с пунктом 136 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 для  установки прибора учета необходимо обратиться к гарантирующему поставщику.  

11.4. Выполнить защиту цепей учета от несанкционированного доступа с возможностью их  пломбирования. Провод (кабель) от точки присоединения, а также от измерительных  трансформаторов до приборов учета не должен иметь ответвлений, соединений, повреждений  изоляции и должен быть доступен для визуального контрольного осмотра по всей длине.  

11.5. При необходимости, освещение дворовой территории выполнить от МОП жилого  дома. Предусмотреть автоматическое включение и отключение освещения.  

11.6. Учет электроэнергии квартир выполнить в соответствии с ПУЭ с применением  электронных счетчиков класса точности 2,0 и выше.  

11.7. При наличии токоприемников I (первой) категории надежности предусмотреть  установку автономного источника электроснабжения. Схема включения автономного источника  должна исключать возможность подачи от него напряжения в распределительную сеть ПАО  «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».  

11.8. Для однофазных токоприемников предусмотреть защиту от повышения фазного  напряжения выше допустимого.  

11.9. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, выполнить разработку  проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими  нормами и правилами. Разработанную проектную документацию на электроснабжение  представить в филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».  

11.10. Проектом определить и в случае необходимости выполнить комплекс технических  мероприятий, исключающих возможность отклонения нормируемых показателей качества  электрической энергии на границе балансовой принадлежности с Сетевой организацией от  нормативных (вследствие подключения электроустановок Заявителя), соответствующих  требованиям ГОСТ 32144-2013, во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных  режимах работы прилегающих сетей.  

11.11. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению  энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта направить в Сетевую организацию  уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных  действующим законодательством и обеспечить доступ представителей филиала «Ивэнерго» для  проведения осмотра электроустановок Заявителя.  

11.12. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок получить в установленном  законодательством порядке.  

12. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

12.1. Электроустановки должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и  СНиП.  

12.2. На устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты,  иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и  требованиям изготовителя.  

12.3. После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить  

присоединяемую электроустановку уполномоченному представителю Филиала ПАО «Россети  

Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» для осмотра. 12.4. Работы проводить с привлечением квалифицированного персонала. 

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня  

заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.  Директор филиала «Ивэнерго» ФИО6  

ДОГОВОР № 371024684 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

г. Иваново « »  2024 г.  

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1. Сетевая организация Публичное акционерное общество «Россети Центр и 

Приволжье» (сокращенное наименование ПАО «Россети Центр и Приволжье»), ОГРН  

<

***>, именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице директора филиала ПАО  «Россети Центр и Приволжье» -«Ивэнерго» ФИО6, действующего на  основании доверенности, принимает на себя обязательства по осуществлению технологического  присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое  присоединение) многоэтажной жилой застройки, в том числе по обеспечению готовности  объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию)  к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами  в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им  объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов  электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:  

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 149 кВт;  категория надежности II (вторая);  

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  присоединение 0,4 кВ;  

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт. 

Заявитель ИП ФИО1, ОГРНИП 

<

***>, именуемая в  дальнейшем заявителем, обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в  соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям (далее - договор). Сетевая организация и заявитель являются сторонами  договора (далее - стороны).  

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения многоэтажной  жилой застройки (высотная застройка) по адресу: 

<

...>, кадастровый  номер земельного участка 37:24:030101:493.  

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к  электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не более 15  метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут  располагаться) присоединяемые объекты заявителя.  

4. Технические условия являются неотъемлемой частью договора. 

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего  договора.  

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет  шесть месяцев со дня заключения настоящего договора.  

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

6. Сетевая организация обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по  выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому  присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также  

урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены  присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;  

в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им  технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем,  провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих  устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения  энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);  

не позднее 120 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в  абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего  договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к  электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при  участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его  заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения  энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже)  

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств  на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного  документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой  организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной  квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в  течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий,  предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации  

7.Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный  срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического  присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий.  При этом дополнительная плата не взимается.  

8.Заявитель обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по  выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению от  точки присоединения объекта заявителя и в пределах границ участка, на котором расположены  присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;  

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств  на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому  присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в  технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и  представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения,  обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего  электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии),  релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация  не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую  организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с  законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка  проектной документации является обязательной);  

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств  сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения  энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ);  

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения  энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи)  напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо  представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения  указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического  присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть  и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой  организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со  дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном  кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности  присоединения к электрическим сетям;  

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства  по оплате расходов на технологическое присоединение;  

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при  технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых  применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и  более источников электроснабжения.  

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок  и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического  присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия  технических условий.  

III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется с применением  стандартизированной тарифной ставки в соответствии с постановлением Департамента энергетики  и тарифов Ивановской области № 46-э/1 от 24.11.2023г. и составляет 14 091,09 рублей  (четырнадцать тысяч девяносто один рубль 09 коп.), кроме того НДС 20 % в сумме 2 818,22  рублей, всего 16 909,31 рублей (шестнадцать тысяч девятьсот девять рублей 31 коп.).  

Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке: 

(10 834,25 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на  покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией  технических условий (ТУ) Заявителю)  

+ 3 256,84 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на  покрытие расходов сетевой организации на выдачу акта об осуществлении технологического  присоединения Заявителю  

= 14 091,09 руб. (без НДС). Всего с учетом 20% НДС - 16 909,31 руб. 

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в  порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической  энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской  Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа  к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил  недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в  электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам  администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил  технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической  энергии, объектов по производству электрической энергии, а также  объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к  электрическим сетям":  

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5  рабочих дней (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением  требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федерального закона «О  государственном оборонном заказе», - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой  организацией счета на оплату технологического присоединения;  

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней  со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;  

в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней  со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;  

г) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней  со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического  присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности  присоединения к электрическим сетям.  

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое  присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой  организации.  

IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ  

И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН. 

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки  присоединения энергопринимающих устройств заявителя.  

V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН. 

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или  в судебном порядке.  

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем  договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор.  

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по  технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен  поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных  очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме  выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по  договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий  по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по  требованию сетевой организации по решению суда.  

17. Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому  присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку,  равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за  исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое  присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения  0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока  осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может  превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за  год просрочки.  

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому  присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной  договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью  принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего  пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.  

18.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору  Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

19.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение  обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после подписания сторонами настоящего договора и оказывающих  непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.  

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении  настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской  Федерации.  

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

21.Настоящий договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета для внесения  платы (части платы) за технологическое присоединение.  

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Сетевая организация: ПАО «Россети Центр и Приволжье» Юридический адрес: 603950, РФ, 

<

...> ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> Филиал «Ивэнерго» Адрес: 153000, РФ, 

<

...>. Заявитель: ИП ФИО1 ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***> 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Сетевая организация: Заявитель: 

директор филиала_________ФИО6 ___________Г.В. ФИО1  

Приложение 1 

к договору № 371024684 от ___________ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье» 

(филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - « Ивэнерго ») 

 № 102-36/58/371024684 " " _________ 20  Сетевая организация: филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».  

Заявитель: ИП ФИО1. 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: КЛ 0,4 кВ и ВРУ-0,4 кВ для  

электроснабжения многоэтажной жилой застройки. 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых  

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:  

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) по адресу: 

<

...>,  

кадастровый номер земельного участка 37:24:030101:493. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя  

составляет 149 кВт. 

3.1. Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт;  3.2. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя 149 кВт.  

4. Категория надежности II (вторая). 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  

присоединение 0,4 кВ. 6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024г. 

7. Точки присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по  

точкам присоединения: 

7.1. точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и  

Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.1) от вновь построенной ТП от вновь построенного  

участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» до ВРУ – 0,4 кВ многоквартирного жилого дома  

-149 кВт. 

7.2. точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и  

Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.2) от вновь построенной ТП от вновь построенного  

участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» до ВРУ – 0,4 кВ многоквартирного жилого дома  

-149 кВт. 

8. Основной источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от  

ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» (ячейка фид.631 или 634). 

9. Резервный источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от  

ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» (ячейка фид.620). 10. Обязательства Сетевой организации: 

10.1. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-15» с III секции шин (ячейка  

фид.631 или 634) до I секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе: 

- прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением  

провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 1290 м.;  

- прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с  

бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной  

трубой в скважине длиной 2500 м. 

10.2. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-14» со II секции шин (ячейка  

фид.620) до II секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе: 

- прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением  

провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 3020 м.;  

- прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с  

бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной  

трубой в скважине длиной 7640 м. 

10.3. Для электроснабжения объекта максимально приближенно к земельному участку  

заявителя построить двухтрансформаторную и более подстанцию (за исключением РТП)  

мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. Электрическую  схему ТП и комплектацию оборудования определить на стадии проектирования.  

10.4. В ТП выполнить монтаж и наладку оборудования 6 и 0,4 кВ, установить два силовых  трансформатора необходимой мощности напряжением 6/0,4кВ и предусмотреть заземляющие  ножи с блокировкой на всех присоединениях и сборных шинах 6 кВ.  

10.5. Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную  мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП с I секции шин до ВРУ-0,4 кВ, в  траншее многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до  200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 200 м.  

10.6. Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную  мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП со II секции шин до ВРУ-0,4, в траншее  многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200  квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 200 м.  

10.7. Место строительства ТП и трассы линий согласовать с заинтересованными  организациями.  

10.8. По техническим условиям выполнить проект. 

10.9. Направить уведомление в Центральное управление Федеральной службы по  экологическому, технологическому и атомному надзору (ул. Калинина, 9/21) о готовности на ввод  в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства.  

11. Обязательства Заявителя: 

11.1. Электроснабжение ВРУ-0,4 кВ объекта выполнить от вновь построенной ТП по  кабелям необходимого сечения с использованием кабельных линий 0,4 кВ, проложенных сетевой  организацией до данного ВРУ-0,4.  

11.2. В ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя выполнить равномерное распределение нагрузки по  фазам и по точкам присоединения.  

11.3. Выполнить монтаж приборов учета на границе балансового разграничения в  соответствии с ПУЭ и ППРФ № 442 от 04.05.2012 года с применением электронных счетчиков  класса точности не менее 0,5S. Трансформаторы тока пломбируемые, класс точности 0,5S. В  соответствии с пунктом 136 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 для  установки прибора учета необходимо обратиться к гарантирующему поставщику.  

11.4. Выполнить защиту цепей учета от несанкционированного доступа с возможностью их  пломбирования. Провод (кабель) от точки присоединения, а также от измерительных  трансформаторов до приборов учета не должен иметь ответвлений, соединений, повреждений  изоляции и должен быть доступен для визуального контрольного осмотра по всей длине.  

11.5. При необходимости, освещение дворовой территории выполнить от МОП жилого  дома. Предусмотреть автоматическое включение и отключение освещения.  

11.6. Учет электроэнергии квартир выполнить в соответствии с ПУЭ с применением  электронных счетчиков класса точности 2,0 и выше.  

11.7. При наличии токоприемников I (первой) категории надежности предусмотреть  установку автономного источника электроснабжения. Схема включения автономного источника  должна исключать возможность подачи от него напряжения в распределительную сеть ПАО  «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».  

11.8. Для однофазных токоприемников предусмотреть защиту от повышения фазного  напряжения выше допустимого.  

11.9. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, выполнить разработку  проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими  нормами и правилами. Разработанную проектную документацию на электроснабжение  представить в филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».  

11.10. Проектом определить и в случае необходимости выполнить комплекс технических  мероприятий, исключающих возможность отклонения нормируемых показателей качества  электрической энергии на границе балансовой принадлежности с Сетевой организацией от  нормативных (вследствие подключения электроустановок Заявителя), соответствующих  требованиям ГОСТ 32144-2013, во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных  режимах работы прилегающих сетей.  

11.11. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению  энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта направить в Сетевую организацию  уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных  

действующим законодательством и обеспечить доступ представителей филиала «Ивэнерго» для  проведения осмотра электроустановок Заявителя.  

11.12. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок получить в установленном  законодательством порядке.  

12. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

12.1. Электроустановки должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и  СНиП.  

12.2. На устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты,  иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и  требованиям изготовителя.  

12.3. После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить  присоединяемую электроустановку уполномоченному представителю Филиала ПАО «Россети  Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» для осмотра.  

12.4. Работы проводить с привлечением квалифицированного персонала. 

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня  заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.  

Директор филиала «Ивэнерго» ФИО6 

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) 30000 руб. судебных  расходов.  

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1  (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) 30000 руб. государственной пошлины,  уплаченной по платежному поручению от 19.08.2022 № 23.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального  кодекса РФ. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок,  не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со  статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса РФ при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области. 

Судья Ерохина Я.Л.