9/2017-87294(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А79-11306/2016

г. Чебоксары

04 сентября 2017 года

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи  Юрусовой Н.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

индивидуального предпринимателя ФИО2, 428000, г.  Чебоксары, ОГРНИП 304212929500123, ИНН 

<

***>,  

к закрытому акционерному обществу "Тус", 428000, г. Чебоксары, Чувашская  Республика, ул. М. Павлова. д. 39, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  

третье лицо - общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания  "Платина", 

<

...>,  

об устранении строительных недостатков, при участии: истца ФИО2, 

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 12.01.2017 № 3  от третьего лица – ФИО4 по доверенности от 26.01.2017,  

руководствуясь статьями 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить. 

Обязать закрытое акционерное общество "Тус" в течение двух месяцев с  момента выступления решения в законную силу устранить причины  проникновения грунтовых вод в нежилые помещения в цокольном этаже жилого  дома № 38 корпус 4 по улице Университетская города Чебоксары путем  выполнения следующих работ:  

- выполнить выравнивающую стяжку из бетона марки не менее М150 (В10)  толщиной 60 мм в виду перепада отметок пола помещений № 2, №№ 50-66, 73- 76,  77, 82, 83 – 136,1 кв.м,  

- отбивка штукатурного слоя по низу наружных и внутренних стен по высоте  от пола на 0,3 м неоднократно намоченных водой для последующей гидроизоляции  – 74 кв.м,  

- устройство штукатурной гидроизоляции по низу наружных и внутренних  стен по высоте от пола на 0,3 м из сухой смеси "АкваНАСТ-ГШ" толщиной 10 мм –  74 кв.м,  

- устройство обмазочной гидроизоляции поверхности фундаментной плиты  из сухой смеси "АкваНАСТ-Б" толщиной 5 мм с армированной сеткой – 247,8 кв.м,  

- устройство защитной бетонной стяжки толщиной 40 мм марки М150 (В10)  по выполненной обмазочной гидроизоляции поверхности фундаментной плиты –  247,8 кв.м.  

Взыскать с закрытого акционерного общества "Тус" в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО2 6000 (Шесть  тысяч) руб. расходов по государственной пошлине, 29314 (Двадцать девять тысяч  триста четырнадцать) руб. 74 коп. расходов по оплате судебной экспертизы.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии в течение месяца с  момента его принятия.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Н.В. Юрусова