Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-5595/2019

г. Хабаровск

25 июня 2019 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 18 июня 2019 г.

Арбитражный суд Хабаровского края

в составе судьи  Трещевой В.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в заседании суда дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Уфимский краностроительный завод» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 450043, 

<

...>)

к Публичному акционерному обществу «Амурский судостроительный завод» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 681000, 

<

...>) 

об урегулировании разногласий по проекту контрактов № 18097 и № 18025

при участии в судебном заседании:

от истца –  представитель по доверенности  б/н от 01.10.2018 Вар- навская И.В. (до перерыва).

от ответчика – представитель по доверенности № 66/12 от 03.12.2018 ФИО2,

У с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «Уфимский краностроительный завод» (далее – истец, ООО «Уфимский краностроительный завод») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Публичному акционерному обществу «Амурский судостроительный завод»  (далее – ответчик, ПАО «Амурский судостроительный завод») об урегулировании разногласий, возникших при заключении контрактов № 18097 и № 18025, по результатам проведения электронных аукционов № 2022000000118000021 от 13.09.2018 и № 2022000000118000022 от 13.09.2018.

В судебном заседании представитель истца уточнил заявленные требования и просил суд урегулировать разногласия:

Контракт №18097 считать заключенным на следующих условиях:

Изложить П.1 Приложения № 1 к Контракту в редакции:

Поз. №

Наименование*

Кол-во, компл.

Цена за единицу товара без НДС, руб.

НДС 20%, руб.

Цена за единицу товара с НДС, руб.

Стоимость* * Товара с НДС, руб.

1.

КМ50/10-УК-А5-28-18-УЗ

6

19 374 293,78

3 874 858,76

23 249 152,54

139 494 915,24

Изложить п.5 Приложения № 1 к Контракту в редакции:

Поз. №

Условное обозначение крана (гп/управление/режим работы/пролет/высота подъема/КИ

Место монтажа

Кол-во

Поставка товара (акт приема-передачи)

Окончание

приемо-сдаточных испытаний (акт

ввода в эксплуатацию)

дата (не позднее)

1.

КМ50/10-УК-А5-28-18-УЗ

Цех 26 пролет 1

2

01.апр.20                        01.май.20

2.

КМ50/10-УК-А5-28-18-УЗ

Цех 26 пролет 2

2

01.май.20                  01.июн.20

3.

КМ50/10-УК-А5-28-18-УЗ

Цех 26 пролет 3

2

01.июн.20                       01.июл.20

Изложить п.3.1 Контракта в редакции:

«Цена контракта без НДС составляет 116 245 762 руб. 68 коп., кроме того НДС 20% - 23 249 152 руб. 56 коп. Итого с НДС (20%) цена контракта составляет 139 494 915 руб. 24 коп.».

Изложить п.3.3 Контракта в следующей редакции:

«Расчеты по настоящему Контракту осуществляются поэтапно:

3.3.1.Заказчик производит на расчетный счет поставщика промежуточные платежи за каждую партию поставленного Оборудования в соответствие с Графиком поставки оборудования и выполнения работ, утвержденном в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) в размере 80% от цены каждой партии поставленного Оборудования, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки каждой партии Оборудования по комплектности на складе Заказчика в соответствии с требованиями п.5.10.1-5.10.3 настоящего контракта, на основании оригиналов счета, товарной накладной ТОРГ-12, счета-фактуры и Акта приема - передачи оборудования (Приложение №3), подписанного обеими сторонами.

Счет в обязательном порядке должен содержать:

номер Контракта,

фразу «за поставленное Оборудование»,

процент оплаты по платежному этапу,

точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу;

Неверно оформленный счет считается невыставленным и оплате не подлежит. Срок оплаты аванса в данном случае исчисляется с момента получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в данном пункте.

3.3.2.Заказчик производит окончательный расчет на расчетный счет поставщика за каждую партию поставленного Оборудования в соответствие с Графиком поставки оборудования и выполнения работ, утвержденном в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) в размере 20% от цены каждой партии поставленного Оборудования, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ввода каждой партии Оборудования в эксплуатацию на основании оригиналов счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных консультационных услуг (Приложение №4), подписанного обеими сторонами, при этом счет - фактура не выставляется, т.к. работы и услуги включены в стоимость поставки.

Счет в обязательном порядке должен содержать:

номер Контракта,

фразу «окончательная оплата по контракту»,

процент окончательной оплаты,

точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу;

Неверно оформленный счет считается невыставленным и оплате не подлежит. Срок оплаты аванса в данном случае исчисляется с момента получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в данном пункте.».

Изложить п. 11.1 Контракта в редакции: 

«Контракт вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами настоящего Контракта, размещенного в единой информационной системе, электронной цифровой подписью и действует до 31.12.2020г. Окончание срока действия настоящего контракта не влечет прекращения гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.».

Контракт №18095 считать заключенным на следующих условиях:

Поз.

№

Наименование*

Кол-во, компл

Цена за единицу товара без НДС, руб.

НДС 20%, руб.

Цена за единицу товара с НДС, руб.

Стоимость* * Товара с НДС, руб.

1.

КМ 10-УП-А5-24-12-УЗ

1

6 357 382,94

1 271 476,59

7 628 859,53

7 628 859,53

2.

КМ 5-УП-А5-24-12-УЗ

1

5 445 719,01

1 089 143,80

6 534 862,82

6 534 862,82

3.

КМ 10-УП-А5-24-12-УЗ

1

6 357 382.94

1 271 476,59

7 628 859,53

7 628 859,53

4.

км 10-УП-А5-24-12-УЗ

1

6 357 382,94

1 271 476,59

7 628 859,53

7 628 859,53

5.

КМ5-УП-А5-24-12-УЗ

1

5 445 719,01

1 089 143,80

6 534 862,82

6 534 862,82

6.

км 10-УП-А5-24-12-УЗ

1

6 357 382,94

1 271 476,59

7 628 859,53

7 628 859,53

7.

км 5-УП-А5-22,98-12-УЗ

1

5 435 111,67

1 087 022.33

6 522 134,00

6 522 134,00

8.

км 10-УП-А5-22,98-12-УЗ

1

6 318 666,13

1 263 733,23

7 582 399,35

7 582 399,35

9.

КМ 10-УП-А5-22,5-10-УЗ

1

6 506 305,30

1 301 261,06

7 807 566,35

7 807 566,35

10.

КМ5-УП-А5-22,5-10-УЗ

1

5 442 128,79

1 088 425,76

6 530 554,55

6 530 554,55

Изложить п.5 Приложения № 1 к Контракту в редакции:

Поз.№

Условное обозначение крана (гп/управление/режим работы/пролет/высота подъема/КИ

Место монтажа

Кол-во

Поставка товара (акт приема-передачи)

Окончание приемосдаточных испытаний (акт

ввода в эксплуатацию)

дата (не позднее)

1.

км 10-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 1

1

01.ИЮЛ.20

01.авг.20

2.

КМ 5-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 1

1

01.ИЮЛ.20

01.авг.20

3.

КМ 10-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 1

1

01.ИЮЛ.20

01.авг.20

4.

КМ 10-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 2

1

01.ИЮЛ.20

01.авг.20

5.

КМ 5-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 2

1

01.ИЮЛ.20

01.авг.20

6.

КМ 10-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 2

1

01.ИЮЛ.20

01.авг.20

7.

КМ5-УП-А5-22,98-12-УЗ

Цех 1 пролет 3

1

01.авг.20

01.сент.20

8.

KM 10-УП-А5-22,98-12-УЗ

Цех 1 пролет 3

1

01.авг.20

01.сент.20

9.

KM 10-УП-А5-22,5-10-УЗ

Цех 3 пролет 2

1

01.сент.20

01.окт.20

10.

KM 5-УП-А5-22,5-10-УЗ

Цех 3 пролет 4

1

01.сент.20

01.окт.20

Изложить п.3.1 Контракта в редакции:

«Цена контракта без НДС составляет 60 023 181 руб. 66 коп.; кроме того НДС 20% - 12 004 636 руб. 33 коп. Итого с НДС (20%) цена контракта составляет 72 027 817 руб. 99 коп.»

Изложить п.3.3 Контракта в следующей редакции:

«Расчеты по настоящему Контракту осуществляются поэтапно:

3.3.1.Заказчик производит первый (авансовый) платёж в размере 30 % от цены Контракта на расчетный счет Поставщика не позднее 31 декабря 2019 года, на основании счета на оплату. При этом дата оплаты аванса не влияет на изменение сроков поставки оборудования.

Счет в обязательном порядке должен содержать:

номер Контракта,

фразу «предварительная оплата»,

процент предварительной оплаты,

точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу;

Неверно оформленный счет считается невыставленным и оплате не подлежит. Срок оплаты аванса в данном случае исчисляется с момента получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в данном пункте.

3.3.2.Заказчик производит на расчетный счет поставщика промежуточные платежи за каждую партию поставленного Оборудования в соответствие с Графиком поставки оборудования и выполнения работ, утвержденном в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) в размере 50 % от цены каждой партии поставленного Оборудования, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки каждой партии Оборудования по комплектности на складе Заказчика в соответствии с требованиями п.5.10.1-5.10.3 настоящего контракта, на основании оригиналов счета, товарной накладной ТОРГ-12, счета-фактуры и Акта приема - передачи оборудования (Приложение №3), подписанного обеими сторонами.

Счет в обязательном порядке должен содержать:

номер Контракта,

фразу «за поставленное Оборудование»,

процент оплаты по платежному этапу,

точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу;

Неверно оформленный счет считается невыставленным и оплате не подлежит. Срок оплаты аванса в данном случае исчисляется с момента получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в данном пункте.

3.3.3.Заказчик производит окончательный расчет на расчетный счет поставщика за каждую партию поставленного Оборудования в соответствие с Графиком поставки оборудования и выполнения работ, утвержденном в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) в размере 20 % от цены каждой партии поставленного Оборудования, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ввода каждой партии Оборудования в эксплуатацию на основании оригиналов счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных консультационных услуг (Приложение №4), подписанного обеими сторонами, при этом счет - фактура не выставляется, т.к. работы и услуги включены в стоимость поставки. Счет в обязательном порядке должен содержать:

- номер Контракта,

- фразу «окончательная оплата по контракту»,

- процент окончательной оплаты,

- точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу;

Неверно оформленный счет считается невыставленным и оплате не подлежит. Срок оплаты аванса в данном случае исчисляется с момента получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в данном пункте.»

Изложить п.11.1 Контракта в редакции:

«Контракт вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами настоящего Контракта, размещенного в единой информационной системе, электронной цифровой подписью и действует до 31.12.2020г. Окончание срока действия настоящего контракта не влечет прекращения гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.».

Суд принял уточнение иска.

Представитель ответчика в удовлетворении иска возражал, ссылаясь на тот факт, что предложенные истцом изменения в части сроков и цены контракта противоречит требованиям Федерального Закона № 44-ФЗ, а порядок расчетов по контракту № 18097 нарушает интересы ответчика.

В ходе судебного разбирательства суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, установил следующие обстоятельства.  

Истец является поставщиком, с которым заключается контракт на поставку кранов мостовых электрических грузоподъемностью 50/10 тонн в количестве 6 (шести) комплектов согласно извещения № 2022000000118000021, что подтверждается опубликованным 14 марта 2019 года протоколом № 100/44 заседания единой комиссии по подведению итогов электронного аукциона №2022000000118000021 от 13.09.2018г., согласно которого электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения вторых частей заявок только одна вторая заявка участника № 158 признана соответствующей требованиям аукционной документации.

Цена контракта устанавливается согласно протоколу подведения итогов аукциона в электронной форме, в том числе НДС 18%.

Истец признан победителем электронного аукциона с ценой предложения 137 170 000,00 руб., процент понижения составил 24,90%.

По результатам определения поставщика стоимость 1 (одного) комплекта оборудования с учетом НДС 18% составила 22 861 66 руб. 66 коп. Цена 1 (одного) комплекта оборудования без учета НДС составляет 19 374 293 руб. 78 коп.

Размещение закупки проходило с приостановкой сроком 181 день в связи со следующими обстоятельствами.

30 августа 2018 года по требованию Хабаровского УФАС России размещение закупки приостановлено до рассмотрения жалобы АО «Атомэнергоснаб», не допущенного к участию в аукционе.

10 сентября 2018 года аукцион в электронной форме был проведен.

13 сентября 2018 года согласно предписанию контролирующего органа проведение закупки было приостановлено на стадии заключения контракта.

На основании решения от 04.09.2018 № 310 по делу № 7-1/528 Хабаровского УФ АС России выдано предписание № 88 от 04.09.2018 об аннулировании всех протоколов, составленных в ходе проведения электронного аукциона.

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 24.12.2018г. по делу №А73-16532/2018 пункты 2-4 решения от 04.09.2018 № 310 и предписания от 04.09.2018 № 88 Хабаровского УФАС России по делу № 7-1/528 признаны недействительными.

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2019 №06АП-792/2019 решение Арбитражного суда Хабаровского края от 24.12.2018 по делу № А73-16532/2018 оставлено без изменений.

13 марта 2019 года аукцион был возобновлен, 14 марта 2019 года в ЕИС размещен протокол подведения итогов электронного аукциона.

С момента приостановления размещения закупки 13.09.2018 до ее возобновления 13.03.2019 прошел 181 день.

В связи с тем, что аукционной документацией были предусмотрены конкретные сроки поставки оборудования и проведения работ, а также срок выплаты аванса, 15 марта 2019 года истец в адрес ответчика направил письмо исх. № 47 от 15.03.2018 с просьбой объявить новую закупку, либо направить победителю аукциона проект контракта, в котором предусмотреть перенос сроков поставки оборудования и выполнения работ на 181 день, на которое от заказчика получен ответ исх. №АСЗ-069ГИ-3678 от 20.03.2019, согласно которому следует, что ответчиком принято решение о направлении победителю проекта контракта на условиях, указанных в документации, а также о направлении обращения за разъяснениями в УФАС России и Минфин России.

19 марта 2019 года ответчик разместил в ЕИС проект контракта, который содержит следующие условия:

Цена контракта устанавливается согласно Протоколу подведения итогов в электронной форме № 100/44 от 13.09.2018 и составляет 137 170 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 20% в размере 22 861 666 руб. 67 коп.

Заказчик производит первый (авансовый платеж) в размере 30 % от цены контракта на расчетный счет поставщика не позднее 31 декабря 2018г. на основании счета на оплату. При этом дата оплаты аванса не влияет на изменение сроков поставки оборудования.

В проекте контракта График поставки оборудования и выполнения работ

Поз.№

Условное обозначение крана (гп/управление/режим работы/пролет/высота подъема/КИ

Место монтажа

Кол-во

Поставка товара (акт приема-передачи)

Окончание приеме- s сдаточных испытаний (акт

ввода в эксплуатацию)

дата (не позднее)

1.

КМ 50/10-УК-А5-28-18-УЗ

Цех 26 пролет 1

2

01.ИЮЛ.19

01.авг.19

2.

КМ 50/10-УК-А5-28-18-УЗ

Цех 26 пролет 2

2

01.авг.19

01.сен.19

3.

КМ 50/10-УК-А5-28-18-УЗ

Цех 26 пролет 3

2

01.сен.19

01.OKT.19

В предложенном заказчиком проекте контракта срок поставки первой партии оборудования сократился до 91 дня (ориентировочно с 01.04.2019 по 30.06.2019) вместо 273 дней, на которые рассчитывал ответчик принимая участие в закупке (ориентировочно с 01.10.2018 по 30.06.2019); срок поставки второй партии сократился до 122 дней (ориентировочно с 01.04.2019 по 31.07.2019) вместо 304 дней (ориентировочно с 01.10.2018 по 31.07.2019); срок поставки третьей партии -до 153 дней (ориентировочно с 01.04.2019 по 31.08.2019) вместо 335 дней (ориентировочно с 01.10.2018 по 31.08.2019).

В связи с тем, что в предлагаемом для подписания проекте контракта содержались невыполнимые условия - в виде оплаты аванса в срок не позднее 31.12.2018г., а также условия по срокам поставки значительно хуже, чем мог рассчитывать поставщик, принимая решение об участии в закупке, истец 25.03.2019г. направил протокол разногласий:

28 марта 2019 года ответчик отклонил протокол разногласий, так как в соответствии с ч.2 ст. 34 Закона №44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, и 28.03.2019г. вновь направил проект контракта в первоначальной редакции с регламентированной датой подписания контракта 02.04.2019г.

П. Закупка № 2022000000118000022

Истец является поставщиком, с которым заключается контракт на поставку кранов мостовых электрических грузоподъемностью 5 тонн и 10 тонн в количестве 10 (десяти) комплектов согласно извещения № 2022000000118000022, что подтверждается опубликованным 14 марта 2019 года протоколом № 101/44 заседания единой комиссии по подведению итогов электронного аукциона №2022000000118000022 от 13.09.2018г., согласно которого электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения вторых частей заявок только одна вторая заявка участника № 63 признана соответствующей требованиям аукционной документации.

Цена контракта устанавливается согласно протоколу подведения итогов аукциона в электронной форме, в том числе НДС 18%о.

Истец признан победителем электронного аукциона с ценой предложения 70 827 354,35 руб., в том числе НДС 18%), процент понижения составил 24,90%).

Следовательно, по результатам определения победителя, цена контракта без учета НДС составляет 60 023 181 руб. 66 коп.

Размещение закупки проходило с приостановкой сроком 181 день в связи со следующими обстоятельствами.

30 августа 2018 года по требованию Хабаровского УФАС России размещение закупки приостановлено до рассмотрения жалобы АО «Атомэнергоснаб», не допущенного к участию в аукционе.

10 сентября 2018 года аукцион в электронной форме был проведен.

13 сентября 2018 года согласно предписанию контролирующего органа проведение закупки было приостановлено на стадии заключения контракта.

На основании решения от 04.09.2018 № 336 по делу № 7-1/523 Хабаровского УФАС России выдано предписание № 92 от 04.09.2018 об аннулировании всех протоколов, составленных в ходе проведения электронного аукциона.

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 24.12.2018г. по делу №А73-16532/2018 пункты 2-4 решения от 04.09.2018 № 336 и предписания от 04.09.2018 № 88 Хабаровского УФАС России по делу № 7-1/523 признаны недействительными.

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2019 №06АП-792/2019 решение Арбитражного суда Хабаровского края от 24.12.2018 по делу № А73-16532/2018 оставлено без изменений.

13 марта 2019 года аукцион был возобновлен, 14 марта 2019 года в ЕИС размещен протокол подведения итогов электронного аукциона.

С момента приостановления размещения закупки 13.09.2018 до ее возобновления 13.03.2019 прошел 181 день.

В связи с тем, что аукционной документацией были предусмотрены конкретные сроки поставки оборудования и проведения работ, а также срок выплаты аванса, 15 марта 2019 года истец в адрес ответчика направил письмо исх. № 46 от 15.03.2018 с просьбой объявить новую закупку, либо направить победителю аукциона проект контракта, в котором предусмотреть перенос сроков поставки оборудования и выполнения работ на 181 день, на которое от Заказчика получен ответ исх. №АСЗ-069ГИ-3678 от 20.03.2019, согласно которому следует, что ответчиком принято решение о направлении победителю проекта контракта на условиях, указанных в документации, а также о направлении обращения за разъяснениями в УФАС России и Минфин России.

19 марта 2019 года ответчик разместил в ЕИС проект контракта, который содержит следующие условия:

Цена контракта устанавливается согласно Протоколу подведения итогов в электронной форме № 101/44 от 13.09.2018 и составляет 70 827 354 руб. 35 коп., в том числе НДС 20% в размере 11 804 559 руб. 06 коп.

Заказчик производит первый (авансовый платеж) в размере 30 % от цены контракта на расчетный счет поставщика не позднее 31 декабря 2018г. на основании счета на оплату. При этом дата оплаты аванса не влияет на изменение сроков поставки оборудования.

В проекте контракта График поставки оборудования и выполнения работ

Поз.№

Условное обозначение крана (гп/управление/режим работы/пролет/высота подъема/КИ

Место монтажа

Кол-во

Поставка товара (акт приема-передачи)

Окончание приемосдаточных испытаний (акт ввода в эксплуатацию)

дата (не позднее)

1.

КМ 10-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 1

1

10.мар.19

20.апр.19

2.

КМ5-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 1

1

10.мар.19

20.апр.19

3.

КМ 10-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 1

1

10.мар.19

20.апр.19

4.

КМ 10-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 2

1

ЗО.мар.19

ЗО.апрЛ9

5.

КМ5-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 2

1

ЗО.мар.19

ЗО.апр.19

6.

КМ 10-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 2

1

ЗО.мар.19

ЗО.апр.19

7.

КМ 5-УП-А5-22,98-12-УЗ

Цех 1 пролет 3

1

20.апр.19

20.май.19

8.

КМ 10-УП-А5-22,98-12-УЗ

Цех 1 пролет 3

1

20.апр.19

20.май.19

9.

КМ 10-УП-А5-22,5-10-УЗ

Цех 3 пролет 2

1

20.май.19

20.ИЮН.19

10.

КМ 5-УП-А5-22,5-10-УЗ

Цех 3 пролет 4

1

20.май.19

20.ИЮН.19

В предложенном заказчиком проекте контракта срок поставки первой партии оборудования сократился до 0 дня (ориентировочно с 01.04.2019 по 10.03.2019) вместо 161 дней, на которые рассчитывал ответчик принимая участие в закупке (ориентировочно с 01.10.2018 по 10.03.2019); срок поставки второй партии сократился до 0 дней (ориентировочно с 01.04.2019 по 30.03.2019) вместо 181 дня (ориентировочно с 01.10.2018 по 30.03.2019); срок поставки третьей партии-до 20 дней (ориентировочно с 01.04.2019 по 20.04.2019) вместо 202 дней (ориентировочно с 01.10.2018 по 20.04.2019).

Таким образом, срок поставки оборудования истек на момент заключения контракта, и поставщик, в случае его заключения, будет считаться просрочившим обязательство по поставке оборудования.

В связи с тем, что в предлагаемом для подписания проекте контракте содержались невыполнимые условия - в виде оплаты аванса в срок не позднее 31.12.2018г., а также условия по срокам поставки значительно хуже, чем мог рассчитывать поставщик, принимая решение об участии в закупке, истец направил протокол разногласий.

28 марта 2019 года ответчик отклонил протокол разногласий, так как в соответствии с ч.2 ст. 34 Закона №44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, и 28.03.2019г. вновь направил проект контракта в первоначальной редакции с регламентированной датой подписания контракта 02.04.2019г.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Учитывая представленные доказательства, суд признал иск подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.

Как следует из части 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

В соответствии с пунктом 1 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами для стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта сторона должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора) в течение тридцати дней со дня получения оферты.

Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для которой заключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора), вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в течение тридцати дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для акцепта.

Обязанность истца, как победителя электронной процедуры, заключить с заказчиком контракты, следует из положений статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее  - Закон № 44-ФЗ).

Пунктом 1 статьи 446 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации либо по соглашению сторон, условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда.

Согласно статье 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (пункт 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, стороны не пришли к соглашению по ряду условий контрактов, а именно, по цене контракта, по срокам поставки оборудования и выполнения работ, а так же по порядку расчетов за поставленное оборудование и выполненные работы.

Рассмотрев разногласия сторон по спорным пунктам контрактов, суд пришел к следующим выводам.

По контракту № 18097 (закупка № 2022000000118000021). 

Так согласно пункту 1 Приложения № 1 к контракту в редакции истца следует:

Поз. №

Наименование*

Кол-во, компл.

Цена за единицу товара без НДС, руб.

НДС 20%, руб.

Цена за единицу товара с НДС, руб.

Стоимость* * Товара с НДС, руб.

1.

КМ50/10-УК-А5-28-18-УЗ

6

19 374 293,78

3 874 858,76

23 249 152,54

139 494 915,24

Представитель ответчика в изложении указанного пункта в редакции истца возражал, поскольку это приведет к увеличению цены контракты, что противоречит результатам проведения электронного аукциона и действующему законодательству.

Суд отклоняет доводы ответчика по следующим основаниям.

Согласно положениям Закона № 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 Закона о контрактной системе (статья 34 Закона № 44-ФЗ).

Вместе с тем, в соответствии с положениями Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 502-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 502-ФЗ) статья 112 Закона № 44-ФЗ дополнена частью 54, согласно которой до 1 октября 2019 г. в рамках срока исполнения контракта допускается по соглашению сторон изменение цены заключенного до 1 января 2019 г. контракта в пределах увеличения в соответствии с законодательством Российской Федерации ставки НДС в отношении товаров, работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января 2019 г., если увеличенный размер ставки НДС не предусмотрен условиями контракта. Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренное настоящей частью изменение может быть осуществлено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

Таким образом, указанная норма Закона № 44-ФЗ предусматривает наличие следующей совокупности условий для изменения цены контракта:

1) изменение осуществляется исключительно до 1 октября 2019 г. и по соглашению сторон;

2) только в пределах увеличения ставки НДС и только на товары, работы, услуги, в отношении которых увеличилась данная ставка, и оплата которых осуществляется после 1 января 2019 г.;

3) если увеличенный размер ставки НДС не был предусмотрен условиями контракта (в том числе при обосновании начальной (максимальной) цены контракта).

Поскольку в данной ситуации изменение цены контракта  осуществляется только в пределах увеличения ставки НДС, условиями спорного контракта не предусмотрено увеличенного размера НДС, оплата товаров осуществляется после 1 января 2019 года, суд полагает возможным принять спорный пункт контракта в редакции истца.

Ссылка ответчика на разъяснения, содержащиеся в информационном письме Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2018 г. N 24-03-07/61247, судом отклоняется, поскольку указанное разъяснение дано без учета принятого 27.12.2018 Закона № 502-ФЗ, в связи с чем, в информационном письме от 14 марта 2019 года № 25-04-02/16837 Министерство финансов Российской Федерации разъяснило о возможности изменения цены контракта в связи с изменением ставки НДС.

При таких обстоятельствах, пункт 3.1 контракта так же следует изложить в редакции истца.

 «Цена контракта без НДС составляет 116 245 762 руб. 68 коп., кроме того НДС 20% - 23 249 152 руб. 56 коп. Итого с НДС (20%) цена контракта составляет 139 494 915 руб. 24 коп.».

Согласно пункту  5 Приложения № 1 к контракту в редакции истца установлены следующие сроки исполнения обязательств по контракту:

Поз. №

Условное обозначение крана (гп/управление/режим работы/пролет/высота подъема/КИ

Место монтажа

Кол-во

Поставка товара (акт приема-передачи)

Окончание

приемо-сдаточных испытаний (акт

ввода в эксплуатацию)

дата (не позднее)

1.

КМ50/10-УК-А5-28-18-УЗ

Цех 26 пролет 1

2

01апреля2020               01мая2020

2.

КМ50/10-УК-А5-28-18-УЗ

Цех 26 пролет 2

2

01мая2020                  01июня2020

3.

КМ50/10-УК-А5-28-18-УЗ

Цех 26 пролет 3

2

01июня2020                 01июля2020

Учитывая то, что истец уточнил редакцию данного пункта в соответствии с отзывом ответчика, суд полагает возможным так же изложить редакцию данного пункта в редакции истца.

Разногласия относительно порядка расчетов, предусмотренного пунктом 3.3. контракта.

Истец просил изложить данный пункт в следующей редакции:

«Расчеты по настоящему контракту осуществляются поэтапно:

3.3.1.Заказчик производит на расчетный счет поставщика промежуточные платежи за каждую партию поставленного Оборудования в соответствие с Графиком поставки оборудования и выполнения работ, утвержденном в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) в размере 80% от цены каждой партии поставленного Оборудования, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки каждой партии Оборудования по комплектности на складе Заказчика в соответствии с требованиями п.5.10.1-5.10.3 настоящего контракта, на основании оригиналов счета, товарной накладной ТОРГ-12, счета-фактуры и Акта приема - передачи оборудования (Приложение №3), подписанного обеими сторонами.

Счет в обязательном порядке должен содержать:

номер Контракта,

фразу «за поставленное Оборудование»,

процент оплаты по платежному этапу,

точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу;

Неверно оформленный счет считается невыставленным и оплате не подлежит. Срок оплаты аванса в данном случае исчисляется с момента получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в данном пункте.

3.3.2.Заказчик производит окончательный расчет на расчетный счет поставщика за каждую партию поставленного Оборудования в соответствие с Графиком поставки оборудования и выполнения работ, утвержденном в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) в размере 20% от цены каждой партии поставленного Оборудования, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ввода каждой партии Оборудования в эксплуатацию на основании оригиналов счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных консультационных услуг (Приложение №4), подписанного обеими сторонами, при этом счет - фактура не выставляется, т.к. работы и услуги включены в стоимость поставки.

Счет в обязательном порядке должен содержать:

номер Контракта,

фразу «окончательная оплата по контракту»,

процент окончательной оплаты,

точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу;

Неверно оформленный счет считается невыставленным и оплате не подлежит. Срок оплаты аванса в данном случае исчисляется с момента получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в данном пункте.».

Представитель ответчика в изменении порядка расчетов возражал.

Оценив доводы сторон, суд пришел к следующему выводу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда (пункт 2 статьи 711 ГК РФ).

Спорным контрактом предусмотрено перечисление авансового платежа в размере 30% и 50% за поставленное оборудование, окончательный расчет в размере 20% после выполнения работ и ввода оборудования в эксплуатацию.

Доказательств, подтверждающих несоответствие данного условия требованиям действующего законодательства, истцом не предоставлено.

Таким образом, суд отклоняет довод истца в части определения порядка расчетов исходя из 80% оплаты за поставленное оборудование, как не основанный на норме права.

В связи с чем, пункт 3.3 контракта подлежит изложению в следующей редакции:

«Расчеты по настоящему контракту осуществляются поэтапно:

3.3.1.Заказчик производит первый (авансовый) платёж в размере 30 % от цены Контракта на расчетный счет Поставщика не позднее 31 декабря 2019 года, на основании счета на оплату. При этом дата оплаты аванса не влияет на изменение сроков поставки оборудования.

Счет в обязательном порядке должен содержать:

номер Контракта,

фразу «предварительная оплата»,

процент предварительной оплаты,

точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу;

Неверно оформленный счет считается невыставленным и оплате не подлежит. Срок оплаты аванса в данном случае исчисляется с момента получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в данном пункте.

3.3.2.Заказчик производит на расчетный счет поставщика промежуточные платежи за каждую партию поставленного Оборудования в соответствие с Графиком поставки оборудования и выполнения работ, утвержденном в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) в размере 50 % от цены каждой партии поставленного Оборудования, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки каждой партии Оборудования по комплектности на складе Заказчика в соответствии с требованиями п.5.10.1-5.10.3 настоящего контракта, на основании оригиналов счета, товарной накладной ТОРГ-12, счета-фактуры и Акта приема - передачи оборудования (Приложение №3), подписанного обеими сторонами.

Счет в обязательном порядке должен содержать:

номер Контракта,

фразу «за поставленное Оборудование»,

процент оплаты по платежному этапу,

точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу;

Неверно оформленный счет считается невыставленным и оплате не подлежит. Срок оплаты аванса в данном случае исчисляется с момента получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в данном пункте.

3.3.3.Заказчик производит окончательный расчет на расчетный счет поставщика за каждую партию поставленного Оборудования в соответствие с Графиком поставки оборудования и выполнения работ, утвержденном в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) в размере 20 % от цены каждой партии поставленного Оборудования, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ввода каждой партии Оборудования в эксплуатацию на основании оригиналов счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных консультационных услуг (Приложение №4), подписанного обеими сторонами, при этом счет - фактура не выставляется, т.к. работы и услуги включены в стоимость поставки. Счет в обязательном порядке должен содержать:

- номер Контракта,

- фразу «окончательная оплата по контракту»,

- процент окончательной оплаты,

- точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу;

Неверно оформленный счет считается невыставленным и оплате не подлежит. Срок оплаты аванса в данном случае исчисляется с момента получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в данном пункте.»

В отсутствие мотивированного возражения ответчика относительно предложенной истцом редакции пункта 11.1 Контракта, суд полагает возможным изложить пункт 11.1 Контракта в следующей редакции: 

«Контракт вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами настоящего Контракта, размещенного в единой информационной системе, электронной цифровой подписью и действует до 31.12.2020г. Окончание срока действия настоящего контракта не влечет прекращения гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.».

Разногласия по контракту № 18025 (закупка № 2022000000118000022). 

Так согласно пункту 1 Приложения № 1 к контракту в редакции истца следует:

Поз.

№

Наименование*

Кол-во, компл

Цена за единицу товара без НДС, руб.

НДС 20%, руб.

Цена за единицу товара с НДС, руб.

Стоимость* * Товара с НДС, руб.

1.

КМ 10-УП-А5-24-12-УЗ

1

6 357 382,94

1 271 476,59

7 628 859,53

7 628 859,53

2.

КМ 5-УП-А5-24-12-УЗ

1

5 445 719,01

1 089 143,80

6 534 862,82

6 534 862,82

3.

КМ 10-УП-А5-24-12-УЗ

1

6 357 382.94

1 271 476,59

7 628 859,53

7 628 859,53

4.

км 10-УП-А5-24-12-УЗ

1

6 357 382,94

1 271 476,59

7 628 859,53

7 628 859,53

5.

КМ5-УП-А5-24-12-УЗ

1

5 445 719,01

1 089 143,80

6 534 862,82

6 534 862,82

6.

км 10-УП-А5-24-12-УЗ

1

6 357 382,94

1 271 476,59

7 628 859,53

7 628 859,53

7.

км 5-УП-А5-22,98-12-УЗ

1

5 435 111,67

1 087 022.33

6 522 134,00

6 522 134,00

8.

км 10-УП-А5-22,98-12-УЗ

1

6 318 666,13

1 263 733,23

7 582 399,35

7 582 399,35

9.

КМ 10-УП-А5-22,5-10-УЗ

1

6 506 305,30

1 301 261,06

7 807 566,35

7 807 566,35

10.

КМ5-УП-А5-22,5-10-УЗ

1

5 442 128,79

1 088 425,76

6 530 554,55

6 530 554,55

Представитель ответчика в изложении указанного пункта в редакции истца возражал, поскольку это приведет к увеличению цены контракты, что противоречит результатам проведения электронного аукциона и действующему законодательству.

Поскольку судом установлено, что Закон № 44-ФЗ предусматривает возможность изменения цены контракта в рамках срока его исполнения при наличии определенных законом условий, и, учитывая, что в данной ситуации изменение цены спорного контракта  осуществляется только в пределах увеличения ставки НДС, условиями спорного контракта не предусмотрено увеличенного размера НДС, оплата товаров осуществляется после 1 января 2019 года, суд полагает возможным принять спорный пункт контракта в редакции истца.

При таких обстоятельствах, пункт 3.1 контракта так же следует изложить в редакции истца.

«Цена контракта без НДС составляет 60 023 181 руб. 66 коп.; кроме того НДС 20% - 12 004 636 руб. 33 коп. Итого с НДС (20%) цена контракта составляет 72 027 817 руб. 99 коп.»

Согласно пункту  5 Приложения № 1 к контракту в редакции истца установлены следующие сроки исполнения обязательств по контракту:

Поз.№

Условное обозначение крана (гп/управление/режим работы/пролет/высота подъема/КИ

Место монтажа

Кол-во

Поставка товара (акт приема-передачи)

Окончание приемосдаточных испытаний (акт

ввода в эксплуатацию)

дата (не позднее)

1.

км 10-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 1

1

01ИЮЛя2020

01августа2020

2.

КМ 5-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 1

1

01ИЮЛя2020

01августа2020

3.

КМ 10-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 1

1

01ИЮЛя2020

01августа2020

4.

КМ 10-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 2

1

01ИЮЛя2020

01августа2020

5.

КМ 5-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 2

1

01ИЮЛя2020

01августа2020

6.

КМ 10-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 2

1

01ИЮЛя2020

01августа2020

7.

КМ5-УП-А5-22,98-12-УЗ

Цех 1 пролет 3

1

01августа2020

01сентября2020

8.

KM 10-УП-А5-22,98-12-УЗ

Цех 1 пролет 3

1

01августа2020

01сентября2020

9.

KM 10-УП-А5-22,5-10-УЗ

Цех 3 пролет 2

1

01сентября2020

01октября2020

10.

KM 5-УП-А5-22,5-10-УЗ

Цех 3 пролет 4

1

01сентября2020

01октября2020

Учитывая то, что истец уточнил редакцию данного пункта в соответствии с отзывом ответчика, суд полагает возможным так же изложить редакцию данного пункта в редакции истца.

Разногласия относительно порядка расчетов, предусмотренного пунктом 3.3. контракта.

Истец просил изложить данный пункт в следующей редакции:

«Расчеты по настоящему Контракту осуществляются поэтапно:

3.3.1.Заказчик производит первый (авансовый) платёж в размере 30 % от цены Контракта на расчетный счет Поставщика не позднее 31 декабря 2019 года, на основании счета на оплату. При этом дата оплаты аванса не влияет на изменение сроков поставки оборудования.

Счет в обязательном порядке должен содержать:

номер Контракта,

фразу «предварительная оплата»,

процент предварительной оплаты,

точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу;

Неверно оформленный счет считается невыставленным и оплате не подлежит. Срок оплаты аванса в данном случае исчисляется с момента получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в данном пункте.

3.3.2.Заказчик производит на расчетный счет поставщика промежуточные платежи за каждую партию поставленного Оборудования в соответствие с Графиком поставки оборудования и выполнения работ, утвержденном в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) в размере 50 % от цены каждой партии поставленного Оборудования, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки каждой партии Оборудования по комплектности на складе Заказчика в соответствии с требованиями п.5.10.1-5.10.3 настоящего контракта, на основании оригиналов счета, товарной накладной ТОРГ-12, счета-фактуры и Акта приема - передачи оборудования (Приложение №3), подписанного обеими сторонами.

Счет в обязательном порядке должен содержать:

номер Контракта,

фразу «за поставленное Оборудование»,

процент оплаты по платежному этапу,

точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу;

Неверно оформленный счет считается невыставленным и оплате не подлежит. Срок оплаты аванса в данном случае исчисляется с момента получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в данном пункте.

3.3.3.Заказчик производит окончательный расчет на расчетный счет поставщика за каждую партию поставленного Оборудования в соответствие с Графиком поставки оборудования и выполнения работ, утвержденном в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) в размере 20 % от цены каждой партии поставленного Оборудования, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ввода каждой партии Оборудования в эксплуатацию на основании оригиналов счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных консультационных услуг (Приложение №4), подписанного обеими сторонами, при этом счет - фактура не выставляется, т.к. работы и услуги включены в стоимость поставки. Счет в обязательном порядке должен содержать:

- номер Контракта,

- фразу «окончательная оплата по контракту»,

- процент окончательной оплаты,

- точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу;

Неверно оформленный счет считается невыставленным и оплате не подлежит. Срок оплаты аванса в данном случае исчисляется с момента получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в данном пункте.»

Учитывая отсутствие мотивированного возражения ответчика относительно предложенной истцом редакции спорного пункта, суд полагает возможным изложить пункт 3.3. в редакции истца.

В отсутствие мотивированного возражения ответчика относительно предложенной истцом редакции пункта 11.1 Контракта, суд полагает возможным изложить пункт 11.1 Контракта в следующей редакции: 

«Контракт вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами настоящего Контракта, размещенного в единой информационной системе, электронной цифровой подписью и действует до 31.12.2020г. Окончание срока действия настоящего контракта не влечет прекращения гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.».

 Поскольку разногласия, возникшие при заключении спорных контрактов, судом урегулированы, основания для приостановки их заключения отпали, в связи с чем суд полагает возможным отменить обеспечительные меры, принятые судом определениями от 02.04.2019.

Понесенные истцом судебные расходы в виде уплаченной госпошлины по платежному поручению № 17  от 20.03.2019 в сумме 6 000 руб. 00 коп. в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат возмещению ответчиком.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Урегулировать разногласия, возникшие при заключении Контракта № 18097 (закупка № 2022000000118000021). 

Изложить пункт 1 Приложения № 1 к Контракту в следующей редакции:

Поз. №

Наименование*

Кол-во, компл.

Цена за единицу товара без НДС, руб.

НДС 20%, руб.

Цена за единицу товара с НДС, руб.

Стоимость* * Товара с НДС, руб.

1.

КМ50/10-УК-А5-28-18-УЗ

6

19 374 293,78

3 874 858,76

23 249 152,54

139 494 915,24

Изложить пункт 5 Приложения № 1 к Контракту в редакции:

Поз. №

Условное обозначение крана (гп/управление/режим работы/пролет/высота подъема/КИ

Место монтажа

Кол-во

Поставка товара (акт приема-передачи)

Окончание

приемо-сдаточных испытаний (акт

ввода в эксплуатацию)

дата (не позднее)

1.

КМ50/10-УК-А5-28-18-УЗ

Цех 26 пролет 1

2

01апреля2020               01мая2020

2.

КМ50/10-УК-А5-28-18-УЗ

Цех 26 пролет 2

2

01мая2020                  01июня2020

3.

КМ50/10-УК-А5-28-18-УЗ

Цех 26 пролет 3

2

01июня2020                 01июля2020

Изложить пункт 3.1 Контракта в следующей редакции:

«Цена контракта без НДС составляет 116 245 762 руб. 68 коп., кроме того НДС 20% - 23 249 152 руб. 56 коп. Итого с НДС (20%) цена контракта составляет 139 494 915 руб. 24 коп.».

Изложить п.3.3 Контракта в следующей редакции:

«Расчеты по настоящему Контракту осуществляются поэтапно:

3.3.1.Заказчик производит первый (авансовый) платёж в размере 30 % от цены Контракта на расчетный счет Поставщика не позднее 31 декабря 2019 года, на основании счета на оплату. При этом дата оплаты аванса не влияет на изменение сроков поставки оборудования.

Счет в обязательном порядке должен содержать:

номер Контракта,

фразу «предварительная оплата»,

процент предварительной оплаты,

точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу;

Неверно оформленный счет считается невыставленным и оплате не подлежит. Срок оплаты аванса в данном случае исчисляется с момента получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в данном пункте.

3.3.2.Заказчик производит на расчетный счет поставщика промежуточные платежи за каждую партию поставленного Оборудования в соответствие с Графиком поставки оборудования и выполнения работ, утвержденном в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) в размере 50 % от цены каждой партии поставленного Оборудования, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки каждой партии Оборудования по комплектности на складе Заказчика в соответствии с требованиями п.5.10.1-5.10.3 настоящего контракта, на основании оригиналов счета, товарной накладной ТОРГ-12, счета-фактуры и Акта приема - передачи оборудования (Приложение №3), подписанного обеими сторонами.

Счет в обязательном порядке должен содержать:

номер Контракта,

фразу «за поставленное Оборудование»,

процент оплаты по платежному этапу,

точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу;

Неверно оформленный счет считается невыставленным и оплате не подлежит. Срок оплаты аванса в данном случае исчисляется с момента получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в данном пункте.

3.3.3.Заказчик производит окончательный расчет на расчетный счет поставщика за каждую партию поставленного Оборудования в соответствие с Графиком поставки оборудования и выполнения работ, утвержденном в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) в размере 20 % от цены каждой партии поставленного Оборудования, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ввода каждой партии Оборудования в эксплуатацию на основании оригиналов счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных консультационных услуг (Приложение №4), подписанного обеими сторонами, при этом счет - фактура не выставляется, т.к. работы и услуги включены в стоимость поставки. Счет в обязательном порядке должен содержать:

- номер Контракта,

- фразу «окончательная оплата по контракту»,

- процент окончательной оплаты,

- точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу;

Неверно оформленный счет считается невыставленным и оплате не подлежит. Срок оплаты аванса в данном случае исчисляется с момента получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в данном пункте.»

Изложить пункт 11.1 Контракта в следующей редакции: 

«Контракт вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами настоящего Контракта, размещенного в единой информационной системе, электронной цифровой подписью и действует до 31.12.2020г. Окончание срока действия настоящего контракта не влечет прекращения гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.».

Урегулировать разногласия, возникшие при заключении Контракта № 18025 (закупка № 2022000000118000022). 

Изложить пункт 1 Приложения № 1 к Контракту в следующей редакции:

Поз.

№

Наименование*

Кол-во, компл

Цена за единицу товара без НДС, руб.

НДС 20%, руб.

Цена за единицу товара с НДС, руб.

Стоимость* * Товара с НДС, руб.

1.

КМ 10-УП-А5-24-12-УЗ

1

6 357 382,94

1 271 476,59

7 628 859,53

7 628 859,53

2.

КМ 5-УП-А5-24-12-УЗ

1

5 445 719,01

1 089 143,80

6 534 862,82

6 534 862,82

3.

КМ 10-УП-А5-24-12-УЗ

1

6 357 382.94

1 271 476,59

7 628 859,53

7 628 859,53

4.

км 10-УП-А5-24-12-УЗ

1

6 357 382,94

1 271 476,59

7 628 859,53

7 628 859,53

5.

КМ5-УП-А5-24-12-УЗ

1

5 445 719,01

1 089 143,80

6 534 862,82

6 534 862,82

6.

км 10-УП-А5-24-12-УЗ

1

6 357 382,94

1 271 476,59

7 628 859,53

7 628 859,53

7.

км 5-УП-А5-22,98-12-УЗ

1

5 435 111,67

1 087 022.33

6 522 134,00

6 522 134,00

8.

км 10-УП-А5-22,98-12-УЗ

1

6 318 666,13

1 263 733,23

7 582 399,35

7 582 399,35

9.

КМ 10-УП-А5-22,5-10-УЗ

1

6 506 305,30

1 301 261,06

7 807 566,35

7 807 566,35

10.

КМ5-УП-А5-22,5-10-УЗ

1

5 442 128,79

1 088 425,76

6 530 554,55

6 530 554,55

Изложить пункт 5 Приложения № 1 к Контракту в следующей редакции:

Поз.№

Условное обозначение крана (гп/управление/режим работы/пролет/высота подъема/КИ

Место монтажа

Кол-во

Поставка товара (акт приема-передачи)

Окончание приемосдаточных испытаний (акт

ввода в эксплуатацию)

дата (не позднее)

1.

км 10-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 1

1

01ИЮЛя2020

01августа2020

2.

КМ 5-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 1

1

01ИЮЛя2020

01августа2020

3.

КМ 10-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 1

1

01ИЮЛя2020

01августа2020

4.

КМ 10-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 2

1

01ИЮЛя2020

01августа2020

5.

КМ 5-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 2

1

01ИЮЛя2020

01августа2020

6.

КМ 10-УП-А5-24-12-УЗ

Цех 1 пролет 2

1

01ИЮЛя2020

01августа2020

7.

КМ5-УП-А5-22,98-12-УЗ

Цех 1 пролет 3

1

01августа2020

01сентября2020

8.

KM 10-УП-А5-22,98-12-УЗ

Цех 1 пролет 3

1

01августа2020

01сентября2020

9.

KM 10-УП-А5-22,5-10-УЗ

Цех 3 пролет 2

1

01сентября2020

01октября2020

10.

KM 5-УП-А5-22,5-10-УЗ

Цех 3 пролет 4

1

01сентября2020

01октября2020

Изложить пункт 3.1 Контракта в следующей редакции:

«Цена контракта без НДС составляет 60 023 181 руб. 66 коп.; кроме того НДС 20% - 12 004 636 руб. 33 коп. Итого с НДС (20%) цена контракта составляет 72 027 817 руб. 99 коп.»

Изложить пункт 3.3 Контракта в следующей редакции:

«Расчеты по настоящему Контракту осуществляются поэтапно:

3.3.1.Заказчик производит первый (авансовый) платёж в размере 30 % от цены Контракта на расчетный счет Поставщика не позднее 31 декабря 2019 года, на основании счета на оплату. При этом дата оплаты аванса не влияет на изменение сроков поставки оборудования.

Счет в обязательном порядке должен содержать:

номер Контракта,

фразу «предварительная оплата»,

процент предварительной оплаты,

точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу;

Неверно оформленный счет считается невыставленным и оплате не подлежит. Срок оплаты аванса в данном случае исчисляется с момента получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в данном пункте.

3.3.2.Заказчик производит на расчетный счет поставщика промежуточные платежи за каждую партию поставленного Оборудования в соответствие с Графиком поставки оборудования и выполнения работ, утвержденном в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) в размере 50 % от цены каждой партии поставленного Оборудования, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки каждой партии Оборудования по комплектности на складе Заказчика в соответствии с требованиями п.5.10.1-5.10.3 настоящего контракта, на основании оригиналов счета, товарной накладной ТОРГ-12, счета-фактуры и Акта приема - передачи оборудования (Приложение №3), подписанного обеими сторонами.

Счет в обязательном порядке должен содержать:

номер Контракта,

фразу «за поставленное Оборудование»,

процент оплаты по платежному этапу,

точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу;

Неверно оформленный счет считается невыставленным и оплате не подлежит. Срок оплаты аванса в данном случае исчисляется с момента получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в данном пункте.

3.3.3.Заказчик производит окончательный расчет на расчетный счет поставщика за каждую партию поставленного Оборудования в соответствие с Графиком поставки оборудования и выполнения работ, утвержденном в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) в размере 20 % от цены каждой партии поставленного Оборудования, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ввода каждой партии Оборудования в эксплуатацию на основании оригиналов счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных консультационных услуг (Приложение №4), подписанного обеими сторонами, при этом счет - фактура не выставляется, т.к. работы и услуги включены в стоимость поставки. Счет в обязательном порядке должен содержать:

- номер Контракта,

- фразу «окончательная оплата по контракту»,

- процент окончательной оплаты,

- точную сумму, подлежащую оплате по платежному этапу;

Неверно оформленный счет считается невыставленным и оплате не подлежит. Срок оплаты аванса в данном случае исчисляется с момента получения Заказчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в данном пункте.»

Изложить пункт 11.1 Контракта в следующей редакции:

«Контракт вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами настоящего Контракта, размещенного в единой информационной системе, электронной цифровой подписью и действует до 31.12.2020г. Окончание срока действия настоящего контракта не влечет прекращения гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.».

Взыскать с Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Уфимский краностроительный завод» судебные расходы в виде уплаченной госпошлины в сумме 6 000 руб. 00 коп.

Обеспечительные меры, принятые судом определениями от 02.04.2019, отметить.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья                                                                               В.Н.Трещева