АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40- 299233/19-96-2403

г. Москва

29 января 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 22 января 2020 года 

Решение в полном объеме изготовлено 29 января 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Гутник П.С., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «Гласс Проект» к ответчику АО «ГК ИНЖГЛОБАЛ» о взыскании 6 869 595,66 руб., госпошлины

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 11.11.2019 г., диплом;

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 10.12.2018 г., диплом;

УСТАНОВИЛ:

С учетом принятых судом в порядке, предусмотренном ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уточнений ООО «Гласс Проект»  обратилось в суд с требованиями о взыскании с АО «ГК ИНЖГЛОБАЛ» задолженности в размере 5 066 182 руб. 56 коп.

Истец требования поддержал в полном объеме.

Ответчик требования не признал, согласно доводов отзыва. 

Выслушав доводы истца и ответчика, исследовав письменные доказательства, суд находит иск подлежащим удовлетворению.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры являются основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей.

Пункт 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает приобретение и осуществление юридическими лицами своих гражданских прав своей волей и в своем интересе, гарантирует свободу в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Из материалов дела усматривается, что между ООО «Гласе Проект» и АО «ГК ИНЖГЛОБАЛ», был заключен Договор строительного подряда № 03-05/2018-к7 от «03» мая 2018 г., по которому АО «ГК ИНЖГЛОБАЛ», является Подрядчиком, а ООО «Гласе Проект» - Субподрядчиком.

В рамках данного Договора Подрядчик поручил, а Субподрядчик принял на себя обязательство своими силами и средствами, из своих материалов выполнить работы на Объекте «Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой (1-я очередь «1А»), жилой корпус № 7, расположенная по адресу: г. Москва, ЮВАО г. Москвы, р-н Лефортово, ул. Золоторожский Вал, вл. 11».

Согласно пункту 2.1. Договора строительного подряда № 03-05/2018-к7 от «03» мая 2018 г., «цена договора (цена работ) складывается из стоимости фактически выполненных Субподрядчиком, объемов работ, указанных в п. 1.1. за весь период договора и рассчитывается на основании утвержденного сторонами Приложения № 1, в том числе включая все затраты Субподрядчика.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно пункту 3.1. Договора строительного подряда № 03-05/2018-к7 от «03» мая 2018 г., факт выполнения Субподрядчиком работ фиксируется подписанием актов приемки выполненных работ (КС - 2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС - 3). 

Ответчиком по результатам выполненных работ подписаны справки о стоимости выполненных работ: КСЗ № 1 - 3 120 080,25 руб. от 18.09.2018, КСЗ № 2 - 5 449 906,64 руб. от 15.10.2018, КСЗ №3 -2 951 792,55 руб. от 02.11.2018, КСЗ №4 - 1 337 670,10 руб. от 19.11.2018, КСЗ № 5 - 11 932 115,14 руб. от 20.12.2018, КСЗ № 6 - 2 811 273,07 руб. от 14.03.2019, КСЗ №7 -2 659 111,42 руб. от 29.04.2019, КСЗ № 8 - 1 237 995,00 руб. от 20.06.2019, КСЗ № 9 - 1 367 961,85 от 05.08.2019, КСЗ № 1 - 515 125,80 от 08.07.2019.

Согласно ч. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с пунктом 3.2.3 Договора оплата работ осуществляется в следующем порядке: текущие платежи осуществляются подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ ( форма КС-2) , справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), отчета субподрядчика по использованию давальческих материалов по форме (по форме Приложения № 3), исполнительной документации на выполненные jf работы, предоставления счета и счета-фактуры.

В пунктах 3.3. и 3.5. Договора подряда для обеспечения выполнения истцом/субподрядчиком полного комплекса работ в установленные сроки и с надлежащим качеством, стороны согласовали следующие условия об удержаниях из стоимости работ, выполненных ООО «Гласе Проект»:,  « п.3.3. В целях обеспечения субподрядчиком выполнения полного комплекса работ в установленные Договором сроки. Подрядчик из текущих платежей удерживает оплату Субподрядчику в размере 5 % (Пять процентов) от стоимости выполненных работ, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Удержанная сумма подлежит возврату Субподрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки полностью выполненных работ по форме Приложения №4 к Договору, за вычетом неустойки, начисленной Субподрядчику в случае просрочки выполнения работ»;  «п.3.5. В целях обеспечения субподрядчиком обязательств по качеству выполненных работ Подрядчик задерживает оплату в размере 5 % (Пять процентов) от стоимости выполненных работ. Удержание производится из текущих платежей за выполненные работы. Удержанная сумма подлежит возврату Субподрядчику не позднее 10 (Десяти) банковских дней по истечении 12 месяцев с момента выполнения всего комплекса работ на объекте и подписания сторонами Акта сдачи-приемки полностью выполненных работ (по форме Приложения №4к настоящему Договору) в порядке, предусмотренном разделом И настоящего Договора, за исключением сумм, израсходованных Подрядчиком на устранение недоделок, брака и дефектов, возникших по вине Субподрядчика и не устраненных им собственными силами и за свой счет.

Акт сдачи-приемки полностью выполненных  работ по Договору был подписан истцом и ответчиком 05 августа 2019г.

Таким образом, срок возврата АО «ГК ИНЖГЛОБАЛ» гарантийного удержания соответственно возникновения у истца права требовать возврата гарантийного удержания по п.3.3. Договора, обеспечивающего срок выполнения работ, наступил 16 сентября 2019г., срок возврата АО «ГК ИНЖГЛОБАЛ» гарантийного удержания и соответственно возникновения у истца права требовать возврата гарантийного удержания по п.3.5. Договора, обеспечивающего качество выполненных работ, наступит   19 августа 2020г.

Всего по Договору истцом были выполнены работы и переданы конструкции, на общую сумму 30 283 589,68руб. (с учетом гарантийных удержаний в размере 3 286 790,60 руб., подлежащих возврату АО «ГК ИНЖГЛОБАЛ» после истечения сроков , установленных в пунктах 3.3. и 3.5. Договора подряда).

Общая стоимость выполненных работ, размер и сумма гарантийный удержаний, стоимость работ подлежащая уплате АО «ГК ИНЖГЛОБАЛ» согласно п.3.2.3 договора, указаны в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), копии которых представлены в материалы дела.

АО «ГК ИНЖГЛОБАЛ» перечислило истцу по Договору подряда денежные средства на общую сумму 22 357 656,75 руб. 

В соответствии с условиями Договора ответчик передал, а истец принял в счет оплаты выполненных работ материалы на общую сумму 4 503 145,68 руб. по накладным, копии которых представлены в материалы дела.

Всего по Договору АО «ГК ИНЖГЛОБАЛ» оплатило работ на общую сумму 26 860 802,43руб.

Задолженность АО «ГК ИНЖГЛОБАЛ» за выполненные работы (основной долг) составляет 3 422 787,25руб. (30 283 589,68 руб. - 26 860 802,43руб.) = 3 422 787,25руб., где 30 283 589,68 руб. - стоимость выполненных работ истцом, с учетом гарантийных удержаний, 26 860 802,43руб. -     стоимость работ оплаченных ответчиком.

Задолженность АО «ГК ИНЖГЛОБАЛ» по возврату гарантийного удержания, обеспечивающего сроки выполнения истцом работ (пункт 3.3. Договора), возникшая с 16 сентября 2019г. составляет 1 643 395 ,30 руб.

Всего   задолженность   АО   «ГК   ИНЖГЛОБАЛ»       по   Договору   составляет 5 066 182,55 руб.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием оплатить задолженность, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском.

В представленном в материалы дела отзыве на исковое заявление ответчик задолженность в размере 5 066 182,55 руб. не оспорил.

Оплата выполненных работ ответчиком в полном объеме до настоящего времени не произведена. Доказательств обратного ответчиком не представлено. Сумма задолженности по данному договору составляет 5 066 182,55 руб.

Оценив и исследовав в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, проанализировав условия договора, суд пришел к выводу о том, что работы  истцом выполнены, замечания в отношении объема и качества выполненных работ не представлены, оплата работ ответчиком добровольно не произведена, поэтому требования  истца о взыскании задолженности в судебном порядке являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Расходы по госпошлине распределены на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании статей 307-309, 330, 702, 711, 740, 746, 753  Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 65, 71, 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АО «ГК ИНЖГЛОБАЛ» в пользу ООО «Гласс Проект» задолженность в размере 5 066 182 руб. 56 копеек.

Взыскать с АО «ГК ИНЖГЛОБАЛ» в доход федерального бюджета 48 331 рубль государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                П.С.  Гутник