100045_1819289  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А74-13220/2018

05 июня 2019 г.

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи В.А. Ламанского, при ведении  протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1,  рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Управления  муниципальным имуществом администрации Таштыпского района (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Атлант» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить  недостатки, выявленные в ходе эксплуатации жилых помещений.  

Руководствуясь статьями 49, 102, 110, 167–171, 176, 180, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить исковые требования. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Атлант» в срок до 01 сентября 2019 г. устранить недостатки, выявленные в ходе  эксплуатации жилых помещений, расположенных в доме № 11А по ул. Войкова в с. Таштып  Таштыпского района Республики Хакасия:  

- в квартире № 6 – произвести демонтаж и монтаж существующих оконных блоков  ПВХ с регулировкой створок; произвести замену трёх алюминиевых батарей на чугунные;  

- в квартире № 7 – произвести демонтаж и монтаж существующих оконных блоков  ПВХ с регулировкой створок; произвести замену трёх алюминиевых батарей на чугунные;  

- в квартире № 8 – произвести замену трёх алюминиевых батарей на чугунные; 

- в квартире № 9 – произвести демонтаж и монтаж существующих оконных блоков  ПВХ с регулировкой створок;  

- в квартире № 10 – произвести демонтаж и монтаж существующих оконных блоков  ПВХ с регулировкой створок; произвести замену двух алюминиевых батарей на чугунные;  

- в квартире № 22 – произвести замену двух алюминиевых батарей на чугунные;  дополнительно уложить утеплитель в перекрытиях, толщиной не менее 50 мм;  

- в квартире № 23 – произвести демонтаж и монтаж существующих оконных блоков  ПВХ с регулировкой створок; произвести замену двух алюминиевых батарей на чугунные;  дополнительно уложить утеплитель в перекрытиях, толщиной не менее 50 мм;  

- в квартире № 24 – произвести демонтаж и монтаж существующих оконных блоков  ПВХ с регулировкой створок; произвести замену двух алюминиевых батарей на чугунные;  дополнительно уложить утеплитель в перекрытиях, толщиной не менее 50 мм.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Атлант» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6000 (шесть  тысяч) рублей.  

Настоящее решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в  Третий арбитражный апелляционный суд (г. Красноярск) в месячный срок после его  принятия. Жалобы подаются через Арбитражный суд Республики Хакасия.