5/2017-27685(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020  

http://novgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

Великий Новгород Дело № А44-583/2017  21 июня 2017 года  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить, внести изменения, в государственный  контракт № 0150200000615000454-0055888-01 от 31.08.2015 года, заключенный между  между обществом с ограниченной ответственностью "Земля" и государственным  областным казенным учреждением "Управление автомобильных дорог Новгородской  области "Новгородавтодор", изложив:  

1) пункт 7.1. государственного контракта в следующей редакции: «Контракт  вступает в силу с даты его заключения и заканчивает действие 31.12.2017 включительно  по выполнению Сторонами взаимных обязательств»;  

2) пункт 3.2. государственного контракта в следующей редакции: «Сроки  выполнения работ определяются календарным планом выполнения работ (приложение №  2 к контракту):  

- начало выполнения работ: с даты заключения контракта;  - срок завершения работ: не позднее 31.12.2017»;  

3) приложение № 2 к контракту № 0150200000615000454-0055888-01 от 31.08.2015  года «календарный план выполнения кадастровых работ» в п.п. № 5 в столбец «Сроки  выполнения работ: начало, окончание», изложив его в следующей редакции: «01.11.201531.12.2017» и в п.п. № 6 в столбец «Сроки выполнения работ: начало, окончание», изложив  его в следующей редакции: «01.12.2015-31.12.2017».  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный  суд в месячный срок со дня его принятия.  

Судья А.Е. Федорова