46_2851565  

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-1273/2018  

22.03.2018 г. 

Арбитражный суд Иркутской области в составе: судьи Кириченко С.И., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации  городского поселения Белореченского муниципального образования (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 665479, Иркутская область, Усольский район,  рабочий 

<

...>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой +» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>, адрес: 664007, 

<

...>, офис, 201)  

об обязании устранении недостатков выполненных работ по муниципальному контракту  от 28.04.2014 № 05/2014  

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

 Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой+» в течении 30  дней после вступления в законную силу решения суда безвозмездно устранить недостатки  выполненных работ по муниципальному контракту от 28.04.2014г № 05/2014 на  

выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома № 2 р.п.  Белореченский Усольского района Иркутской области, а именно:  

- установить отмёты водосточных труб; 

-устранить нарушения технологии укладки кровельного покрытия (устранить наличие  просветов в шиферном покрытии между листами шифера);  

-установить жалюзийные решетки на слуховых окнах; 

-устранить зазоры при примыкании водосливных воронок к кровле и к водосточным  трубам,  

-восстановить герметичность примыкания вытяжных вентиляционных шахт чердака; 

-вывести вытяжные канализационные трубы в чердачном помещении за пределы кровли;  -произвести огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Пирилакс».  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой+» в доход  федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 6 000руб.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца после его принятия, и по истечении этого срока вступает в законную силу.  

Судья С.И. Кириченко