АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, 

<

...>, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru ОПРЕДЕЛЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-26533/2023

г. Уфа

13 января 2026 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Исхаковой А.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Губачевой У.И., рассматривает в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Энергомашстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к акционерному обществу "Нефтеавтоматика" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 7 742 968 руб. 44 коп. стоимости выполненных работ,

по встречному иску акционерного общества "Нефтеавтоматика" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Энергомашстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 17 406 388 руб. 83 коп. неосновательного обогащения, 1 260 000 руб. ущерба.

третьи лица: 1) ООО "Стройэксперт" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), 2) АО "Транснефть - Сибирь" (ИНН: 

<

***>),

Руководствуясь ст. 82, 84, 144, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Ходатайство общества с ограниченной ответственностью "Энергомашстрой" (ИНН

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о назначении по делу судебной строительно-технической экспертизы удовлетворить. 2. Назначить по делу судебную строительно-техническую экспертизу.

3. Проведение экспертизы поручить эксперту Союза «Тверская торгово-промышленная Палата» ФИО1 (РФ, г. Тверь, Смоленский

переулок, 29). Определить вознаграждение эксперту в сумме 68 350 руб. 84 коп.

Разъяснить эксперту, что в случае изменения стоимости экспертизы эксперт обязан

обратиться в суд с мотивированным ходатайством об изменении стоимости до начала

производства экспертизы. 4. На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

1) Определить объем и стоимость фактически качественно выполненных работ, соответствующих условиям контракта № 11-22НА от 20.01.2022, дополнительному соглашению № 2/дс 166-22НА к контракту (цена контракта – 117 200 030 руб.), приложению № 1б «Распределение контрактной цены и график объемов финансирования, строительным нормам и правилам, оформленных – обществом с ограниченной ответственностью "Энергомашстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>):

- актом о приемке выполненных работ формы N КС-2 и справкой о стоимости

выполненных работ и затрат формы КС-3 от 31.03.2022 № 1 на сумму 886 442 руб. 76

коп.;

- актом о приемке выполненных работ формы N КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 15.05.2022 № 2 на сумму 17 173 780 руб. 56 коп.;

- актом о приемке выполненных работ формы N КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 15.07.2022 № 3 на сумму 5 642 859 руб. 92 коп.;

- актом о приемке выполненных работ формы N КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 30.08.2022 № 4 на сумму 26 989 650 руб. 14 коп.;

- актом о приемке выполненных работ формы N КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 30.09.2022 № 5 на сумму 4 333 328 руб. 75 коп.;

- актом о приемке выполненных работ формы N КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 03.11.2022 № 6 на сумму 2 151 577 руб. 98 коп.;

- актом о приемке выполненных работ формы N КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 25.12.2022 № 7 на сумму

18 501 767 руб. 72 коп.;

- актом о приемке выполненных работ формы N КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 28.02.2023 № 8 на сумму

18 863 227 руб. 46 коп.;

- актом о приемке выполненных работ формы N КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 31.03.2023 № 9 на сумму

1 529 627 руб. 84 коп.;

- актом о приемке выполненных работ формы N КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 31.03.2023 № 9/1 на сумму

220 руб. 76 коп.;

- актом о приемке выполненных работ формы N КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 30.04.2023 № 10 на сумму

16 366 272 руб. 02 коп.;

- актом о приемке выполненных работ формы N КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 30.04.2023 № 10/1 на сумму

27 810 руб. 77 коп.;

- актом о приемке выполненных работ формы N КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 22.05.2023 № 11 на сумму

8 755 274 руб. 09 коп.?

2) В случае несоответствия объема фактически выполненных работ условиям

контракта № 11-22НА от 20.01.2022, дополнительному соглашению № 2/дс 166-22НА к контракту (цена контракта – 117 200 030 руб.), приложению № 1б

«Распределение контрактной цены и график объемов финансирования,

строительным нормам и правилам, указать в чем выразилось данное

несоответствие?

3) При наличии недостатков определить их характер, стоимость их устранения,

являются ли они существенными и неустранимыми?

4) Кем, обществом с ограниченной ответственностью "Энергомашстрой" (ИНН

<

***>, ОГРН: 

<

***>) или иным подрядчиком выполнены работы,

указанные в вышеуказанных актах выполненных работ. Каковы объёмы и стоимость

работ, выполненных каждым из лиц.

5. Установить срок проведения судебной экспертизы 30 рабочих дней со дня

получения экспертом материалов дела.

6. Предупредить эксперта об уголовной ответственности, предусмотренной статьей

307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу заведомо ложного заключения.

Предупредить эксперта о необходимости в максимально краткий срок произвести осмотр и фиксацию состояния объекта в связи с заключением ответчиком нового контракта на выполнение работ, аналогичных спорным.

Разъяснить эксперту, что если эксперт в ходе исследования обнаружит имеющие значение для дела обстоятельства, относительно которых вопросы не были поставлены судом, он вправе по своей инициативе сделать соответствующие выводы, снабдив их специальной оговоркой.

Разъяснить эксперту, что при невозможности проведения экспертизы до истечения указанного в определении срока эксперт обязан сообщить об этом, направить в суд ходатайство о продлении срока проведения экспертизы с обоснованием причин невозможности проведения экспертизы в установленный судом срок.

Судья А.А. Исхакова