Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-44008/2017

09 октября 2017 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  05 октября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен  09 октября 2017 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Альянстранстрой" (адрес:  Россия 166700, рп ИСКАТЕЛЕЙ, НЕНЕЦКИЙ АО ЗАПОЛЯРНЫЙ р-н, пер ГАЗОВИКОВ 7/4, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: акционерное общество "Коминефтеэнергомонтажавтоматика" (адрес:  Россия 196006, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/ЛИТЕР А/ПОМ. 33-Н, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 2 507 902 руб. 03 коп.

 

при участии

- от истца: Шорник А.В., выписка из ЕГРЮЛ

- от ответчика: не явился, извещен

установил:

ООО "Альянстранстрой" просит взыскать с АО "Коминефтеэнергомонтажавтоматика" 2 447 556 руб. 80 коп. задолженности по оплате выполненных работ на основании договора подряда б/н от 26.09.2016 и 60 345 руб. 23 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со стю395 ГК РФ. 

Ответчик отзыв не представил, извещен надлежащим образом. Дело рассматривается без его участия на основании ст.156 АПК РФ.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор подряда б/н от 26.09.2016.

Согласно п.1.1 договора подрядчик-истец обязуется выполнить монтажно-строительные работы на объектах: «Обсутройство нефтяного месторождения им.Ю.Россихина, Восточного Сарутаю» и Инзырейского месторождений. 

Стоимость работ определяется в соответствии с приложением 1 и составляет 240 руб. 00 коп. чел/час без НДС. 

Срок окончания работ – декабрь 2016 года. 

Истец выполнил работы в полном объеме с надлежащим качеством и направил ответчику-заказчику акты о приемке выполненных работ на суммы 643 813 руб. 80 коп. и на 1 803 743 руб. 00 коп. 

Ответчик акты не подписал, мотивированных возражений не представил, оплату работ не произвел. 

В соответствии со ст.753 ГК РФ работы считаются принятыми и подлежат оплате. 

Задолженность ответчика по оплате выполненных истцом работ составляет 2 447 556 руб. 80 коп.

В соответствии со ст.395 ГК РФ ответчику начислены проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 28.03.2017 в размере 60 345 руб. 23 коп. 

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика. 

Руководствуясь статьями 309, 310, 395, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с акционерного общества "Коминефтеэнергомонтажавтоматика" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Альянстранстрой" 2 507 902 руб. 03 коп., из них: 2 447 556 руб. 80 коп. задолженности и 60 345 руб. 23 коп. процентов, а также 35 540 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.