41/2020-2340(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А13-21172/2019

город Вологда

13 января 2020 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области   

р е ш и л :

внести следующие изменения в муниципальный контракт № 62 от  14.08.2017:  

- пункт 3.1. изложить в следующей редакции:  

«3.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального  контракта по 01 сентября 2020 года, в том числе:  

Берегоукрепление набережной VI Армии на участке от пешеходного  моста через реку Вологда в створе ул.Добролюбова до моста через реку  Вологда по ул.Чернышевского (Октябрьский мост) (2-й участок от  ул.Добролюбова до ул.Чернышевского ПК11+55-ПК17+17, 1 очередь от  ул.Комсомольской до ул.Чернышевского) с момента подписания  муниципального контракта до 01 сентября 2020 года,  

Берегоукрепление набережной VI Армии на участке от пешеходного  моста через реку Вологда в створе ул.Добролюбова до моста через реку  Вологда по ул.Чернышевского (Октябрьский мост) (2-й участок от  ул.Добролюбова до ул.Чернышевского ПК11+55-ПК17+17, 2 очередь от  ул.Добролюбова до ул.Комсомольской) с 01 декабря 2017 года по 01  сентября 2020 года,  

Берегоукрепление набережной VI Армии на участке от моста 800-летия  через реку Вологда (от ул.Прокатова) города Вологды до пешеходного моста  через реку Вологда в створе ул.Добролюбова (1-й участок 1 очередь от  ул.Самойло до ул.Добролюбова ПК0+00-ПК11+55) с 01 января 2018 года по  01 сентября 2020 года,  

2 А13-20938/2019 

Берегоукрепление набережной VI Армии на участке от моста 800-летия  через реку Вологда (от ул.Прокатова) города Вологды до пешеходного моста  через реку Вологда в створе ул.Добролюбова (1-й участок 2 очередь от  ул.Прокатова до ул.Самойло ПК0+00-ПК11+55) с 01 декабря 2018 г. по 01  сентября 2020 года,  

Берегоукрепление набережной VI Армии на участке от моста через  реку Вологда по ул.Чернышевского (Октябрьский мост) до улицы Гоголя (3- й участок от ул.Чернышевского до ул.Гоголя ПК17+17-ПК27+95) с 01 января  2019 года по 01 сентября 2020 года.  

3.2. Место выполнения работ: г.Вологда, набережная VI Армии от  моста 800-летия города Вологды до улицы Гоголя.  

- пункт 6.1. изложить в следующей редакции: «6.1. Порядок и срок оплаты: 

Оплата по сопровождаемому контракту осуществляется в пределах  суммы, установленной в Графике оплаты и выполнения работ (Приложение   № 2 к Контракту) по безналичному расчету за выполненные работы в  течение 30 (тридцати) дней на основании счета-фактуры (счета), акта  приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости  выполненных работ (форма № КС-3), подписанных сторонами, на отдельный  счет Подрядчика.  

Авансирование выполнения работ не предусмотрено.». 

- пункт 8.4.1. изложить в следующей редакции:  

«8.4.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком и  оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справкой о  стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  

После выполнения работ в соответствии с Графиком оплаты и  выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) Подрядчик представляет  Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о  стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 3 экземплярах,  исполнительную документацию на выполненный объем работ  (исполнительные схемы, акты на скрытые работы, сертификаты и т.д.).».  

- График оплаты и выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту)  изложить в новой редакции:  

«Приложение № 2 

к муниципальному контракту 

 № 62 

от «14» 08. 2017 года 

График оплаты и выполнения работ 

Выполнение работ по объекту: «Благоустройство набережной VI Армии от моста 800-летия города Вологды до улицы  Гоголя в городе Вологде 1 пусковой комплекс (берегоукрепление)»:  

Срок выполнения 

работ 

Участок берегоукрепления  

Очередь 

Срок оплаты  

Стоимость работ  

(тыс.руб.)  

С момента 

заключения 

контракта до 

01.09.2020 

2 участок 

1 очередь 

В течение 30  

23 530,52  

Берегоукрепление набережной VI Армии  

от ул.Комсомольской до 

(Тридцати) 

на участке от пешеходного моста через  

ул. Чернышевского) 

дней с момента  

реку Вологда в створе ул.Добролюбова  

акта приемки  

01.12.17-01.09.2020  

до моста через реку Вологда по 

2 очередь 

выполненных  

18 187,71  

ул.Чернышевского 

от ул.Добролюбова до 

работ (форма  

ул.Комсомольской 

КС-2) и 

01.01.18-01.09.2020  

1 участок 

1 очередь 

справки о 

38 359.39  

стоимости 

Берегоукрепление набережной VI Армии  

от ул.Самойло до ул.Добролюбова 

выполненных  

01.12.18-01.09.2020  

на участке от моста 800-летия через реку  

2 очередь 

72 276.17  

работ и затрат  

Вологда (от ул.Прокатова) города  

от ул.Прокатова до ул.Самойло 

(форма КС-3)  

Вологды до пешеходного моста через 

реку Вологда в створе ул.Добролюбова  

01.01.19-01.09.2020  

3 участок 

112 827.62  

Берегоукрепление набережной VI Армии  

на участке от моста через реку Вологда  

по ул.Чернышевского (Октябрьский 

мост) до улицы Гоголя 

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия через Арбитражный суд  Вологодской области.  

Судья Т.Б. Виноградова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебногодепартамента

Код для идентификации: 

Дата 01.03.2019 5:14:21Кому выдана Виноградова Татьяна Борисовна