АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-11466/19

20 сентября 2019 г.

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена   19 сентября 2019 г.

Полный текст решения изготовлен            20 сентября 2019 г.

Арбитражный суд Ростовской области  в составе: судьи Новожиловой М. А.

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "Комбинат крупнопанельного домостроения" (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>) к акционерному обществу "Ростовское энергетическое строительно-ремонтное предприятие" (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>) о взыскании неустойки,

встречному иску акционерного общества "Ростовское энергетическое строительно-ремонтное предприятие" к акционерному обществу "Комбинат крупнопанельного домостроения" о взыскании неустойки 

при участии:

от истца (ответчика по встречному иску): представитель  ФИО2  по доверенности от  20.12.2018

от ответчика (истца по встречному иску): представитель ФИО3 по доверенности от 10.01.2019. 

установил:

акционерное общество «Комбинат крупнопанельного домостроения» (далее - АО «ККПД») обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к акционерному обществу «Ростовское энергетическое строительно-ремонтное предприятие» (далее - АО «РЭСР») о взыскании 734 885,97 руб. пени, из них: по договору подряда от 10.01.2017 № 08 в размере 67966,43 руб. пени, по договору подряда от 10.01.2017 № 09  в размере 103 141,38 руб. пени, по договору подряда от 13.04.2016 № 24 в размере 242 232,32 руб. пени, по договору подряда от 29.08.2016 № 42 в размере 19356,02 руб. пени, по договору подряда от 18.08.2017 № 58 в размере 302189,82  руб. пени (требования, уточненные в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Акционерное общество «Ростовское энергетическое строительно-ремонтное предприятие» обратилось к акционерному обществу «Комбинат крупнопанельного домостроения» с встречными исковыми требованиями о взыскании пени в сумме  1 831 277,72 руб., в том числе: по договору от 10.01.2017 № 08 в сумме 170 143,20 руб., по договору от 10.01.2017 № 09 в сумме 402937,91 руб., по договору от 13.04.2016 № 24 в сумме 335056,04 руб., по договору  от 29.08.2016 № 42 в сумме 60 586,25 руб., по договору от 18.08.2017 № 58 в сумме 862554,32  руб. (требования, уточненные в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Истец (ответчик по встречному иску) требования поддержал полностью, просил оставить встречный иск без рассмотрения, отклонить встречный иск, просил применить ст. 333 ГК РФ в случае удовлетворения встречных исковых требований. 

Ответчик (истец по встречному иску) возражал против удовлетворения первоначальных исковых требований, заявил о невозможности своевременного выполнения работ по договорам по не зависящим от подрядчика причинам, по вине  заказчика; просил применить ст. 333  ГК РФ в отношении первоначальных исковых требований  и просил удовлетворить встречный иск полностью.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 17.09.2019 объявлялся перерыв до 19.09.2019 до 14 часов 00 минут, о чем сделано публичное извещение в информационно – телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте Арбитражного суда Ростовской области. После окончания перерыва судебное заседание продолжено с участием представителей сторон.

Стороны поддержали ранее изложенные позиции.

Судом установлено следующее.

Между (ЗАО) АО «ККПД» (генподрядчик) и (ЗАО) АО «РЭСР» (подрядчик) заключены договоры подряда от 10.01.2017 № 08, от 10.01.2017 № 09,  от 13.04.2016 №24, от 29.08.2016 № 42, от 18.08.2017 № 58.

В соответствии с п. 1.1. договора подряда от 10.01.2017 № 08 генподрядчик поручил, а подрядчик принял на себя обязательства по устройству внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения и системы ОДК на объекте имеющего адресные ориентиры: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ЖР "Левенцовский", микрорайон № 6, 2 очередь, 1 этап, (дополнительные работы: выход за границы красной линии к.6-12: от УТ17 до УТ18, от УТ20 до "красной линии" к.6-15), в соответствии с утвержденной проектной документацией, Протоколом согласования твердой договорной цены (Приложение №1 к договору), а генподрядчик обязался принять результаты выполненных подрядчиком работ и оплатить их на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.

В соответствии с п. 2.1. договора, стоимость работ составляет 4 525 300 рублей.

В соответствии с п. 3.1. указанного договора сроки выполнения работ: начало выполнения работ - 10.01.2017; окончание выполнения работ - 01.04.2017.

Как указано истцом по первоначальному иску, стоимость работ, выполненных с нарушением срока,  составляет 537 284,00 рубля. Акты выполненных работ (КС-2) на указанную сумму представлены в адрес АО (ЗАО) «ККПД» 25.07.2017.

Согласно п. 12.3. договора, в случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему договору (включая сроки, указанные в Графике производства работ), подрядчик обязан уплатить генподрядчику по его письменному требованию неустойку в размере 0,11% стоимости работ, выполненных с нарушением сроков (либо стоимости невыполненных работ) за каждый день просрочки.

По расчёту истца неустойка по договору  от 10.01.2017 № 08 за период с  02.04.2017 по 25.07.2017 (115 дней) составила 67966,43 руб.

В соответствии с п. 1.1. договора подряда  от 10.01.2017 № 09 генподрядчик поручил, а подрядчик принял на себя обязательства по выполнению комплекса работ по устройству внутриквартальных сетей водопровода и канализации - Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный (В1), канализация бытовая, Kl, КН) на объекте имеющего адресные ориентиры: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ЖР "Левенцовский", микрорайон №6, 2 очередь, 1 этап, (выходы сетей В 1 за границы красных линий к.6-12: от кол 72 до ПГ41, включительно; корп.6-15: от кол.50 до ПГ 52,включительно), в соответствии с утвержденной проектной документацией, Протоколом согласования твердой договорной цены (Приложение №1 к договору), а генподрядчик обязуется принять результаты выполненных подрядчиком работ и оплатить их на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

В соответствии с п. 2.1. договора  стоимость работ составляет 2 846 105 рублей.

В соответствии с п. 3.1. указанного договора сроки выполнения работ: начало выполнения работ - 10.01.2017; окончание выполнения работ - 20.04.2017.

Как указано истцом по первоначальному иску, стоимость работ, выполненных с нарушением срока, составляет 756 168,50 руб. Акты выполненных работ (КС-2) на указанную сумму представлены в адрес АО (ЗАО) «ККПД» 22.08.2017.

Согласно п. 12.3. договора в случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему договору (включая сроки, указанные в Графике производства; работ), подрядчик обязан уплатить генподрядчику по его письменному требованию неустойку в размере 0,11% стоимости работ, выполненных с нарушением сроков (либо стоимости невыполненных работ) за каждый день просрочки.

По расчёту истца неустойка по договору  от 10.01.2017 № 09 за период с  21.04.2017 по 22.08.2017 (124 дня) составила 103 141,38 руб.

В соответствии с п. 1.1. договора подряда  от 13.04.2016 №24 генподрядчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по устройству внутриквартальных инженерных сетей водоснабжения и канализации (далее работы) на объекте, имеющего адресные ориентиры: Ростовская область, г. ростов-на-Дону, жилой район «Левенцовский», МКР 6 (2 очередь, 1 этап) (далее «объект»), в соответствии с утвержденной проектной документацией, протоколами согласования твердой договорной цены, а генподрядчик обязуется принять результаты выполненных подрядчиком работ и оплатить их на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.

В соответствии с п. 2.1. договора стоимость работ составляет 30 610 000 рублей.

В соответствии с п. 3.1. указанного договора сроки выполнения работ: начало выполнения работ - 25.04.2016; окончание выполнения работ - 15.05.2017.

Как указано истцом по первоначальному иску, стоимость работ, выполненных с нарушением срока,  составляет 425 118,15 рублей. Акты выполненных работ (КС-2) на указанную сумму представлены в адрес АО (ЗАО) «ККПД» 15.10.2018.

Согласно п. 12.3. договора в случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему договору (включая сроки, указанные в Графике производства; работ), подрядчик обязан уплатить генподрядчику по его письменному требованию неустойку в размере 0,11% стоимости работ, выполненных с нарушением сроков (либо стоимости невыполненных работ) за каждый день просрочки.

По расчёту истца неустойка по договору  от 13.04.2016 № 24 за период с  16.05.2017 по 15.10.2018 (518 дней) составила 242232,32 руб.

 В соответствии с п. 1.1. договора подряда от 29.08.2016 № 42 генподрядчик поручил, а подрядчик принял на себя обязательства по выполнению комплекса работ по устройству внутриквартальных инженерных сетей водоснабжения и канализации на объекте имеющего адресные ориентиры: Ростовская область, г. Ростов- на-Дону, жилой район «Левенцовский», МКР 6, (переход 1-2 очередь), в соответствии с утвержденной проектной документацией, Протоколом согласования твердой договорной цены (Приложение №1 к договору), а генподрядчик обязуется принять результаты выполненных подрядчиком работ и оплатить их на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.

В соответствии с п. 2.1. договора стоимость работ по договору составляет 2 485 646 рублей.

В соответствии с п. 3.1. указанного договора сроки выполнения работ: начало выполнения работ — 09.09.2016; окончание выполнения работ - 10.10.2016.

Согласно п. 1. дополнительного соглашения №4 от 13.06.2018 к договору подряда от 29.08.2016 № 42 стороны договорились внести изменения в п. 3.1.2. договора подряда № 42 от 29.08.2016 г., изложив его в следующей редакции: «окончание выполнения работ - 30.08.2018».

Как указано истцом по первоначальному иску, стоимость работ, выполненных с нарушением срока,  составляет 1 256 884,40 руб. Акты выполненных работ (КС-2) на указанную сумму представлены в адрес АО (ЗАО) «ККПД» 13.09.2018.

Согласно п. 12.3. договора в случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему договору (включая сроки, указанные в Графике производства; работ), подрядчик обязан уплатить генподрядчику по его письменному требованию неустойку в размере 0,11% стоимости работ, выполненных с нарушением сроков (либо стоимости невыполненных работ) за каждый день просрочки.

По расчёту истца неустойка по договору  от 29.08.2016 № 42 за период с  31.08.2018 по 13.09.2018 (14 дней) составила 19 356,02 руб.

В соответствии с п.1.1.договора подряда от 18.08.2017 № 58 генподрядчик поручил, а подрядчик принял на себя обязательства по выполнению комплекса работ по устройству внутриквартальных сетей водоснабжения и канализации на объекте имеющего адресные ориентиры: г. Ростов-на-Дону, ЖР "Левенцовский", микрорайон №5, 1 очередь, в соответствии с утвержденной проектной документацией, Протоколом согласования твердой договорной цены (Приложение №1 к договору), а генподрядчик обязуется принять результаты выполненных подрядчиком работ и оплатить их на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.

В соответствии с п. 2.1. договора  (в редакции дополнительного соглашения № 3 от 26.07.2019) стоимость работ по договору составляет 24 680 936,76 руб. 

В соответствии с п. 3.1. указанного договора сроки выполнения работ: начало выполнения работ - 05.09.2017; окончание выполнения работ - 31.12.2018.

В соответствии с п. 3.1.3. договора сроки выполнения отдельных видов и этапов работ (промежуточных объемов работ) определяются Графиком производства работ (приложений № 2).

Дополнительным соглашением №2 от 19.07.2018 к договору подряда от 18.08.2017 № 58, сторонами согласован  график производства работ (приложение№2 к дополнительному соглашению), в соответствии с которым, подрядчик обязан выполнить работы по устройству наружного водопровода в срок с 10.10.2017 по 10.10.2018, работы по устройству напорной канализации в срок с 05.09.2017до 10.12.2017 (л.д. 153 т. 3).

Дополнительным соглашением от 26.07.2019 № 3 к договору подряда от 18.08.2017 №58 сторонами зафиксирован тот факт, что по состоянию на 01.01.2019 генподрядчиком приняты работы на сумму 23 505 273,90 руб.; стоимость работ подлежащих принятию после 01.01.2019 составила  1 175 662,86 руб.

Акт выполненных работ (КС-2) № 5 на общую сумму  1 508 933 рубля, включая  работы по устройству напорной канализации на сумму 74700 руб. и   работы по устройству наружного водопровода сумму 1 434 233 руб. представлены подрядчиком в адрес генподрядчика (АО «ККПД») 15.11.2018 (л.д. 121 т. 1).

Акт выполненных работ (КС-2) № 6 на сумму  1175662,86 руб. на работы по устройству  наружного водопровода представлены подрядчиком в адрес генподрядчика (АО «ККПД») 26.07.2019 (л.д.146 т. 3).

Согласно п. 12.3. договора в случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему договору (включая сроки, указанные в Графике производства; работ), подрядчик обязан уплатить генподрядчику по его письменному требованию неустойку в размере 0,11% стоимости работ, выполненных с нарушением сроков (либо стоимости невыполненных работ) за каждый день просрочки.

По расчёту истца неустойка по договору  от 18.08.2017 № 58  за нарушение срока устройства наружного водопровода за период с 11.10.2018 по 15.11.2018 составила 56 795,63 рубля; неустойка за нарушение срока устройства напорной канализации  за период с 11.12.2017 по 15.11.2018 (340 дней) составила 27 937,80 рублей.

Истцом по первоначальному иску также указано, что по состоянию на 30.03.2019 АО «РЭСР» выполнены работы по договору от 18.08.2017 № 58 на сумму 23 505 273,90 руб., не выполнены работы на сумму 1 156 067,99 руб. (устройство наружного водовода).

Сумма неустойки за просрочку выполнения работ по договору за период с 11.10.2018 по 30.03.2019 (171 день) составила 217 456,39 руб. 

По состоянию на 30.03.2019 общая сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору от 18.08.2017 № 58 составляет 302 189, 82 руб. (56 795,63 руб. +27 937,80 руб.+217 456,39 руб.).

Общая сумму неустойки по всем договорам – 734 885,97 руб.

Изложенное послужило основанием для обращения истца в суд с первоначальными исковыми требованиями.

Возражая против первоначальных исковых требований АО «РЭСР» ссылается на невозможность выполнения работ в согласованный сторонами срок по вине генподрядчика, которым несвоевременно передавалась строительная площадка, не принимались проектные решения, не оплачивались авансовые платежи, необходимые для приобретения материалов, о чем АО «РЭСР» неоднократно указывало в письменных обращениях адресованных АО «ККПД».

Так, в спорных договорах подряда от 10.01.2017 №08, от 10.01.2017 №9,  от 13.04.2016 №24, от 29.08.2016 №42, от 13.04.2016  №58 предусмотрено, что для приобретения материалов генподрядчик на основании полученного от подрядчика счета в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора перечисляет на расчетный счет подрядчика аванс (п.2.4 договоров). Также АО «ККПД» обязалось своевременно производить оплату выполненных работ в сроки, определенные  договором (пункты  10.3 и 12.4 договоров); передавать по акту приема-передачи на период выполнения комплекса работ на Объекте строительную площадку (п.6.3 договоров).

При исполнении обязательств по договору подряда от 10.01.2017 № 08 АО «РЭСР» направляло в адрес АО «ККПД»: письмо №51 от 13.03.2017 с требованием о погашении задолженности для продолжения выполнения работ и соблюдения договорных сроков по договорам в общей сумме 23 616 000 руб., в том числе по договору №08 на сумму в размере 3 868 000 руб.; письмо №223 от 04.07.2017 с требованием об освобождении территории, попадающей в зону строительства от объектов, препятствующих прокладке линий тепло- и водоснабжения к корпусу 6-14 МКР №6; письмо №117 от 25.04.2017 о необходимости заключения дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения работ по договору ввиду того, что работы были временно приостановлены в связи с отсутствием их финансирования.

Работы по договору выполнены в следующие периоды:

Акт КС-2 №1 от 25.01.2017 на сумму 3 988 016 руб. за период 10.01.2017- 25.01.2017 (16 дней), Акт КС-2 №2 от 27.07.2017 на сумму 537 284 руб. за период 03.07.2017-25.07.2017 (23 дня).

В процессе исполнения договора подряда от 10.01.2017 №9 АО «РЭСР» направляло в адрес АО «ККПД» письмо №51 от 13.03.2017 с требованием о погашении задолженности для продолжения выполнения работ и соблюдения договорных сроков по договорам в общей сумме 23 616 000 руб., в том числе по договору №09 в размере 2 045 000 руб., письмо №223 от 04.07.2017 требовало освободить территорию, попадающей в зону строительства от объектов, препятствующих прокладке линий тепло- и водоснабжения к корпусу 6-14 МКР №6, письмом №117 от 25.04.2017 указывало на необходимость заключения дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения работ по договору ввиду того, что работы были временно приостановлены в связи с отсутствием их финансирования.

Согласно Актам формы КС -2 АО «РЭСР» выполнило работы по договору от 10.01.2017 №9  в следующие периоды: Акт КС-2 №1 от 22.06.2016 на сумму 675072 руб. в период с 01.06.2015 по 22.06.2016 Акт КС-2 №2 от 16.08.2016 на сумму 1 919 200,34руб. в период с 01.07.2015 по 16.08.2016 Акт КС-2 №3 от 14.10.2016 на сумму 9 236 926 руб. в период с 16.09.2016 по 14.10.2016 Акт КС-2 №4 от 16.11.2016 на сумму 9 910 739руб. в период 15.10.2015 по 16.11.2016 Акт КС-2 №5 от 16.12.2016 на сумму 5 930 631,20 руб. в период 17.11.2016 по 16.12.2016 Акт КС-2 №6 от 16.12.2016 на сумму 4 299 303,70руб. в период 17.11.2016 по 16.12.2016 Акт КС-2 №7 от 16.12.2016 на сумму 1 631 327руб. в период 17.11.2016 по 16.12.2016 Акт КС-2 №8 от 17.04.2017 на сумму 2 093 924,07руб. в период с 01.04.2017 по 17.04.2017 Акт КС-2 №8 от 13.09.2018 на сумму 72 932,38руб. периоде 16.08.2018 по 13.09.2018АО «ККПД» заявлена неустойка за просрочку выполнения работ в размере 425 118,15руб., начисленная на стоимость выполненных работ по акту КС-2 №9 от 15.10.2018 - 425 118,15руб. за период с 15.05.2017 по 15.10.2018 (519 дней).

В процессе исполнения договора от 13.04.2016 №24 АО «РЭСР» направляло в адрес АО «ККПД»: письмо №51 от 13.03.2017 с требованием о погашении задолженности для продолжения выполнения работ и соблюдения договорных сроков по договорам в общей сумме 23 616 000 руб., в том числе по договору №24 в размере 6 949 000руб., в письме №87 от 04.04.2017 сообщалось, что практически все работы по договору выполнены, кроме участка от К88 до К91, на котором работает кран и проложена подъездная дорога. В данном письме АО «РЭСР» просило направить утвержденный график производства с указанием даты предоставления строительной площадки на участке К88 до К91; письмо №117 от 25.04.2017 о необходимости заключения дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения работ ввиду того, что работы были временно приостановлены в связи с отсутствием их финансирования; письмо №124 от 07.05.2018, в котором сообщалось о несоблюдении АО «ККПД» обязательств по существующим договорам в части финансовых обязательств (задолженность превысила 17 000 000 руб.) и условий организации строительства (не предоставление строительных площадок) что затрудняет деятельность АО «РЭСР». АО «РЭСР» просило АО «ККПД» принять поэтапные меры ликвидации образовавшейся задолженности для предотвращения срыва намеченных сроков завершения работ; письмо №165 от 31.05.2018 об истечении сроков работ по причинам не зависящим от АО РЭСР и предложением прекращения договора соответствующим уменьшением объемов и стоимости работ в связи с нецелесообразностью проведения благоустройства на данном этапе и отсутствия объекта работ; письмо №171 от 05.06.2018, в котором сообщило, что в связи с отсутствием финансирования невозможно выполнение работ по объектам, в связи с чем вынуждено приостановить работы на объектах с 13.06.2018 до погашения существующей задолженности по договорам; письмо №192 от 18.06.2018 с просьбой согласовать и подписать график оплаты по договорам, а также провести рабочее совещание для актуализации договоров, сроки производства по которым истекли по независящим от АО РЭСР» обстоятельствам; письмо №249 от 13.07.2018 с предложением о прекращении договора с уменьшением объемов работ и их стоимости в связи с отсутствием объекта работ; письмо №316 от 22.08.2018 о направлении графиков производства работ.

По договору от 29.08.2016 №42 АО «РЭСР» направляло в адрес АО «ККПД»: письмо №51 от 13.03.2017 с требованием о погашении задолженности для продолжения выполнения работ и соблюдения договорных сроков по договорам в общей сумме 23 616 000 руб., в том числе по договору №24 в размере 823 000 руб.; письмо №117 от 25.04.2017 о необходимости заключения дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения работ, поскольку по договорам №24 от 13.04.2016, №42 от №41 от 15.08.2016, №06 от 10.01.2017, №08 от 10.01.2017, №09 от 10.01.2017 сроки договоров истекли либо подходят к завершению, однако работы по этим договорам были временно приостановлены в связи с отсутствием финансирования; письмо №124 от 07.05.2018, в котором сообщалось о несоблюдении АО «ККПД» обязательств по существующим договорам в части финансовых обязательств (задолженность превысила 17 000 000 руб.) и условий организации строительства (не предоставление строительных площадок) что затрудняет деятельность АО «РЭСР». АО «РЭСР» просило АО «ККПД» принять поэтапные меры ликвидации образовавшейся задолженности для предотвращения срыванамеченных сроков завершения работ №136 от 14.05.2018 о предоставлении площадки для строительства (на участке от К26 до УП6 до УП6 (разборка внутриквартальной временной дороги); письмо №165 от 31.05.2018 о готовности выполнения работ при предоставлении АО «ККПД» площадки строительства и оформления дополнительного соглашения с утверждением соответствующего графика работ.

При исполнении данногодоговора от 29.08.2016 №42 сторонами неоднократно пересматривался график производства работ (дополнительные соглашения №1 от 07.10.2016, №3 от 18.04.2017, №4 от 13.06.2018.

Дополнительным соглашением №4 от 13.06.2018 был согласован окончательный срок выполнения работ - 30.08.2018.

Письмом №165 от 31.05.2018 о готовности выполнения работ при предоставлении АО «ККПД» площадки строительства, а также о необходимости согласования графика работ. Как следует из акта КС-2 от 13.09.2018 АО «РЭСР» смогло приступить к работам только 16.08.2018. 

По договору от 13.04.2016 №58  АО «РЭСР» обращалось в адрес АО «ККПД» в следующих случаях: письмо №360 от 25.09.2017 с требованием о перечислении аванса, а также об отсутствии возможности гарантировать завершение работ в сроки, предусмотренные графиком работ при отсутствии финансирования; письмо №411 от 31.10.2017 о необходимости принятия технического решения и оформления акта на дополнительные работы в связи с установлением несоответствия абсолютных отметок существующей бытовой напорной канализации с отметками запроектированной сети в месте ее подключения к существующей; письмо №414 от 10.11.2017 о необходимости принятия решения о корректировке проекта и внесении изменений в сметную документацию с оформлением дополнительного соглашения на СМР в связи с установлением несоответствия проектных решений и фактического расположения существующих канализационных трубопроводов; письмо № №430 от 27.11.2017, в котором сообщало, что фактически получило возможность приступить к работам по устройству сетей водопровода и канализации 5 МКР «Левенцовский» 24.11.2017 и готово завершить работы до 05.12.2017 при устранении АО «ККПД» условий, препятствующих работе: отсутствие проектного решения по водомерному узлу; невозможность производства работ на участке прохождения временной автодороги от УП1 до УП2; Письмом №456 от 14.12.2017 сообщалось, что в связи с отсутствием проектных решений и непредставлением строительной площадки срываются предусмотренные договором сроки по устройству внутриквартальных сетей водоснабжения и канализации в части строительства участков дождевой канализации. АО «РЭСР» просило рассмотреть целесообразность проведения указанных работ и в случае необходимости их выполнения скорректировать договорные сроки; письмо №4 от 12.01.2018 с предложением внести изменения в договор в части уменьшения объемов работ и цены в связи с невозможностьюсоблюдения сроков, предусмотренных договором по независящим от АО «РЭСР» причинам; письмо №99 от 18.04.2018, согласно которому после сообщения АО «ККПД» №10- 023/18-К от 11.01.2018, что по устройству ливневой канализации откладываются на неопределенное время, АО «РЭСР» повторно предложило подписать дополнительное соглашение о внесении изменений в части уменьшения соответствующих объемов и стоимости работ; письмо №124 от 07.05.2018, в котором сообщалось о несоблюдении АО «ККПД» обязательств по существующим договорам в части финансовых обязательств ( задолженность превысила17 000 000 руб.)и условий организации строительства (не предоставление строительных площадок) что затрудняет деятельность АО «РЭСР». АО «РЭСР» просило АО «ККПД» принять поэтапные меры ликвидации образовавшейся задолженности для предотвращения срыва намеченных сроков завершения работ; письмо №135 от 14.05.2018 с просьбой указания сроков предоставления строительной площадки для составления поэтапногографика завершения работ по строительству водопроводной линии; письмо №165 от 31.05.2018 о не предоставлении АО «ККПД» строительной площадки, в связи с чем, предлагалось заключить дополнительное соглашение с исключением объемов работ и стоимости ливневой канализации и утверждением Заказчиком графика на выполнение оставшихся работ; письмо №171 от 05.06.2018, в котором сообщило, что в связи с отсутствием финансирования невозможно выполнение работ по объектам, в связи с чем вынуждено приостановить работы на объектах с 13.06.2018 до погашения существующей задолженности по договорам; письмо №192 от 18.06.2018 с просьбой согласовать и подписать график оплаты по договорам, а также провести рабочее совещание для актуализации договоров, сроки производства по которым истекли по независящим от. АО РЭСР» обстоятельствам; письмо №397 от 08.11.2018 о невозможности выполнения работ по прокладке наружного водопровода ПГ9-ПГ12 в связи с не предоставлением строительной площадки; письмо №415 от 19.11.2018 о нарушении графика выполнения работ, предусмотренного дополнительным соглашением №2 от 19.07.2018 в связи с непредоставление строительной площадки на участке ПГ9-ПГ12 по устройству и просьбой откорректировать дополнительным соглашением график работ с учетом сроков предоставления строительной площадки; письмо №417 от 26.11.2018 - о необходимости внесения изменений в графики работ в связи с истекшим срокомстроительства наружного водопровода, предусмотренного дополнительным соглашением№2 от 19.07.2018 по причине позднего предоставления строительной площадки и не переданного участка ПГ10-ПГ124 письмо №438 от 30.11.2018 (с приложением Актов передачи строительных площадок с замечаниями) о выявленных замечаниях при передаче стройплощадки, о готовности выполнения работ на участке ПГ10-ПГ12 до 15.12.2018 при устранении замечаний, указанных при передаче строительной площадки. Кроме того, АО «РЭСР» просило завершить подписание ранее представленных в ноябре форм КС-2, КС-3 за выполненные работы в ноябре;  письмо №446 от 04.12.2018 о направлении для рассмотрения и утверждения откорректированных сроков окончания работ по договору.

Ссылаясь на изложенные обстоятельства АО «РЭСР» заявило о ненадлежащим исполнением обязательств по договорам со стороны АО «ККПД», в результате чего наступили последствия не зависящие от подрядчика в виде нарушения сроков производства работ по договорам.

Истцом по встречному иску заявлены требования о взыскании пени в общей сумме 1 831 277,72 руб., в том числе:  по договору подряда от 10.01.2017 № 08 в сумме 170 143,20 руб., по договору от 10.01.2017 № 09 в сумме 402937,91 руб., по договору от 13.04.2016 № 24 в сумме 335056,04 руб., по договору  от 29.08.2016 № 42 в сумме 60 586,25 руб., по договору от 18.08.2017 № 58 в сумме 862554,32  руб. (требования, уточненные в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Требования по встречному  иску мотивированы следующим.

По условиям пунктов 10.3  договоров  от 10.01.2017 № 08, от 10.01.2017 № 09, от 13.04.2016 № 24, от 29.08.2016 № 42, от 18.08.2017 № 58  оплата результата выполненных подрядчиком и принятых генподрядчиком работ по договору производится ежемесячно денежными средствами на расчетный счет подрядчика в течение 20 банковских дней с момента подписания сторонами актов о приемке работ по формы КС-2 и справок по форме КС-3 с последующим предоставлением подрядчиком в соответствии с НК РФ счет-фактур, и при условии оформления сторонами акта сверки взаиморасчетов.

Согласно пунктам 10.4 договоров  от 10.01.2017 № 08, от 10.01.2017 № 09, от 13.04.2016 № 24, от 29.08.2016 № 42, от 18.08.2017 № 58  оплата выполненных работ производится с учетом гарантийного удержания (п. 12.13) и погашением авансового платежа пропорционально объему выполненных и принятых генподрядчиком  работ, начиная с первого отчетного периода и до полного его погашения.

В силу положений пунктов 12.13. договоров  от 10.01.2017 № 08, от 10.01.2017 № 09, от 13.04.2016 № 24, от 29.08.2016 № 42, от 18.08.2017 № 58  в качестве обеспечения исполнения подрядчиком своих обязательств по договору и обеспечения устранения подрядчиком скрытых дефектов, выявленных в течение первого года гарантийного срока, генподрядчик осуществляет удержание денежных средств (гарантийное удержание) в размере 3% от средств, подлежащих оплате подрядчику в счет выполнения работ.

Согласно пунктам 12.14 договоров  от 10.01.2017 № 08, от 10.01.2017 № 09, от 13.04.2016 № 24, от 29.08.2016 № 42, от 18.08.2017 № 58 , после ввода внутриквартальных сетей теплоснабжения в эксплуатацию и передачи их ООО «ККПД-Инвест», оплата гарантийного удержания осуществляется генподрядчиком путем перечисления денежных средств на счет подрядчика равными частями в размере 25% от обей суммы гарантийного удержания в течение последней платежной недели каждого квартала в течение гарантийного срока (12 месяцев) на основании счета подрядчика. 

В соответствии с пунктами 12.11. договоров  от 10.01.2017 № 08, от 10.01.2017 № 09, от 13.04.2016 № 24, от 29.08.2016 № 42, от 18.08.2017 № 58   в случае несвоевременной оплаты выполненных и принятых работ, генподрядчик обязан оплатить подрядчику пеню (неустойку) в размере 0,03% от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, кроме случаев, когда финансирование прекращено вследствие консервации объекта или его части.

По договору №08 от 29.08.2016 АО «РЭСР» выполнило работы на сумму 3 988 016 руб. и выставило счет на оплату №6 от 25.01.2017 суммы 3 868 375,52 руб. (за вычетом 119 640,48 руб. гарантийного удержания), что подтверждается Актом КС-2, справкой КС-3 №1 от 25.01.2017. 

Срок оплаты суммы 3 868 375,52 руб. - до 22.02.2017.

Платежным поручением №4176 от 03.07.2017 АО «ККПД» оплатило 3 868 375,52 руб.

Сумма пени составила 152027,16руб. (3 868 375,52руб. х 131 (23.02.2017 по 03.07.2017) х 0,03%).

По Актам КС-2, КС-3 №2 от 25.07.2017 АО «РЭСР» выполнило работы на сумму 537 284руб. и выставило счет №40 от 25.07.2017 на оплату суммы 521 165,48 руб. (за вычетом 16 118,52 руб. гарантийного удержания).

Срок оплаты суммы 521 165,48 руб. - до 22.08.2017.

АО «ККПД» погасило задолженность в размере 135 759 руб. путем подписания Акта зачета взаимных требований от 28.09.2017.

Стоимость неоплаченных работ в период 23.08.2017 по 28.09.2017 (37дней) составила 521 165,48 руб.

Пеня за просрочку оплаты работ - 5784,94руб. (521165,48 руб. х 37x0,03%).

Платежным поручением №7446 от 10.11.2017 АО «ККПД» оплатило 385 406,48 руб.

Стоимость неоплаченных работ в период 29.09.2017 по 10.11.2017 (43 дня) составила 385 406,48 руб. (521 165, 48- 135 759 руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 4 971, 74руб. (385 406,48 руб. х 43 х 0,03%).

АО РЭСР выставило счет на оплату гарантийного удержания за 3 квартал 2017 года - счет №64 от 20.09.2017 на сумму 33 929,75 руб.

АО «ККПД» платежным поручением №7837 от 17.11.2017 оплатило 33 929,75руб.

Пеня за просрочку оплаты работ - 468,23руб. (33 929,75руб. х 46 (03.10.2017 по 17.11.2017) х 0,03%).

АО РЭСР выставило счет на оплату гарантийного удержания за 4 квартал 2017 года - счет №131 от 29.12.2017 на сумму 33 929,75 руб.

АО «ККПД» оплатило платежным поручением №2249 от 11.04.2018.

Пеня за просрочку оплаты работ - 936,46ру6.(33 929,75руб. х 92 (10.01.2018 по 11.04.2018) х 0,03%). 

АО РЭСР выставило счет №36 от 01.04.2018 на оплату гарантийного удержания за 1 квартал 2018 года на сумму 33 929,75руб.

Стоимость неоплаченных работ за период с 03.04.2018 по 02.07.2018 (91 день) - 33929,75руб.

Пеня за просрочку оплаты работ - 926,28руб. (33929,75руб. х 91 х 0,03%).

АО РЭСР выставило счет №81 от 01.07.2018 на оплату гарантийного удержания за 2 квартал 2018 года на сумму 33 929,75руб.

Стоимость неоплаченных работ за период с 03.07.2018 по 16.11.2018 (137 дней) - 67 859,5руб. (33929,75руб. +33929,75руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 2789,03руб. (67 859,5руб. х137х 0,03%).

АО «ККПД» оплатило 33 929,75руб. платежным поручением №8520 от 16.11.2018.

Стоимость неоплаченных работ за период 17.11.2018 по 24.06.2019 (220 дней) составила 33 969,75руб. (67 859,5руб. - 33 969,75руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 2239,36руб.(33 929,75руб. х 220 х 0,03%).

АО «ККПД» платежным поручением №8634 от 24.06.2019 (на основании решения Арбитражного суда Ростовской области от 07.05.2019 по делу №А53-5229/19) погасило задолженность в размере 33 969,75 руб.

Общая сумма пени за несвоевременную оплату стоимости работ по договору №8 от

29.08.2016 составила 170143,2 руб. (152 027,16 руб. + 5784,94руб. + 4 971,74руб. + 468,23руб. + 936,46руб. + 926,28руб. + 2789,03руб. + 2239,36 руб.).

По договору от 10.01.2017 №09 АО «РЭСР» выполнило работы на сумму 2 107 936,50руб., что подтверждается Актом  КС-2, справкой КС-3 №1 от 25.01.2017, и выставило счет от 25.01.2017 №8 на оплату суммы 2 044 698,40руб. (за вычетом 63 238,09 руб. гарантийного удержания).

Срок оплаты суммы 2 044 698,40руб. - до 22.02.2017.

Стоимость неоплаченных работ в период с 23.02.2017-19.09.2017 (209 дней) составила 2 044 698,4руб.

Пеня за просрочку оплаты работ -128 202,59 руб. (2 044 698,4руб х 209 х 0,03%).

По Актам КС-2, справке КС-3 №2 от 22.08.2017 АО «РЭСР» выполнило работы на сумму 756 168,50руб., выставило счет №46 от 22.08.2017 на оплату суммы 733 483, 44руб. (за вычетом 22 685,06. гарантийного удержания).

Срок оплаты суммы 733 483, 44руб. - до 19.09.2017.

Стоимость неоплаченных работ за период с 20.09.2017 по 28.09.2017 (9 дней) составила 2 778 181,84 руб. (2 044 698,4руб +733 483, 44руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 7501,09руб. (2 778 181,84руб. х 9 х 0,03%).

Путем подписания Акта зачета взаимных требований от 28.09.2017  АО «ККПД» погасило задолженность по договору №09 в размере 85 923,15руб.

Стоимость неоплаченных работ за период с 29.09.2017 по 02.10.2017 (4 дня) составила 2 692 258,69 (2 778 181,84 - 85 923,15руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 3 230,71руб. (2 692 258,69 х 4 х 0,03%).

На оплату гарантийного удержания за 3 квартал 2017 года АО «РЭСР» выставило счет №65 от 20.09.17 на сумму 21 480,79руб. Срок оплаты 02.10.2017.

Стоимость неоплаченных работ за период с 03.10.2017 по 30.10.2017 (28 дней) составила 2 713 739,48 руб. (2 692 258,69руб. +21480,79руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 22 795,41руб. (2 713 739,48руб. х 28 х0,03%).

АО «ККПД» платежным поручением от 30.10 .2017  №7218 оплатило 733 483,44руб.

Стоимость неоплаченных работ за период с 31.10.2017 по 17.11.2017 (18 дней) составила  1 980 256,04руб. (2 713 739,48 руб.- 733 483,44руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 10 693,38руб. (1 980 256,04руб. х 18 х 0,03%).

АО «ККПД» платежным поручением от 17.11.2017 №7838 оплатило 21480,79 руб.

Стоимость неоплаченных работ в период с 18.11.2017 по 09.01.2018 (53 дня) составила 1 958 775,25 руб. (1 980 256,04руб.- 21480,79 руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 31144,53 руб. (1 958 775,25 руб. х 53 х0,03%).

На оплату гарантийного удержания за 4 квартал 2017 года АО «РЭСР» выставило счет №132 от 29.12.2017 на сумму 21 480,79руб. Срок оплаты 09.01.2018.

Стоимость неоплаченных работ в период 10.01.2018 по 02.04.2018 (83 дня) составила 1 980 256,04руб. (1 958 775,25 руб. +21 480,79руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 49 308,38руб. (1 980 256,04руб. х 94 х0,03%).

На оплату гарантийного удержания за 1 квартал 2018 года АО «РЭСР» выставило счет №37 от 01.04.2018 на сумму 21 480,79руб. Срок оплаты 02.04.2018.

Стоимость неоплаченных работ в период с 03.04.2018 по 11.04.2018 (9 дней) составила 1 001 736,83руб. (1 980 256,04руб. +21480,79руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 5 404,69руб. (2 001 736,83 руб. х 9 х 0,03%).

АО «ККПД» платежным поручением от 11.04.2018  №2248 оплатило 21 480,79 руб.

Стоимость неоплаченных работ в период 12.04.2018 по 02.07.2018 (82 дня) 1 980 256,04руб. (2 001 736,83руб. -21 480,79 руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ -48 714,3руб. (1 980 256,04руб.х 82 х 0,03%).

На оплату гарантийного удержания за 2 квартал 2018 года АО «РЭСР» выставило счет №82 от 01.07.2018 на сумму 21 480,79руб. Срок оплаты 02.07.2018.

Стоимость неоплаченных работ в период с 03.07.2018 по 16.11.2018(137 дней) – 1 001 736,83руб. ( 1 980 256,04руб. +21480,79 руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ 82 2 71,38руб. (2 001 736,83 руб. х137х 0,03%)

АО «ККПД» платежным поручением от 16.11.2018 №8521 оплатило 21480,79 руб.

Стоимость неоплаченных работ в период с 17.11.2018 по 30.11.2018 (14 дней).

1 980 256,04руб. (2 001 736,83руб. -21 480,79руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ — 8 317,08руб. (1 980 256,04руб. х 14 х 0,03%).

АО «ККПД» платежным поручением от 30.11.2018 №8780 оплатило 1 000 000 руб.

Стоимость неоплаченных работ в период 01.12.2018 по 14.12.2018 (14 дней) - 980 256,04руб. (1 980 256,04руб. - 1 000 000 руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 4117,08руб. ( 980 256,04руб. х 14 х 0,03%).

АО «ККПД» платежным поручением от 14.12.2018  №9159 оплатило 958 775,25руб.

Стоимость неоплаченных работ в период 15.12.2018 по 24.06.2019 (192 дня) -21480,79 руб. (980 256,04руб. - 958 775,25руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 1237,29руб. (21480,79 руб. х 192 х 0,03%).

АО «ККПД» платежным поручением №8635 от 24.06.2019 (на основании решения Арбитражного суда Ростовской области от 07.05.2019 по делу №А53-5229/19) погасило задолженность в сумме 21480,79 руб.

Общая сумма пени за несвоевременную оплату стоимости работ по договору от 10.01.2017 №9 составила 402 937,91руб. (128 202,59руб. + 7 501,09руб.+ 3 230,71руб.+ 22 795,41руб. + 10 693,38руб.+ 31144,53 руб. + 49 308,38руб. + 5 404,69руб. + 48 714,3руб.+ 82 271,38руб. + 8317,08руб.+ 4117,08 руб. + 1 237,29 руб.)

По договору №24 от 13.04.2016 АО «РЭСР» выполнило работы на сумму 675 072,80 руб., что подтверждается Актам КС-2, справкой КС-3 №1 от 22.06.2016, и выставило счет №49 от 22.06.2016 на оплату суммы 654 820,62руб. (за вычетом 20 252,18 руб. гарантийного удержания)

Срок оплаты суммы 654 820,62руб. - до 20.07.2016.

Платежным поручением №786146 от 29.08.2016 АО «ККПД» оплатило 654 820,62руб. Пеня за просрочку оплаты работ в размере 654 820,62 руб. за период с 21.07.2016 по 29.08.2016 (40 дней) составила 7857,85руб. (654 820,62руб. х40 х 0,03%).

По Актам КС-2, КС-3 №2 от 16.08.2016 АО «РЭСР» выполнило работы на сумму 2 264 656,40руб., выставило счет №71 от 16.08.2016 на оплату суммы 2 196 716,71руб. (за вычетом 67 939,69. гарантийного удержания).

Срок оплаты суммы 2 196 716,71руб. - до 13.09.2016.

Платежным поручением №787398 от 06.10.2016 АО «ККПД» оплатило 2 196 716,71руб. Пеня за просрочку оплаты работ в размере 2196 716,71руб. за период с 14.09.2016 по 06.10.2016 (23 дня) составила 15157,35руб. (2 196 716,71руб. х 23 х 0,03%).

По Актам КС-2, КС-3 №3 от 14.10.2016 АО «РЭСР» выполнило работы на сумму 9 236 926руб., выставило счет №87 от 14.10.2016 на оплату суммы 5 894 337,15руб. (за вычетом 277 107,78 гарантийного удержания и 3 065 481,07 зачета аванса).

Срок оплаты суммы 5 894 337,15руб. - до 14.11.2016.

Платежным поручением №788001 от 31.10.2016 АО «ККПД» оплатило 5 894 337,15руб

По Актам КС-2 №4, №5 от 16.11.2016, КС-3 №4 от 16.11.2016 АО «РЭСР» выполнило работы на общую сумму 9 910 739руб., выставило счет №106 от 16.11.2016 на оплату суммы 6 324 315,80 руб. (за вычетом 297 322,17руб. гарантийного удержания и 3 289 101,03 зачета аванса).

Срок оплаты суммы 6 324 315,80руб. - до 14.12.2016.

Платежным поручением №789091 от 07.12.2016 АО «ККПД» оплатило 1 000 000 руб.

Пеня за просрочку оплаты работ в размере 5 324 315,80руб (6 324 315,80руб - 1000 000руб.) за период с 15.12.2016 по 21.12.2016 (7 дней) составила 11181,06руб. (5 324 315,80руб. х7х 0,03%).

Платежным поручением №789634 от 21.12.2016 АО «ККПД» оплатило 1 000 000 руб.

Пеня за просрочку оплаты работ в размере 4 324 315,80руб (5 324 315,80руб - 1 000 000руб.) за период с 22.12.2016 по 20.01.2017 (30 дней) составила 38 918,84руб. (4 324 315,80руб. х 30 x 0,03%).

По Актам КС-2 №6, №7 от 16.12.2016, КС-3 №5 от 16.12.2016 АО «РЭСР» выполнило работы на общую сумму 5 930 631,20 руб., выставило счет №114 от 16.12.2016 на оплату суммы 3 784 499,27руб. (за вычетом 177 918,94 руб. гарантийного удержания и 1 968 212,99 руб. зачета аванса).

Срок оплаты суммы 3 784 499,27руб. - до 20.01.2017.

Стоимость неоплаченных работ в период с 21.01.2017 по 01.02.2017 (12 дней) составила 8 108 815,07руб. (4 324 315,80руб. +3 784 499,27руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 29 191,74руб. (8 108 815,07руб. х 12 х 0,03%).

Платежным поручением №572 от 01.02.2017 АО «ККПД» оплатило 300 000 руб.

Стоимость неоплаченных работ в период с 02.02.2017 по 28.04.2017 (86 дней) составила 7 808 815,07руб. (8 108 815,07руб. - 300 000 руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ -201 467,43руб. (7 808 815,07руб. х 86 х 0,03%).

Платежным поручением №2255 от 28.04.2017 АО «ККПД» оплатило 4 324 315,80 руб. Стоимость неоплаченных работ в период с 29.04.2017 по 18.05.2017 (20 дней) составила 3 484 499,27руб. (7 808 815,07руб. -4 324 315,80 руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 20 907руб. (3 484 499,27руб. х 20 х 0,03%).

По Актам КС-2 №8 от 17.04.2017, КС-3 №6от 17.04.2017 АО «РЭСР» выполнило работы на сумму 2 093 924,07руб., выставило счет №18 от 17.04.2017 на оплату суммы 1 336 190,68руб. (за вычетом 62 817,72 руб. гарантийного удержания и 694 915,67 зачета аванса).

Срок оплаты суммы 2 196 716,71руб. - до 18.05.2017.

Платежным поручением №3206 от 25.05.2017 АО «ККПД» оплатило 3 484 499,27 руб. Платежным поручением №2808 от 25.05.2017 АО «ККПД» оплатило 1 336 190,68 руб. Стоимость неоплаченных работ в период с 19.05.2017 по 25.05.2017 (7 дней) составила 4 820 689,95руб. (3 484 499,27руб. + 1 336 190,68руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ -10123,45 руб. (4 820 689,95руб. х 7х 0,03%).

По Актам КС-2 №8 от 13.09.2018, КС-3 №6 от 13.09.2018 АО «РЭСР» выполнило работы на сумму 72 932,38руб., выставило счет №114 от 13.09.2018 на оплату суммы 46 540,16руб. (за вычетом 2 187,97руб. гарантийного удержания и 24 204,25руб. зачета аванса).

Срок оплаты суммы 46 540,16руб. - до 11.10.2018.

Платежным поручением №7896 от 29.10.2018 АО «ККПД» оплатило 46 540,16 руб.

Пеня за просрочку оплаты работ в размере 46 540,16руб. за период с 12.10.2018 по 29.10.2018 (18 дней) составила 251,32руб. (46 540,16руб. х 18 х 0,03%).

По Актам КС-2 №9 от 15.10.2018, КС-3 от 15.10.20185 АО «РЭСР» выполнило работы на сумму 425 118,15 руб., выставило счет №118 от 15.10.2018 на оплату суммы 271 279,6 руб. (за вычетом 12 753,54. гарантийного удержания и 141 084,99 зачета аванса).

Срок оплаты суммы 271 279,62руб. - до 13.11.2018.

Платежным поручением №7897 от 29.10.2018 АО «ККПД» оплатило 271 279,6руб.

Общая сумма пени за несвоевременную оплату стоимости работ по договору от 13.04.2016 № 24 составила 335 056,04руб. (7 857,85 руб. + 15157,35руб. +11181,06 руб. + 38 918,84 руб. + 29 191,74 руб. + 201 467,43 руб. + 20 907 руб. + 10123,45 руб. + 251,32 руб.).

По договору от 29.08.2016 №42 АО «ККПД» произвело предоплату для приобретения строительных материалов в размере 745 693 руб. с нарушением срока, счет АО «РЭСР» №70 от 29.08.2016 оплатило платежным поручением №787439 от 07.10.2016.

По Актам КС-2, КС-3 №1 от 16.11.2016 АО «РЭСР» выполнило работы на сумму 1 228 761,6 руб., выставило счет №107 от 16.11.2016 на оплату суммы 823 270,27руб. (за вычетом 36 862,85 руб. гарантийного удержания и 368 628,48 руб. зачета авансового платежа).

Срок оплаты суммы 823 270,27руб. до 14.12.2016.

Платежным поручением №3990 от 03.07.2017 АО «ККПД» оплатило 823 270,27 руб.

Пеня за просрочку оплаты работ в размере 823 270,27руб. за период с 15.12.2016 по 03.07.2017 (201 день) составила 49 643,2руб. (823 270,27руб. х 201 х 0,03%)

По Актам КС-2, КС-3 №2 от 13.09.2018 АО «РЭСР» выполнило работы на сумму 1 256 884,4руб., выставило счет №112 от 13.09.2018 на оплату суммы 842 112,55руб. (за вычетом 37 706, 53руб. гарантийного удержания и 377 065,32 руб. зачета авансового платежа). 

Срок оплаты суммы 842 112,55руб. до 11.10.2018

Пеня за просрочку оплаты работ в размере 842112,55руб. за период с 12.10.2018 по 29.10.2018 (18 дней) составила 4 547,41руб. (842 112,55руб. х 18 х 0,03%).

Платежным поручением №7899 от 29.10.2018 АО «ККПД» оплатило 767 543,17 руб. Стоимость неоплаченных работ в период с 30.10.2018 по 10.01.2019 (73 дня) составила 74569,38руб. (842 112,55руб. -767 543,17 руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 1 633,07руб. (74569,38руб. х73 х 0,03%).

Па оплату гарантийного удержания за 4 квартал 2018 года АО «РЭСР» выставило счет №148 от 31.01.2018 на сумму 9 426,63 руб. Срок оплаты 09.01.2019.

Стоимость неоплаченных работ составила 83996,01руб. Согласно решению Арбитражного суда Ростовской области от 06.05.2019 по делу №А53-5228/19 указанная задолженность взыскана с АО «ККПД».

До настоящего времени АО «ККПД» сумму задолженности в размере 83 996,01руб. не погасило.

Сумма пени, начисленная на стоимость неоплаченных работ в размере 83996,01 руб. (74569,38руб.+ 9 426,63 руб.) за период с 10.01.2019 по 17.07.2019 (189 дней) составила 4 762,57руб. (83996,01руб. х 189х 0,03%).

Общая сумма пени за несвоевременную оплату стоимости работ по договору от 29.08.2016  №42 составила 60 586,25руб. (49 643,2руб. +4 547,41руб. +1 633,07руб+4 762,57руб.).

По договору №58 от 18.08.2017  АО «ККПД» предоплату для приобретения строительных материалов в размере 16 775 530руб. произвело с нарушением срока, счет АО «РЭСР» №53 от 08.09.2017 оплатило платежными поручениями №6358 от 03.10.2017 на сумму 7 000 000руб., №6962 от 20.10.2017 на сумму 9 775 530,95руб.

По Актам КС-2, КС-3 №1 от 16.10.2017 АО «РЭСР» выполнило работы на сумму 2 355 217руб., выставило счет №84 от 16.10.2017 на оплату сумму 1 247 951,99 (за вычетом 79 656,51руб. гарантийного удержания и 1 247 951,99 руб. зачета аванса).

Срок оплаты суммы 2 355 217руб. - до 14.11.2017.

Платежным поручением №8345 от 08.12.2017 АО «ККПД» оплатило 1 247 951,99 руб.

Пеня за просрочку оплаты работ в сумме 1 247 951,99руб. за период с 15.11.2017 по 08.12.2017 (24 дня) составила - 8 985,25 руб. (1 247 951,99руб.х 24 х 0,03%).

По Актам КС-2, КС-3 №2 от 18.12.2017 АО «РЭСР» выполнило работы на сумму 14 811 259,90руб., выставило счет №111 от 18.12.2017 на оплату сумму 6 961 292,15руб. (за вычетом 444 337,80руб. гарантийного удержания и 7 405 629,95руб. зачета аванса).

Срок оплаты суммы 6 961 292,15руб. - до 23.01.2018.

Пеня за просрочку оплаты работ в сумме 6 961 292,15руб. за период с 24.01.2018 по 09.08.2018 (197 дней) составила - 411 412,44 руб. (6 961 292,15руб.х 197 х 0,03%).

Платежным поручением № 5652 от 09.08.2018 АО «ККПД» оплатило 1000000 руб. Стоимость неоплаченных работ в период с 10.08.2018 по 15.08.2018 (6 дней) составила 5 961 292,15руб. (6 961 292,15руб. -1 000 000 руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 10 730,33 (5 961 292,15руб. х 6 х 0,03%).

Платежным поручением №5930 от 15.08.2018 АО «ККПД» оплатило 150000 руб.

Стоимость неоплаченных работ в период с 16.08.2018 по 31.08.2018 (16 дней) составила 4 461 292,15руб. (5 961 292,15руб. -1 500 000 руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 21 414,2руб. (4 461 292,15руб. х 16 х 0,03%).

Платежным поручением №6213 от 31.08.2018 АО «ККПД» оплатило 150000 руб.

Стоимость неоплаченных работ в период с 31.08.2018 по 14.09.2018 (14 дней) составила 2 961 292,15руб. (4 461 292,15руб. -1 500 000 руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 12437,43руб. (2 961 292,15руб. х 14 х 0,03%).

Платежным поручением №6582 от 14.09.2018 АО «ККПД» оплатило 1000000 руб. Стоимость неоплаченных работ в период с 15.09.2018 по 11.10.2018 (27 дней) составила 1 961 292,15руб. (2 961 292,15руб. -1 000 000 руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 15 886,47руб. (1 961 292,15руб. х 27х 0,03%).

По Актам КС-2, КС-3 №3 от 13.09.2018 АО «РЭСР» выполнило работы на сумму 3 332 778руб., выставило счет №115 от 13.09.2018 на оплату суммы 1566405,66руб. (за вычетом 99 983,34руб. гарантийного удержания и 1 666 389 зачета аванса).

Срок оплаты суммы 1566405,66руб. - до 11.10.2018.

Стоимость неоплаченных работ в период с 12.10.2018 по 13.11.2018 (32дня) составила 3 527 697,81руб. (1 961 292,15руб. +1566405,66 руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 33 865,92ру6.(3 527 697,81руб. х 32 х 0,03%).

По Актам КС-2, КС-3 №4 от 15.10.2018 АО «РЭСР» выполнило работы на сумму 1 197 086руб., выставило счет №120 от 15.10.2018 на оплату суммы 562 630,42руб. (за вычетом 35 912,58руб. гарантийного удержания и 598 543 зачета аванса).

Срок оплаты суммы 562 630,42руб. - до 13.11.2018.

Стоимость неоплаченных работ в период с 14.11.2018 по 13.12.2018 (30 дней) составила 4 090 328,23 (3 527 697,81руб. +562 630,42руб.).

Пеня за просрочку оплаты работ - 36 812,95руб.(4 090 328,23руб. х30 х 0,03%).

По Актам КС-2, КС-3 №5 от 15.11.2018 АО «РЭСР» выполнило работы на сумму 1 197 086руб., выставило счет №156 от 15.11.2017 на оплату суммы 709198,49руб. (за вычетом 45 267,99руб. гарантийного удержания и 754 466,52 зачета аванса).

Срок оплаты суммы 709198,49руб. - до 13.12.2018.

До настоящего времени стоимость работ в размере 4 799 526,72руб. (4 090 328,23. + 709198,49 руб.) АО «ККПД» не оплачена.

Пеня за просрочку оплаты работ в размере 4 799 526,72 руб. за период с 14.12.2018 по 17.07.2019 (216 дней) составила 311 009,33руб. (4 799 526,72руб. х 216х 0,03%).

Общая сумма пени за несвоевременную оплату стоимости работ по договору 18.08.2017 №58 составила 862 554,32 руб. (8 985,25руб. + 411 412,44руб. + 10 730,33 + 21 414,2руб. + 12437,43руб. 15 886,47руб. + 33 865,92руб. + 36 812,95руб. + 311 009,33руб.)

Стороны обменялись претензионными письмами.

Невозможность урегулирования спора мирным путем послужила основанием для обращения с требованиями в суд.

Правоотношения сторон регулируются нормами закрепленными в главе 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

 Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

 Доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ (п. 2 ст. 720 ГК РФ). Пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным сторонами.

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с нормами статьи 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Истцом по первоначальному иску заявлено требование о взыскании пени за нарушение срока выполнения работ.

Истцом по встречному иску заявлено требование о взыскании пени за нарушение срока оплаты выполненных работ.

Факт нарушения срока выполнения работ и факт нарушения срока оплаты выполненных работ по договорам подряда от 10.01.2017 № 08, от 10.01.2017 № 09, от 13.04.2016 № 24, от 29.08.2016 № 42, от 18.08.2017 № 58  подтверждается материалами дела, сторонами не оспаривается.

Согласно пунктам  12.3. договоров от 10.01.2017 № 08, от 10.01.2017 № 09, от 13.04.2016 № 24, от 29.08.2016 № 42, от 18.08.2017 № 58   в случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему договору (включая сроки, указанные в Графике производства работ), подрядчик обязан уплатить генподрядчику по его письменному требованию неустойку в размере 0,11% стоимости работ, выполненных с нарушением сроков (либо стоимости невыполненных работ) за каждый день просрочки.

В соответствии с пунктами 12.11. договоров  от 10.01.2017 № 08, от 10.01.2017 № 09, от 13.04.2016 № 24, от 29.08.2016 № 42, от 18.08.2017 № 58   в случае несвоевременной оплаты выполненных и принятых работ, генподрядчик обязан оплатить подрядчику пеню (неустойку) в размере 0,03% от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, кроме случаев, когда финансирование прекращено вследствие консервации объекта или его части.

Таким образом, в спорных договорах сторонами согласованы условия привлечения к ответственности подрядчика (за нарушение срока выполнения работ) и генподрядчика (за нарушение срока оплаты работ).   

Истцом по первоначальному иску заявлено требование о взыскании  734 885,97 руб. пени, в том числе: по договору подряда от 10.01.2017 № 08 в размере 67966,43 руб., по договору подряда от 10.01.2017 № 09  в размере 103 141,38 руб., по договору подряда от 13.04.2016 № 24 в размере 242 232,32 руб., по договору подряда от 29.08.2016 № 42 в размере 19356,02 руб., по договору подряда от 18.08.2017 № 58 в размере 302189,82  руб.

Проверив расчет неустойки, произведенный истцом по первоначальному иску, суд признает его неверным в следующей части.

По расчёту истца неустойка по договору  от 10.01.2017 № 08 за период с  02.04.2017 по 25.07.2017 (115 дней) составила 67966,43 руб.

По договору  подряда от 10.01.2017 № 08 дата окончания выполнения работ - 01.04.2017 (п. 3.1.)

Как указано истцом по первоначальному иску,  работы на сумму 537 284  рубля предъявлены к приемке генподрядчика  АО (ЗАО) «ККПД» по актам выполненных работ (КС-2)  от 25.07.2017.

Согласно статье 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Из представленного истцом расчета пени следует, что им не учтено, что 01.04.2017 является выходным днем (суббота). Следовательно, последним днем срока предъявления работ к приемке является первый рабочий день – 03.04.2017, верным является период просрочки с 04.04.2017 по 25.07.2017 (113 дней). В связи с чем, судом произведён перерасчет пени, с применением надлежащих сроков окончания периодов. По расчету суда неустойка за указанный период составляет 66784,40 руб. (537 284х0,11%х113 дней).

По расчету истца по первоначальному иску неустойка по договору подряда от 18.08.2017 № 58 составила 302 189, 82 руб., в том числе: 

неустойка за нарушение срока устройства напорной канализации  за период с 11.12.2017 по 15.11.2018 составила 27 937,80 руб.; 

неустойка за нарушение срока устройства наружного водопровода на сумму 1 434 233 руб. за период с 11.10.2018 по 15.11.2018 составила 56 795,63 руб. и на сумму  1 156 067,99 руб. за период с 11.10.2018 по 30.03.2019 составила 217 456,39 руб.;

В соответствии с п. 3.1.3. договора сроки выполнения отдельных видов и этапов работ (промежуточных объемов работ) определяются Графиком производства работ (приложений № 2). 

Дополнительным соглашением от 19.07 .2018 №2 к договору подряда от 18.08.2017 № 58 сторонами согласован график производства работ (приложение№2 к дополнительному соглашению), в соответствии с которым  подрядчик обязан выполнить работы по устройству наружного водопровода в период с 10.10.2017 по  10.10.2018 и работы по устройству напорной канализации в период с 05.09.2017 по  10.12.2017 (воскресенье) (л.д. 153 т. 3).

Акт выполненных работ (КС-2) № 5 на общую сумму  1 508 933 рубля, включая  работы по устройству напорной канализации на сумму 74700 руб. и   работы по устройству наружного водопровода сумму 1 434 233 руб. представлены подрядчиком в адрес генподрядчика (АО «ККПД») 15.11.2018 (л.д. 121 т. 1).

Акт выполненных работ (КС-2) № 6 на сумму  1175662,86 руб. на работы по устройству  наружного водопровода сумму представлены подрядчиком в адрес генподрядчика (АО «ККПД») 26.07.2019 (л.д.146 т. 3).

С учетом ст. 193 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойка за нарушение срока устройства напорной канализации подлежит расчету с 12.12.2017 по 15.11.2018 (339 дней) и составляет 27855,63 руб. (74700 руб. х 0,11% х 339дн).

Неустойка за нарушение срока устройства наружного водопровода в сумме 56 795,63 руб. за период с 11.10.2018 по 15.11.2018 и в сумме 217 456,39 руб. за период с 11.10.2018 по 30.03.2019  рассчитана истцом по первоначальному иску верно.

Таким образом, неустойка по договору подряда от 18.08.2017 № 58 составила 302 107,65 руб.

По договору  от 10.01.2017 № 09 расчет неустойки в сумме 103 141,38 руб. за период с  21.04.2017 по 22.08.2017 (124 дня) произведен верно.

По договору  от 13.04.2016 № 24 расчет неустойки в сумме 242232,32 руб. за период с  16.05.2017 по 15.10.2018 (518 дней) произведен верно.

 По договору  от 29.08.2016 № 42 расчет неустойки в сумме 19 356,02 руб. за период с  31.08.2018 по 13.09.2018 (14 дней) произведен верно.

Таким образом, неустойка за нарушение срока выполнения работ  по договорам от 10.01.2017 № 08, от 10.01.2017 № 09, от 13.04.2016 № 24, от 29.08.2016 № 42, от 18.08.2017 № 58, на которую может рассчитывать истец по первоначальному иску,  составляет   733 621,77 руб. (66784,40 руб.+ 302 107,65 руб.+ 103 141,38 руб. + 242232,32 руб.+ 19 356,02 руб.)

Защищаясь против исковых требований, ответчик  по первоначальному иску ссылается на невозможность выполнения работ по всем договорам в согласованный сторонами срок по вине генподрядчика, которым не оплачивались авансовые платежи, необходимые для приобретения материалов, не производились своевременно расчеты по договорам за принятые работы, а также несвоевременно передавалась строительная площадка, не оказывалось подрядчику содействие по изменению проектных решений в тех случаях, когда АО «РЭСР» указывало на данные обстоятельства в письменных обращениях, адресованных АО «ККПД».

На основании статей 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней) предусмотренными законом или договором, которую должник обязан уплатить в случае неисполнение или ненадлежащего исполнения обязательств.

В соответствии с пунктом 2 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Законодатель возлагает на подрядчика обязанность информировать заказчика о ходе выполнения работ, обо всех обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок - ст. 716 ГК РФ.

В случае, если какие-то работы или часть работ выполняется иждивением заказчика и заказчик не выполняет свои обязанности по предоставлению оборудования либо материалов либо не допускает работников подрядчика для проведения работ, подрядчик вправе не приступать к работам, а начатую работу приостановить - ст. 719 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 718 ГК РФ   в ходе выполнения подрядных работ заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. В соответствии со статьей 750 ГК РФ, если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по их устранению.

Таким образом, корреспондирующая обязанность заказчика состоит в необходимости оказывать содействие подрядчику в выполнении работ в объеме и на и на условиях, предусмотренных в договоре.

По условиям спорных договоров от 10.01.2017 № 08, от 10.01.2017 № 09, от 13.04.2016 № 24, от 29.08.2016 № 42, от 18.08.2017 № 58   АО «ККПД» обязалось:

оплатить аванс на приобретение стройматериалов в течение 10 банковских дней после заключения договора для приобретения подрядчиком стройматериалов (сумма аванса в каждом договоре согласована) (п. 2.4 договоров);

своевременно производить оплату выполненных работ в сроки, определенные договорами (п. 10.3 договоров),

передавать по акту приема-передачи на период выполнения комплекса работ на объекте строительную площадку (п.6.2. договоров).

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что АО «ККПД» не произвело своевременную выплату аванса по спорным договорам и несвоевременно производило оплату за выполненные работы, предъявленные к приемке.

Вместе с тем, по указанному основанию работы не объектах не приостановлены, о невозможности их выполнения не было заявлено подрядчиком. 

Доказательства иного материалы дела не содержат.

Письма о приостановлении работ по договору от 13.04.2016 №24 ввиду отсутствия финансирования №165 от 31.05.2018, №171 от 05.06.2018,  №192 от 18.06.2018 не могут быть  приняты во внимание ввиду того, что направлены подрядчиком в адрес генподрядчика после истечения срока выполнения работ по договору.

Ввиду изложенного, доводы АО «РЭСР» против требований АО «ККПД»  в указанной части признаются несостоятельными.

Ссылка АО «РЭСР» на несовершение АО «ККПД»   действий по передаче строительных площадок  по всем договорам отклоняется. Как подтверждено материалами дела и не оспаривается подрядчиком, работы на объектах фактически выполнялись, выполненные работы предъявлялись к приемке генподрядчика по актам формы КС-2, что подстрижено материалами дела. Соответственно, строительная площадка во всех случаях была обозначена, передана генподрядчиком и получена заказчиком.

Вместе с тем, как видно из представленной переписки сторон, по договорам от 13.04.2016 № 24, от 29.08.2016 № 42, от 18.08.2017 № 58 было затруднено продолжение выполнения работ ввиду того, что места производства работ (участки для прокладки подземных коммуникаций) были заняты материалами либо оборудование генподрядчика (иных подрядчиков), о чем   АО «РЭСР» извещало АО «ККПД»  письменно.

Так, по договору от 13.04.2016 №24 письмом  от 04.04.2017 №87 подрядчик сообщил генподрядчику, что практически все работы по договору выполнены, кроме участка от К88 до К91, на котором работает кран и проложена подъездная дорога. В данном письме АО «РЭСР» просило направить утвержденный график производства с указанием даты предоставления строительной площадки на участке К88 до К91. Письмо направлено генподрядчику  до истечения согласованного договором  срока завершения работ (15.05.2017).

По договору от 29.08.2016 №42 письмом от 07.05.2018 и письмом  от 14.05.2018 №136 подрядчик сообщил генподрядчику о необходимости предоставления площадки для строительства (на участке от К26 до УП6 до УП6 (разборка внутриквартальной временной дороги). Письма направлено генподрядчику  до истечения согласованного договором  срока завершения работ (30.05.2017).

По договору от 18.08.2017 № 58 подрядчик сообщал генподрядчику в письме от 27.11.2017 № 430 и 14.05.2018 № 135, от 08.11.2018 №397, от 30.11.2018 №438 о необходимости устранения АО «ККПД» условий, препятствующих работ, связанных с тем, что на участке производства работ проходит временная автодороги от УП1 до УП2, участок производства работ занят объектами (материалами) иных смежных подрядчиков. Письма направлено генподрядчику  до истечения согласованного договором  срока завершения работ по договору.

Кроме того, при исполнении обязательств по договору от 13.04.2016 №58  АО «РЭСР» неоднократно извещало генерального подрядчика о необходимости изменения проектных решений и согласовании дополнительных работ  (письмо от 31.10.2017 №411; письмо от 10.11.2017 №414; письмо от 27.11.2017 № 430, от 14.12.2017 №456.

В силу ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В силу части 3 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации  должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором.

АО «РЭСР» доказана затруднительность выполнения работ в согласованный срок по договорам от 13.04.2016 № 24, от 29.08.2016 № 42, от 18.08.2017 № 58 ввиду того, что  АО «ККПД» не совершались  разумные и добросовестные действий, направленных на освобождение от складирования материалов и оборудования мест (участков), где подрядчиком проводились работы по прокладке подземных коммуникаций. Доказательства незамедлительного реагирования на  обращения  подрядчика и оказания ему содействия в выполнении работ материалы дела не содержат.

Одновременно судом не принимаются во внимания письма АО «РЭСР» о содействии в завершении работ по договорам от 10.01.2017 № 08, от 10.01.2017 № 09, поскольку они направлялись в адрес АО «ККПД» после истечения согласованных сторонами договоров  сроков производства работ, то есть  несвоевременно извещая заказчика работ о препятствиях в их выполнении подрядчик принял на себя негативные риски, связанные с нарушением срока производства работ по данным договорам. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, суд приходит к выводу, что оснований для привлечения АО «РЭСР» к ответственности в виде пени за нарушение срока производства работ по договорам   от 13.04.2016 № 24, от 29.08.2016 № 42, от 18.08.2017 № 58 не имеется.

Таким образом, первоначальные исковые требования подлежат частичному удовлетворению на сумму 169 925,78 руб. (согласно уточненному расчету суда по договору от 10.01.2017 № 08 следует взыскать 66784,40 руб. пени; по договору подряда  от 10.01.2017 № 09 следует взыскать 103 141, 38 руб. пени).

Истцом по встречному иску заявлены требования о взыскании пени в общей сумме 1 831 277,72 руб., в том числе:  по договору подряда от 10.01.2017 № 08 в сумме 170 143,20 руб., по договору от 10.01.2017 № 09 в сумме 402937,91 руб., по договору от 13.04.2016 № 24 в сумме 335056,04 руб., по договору  от 29.08.2016 № 42 в сумме 60 586,25 руб., по договору от 18.08.2017 № 58 в сумме 862554,32  руб. (требования, уточненные в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктами 12.11. договоров  от 10.01.2017 № 08, от 10.01.2017 № 09, от 13.04.2016 № 24, от 29.08.2016 № 42, от 18.08.2017 № 58   в случае несвоевременной оплаты выполненных и принятых работ, генподрядчик обязан оплатить подрядчику пеню (неустойку) в размере 0,03% от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, кроме случаев, когда финансирование прекращено вследствие консервации объекта или его части.

По условиям пунктов 10.3  договоров  от 10.01.2017 № 08, от 10.01.2017 № 09, от 13.04.2016 № 24, от 29.08.2016 № 42, от 18.08.2017 № 58 предусмотрено, что оплата результата выполненных подрядчиком и принятых генподрядчиком работ по договору производится ежемесячно денежными средствами на расчетный счет подрядчика в течение 20 банковских дней.

Факт нарушения обязательств генподрядчиком обязательств по оплате работ подтверждается материалами дела.

Таким образом, требования АО «РЭСР» о взыскании пени за нарушение с рока производства работ правомерны.

Расчет неустойки, произведенный истцом по встречному иску, судом проверен, признан верным.

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Ответчиком по встречному иску расчет истца не оспорен, коннтррасчет не представлен.

Довод ответчика по встречному иску о необходимости включения в период времени расчетов за выполненные работы периода рассмотрения генеральным подрядчиком документации о выполненных работах, представленной подрядчиком (актов КС-2, исполнительной документации), отклоняется. 

По условиям п. 10.2 спорных договоров от 10.01.2017 № 08, от 10.01.2017 № 09, от 13.04.2016 № 24, от 29.08.2016 № 42, от 18.08.2017 № 58   подписанные акты формы КС-2, справки КС-3 либо мотивированный отказ в приемке работ возвращается подрядчику генеральным подрядчиком в течение 14 рабочих дней.

В п. 10.3. спорных договоров предусмотрено, что оплата результата выполненных подрядчиком и принятых генподрядчиком работ по договору производится ежемесячно денежными средствами на расчетный счет подрядчика в течение 20 банковских дней.

Истолковав по правилам ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации  положения пунктов 10.2 и 10.3 спорных договоров суд приходит к выводу, что условия п. 10.2 и п. 10.3 договоров регулируют различные обязательства сторон, связанные с возвратом подписанных документов о приемке работ (п. 10.2. договоров) и оплатой работ (п. 10.3. договоров), ввиду чего оснований для включения в период расчетов по договорам срока, предусмотренного для возврата документов (актов) не имеется.

Таким образом, требования по встречному иску подлежат удовлетворению на общую сумму 1 831 277,72 руб.

Ответчиком по первоначальному иску и ответчиком по встречному иску заявлены ходатайства об уменьшении неустойки в порядке ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые подлежат отклонению ввиду следующего.

В силу пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно пункту 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7), если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктами 73, 74 названного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.).

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации) (пункт 75 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7).

Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации) (пункт 77 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7).

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Стороны являются коммерческими организациями и наряду с другими участниками гражданского оборота несут коммерческие риски при осуществлении предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение прибыли (статья 2 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Стороны свободны в определении условий договора в силу статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, и заключая спорные  договоры были осведомлены о размере ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства, а также о том, что размер ответственности подрядчика (0,11%) отличается от размера ответственности генподрядчика (0,03%).

Сделки не являлись обязательными для сторон по спору и заключались вне рамок специальных публичных процедур, подпадающих под специальное законодательное регулирование. 

Заключая спорные договоры стороны согласились с их условиями и, подписав договоры, приняли на себя обязательства по их исполнению.

Какого-либо спора или разногласий по условию о размере неустойки, либо оснований применения неустойки у сторон при заключении договора не имелось.

Доказательства иного в материалы дела не представлены.

При заключении договора стороны должны был осознавать возможность наступления последствий в виде применения меры гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств, предусмотренной договорами.

Степень соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требуют правила статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение вопроса о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства производится на основании имеющихся в деле материалов и конкретных обстоятельств дела. Явная несоразмерность неустойки должна быть очевидной.

Доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, сторонами не представлено (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Доказательств того, то взыскиваемая неустойка может привести к получению другой стороной необоснованной выгоды, также не представлено.

Суд отмечает, что ставки штрафной санкции в размере 0,11% и 0,03% от размера несвоевременно исполненного обязательства являются обычно применяемыми в гражданских правоотношениях и не могут свидетельствовать о чрезмерности штрафной санкции.

При указанных обстоятельствах ходатайства сторон подлежат отклонению. 

Ответчиком по первоначальному иску и ответчиком по встречному иску заявлены ходатайства об оставлении исков без рассмотрения,  которые подлежат отклонению ввиду следующего.

В соответствии с частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции, вступившей в силу с 12.07.2017) гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором. Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.

По смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, пункта 7 части 1 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации под претензионным или иным досудебным порядком урегулирования спора подразумевается одна из форм защиты гражданских прав, которая заключается в попытке урегулирования спорных вопросов непосредственно между предполагаемыми кредитором и должником по обязательству до передачи дела в арбитражный суд без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы.

Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.

Согласно правовому подходу, изложенному в определении Верховного Суда Российской Федерации от 20.03.2017 N 309-ЭС16-17446, досудебный порядок урегулирования экономических споров представляет собой взаимные действия сторон материального правоотношения, направленные на самостоятельное разрешение возникших разногласий. Лицо, считающее, что его права нарушены действиями другой стороны, обращается к нарушителю с требованием об устранении нарушения. Если получатель претензии находит ее доводы обоснованными, то он предпринимает необходимые меры к устранению допущенных нарушений, исключив тем самым необходимость судебного вмешательства. Такой порядок ведет к более быстрому и взаимовыгодному разрешению возникших разногласий и споров.

В материалы дела представлены претензионные письма истца по первоначальному иску (л.д. 130-145 т. 1) и претензионные письма нарушении срока оплаты работ по договорам  истца по встречному иску (л.д. 38-89 т. 3).

Факт получения данной корреспонденции подтверждается материалами дела и не оспаривается сторонами спора.

Согласно правовому подходу,  выработанному арбитражной практикой, формальное соблюдение лицом, предъявившим встречный иск, который подлежал рассмотрению в рамках принятого к производству первоначального иска, досудебного порядка урегулирования спора не обеспечит эффективной судебной защиты, возвращение встречного искового заявления ввиду несоблюдения истцом по встречному иску претензионного порядка урегулирования спора приводит к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон.

Кроме того, целями установления претензионного порядка является побуждение сторон конфликта к его разрешению мирно, без обращения в суд, с сохранением между сторонами партнерских отношений. Помимо указанного целями данной досудебной процедуры принято рассматривать и экономию средств и времени сторон. При этом досудебный порядок не должен являться препятствием защиты лицом своих прав в судебном порядке.

С учетом изложенного, формальные препятствия для признания соблюденным претензионного порядка урегулирования спора не должны автоматически влечь оставление заявления без рассмотрения по п. 2 ч. 1 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд должен исходить из реальной возможности урегулирования конфликта между сторонами в таком порядке.

Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что в настоящем случае отсутствует намерение сторон  урегулировать спорную ситуацию во внесудебном порядке (за весь период рассмотрения спора стороны не  предпринимали действий по его мирному разрешению несмотря на предложения суда), в связи с чем отсутствует возможность досудебного урегулирования спора.

Поскольку, оставляя иск без рассмотрения, суд исходит из реальной возможности погашения конфликта между сторонами при наличии воли сторон к совершению соответствующих действий, направленных на разрешение спора, указание на несоблюдение досудебного порядка разрешения спора в данном случае будет носить формальный характер, и не будет способствовать достижению целей, которые имеет досудебное урегулирование спора.

Ходатайства сторон подлежат отклонению.

При распределении расходов по уплате государственной пошлины суд исходит из следующего.

При обращении в суд истцом по первоначальному иску уплачено 18225 руб. государственной пошлины.

При цене первоначального иска 734 885,97 руб. (уточненные требования) государственная пошлина составляет 17698 рублей.

Первоначальный иск удовлетворён частично (на 23,12%).

Таким образом, с АО «РЭСР» в пользу АО «ККПД» следует взыскать 4091,77 руб. государственной пошлины и возвратить истцу по первоначальному  иску из федерального бюджета 527 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 29.03.2019 № 6241.

При обращении в суд истцом по встречному иску уплачено 29506 руб. государственной пошлины.

При цене встречного иска  1 831 277,72 руб. (уточненные требования) государственная пошлина составляет 31 313 рубля.

Встречный иск удовлетворён полностью.

Таким образом, с  АО «ККПД» следует взыскать в пользу АО «РЭСР» 29506   руб.   государственной пошлины, и в доход федерального бюджета 1807 рублей государственной пошлины по встречному иску.

В соответствии с абзацем вторым части 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.

С учетом распределенной государственной пошлины по первоначальному и встречному искам следует в результате зачета взыскать с акционерного общества "Комбинат крупнопанельного домостроения" в пользу акционерного общества "Ростовское энергетическое строительно-ремонтное предприятие" (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>) денежные средства в сумме 1 686 766,17 руб. 

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

По первоначальному иску.

Взыскать с акционерного общества "Ростовское энергетическое строительно-ремонтное предприятие" (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>) в пользу акционерного общества "Комбинат крупнопанельного домостроения" (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>) 169 925,78 руб. пени и 4091,77 руб. государственной пошлины, а всего 174017,55 рублей.

В остальной части иска отказать.

Возвратить акционерному обществу "Комбинат крупнопанельного домостроения" (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>) из федерального бюджета 527 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 29.03.2019 № 6241 за обращение в суд с первоначальными исковыми требованиями.

По встречному иску.

Взыскать с акционерного общества "Комбинат крупнопанельного домостроения" (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>) в пользу акционерного общества "Ростовское энергетическое строительно-ремонтное предприятие" (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>)  1 831 277,72  руб. пени    и  29506   руб.   государственной пошлины,   а всего 1 860 783,72 руб.

Взыскать с акционерного общества "Комбинат крупнопанельного домостроения" (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета 1807 рублей государственной пошлины по встречному иску.

В результате зачета взыскать с акционерного общества "Комбинат крупнопанельного домостроения" (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>) в пользу акционерного общества "Ростовское энергетическое строительно-ремонтное предприятие" (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>) денежные средства в сумме 1 686 766,17 руб. 

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

СудьяНовожилова М. А.