АРБИТРАЖНЫЙ  СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-18834/2022

г. Нижний Новгород                                                                                         21 декабря 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 12 декабря 2022 года.

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Горбуновой Ирины Александровны (шифр дела 45-491),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Ижстроймаш» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 1 050 549 руб. 02 коп.,

при участии:

от истца: ФИО2 (доверенность от 02.12.2020 со сроком действия до 26.10.2023), 

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом;

установил:

открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Ижстроймаш» (далее – ответчик) о взыскании 1 050 549 руб. 02 коп. неустойки по договору от 27.11.2020 № 4614/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/201/1.

Исковые требования основаны на статьях 309, 310, 330 Гражданского кодекса РФ и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по выполнению работ.

Ответчиком, извещенным надлежащим образом, отзыва на исковое не представлено, явка в судебное заседание представителя не обеспечена.

В  судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 12.12.2022 до 16 ч. 10 мин., до 16 ч. 15 мин. 07.12.2022. После перерыва судебное заседание продолжено.

В соответствии с положениями статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.

Изучив материалы дела и представленные в обоснование иска документы, заслушав представителей сторон,  суд установил следующее.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор от 27.11.2020 № 4614/ОАЭ-ЦДИ ЦВ/201/1, в соответствии с которым подрядчик заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту здания административнобытового корпуса (далее – Объект, инвентарный № 010044/3217, сетевой № 30961100000000070000) (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 1.3 договора срок начала выполнения Работ по договору – 15 января 2021 года. Срок окончания выполнения Работ по договору – 15 сентября 2021 года. Сроки выполнения Работ по каждому этапу определяется в Календарном плане, являющемся приложением № 2 к настоящему Договору.

Содержание Работ, их результаты и требования к ним изложены в Техническом задании (приложение № 1) (пункт 1.4 договора).

В силу пункта 2.1 договора Общая цена настоящего Договора с учетом всех расходов Подрядчика, включая стоимость материалов, изделий, конструкций, оборудования и затрат, связанных с их доставкой на Объект, затрат на выполнение Работ, а также иных затрат Подрядчика, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения работ, составляет – 7 175 88 руб. 26 коп., кроме того НДС (20%) – 1 435 176 руб. 25 коп. Итого общая цена настоящего Договора с учетом НДС (20%) составляет – 8 611 057 руб. 51 коп.

Расчет цены Договора приведен в приложении № 3 к настоящему Договору. Настоящим Подрядчик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия выполнения Работ по настоящему Договору и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение общей цены настоящего Договора, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

В силу пункта 3.1.1 договора подрядчик обязан выполнить все Работы по ремонту здания в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Объект Заказчику готовым к эксплуатации в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением Объекта. 

За нарушение сроков сдачи Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. Если просрочка составит свыше 30 (тридцати) календарных дней Подрядчик уплачивает неустойку в размере 2% от цены Договора за каждые последующие 10 (десять) календарных дней до фактического исполнения обязательства (пункт 16.2 договора).

Работы во исполнения условий договора выполнены ответчиком с нарушением срока (30.11.2021), что подтверждается актами о приемке выполненных работ, представленными в материалы дела.

В связи с чем истцом в адрес ответчика направлена претензия от 14.01.2022 № Исх. -59/ГоркДИ с требованием уплатить пени в общей сумме 1 050 549 руб. 02 коп., которая оставлена последним без ответа и удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с данным исковым заявлением. 

Изучив материалы дела, оценив доказательства и доводы, приведенные сторонами в обоснование своих требований и возражений, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы; по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). 

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства законом или договором может быть предусмотрено взимание с должника неустойки (штрафа, пени).

Факт ненадлежащего исполнения обязательства ответчиком судом установлен; следовательно, начисление договорной неустойки и требование о ее взыскании является правомерным.

Расчет неустойки судом проверен и, в отсутствие мотивированных возражений по расчету, принимается.

При этом суд учитывает, что ответчиком не представлено мотивированных возражений по существу иска, что расценивается судом как признание ответчиком обстоятельств, на которые ссылается истец в обоснование своих требований (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

При таких обстоятельствах, требования истца подлежат удовлетворению в заявленном размере.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Расходы по уплате государственной пошлины и почтовые расходы в порядке части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и будет направлен лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте Арбитражного суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ижстроймаш» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1 050 549 руб. 02 коп. неустойки, 23 505 руб. расходов по государственной пошлине. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по письменному ходатайству взыскателя.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

Судья                                                                                                                            И.А.Горбунова