Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

  г. Ханты-Мансийск  

«04» декабря 2019 г. Дело № А75-18876/2019  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи  Сердюкова П.А., руководствуясь статьями 9, 16, 65, 71, 110 - 112, 167 - 171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования Комитета по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Нягани удовлетворить.  

Обязать акционерное общество «Строительная компания ВНСС» в течение одного  месяца со дня вступления настоящего решения в законную силу за свой счет устранить  недостатки объекта: «Детский сад на 320 мест в мкр. № 6 жилого района «Центральный  г. Нягань», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

<

...>, путем совершения следующих действий:  

-устранить замечания по отмостке здания. Работы производятся в соответствии  с СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.  Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с изменениями № 1, 2, 3);  

-устранить замечания по фасаду здания. Работы производятся в соответствии  с СП 293.1325800.2017 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные  с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ;  

-устранить замечания по керамической плитке и трещинам на стенах и потолках.  Работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 (отделочные,  штукатурные работы);  

-устранить замечания по стеклу на фронтоне. Работы выполняются в соответствии  с ГОСТ 30674-99 (установка оконных блоков);  

-устранить замечания по кровле здания. Работы производятся в соответствии  с СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76;  

-устранить замечания по вентиляции в здании. Работы производятся в соответствии  со Сводом правил СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха» (утв. Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30.06.2012 № 279).  

В случае неисполнения решения суда в течение одного месяца со дня его вступления  в силу, предоставить Комитету по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Нягани право своими силами устранить вышеуказанные  

недостатки объекта: «Детский сад на 320 мест в мкр. № 6 жилого района «Центральный  г. Нягань», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  г. Нягань, ул. Ветеранов, д. 1, с последующим отнесением расходов на акционерное  общество «Строительная компания ВНСС».  

Взыскать с акционерного общества «Строительная компания ВНСС» в федеральный  бюджет государственную пошлину в размере 6 000 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

Судья П.А. Сердюков