Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(

Резолютивная часть решения

)

Дело № А50-37921/2018

03 сентября 2021 г.

г. Пермь

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Пономарева Г.Л.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  первоначальному иску Федерального казенного предприятия «Пермский  пороховой завод» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Федеральному  государственному унитарному предприятию «Научно-производственное  объединение «Техномаш» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью  «КурсСтройЭнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), общество  ограниченной ответственностью «ИнПромЭнерго» (ОГРН5117746062869,  ИНН 

<

***>), закрытое акционерное общество «Завод  электротехнического оборудования» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о взыскании неосновательного обогащения, процентов за  пользование чужими денежными средствами, обязании передать документы  на оборудование; и по встречному иску Федерального государственного  унитарного предприятия «Научно-производственное объединение  «Техномаш» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Федеральному  казенному предприятию «Пермский пороховой завод» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности; третье лицо с  самостоятельными требованиями: общество с ограниченной  ответственностью «МОСКАПСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) об установлении факта качественного выполнения работ и  обязании Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-  производственное объединение «Техномаш» принять работы (согласно  перечню),  

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

РЕШИЛ:

в удовлетворении первоначального иска о взыскании неосновательного  обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами  отказать.  

Встречный иск удовлетворить. 

Взыскать с Федерального казенного предприятия «Пермский  пороховой завод» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  государственного унитарного предприятия «Научно-производственное  объединение «Техномаш» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  денежные средства в сумме 13 843 619 руб. 78 коп.; судебные расходы по  уплате государственной пошлины в сумме 92 218 руб.; по оплате судебной  экспертизы в сумме 400 000 руб.  

Исковые требования третьего лица с самостоятельными требованиями  общества с ограниченной ответственностью «МОСКАПСТРОЙ»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к государственному унитарному  предприятию «Научно-производственное объединение «Техномаш»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить. 

Обязать государственное унитарное предприятие «Научно- производственное объединение «Техномаш» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) принять следующие работы по контракту от 11.07.2017  

 № 17705596339160012640/7176-2017/ЗК, выполненные обществом с  ограниченной ответственностью «МОСКАПСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) с надлежащим качеством:  

перевозка грузов 

Монтаж трансформатора силового  (Трансформатор ТМГ-1000 кВА)  

шт. 

2 

Пусконаладочные работы 

1 

1 

3. Трансформаторная подстанция ПС-23 (Комплектная трансформаторная подстанция). Строительно-монтажные работы не производились, выполнена только поставка оборудования 

Комплектная трансформаторная  подстанция 2 КТП ПКк 630/6/0,4 У1  

шт. 

1 

4. Трансформаторная подстанция ПС-25 

Демонтаж трансформатора силового  

шт. 

2 

Демонтаж шины сборной 

100 м 

0,2 

Погрузо-разгрузочные работы и  перевозка грузов  

Т 

6,0542 

Монтаж трансформатора силового  (Трансформатор ТМГ-630 кВА)  

шт. 

1 

Монтаж трансформатора силового  (Трансформатор ТМГ-1000 кВА)  

шт. 

1 

Пусконаладочные работы 

шт. 

1 

5. Трансформаторная подстанция ПС-26  

Демонтаж трансформатора силового  

шт. 

3 

Демонтаж шины сборной 

100 м 

0,135 

Погрузо-разгрузочные работы и  перевозка грузов  

Т 

7,39208 

Монтаж трансформатора силового  (Трансформатор ТМГ-400 кВА)  

шт. 

1 

Монтаж трансформатора силового  (Трансформатор ТМГ-630 кВА)  

шт. 

1 

Монтаж трансформатора силового  (Трансформатор ТМГ-1000 кВА)  

шт. 

1 

Пусконаладочные работы 

шт. 

1 

6. Трансформаторная подстанция ПС-27  

Демонтаж трансформатора силового  

шт. 

2 

Демонтаж шины сборной 

100 м 

0,2 

Погрузо-разгрузочные работы и  перевозка грузов  

Т 

4,6542 

Монтаж трансформатора силового  (Трансформатор ТМГ-1000 кВА)  

шт. 

2 

Пусконаладочные работы 

шт. 

1 

7. Трансформаторная подстанция ПС-15(31)  

Демонтаж трансформатора силового  

шт. 

2 

Демонтаж шины сборной 

100 м 

0,2 

Погрузо-разгрузочные работы и  перевозка грузов  

т 

4,6542 

Монтаж шины алюминиевой 

100 м 

0,2 

8. Трансформаторная подстанция ПС-41 в здании № 11/6  

Демонтаж трансформатора силового  

шт. 

2 

Демонтаж шины сборной 

100 м 

0,2 

Погрузо-разгрузочные работы и  перевозка грузов  

т 

4,6542 

Монтаж трансформатора силового  (Трансформатор ТМГ-630 кВА)  

шт. 

1 

Монтаж трансформатора силового  (Трансформатор ТМГ-1000 кВА)  

шт. 

1 

Пусконаладочные работы 

шт. 

1 

9. Трансформаторная подстанция ПС-42 в здании Ж» 6/2 

Демонтаж трансформатора силового  

шт. 

2 

Демонтаж шины сборной 

100 м 

0,2 

Погрузо-разгрузочные работы и  перевозка грузов  

т 

2,8042 

Монтаж трансформатора силового  (Трансформатор ТМГ-400 кВА)  

шт. 

2 

Пусконаладочные работы 

шт. 

1 

10. ОРУ-110 КВ ПС 110/6 КВ «Кировская». Поставка оборудования. 

Выключатель элегазовый ВГТ 110- 40/2500  

шт. 

2 

Выключатель элегазовый ВГТ 110- 40/2000  

шт. 

2 

Трансформатор тока ТОЛ110 

шт. 

6 

Трансформатор тока ТОГФ110 

шт. 

6 

Разъединители напряжением: 220 кВ  DBF4-245+2AE BF2, 1000 А  

трёхполюсные с двумя заземляющими  ножами (Применительно: Разъединитель  

трехполюсной с двумя ножами РГНП-2-110/1000) 

шт. 

2 

Разъединители напряжением: 220 кВ 

DBF4-245+AE BF2, 2000 А трехполюсные с одним 

заземляющим ножом (Применительно:  Разъединитель трехполюсной с двумя  ножами РГНП-1-110/1000)2  

шт. 

4 

Заземлитель однополюсной наружный ЗОН-110Б 

шт. 

2 

Ограничитель перенапряжения ОПН-1Ю  

шт. 

2 

Ограничитель перенапряжения 0  ПНН-1Ю  

шт. 

2 

Комплексная трансформаторная  

шт. 

1 

подстанция 2 КТП ПКк 630/6/0.4 У1  

Заземлитель однополюсный наружный ЗОН-110Б, зав. № 18 

шт. 

1 

Вернуть из федерального бюджета РФ Федеральному  государственному унитарному предприятию «Научно-производственное  объединение «Техномаш» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  государственную пошлину в сумме 25 руб., уплаченную по платежному  поручению от 10.08.2020 № 4299 на сумму 92 243 руб.  

Взыскать с Федерального казенного предприятия «Пермский  пороховой завод» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Центр независимых судебных  экспертиз «ТЕХЭКО» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  вознаграждение за проведение экспертизы в сумме 81 198 руб.  

Взыскать с государственного унитарного предприятия «Научно- производственное объединение «Техномаш» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину в  сумме 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме).  

Судья Г.Л. Пономарев 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного департамента 

Дата 31.05.2021 7:20:47

 Кому выдана Пономарев Гораций Леонидович