ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40- 134533/21-67-1055

г. Москва

30 июля 2021 г.

Резолютивная часть решения оглашена 28 июля 2021 года

Полный тест решения изготовлен 30 июля 2021 года                                                                      

Арбитражный суд в составе:                                                                                                                                                    

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому Общества с ограниченной ответственностью "КАПС-СТРОЙ" (105082, Россия, Москва г., муниципальный округ Басманный вн.тер.г., Бакунинская ул., д. 69, стр. 1, этаж 1, пом. i, к. 16, оф. 29К, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.08.2012, ИНН: 

<

***>), 

к Обществу с ограниченной ответственностью "МЕГАСТРОЙ" (125480 Москва город улица Туристская дом 31корпус 1 кабинет №6, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.03.2017, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 1 477 300,00 руб.

При участии:

От истца: ФИО2 по дов-ти от 15.01.2021 г., диплом

От ответчика: неявка, извещен

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "КАПС-СТРОЙ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "МЕГАСТРОЙ" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору от 01.11.2019 №01/11/2019-ЛЭП/2 в размере 1 343 000 руб. 00 коп., неустойки за период с 14.02.2020 по 22.06.2021 в размере 134 300 руб. 00 коп.

Заявленные требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился, отзыв не представил.

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, между ООО «КАПС-СТРОЙ» (далее - Подрядчик, Истец) и ООО «Мегастрой» (далее - Заказчик, Ответчик) 01 ноября 2019 года был заключен Договор подряда № 01/11/2019-ЛЭП/2 (далее - «Договор подряда»).

Согласно условиям пункта 1.1. Договора подряда Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ на объекте по монтажу провода: «АС 300/66 и ЛСА, провода АС300/39 и ПСА для строительства «ВЛ500 кВ Невинномысск-Моздок-2 в рамках реализации инвестиционного проекта «ВЛ 500 кВ Невинномысск-Моздок с расширением ПС 500кВ Невинномысск и ПС 500кВ Моздок (ОРУ 500 кВ)» (далее объект), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Вышеназванный договор, по правовым признакам, является договором строительного подряда и регулируется нормами материального права, содержащимися в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно п. 3.1 Договора подряда стоимость работ составляет: - 5 000 (пять тысяч) рублей за тонну - сборка металлоконструкций, - 12 000    (двенадцать   тысяч)    рублей    00    копеек   -    подъем    собранных металлоконструкций.

В соответствии с п. 6.1 Договора подряда - Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 35 (тридцати пяти) банковских дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

Заказчик выполненные Подрядчиком работы принял без замечаний, о чем свидетельствует подписанный Акт о приемке выполненных работ №1 от 27.12.2019 г. и Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 27.12.2019г. на общую сумму 1 343 000 (Один миллион триста сорок три тысячи) рублей.

Соответственно, Заказчик обязан был оплатить стоимость выполненных работ - 14 февраля 2020 года.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо №51).

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

С учетом изложенного, истец доказал факт наличия у ответчика задолженности представленными в материалы дела доказательствами, требования о взыскании задолженности по договору от 01.11.2019 №01/11/2019-ЛЭП/2 в размере 1 343 000 руб. 00 коп. признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки за период с 14.02.2020 по 22.06.2021 в размере 134 300 руб. 00 коп.

В соответствии с 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п.11.2 Договора подряда Заказчик в случае нарушения договорных обязательств уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы неустойку в размере 0,1% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от своевременно не оплаченной суммы..

Представленный истцом расчет подлежащей взысканию неустойки, а также период её начисления и размер, проверен судом, является правильным и не оспорен по существу ответчиком.

Таким образом, требования истца о взыскании с ответчика неустойки за период с 14.02.2020 по 22.06.2021 в размере 134 300 руб. 00 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу ч. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "МЕГАСТРОЙ" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "КАПС-СТРОЙ" задолженность по договору от 01.11.2019 №01/11/2019-ЛЭП/2 в размере 1 343 000 (один миллион триста сорок три тысячи) руб. 00 коп., неустойку за период с 14.02.2020 по 22.06.2021 в размере 134 300 (сто тридцать четыре тысячи триста) руб. 00 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере 27 773 (двадцать семь тысяч семьсот семьдесят три) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                            В.Г. Джиоев