ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-79250/2023

Дело № А40-172615/23

г. Москва

16 декабря 2023 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи И.А. Титовой 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу 

ООО "СФЕРИУС" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.11.2023, принятое в порядке упрощенного производства по делу № А40-172615/23, 

по исковому заявлению ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРИУС" (108807, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. 

<

...> Д. 2, СТР. 2, ОФИС КПП, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.04.2014, ИНН: 

<

***>, КПП: 775101001) к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИОБА СТРОЙ" (420102, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ ГОРОД, СЕРОВА 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.04.2014, ИНН: 

<

***>, КПП: 165601001) о взыскании суммы основного долга по Договору № 10-2020/Р от 26.10.2020 в размере 241 389,69 рублей; неустойки в размере 171 145,29 рублей, рассчитанной за периоды с 19.02.2021 по 31.03.2022 и со 02.10.2022 по 31.07.2023,

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании с ответчика в пользу истца суммы основного долга по Договору № 10-2020/Р от 26.10.2020 в размере 241 389,69 рублей; неустойки в размере 171 145,29 рублей, рассчитанной за периоды с 19.02.2021 по 31.03.2022 и со 02.10.2022 по 31.07.2023.

Дело рассмотрено судом в порядке упрощённого производства в порядке главы29 Арбитражного процессуального кодекса.

Арбитражным судом города Москвы 10 октября 2023 г. принята резолютивная часть решения в порядке, предусмотренном ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса.

02.11.2023 было изготовлено мотивированное решение, которым  с общества с ограниченной ответственностью «РИОБА СТРОЙ» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СФЕРИУС» (ОГРН 

<

***>) взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 241 389 (двести сорок одна тысяча триста восемьдесят девять) рублей 69 копеек; расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 583 (шесть тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 38 копеек, в удовлетворении остальной части иска отказано.

ООО «СФЕРИУС», не согласившись с принятым решением, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просят решение суда отменить. По их мнению, при вынесении обжалуемого решения судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права, выводы суда не соответствуют обстоятельства дела. 

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело,  проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке ст. ст. 123, 156, 266, 268, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ, изучив материалы дела, заслушав, лиц, участвующих в деле, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, находит решение Арбитражного суда города Москвы не подлежащим изменению или отмене по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела и верно установлено судом первой инстанции, между обществом с ограниченной Ответственностью «Сфериус» (далее - заказчик) и обществом с ограниченной Ответственностью «Риоба Строй» (далее - подрядчик) был заключен Договор № 10-2020/Р от 26.10.2020 о качественном выполнении (согласно СП 29.13330.2020) подрядчиком за плату ремонта усадочных швов с установкой профиля, в количестве 165.00 п.м. на объекте заказчика, расположенном по адресу: г. Москва, 

<

...> (Складской Комплекс «Ботаково»), (далее – Договор).

ООО «Риоба Строй» 24.01.2022 обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к ООО «Сфериус» о взыскании 753 999,36 рублей задолженности по Договору.

18.03.2022 посредством информационной системы «Мой арбитр» ООО «Сфериус» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан по делу № А65-1344/2022 со встречным исковым заявлением к ООО «Риоба Строй» о соразмерном уменьшении установленной за работу цены, выполненной по Договору на 400 000 рублей. Определением от 07.04.2022 в порядке статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса встречный иск принят к производству для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.02.2023 (с учетом определения Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.02.2023 об исправлении опечаток) отказано в удовлетворении первоначального иска, встречный иск удовлетворен частично, стоимость выполненных работ уменьшена до 635 671,86 рубль.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Риоба Строй» обратилось в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.02.2023 принять новый судебный акт об удовлетворении первоначального иска и об отказе в удовлетворении встречного иска в полном объеме.

Постановлением    Одиннадцатого    арбитражного    апелляционного    суда от 26.04.2023 решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.02.2023 по делу№    А65-1344/2022    оставлено    без    изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Во исполнение пункта 2.2.1 Договора, заказчиком произведена авансовая оплата на общую денежную сумму в размере 877 061,55 рубль, что подтверждается платёжным поручением № 433 от 29.10.2020, платёжным поручением № 434 от 29.10.2020, платежным поручением № 72 от 19.02.2021.

Статьёй 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

В соответствии со статьёй 401 Гражданского кодекса, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Как следует из положений статьи 421 Гражданского кодекса, стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (статья 431 Гражданского кодекса).

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно положениям статьи 753 Гражданского кодекса заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Как следует из пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По смыслу гражданско-правового регулирования отношений сторон в сфере подряда и согласно сложившейся в правоприменительной практике правовой позиции, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 г. № 51).

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 30 июля 2015 г. по делу А40-46471/14, акты выполненных работ, хотя и являются наиболее распространенными в гражданском обороте документами, фиксирующими выполнение подрядчиком работ, в то же время не являются единственным средством доказывания соответствующих обстоятельств. Законом не предусмотрено, что факт выполнения работ подрядчиком может доказываться только актами выполненных работ.

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определённая законом или договором денежная сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 7.2 Договора, за нарушение сроков выполнения работ, устранения недостатков работ, заказчик имеет право потребовать от подрядчика выплаты пени в размере 0,1 % от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки по день фактического погашения долга.

Таким образом, с учётом вышеуказанных судебных актов, сумма переплатыООО «Сфериус» составляет 241 389,69 рублей.

На сумму основного долга, истцом рассчитана договорная неустойка с учётом моратория, введённая постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 за период с 19.02.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 31.07.2023. Общее количество дней просрочки составило 709 дней, а размер неустойки - 171 145,29 рублей.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса).

От ответчика поступил письменный отзыв на иск. Доводы отзыва оценены судом и положены в основу настоящего судебного акта.

Как следует из отзыва, ответчик заявляет возражения по части заявленных требований по взысканию неустойки за просрочку выполнения работ в размере171 145,29 рублей.

Согласно п. 3.1 Договора календарный срок производства работ составляет30 (тридцать) календарных дней. Начало работ при соблюдении заказчиком условийп. 2.2.1 Договора (через 7 календарных дней после поступления авансового платежа на расчетный счет подрядчика) - условий п. 4.1.2 Договора (в течение 1-го дня после предоставления площадки по акту).

Как следует из материалов дела, истец произвёл выплату аванса 19.02.2021 платёжным поручением № 72, соответственно, срок выполнения работ: 19.02.2021 + 7 к.д. = 26.02.2021 (начало работ) + 30 к.д. = 26.03.2021 (срок окончания работ).

Работы выполнены ответчиком 15.02.2021, в пределах срока выполнения работ. Просрочка выполнения работ отсутствует, соответственно, неустойка за просрочку выполнения работ предъявлена истцом необоснованно.

Вступившее в законную силу решение от 02.02.2023 по делу № А65-1344/2022 в силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Арбитражный процессуальный кодекс) является преюдициальным для настоящего дела.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации своём постановлении от 20 ноября 2012 г. № 2013/12 указал, что признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом  по другому делу, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определённости.

В пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 57 разъяснено, что независимо от состава лиц, участвующих в деле о взыскании по договору, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитывается судом, рассматривающим второе дело.

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 6 ноября 2014 г. № 2528-О указал, что в системе правового регулирования предусмотренное частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса основание освобождения от доказывания во взаимосвязи с положениями части 1 статьи 64 и части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса означает, что фактические обстоятельства (факты), установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 21 марта 2013 г. № 407-О, от 16 июля 2013 г. № 1201-О, от 24 октября 2013 г. № 1642-О и др.).

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от21 декабря 2011 г. № 30-П разъяснено, что в качестве единого способа опровержения (преодоления) преюдиции во всех видах судопроизводства должен признаваться пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно нашел  требования истца обоснованными в части взыскания с ответчика суммы в размере 241 389,69 рублей. Неустойка не подлежит удовлетворению, поскольку истцом не доказан факт просрочки исполнения обязательств по Договору со стороны подрядчика.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 260 АПК РФ в апелляционной жалобе должны быть указаны требования лица, подающего жалобу и основания, по которым лицо, подающее жалобу, обжалует судебный акт, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства.

В нарушение указанных требований ответчиком в апелляционной жалобе конкретных доводов и оснований обжалования принятого судом решения от 02.11.2023    г. не приведено. Обстоятельства несогласия с судебным актом перед лицами, участвующими в деле, не раскрыты (ч. 3 ст. 65 АПК РФ).

Таким образом, доводам заявителя апелляционной жалобы судом первой инстанции дана соответствующая правовая оценка, оснований для переоценки, которой у апелляционной коллегии не имеется.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам, и вопреки доводам жалобы, основаны на правильном применении судом норм материального и процессуального права, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 АПК РФ, для отмены либо изменения принятого по делу решения.

Руководствуясь статьями 229, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271, статьей 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.11.2023  оставить без изменения, а апелляционную жалобу   – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья:И.ФИО1

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.