Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-5441/2023

г. Благовещенск

15 мая 2024 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.А. Стовбуна, 

протокол вел секретарь судебного заседания Р.В. Галичанина,  рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление некоммерческой  

организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Альпстрой-ДВ» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

третье лицо: Управление федерального казначейства по Амурской области  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о возложении обязанности, 

при участии в заседании: от истца: ФИО1 – дов. № 03-07/22-2023 от 01.12.2023  от ответчика: ФИО2 – дов. № 12-О/8 от 09.01.2024  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Альпстрой-ДВ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) устранить недостатки работ, допущенные при  исполнении договора № РТС228А210163(Д) от 07.06.2021 на выполнение работ по  капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на  территории Амурской области, а именно: в месячный срок со дня вступления решения в  

законную силу отремонтировать штукатурный слой фасада по всему периметру  многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> в соответствии с проектно-сметной документацией, а также СП  71.13330.2017 (раздел «Улучшенная штукатурка»),  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альпстрой-ДВ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд  капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) расходы по госпошлине в размере 6 000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альпстрой-ДВ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд  капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) судебную неустойку в размере 6 000 руб. за каждый день просрочки  исполнения Решения суда, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного  срока для исполнения обязанности, до дня фактического исполнения обязательства.  

Произвести выплату с депозитного счета Арбитражного суда Амурской области  обществу с ограниченной ответственностью «Хабаровское бюро экспертизы и оценки»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)- 106 000 руб. за проведение экспертизы на  основании счета № 338 от 08.02.2024.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья А.А. Стовбун