351/2017-29943(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А35-8716/2016

27 марта 2017 года

г. Курск

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Арцыбашевой Т.Ю., при ведении  аудиозаписи и протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1 Л.В. О.Г., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению  

областного казенного учреждения «Управление капитального строительства Курской  области»  

к обществу с ограниченной ответственностью Производственное объединение  «Кароляна»  

о понуждении к исполнению обязательства в натуре, взыскании штрафа в размере  23291,00 руб. и начислении штрафных санкций в размере 506,00 руб. за каждый день  просрочки устранения дефектов до момента фактического исполнения обязательства.  

Третье лицо: бюджетное медицинское учреждение «Курская областная клиническая  больница».  

В судебном заседании приняли участие представители: от истца: ФИО2 - по доверенности от 22.01.2016 № 1, от ответчика: не явился, уведомлен надлежащим образом, 

от третьего лица: не явился, уведомлен надлежащим образом.  

Руководствуясь статьями 17, 27, 28, 102, 110, 167-171, 174 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования областного казенного учреждения «Управление капитального  строительства Курской области» удовлетворить.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью Производственное  объединение «Кароляна» в течение пятнадцати рабочих дней со дня вступления данного  решения суда в законную силу устранить дефекты работ на объекте «Реконструкция  пищеблока БМУ «Курская областная клиническая», а именно:  

1. Устранить отслоение шпатлевки на потолках коридоров 1 этажа и подвала,  площадью 22,2 кв.м.  

2. Устранить отслоение штукатурки на стенах коридоров 1 этажа, подвала,  помещений персонала, входов в здание и оконных приямков, площадью 33 кв.м.  

3. Устранить протечку по кровле в рыбном, горячем, кондитерском цехах и  кабинете заведующей пищеблоком, площадью 5,2 кв.м.  

4. Устранить разрушение бетонных ступеней лестничных маршей на входах в  здание, площадью 20,5 кв.м.  

5. Устранить отслоение фасадной плитки, площадью 9,9 кв.м. 6. Устранить отслоение линолеумных покрытий, площадью 2,75 кв.м. 

7. Устранить проседание асфальтового покрытия возле выпусков ливневой  канализации, площадью 20,2 кв.м.  

8. Устранить перелом канализационной трубы к жироулавителю, длиной 22,5 м. 9. Устранить провисание гофросифонов в моечной, в количестве 5 штук. 

10. Устранить контруклоны в канализационных трубах d=100 мм. под потолком в  подвале, длиной 5,2 м.  

11. Установить стяжку в канализационном приямке, площадь. 0,6 кв.м. 12. Оштукатурить канализационный приямок, площадью 2,1 кв.м. 

В соответствии с ч. 3 ст. 174 АПК РФ в случае неисполнения обществом с  ограниченной ответственностью Производственное объединение «Кароляна» настоящего  решения в указанный судом срок областное казенное учреждение «Управление  капитального строительства Курской области» вправе осуществить соответствующие  действия за счет общества с ограниченной ответственностью Производственное  объединение «Кароляна» со взысканием с него необходимых расходов.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственное  объединение «Кароляна» в пользу областного казенного учреждения «Управление  капитального строительства Курской области» 23291,00 руб. неустойки, начисленной за  период с 01.08.2016 по 15.09.2016, и неустойку в размере 0,5 % от стоимости объемов  работ, выполненных с дефектами (101267,00 руб.) за каждый день просрочки устранения  указанных дефектов, начиная с 16.09.2016 по день фактического исполнения обязательств  по устранению дефектов.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственное  объединение «Кароляна» в пользу федерального бюджета 8000,00 руб. государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в  течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд  Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного  суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Арцыбашева Т.Ю.