АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-9302/2022

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

 

21 июня 2023 г.                                                                                                      г. Кемерово

Дата объявления резолютивной части решения: 14 июня 2023 года    

Дата изготовления судебного акта в полном объёме: 21 июня 2023 года 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Шикина Г.М.

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Кемеровская генерация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Кемерово,

к обществу с ограниченной ответственностью «СДС-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Кемерово,

Фонду проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Москва,

акционерному обществу «Стройтрансгаз» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Москва,

акционерному обществу «Стройтрансгаз-Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Кемерово, 

о взыскании 7 239 295 руб. 29 коп. долга по оплате коммунальных услуг за декабрь 2021-январь 2022 года, 619 658 руб. 03 коп. неустойки,

при участии: 

от истца: ФИО2, представитель, доверенность от 21.07.2021, паспорт, диплом;

от ответчика1 (до перерыва): ФИО3, представитель, доверенность от 15.02.2022, паспорт, диплом;

от ответчика2: ФИО4 (до перерыва), представитель, доверенность от 26.09.2022 №54, паспорт, диплом; ФИО5, представитель, доверенность от 01.02.2023 № 73, паспорт, диплом;

от ответчика4: ФИО6, представитель, доверенность от 19.05.2023 № 01/Д-15, паспорт, диплом,

установил:

акционерное общество «Кемеровская генерация» (далее – АО «Кемеровская генерация», истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СДС-Строй» (далее – ООО «СДС-Строй», ответчик1) о взыскании 7 239 295 руб. 29 коп. долга за фактически потребленную тепловую энергию за декабрь 2021 года – январь 2022 года, убытков, предусмотренных статьей 22 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении), 619 658 руб. 03 коп. неустойки.

Исковые требования со ссылкой на статьи 307, 309, 395, 539, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате потребленной тепловой энергии.

Определением суда от 26.05.2022 исковое заявление к производству, назначено предварительное судебное заседание на 30.06.2022.

Определением суда от 30.06.2022 дело было признано подготовленным к рассмотрению по существу, судебное разбирательство назначено в судебном заседании 02.08.2022, затем судебное заседание неоднократно откладывалось, в том числе, по ходатайствам сторон.

Ответчик1 с исковыми требованиями не согласился, представил в материалы дела возражения относительно заявленных исковых требований, согласно которым ответчик считает, что после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, обязанность по оплате за потребленную на объекте тепловую энергию перешла к заказчику, то есть к «Фонду проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие». Кроме того, не согласен с расчетом задолженности и с начислением убытков в полуторакратном размере. 

В удовлетворении исковых требований просит отказать в полном объеме.

Более подробно доводы изложены в отзыве на исковое заявление и в пояснениях на возражения истца.

10.10.2022 от истца поступило ходатайство, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), об уменьшении размера исковых требований (т. 1, л.д. 93, 130) – просит взыскать с ответчика:

- 4 329 108 руб. 66 коп. – задолженность по оплате коммунальных услуг;

- 1 803 795 руб. 28 коп. – убытки в полуторакратном размере стоимости тепловой энергии;

- 199 132 руб. 79 коп. – неустойки.

В силу части 1 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Уточнение принято судом к рассмотрению. 

Определением суда от 15.11.2022 по ходатайству истца к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» (далее – Фонд, ответчик2).

Ответчик2 с исковыми требованиями не согласился, указывает на то, что Фонд не имеет договорных отношений с ООО «СДС-Строй», у него заключен договор с АО «Стройтрансгаз» на выполнение проектных и изыскательских работ, строительство объекта капитального строительства от 17.09.2019 № 99920190000000000006/6-ПИР/СМР-КЕ-2019, поэтому в период до подписания актов приемки законченного строительством объекта затраты на оплату тепловой энергии должен нести подрядчик Фонда – АО «Стройтрансгаз». Считает также, что задолженность образовалась по не зависящим от Фонда обстоятельствам, финансирование оплаты коммунальных услуг Фондом запланировано с момента регистрации права собственности на объекты. Оплата задолженности за потребленную тепловую энергию в отношении объектов, принадлежащих Фонду на праве собственности за период с декабря 2021 г. по май 2022 г, произведена в полном объеме.

Кроме того, не согласен с расчетом задолженности и с начислением убытков в полуторакратном размере. Также полагает, что требование об уплате пени за период с 11.05.2022 по 01.10.2022 (включительно) на задолженность, возникшую до введения моратория, не является текущим платежом и не должно применяться к лицу, подпадающему под его действие, следовательно, позиция истца о взыскании неустойки – не является обоснованной и подлежащей удовлетворению.

В удовлетворении исковых требований просит отказать в полном объеме.

Более подробно доводы изложены в отзыве на исковое заявление (т. 1, л.д. 208 – 209) и в пояснениях на возражения истца.

Определением суда от 29.11.2022 по ходатайству истца к участию в деле в качестве соответчиков привлечены Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» и акционерное общество «Стройтрансгаз» (далее – АО «Стройтрансгаз», ответчик3).

Ответчик3 в представленном 01.03.2023 отзыве (т. 1, л.д. 193 – 246) с исковыми требованиями не согласился, указывает на то, что не является надлежащим ответчиком, поскольку в соответствии с договором, заключенным им с акционерным обществом «ГазНиипроект» (в настоящее время – АО «Стройтрансгаз-Сибирь») на выполнение проектных и изыскательских работ, строительство объекта капитального строительства от 18.09.2019 № 99920190000000000006/76509-КЕ-СМР, расходы на оплату тепловой энергии по объектам должен нести субподрядчик – АО «Стройтрансгаз-Сибирь», которое следует привлечь к участию в деле в качестве соответчика.

Определением суда от 02.03.2023 к участию в деле в качестве соответчика привлечено акционерное общество «Стройтрансгаз-Сибирь» (далее – АО «СТГ-Сибирь», ответчик4).

Ответчик4 в представленном 30.03.2023 отзыве (т. 1, л.д. 245 – 246) с исковыми требованиями не согласился, указывает на то, что не является надлежащим ответчиком, поскольку у него заключены договоры субподряда с ООО «СДС-Строй», в соответствии с условиями которых субподрядчик обязался нести все расходы по содержанию строительной площадки. На текущий момент акты окончательной сдачи-приемки выпоненных работ не подписаны, поэтому нет оснований для предъявления АО «СТГ-Сибирь», стоимости затрат на оплату тепловой энергии в отношении строительных объектов.

04.05.2023 от истца поступило ходатайство, в порядке статьи 49 АПК РФ, об уменьшении размера исковых требований – просит взыскать с ответчиков:

- с Фонда задолженность за потребленную тепловую энергию и теплоноситель за период октябрь – декабрь 2021 года в размере 1 018 505 руб. 89 коп., 424 377 руб. 46 коп. убытков, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии и теплоносителя за период октябрь – декабрь 2021 года, 86 529 руб. 16 коп. неустойки за период с октября по декабрь 2021 года, расходы по уплате государственной пошлины;

- солидарно с ООО «СДС-Строй», АО «Стройтрансгаз», АО «СТГ-Сибирь» задолженность за потребленную тепловую энергию и теплоноситель за период сентябрь – декабрь 2021 года в размере 3 310 602 руб. 42 коп., 1 379 417 руб. 67 коп. убытков, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии и теплоносителя за период сентябрь – декабрь 2021 года, 227 280 руб. 51 коп. неустойки, расходы по уплате государственной пошлины.

Уточнение принято судом к рассмотрению. 

В настоящее судебное заседание ответчик3, извещенный о времени и месте судебного разбирательства, явку представителя не обеспечил, ходатайств не заявил.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика3. 

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

АО «Кемеровская генерация» является теплоснабжающей организацией на территории города Кемерово, для него утверждены соответствующие тарифы постановлениями Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 636, № 638. 

Администрацией г. Кемерово были выданы разрешения на строительство от 24.04.2020 № 42-305-10-2020, № 42-305-11-2020, № 42-305-12-2020, № 42-305-13-2020 (т. 1, л.д. 95) нижеследующих объектов капитального строительства, расположенных по адресам: 

<

...> 

1)   Интернат для обучающихся средней специальной музыкальной школы (75 человек), площадью 3098 кв. м, кадастровый номер 42:24:0201013:7263;

2)   Учебный корпус Хореографической академии (150 учащихся) с учебным театром, площадью 8150,1 кв. м, кадастровый номер 42:24:0201013:7266;

3)   Интернат для учащихся (150 мест), площадью 4842 кв. м, кадастровый номер 42:24:0201013:7265;

4)   Общеобразовательная школа (300 учащихся), площадью 9797 кв. м, кадастровый номер 42:24:0201013:7267;

5)   Учебный корпус Средней специальной музыкальной школы (150 учащихся) с концертным залом, площадью 7680,7 кв. м, кадастровый номер 42:24:0201013:7269.

Между Фондом (Заказчик) и АО «Стройтрансгаз» (Подрядчик) заключён договор на выполнение проектных и изыскательских работ, строительство объекта капитального строительства от 17.09.2019 № 99920190000000000006/6-ПИР/СМР-КЕ-2019.

Согласно условиям указанного Договора Подрядчик обязуется выполнить все предусмотренные проектной документацией строительно-монтажные работы объектов капитального строительства, входящих в состав музейного и театрально-образовательного комплексов в г. Кемерово.

Условиями пункта 4.1. Договора предусмотрено, что договорная цена включает в себя сумму вознаграждения Подрядчика и стоимость всех затрат Подрядчика необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 1.1. Договора, в том числе:

- затраты на временное электро-, водо-, газо-, холодно-, теплоснабжение строительной площадки (включая затраты, связанные с использованием дизельных электростанций, водоснабжение, канализацию, и другие коммунальные услуги) во время проведения строительно-монтажных работ (в том числе пуско-наладочных работ), индивидуальных и комплексных испытаний;

- стоимость понесенных Подрядчиком затрат при использовании строительной площадки (коммунальные платежи, пожарная безопасность, обслуживание и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера (зимнее удорожание (снегоборьба) и так далее), необходимые для функционирования строительной площадки, Объектов и оборудования до подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством по каждому Объекту (по форме согласно Приложению № 10 к Договору).

Кроме того, согласно пункту 1.2. Договора обязательства Подрядчика по строительству Объекта в соответствии с Договором считаются исполненными после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме согласно Приложению № 10 к Договору) в отношении каждого Объекта.

Акты приемки законченного строительством объекта были подписаны сторонами (т. 1, л.д. 148 – 174):

- объект «Интернат для обучающихся средней специальной музыкальной школы (75 человек)» - 26.10.2021;

- объект «Учебный корпус хореографической академии (150 учащихся) с учебным театром» - 15.11.2021;

- объект «Интернат для учащихся (150 мест) и учебным театром» - 15.11.2021;

- объект «Общеобразовательная школа (300 учащихся)» - 26.11.2021;

- объект «Учебный корпус Средней специальной музыкальной школы (150 учащихся) с концертным залом» - 15.12.2021.

Таким образом, обязательства АО «Стройтрансгаз» по Договору считаются исполненными только после подписания указанных Актов. В период до момента подписания Актов, затраты на оплату тепловой энергии должен нести Подрядчик Фонда – АО «Стройтрансгаз» согласно договорным условиям. 

В свою очередь, 18.09.2019 между АО «Стройтрансгаз» (Подрядчик) и АО «СТГ-Сибирь» (Субподрядчик) был заключён договор № 99920190000000000006/76509-КЕ-СМР на выполнение проектных и изыскательских работ, строительство объекта капитального строительства.

Согласно условиям указанного Договора Субподрядчик обязуется выполнить все предусмотренные проектной документацией строительно-монтажные работы объектов капитального строительства, входящих в состав музейного и театрально-образовательного комплексов в г. Кемерово.

Условиями пункта 4.1. Договора предусмотрено, что в договорную цену включены сумма вознаграждения Субподрядчика и стоимость всех затрат Субподрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 1.1. Договора, в том числе:

- затраты на временное электро-, водо-, газо-, холодно-, теплоснабжение строительной площадки (включая затраты, связанные с использованием дизельных электростанций, водоснабжение, канализацию, и другие коммунальные услуги) во время проведения строительно-монтажных работ (в том числе пуско-наладочных работ), индивидуальных и комплексных испытаний;

- стоимость понесенных Подрядчиком затрат при использовании строительной площадки (коммунальные платежи, пожарная безопасность, обслуживание и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера (зимнее удорожание (снегоборьба) и так далее), необходимые для функционирования строительной площадки, Объектов и оборудования до подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством по каждому Объекту (по форме согласно Приложению № 10 к Договору).

Согласно пункту 1.2. Договора обязательства Субподрядчика по строительству Объекта в соответствии с Договором считаются исполненными после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (по форме согласно Приложению № 10 к Договору) в отношении каждого объекта.

Акты приемки законченного строительством объекта были подписаны сторонами (т. 1, л.д. 239 – 242):

- объект «Интернат для обучающихся средней специальной музыкальной школы (75 человек)» - 25.10.2021;

- объект «Учебный корпус хореографической академии (150 учащихся) с учебным театром» - 15.11.2021;

- объект «Интернат для учащихся (150 мест) и учебным театром» - 15.11.2021;

- объект «Общеобразовательная школа (300 учащихся)» - 25.11.2021;

- объект «Учебный корпус Средней специальной музыкальной школы (150 учащихся) с концертным залом» - 14.12.2021.

Таким образом, обязательства АО «СТГ-Сибирь» по Договору считаются исполненными только после подписания указанных Актов. В период до момента подписания Актов, затраты на оплату тепловой энергии должен нести Субподрядчик – АО «СТГ-Сибирь» согласно условиям договора. 

В 2020 году между АО «СТГ-Сибирь» (Подрядчик) и ООО «СДС-Строй» (Субподрядчик) заключены договоры субподряда на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства от 20.02.2020 №№ ..384КЕ,..385КЕ, 386КЕ, 387КЕ, 388КЕ, от 21.02.2020 №№ 404КЕ, 406 КЕ, от 15.04.2020 №№ 1168КЕ, 1184КЕ, 1185КЕ,               № 99920190000000000006/1186КЕ (т. 1, л.д. 210 – 236) (далее – договоры). Все указанные договоры заключены в единой редакции, с разным предметом по объекту строительства.

По условиям договоров Субподрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ, предусмотренных договором, а Подрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Субподрядчик обязан нести за свой счет расходы по содержанию Строительной площадки, включая: установку и обслуживание контейнеров для сбора и временного накопления отходов; очистку Строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории от отходов; удаление/вывоз отходов с территории Строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории; мойку транспортных средств, выезжающих со Строительной площадки, согласно требований проектных решений; выполнение иных работ, требуемой нормативно-законодательной и проектной документацией на объекты строительства в период ведения работ и до даты оформления Акта окончательной сдачи-приемки выполненных Работ по Договору включительно (пункт 5.3.16. договоров). 

Согласно пункту 10.7. договоров приемка результатов выполненных Субподрядчиком работ осуществляется по Акту окончательной сдачи-приемки выполненных работ (по форме согласно Приложению № 7 к договорам).

После завершения всех обусловленных Договором работ в полном объеме Субподрядчик письменно извещает Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и предоставляет Подрядчику Акт окончательной сдачи-приемки выполненных работ (по форме согласно Приложению № 7 к Договору) в 2-х экземплярах с предоставлением полного комплект исполнительной документации на выполненные работы в 4 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр сканированная копия на электронном носителе (пункт 10.8. договоров).

Акты окончательной сдачи-приемки выполненных работ по договорам с ООО «СДС-Строй» не подписаны. Согласно ответу ООО «СДС-Строй» от 07.02.2023 № 340-77/0883 (т. 1, л.д. 238) письмо АО «СТГ-Сибирь» от 31.01.2023 (т. 1, л.д. 237) ООО «СДС-Строй» не может подписать направленные в его адрес документы по причине отсутствия заключенного дополнительного соглашения о компенсации непредвиденных расходов, затрат на содержание объектов строительства, понесенных ООО «СДС-Строй» после ввода в эксплуатацию, а также компенсации удорожания строительных ресурсов, в том числе материалов и оборудования, за период выполнения строительно-монтажных работ.

Согласно актам от 20.09.2021, от 21.09.2021 (т. 1, л.д. 24 – 28), составленным с участием представителей ответчика1 и ответчика2, истец провел обследование систем теплопотребления, приборов учета тепловой энергии и теплоносителя вышеуказанных объектов, в результате которого установлено, что пломбы установлены на основании пункта 7 акта о подключении (заявка КТСК от 17.09.2021), система теплоснабжения объекта 2-ух трубная, отопление подключено по независимой схеме, горячее водоснабжение подключено по закрытой схеме, убедиться в работоспособности теплосчетчика не представляется возможным виду отсутствия теплопотребления с даты монтажа УУТЭ.

В отсутствие письменного договора и надлежащего технологического присоединения объекты капитального строительства, расположенные по адресам: 

<

...> в сентябре – декабре 2021 года потребили тепловую энергию в количестве 2 394,4741 Гкал, на сумму 4 329 108 руб. 66 коп., что подтверждается счетами-фактурами от 31.12 2021, от 30.04.2022 и корректировочным счетом-фактурой от 30.04.2022 (т. 1, л.д. 12 – 16).

Объем определен по приборам учета, цена определена согласно тарифу, установленному постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 636. Ответчики против объема и цены поставленной тепловой энергии возражений не представили.

В связи с неоплатой тепловой энергии в течение 15 дней с момента получения корректировочной счет-фактуры истец предъявил требования об оплате убытков в полуторакратном размере стоимости тепловой энергии, что предусмотрено пунктом 10 статьи 22 Закона о теплоснабжении.

Суд удовлетворил исковые требования частично в связи со следующим.

В силу статьи 548 ГК РФ правила, предусмотренные статьями 539 – 547 Кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. К отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 – 547 ГК РФ) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

Как установлено статьей 539 ГК РФ, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию.

Статьей 544 ГК РФ предусмотрено, что оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными нормативными актами или соглашением сторон.

Пунктом 10 статьи 22 Закона о теплоснабжении предусмотрено, что  стоимость тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя, определяется в соответствии с действующими на дату взыскания тарифами на тепловую энергию, теплоноситель для соответствующей категории потребителей или ценами, не подлежащими регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом, с учетом стоимости услуг по передаче тепловой энергии и подлежит оплате потребителем или иным лицом, осуществившими бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, в пятнадцатидневный срок с момента получения соответствующего требования теплоснабжающей организации. В случае неоплаты в указанный срок потребителем или иным лицом, осуществившими бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, стоимости тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления, теплоснабжающая организация вправе прекратить подачу тепловой энергии, теплоносителя и взыскать с потребителя или иного лица, осуществивших бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, убытки в полуторакратном размере стоимости тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя.

В соответствии с пунктом 29 статьи 2 Закона о теплоснабжении бездоговорное потребление тепловой энергии – потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных (технологически присоединенных) к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения (технологического присоединения), либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем.

Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 (далее – Правила № 787).

Согласно пункту 3 Правил № 787 подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании договора.

В соответствии с пунктом 15 Правил № 787 подключение к системам теплоснабжения осуществляется в следующем порядке:

а) направление исполнителю заявки о подключении к системе теплоснабжения;

б) заключение договора о подключении;

в) выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных условиями подключения и договором о подключении;

г) составление акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя;

д) составление акта о подключении.

Осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами подтверждающего выполнение сторонами обязательств по договору о подключении и содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения (пункт 50 Правил № 787).

Согласно пункту 1 статьи 548 ГК РФ правила, предусмотренные статьями 539 - 547 данного Кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (пункт 1 статьи 539 ГК РФ).

Оплата производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (пункт 1 статьи 544 ГК РФ).

Отсутствие письменного договора энергоснабжения в силу статей 307, 309 и 544 ГК РФ не освобождает обязанное лицо от оплаты фактически принятого количества энергии.

Правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций регулируются Законом о теплоснабжении.

Суд полагает, что задолженность за потребленную тепловую энергию и теплоноситель за период октябрь – декабрь 2021 года в размере 1 018 505 руб. 89 коп. подлежит взысканию с Фонда, а в размере 3 310 602 руб. 42 коп. – солидарно с ООО «СДС-Строй», АО «Стройтрансгаз», исходя из следующего.

В силу положений статьи 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями указанного обязательства.

Акты приемки законченного строительством объекта по договору на выполнение проектных и изыскательских работ, строительство объекта капитального строительства от 17.09.2019 № 99920190000000000006/6-ПИР/СМР-КЕ-2019 были подписаны между Фондом (Заказчик) и АО «Стройтрансгаз» (Подрядчик) (т. 1, л.д. 148 – 174):

- объект «Интернат для обучающихся средней специальной музыкальной школы (75 человек)» - 26.10.2021;

- объект «Учебный корпус хореографической академии (150 учащихся) с учебным театром» - 15.11.2021;

- объект «Интернат для учащихся (150 мест) и учебным театром» - 15.11.2021;

- объект «Общеобразовательная школа (300 учащихся)» - 26.11.2021;

- объект «Учебный корпус Средней специальной музыкальной школы (150 учащихся) с концертным залом» - 15.12.2021.

Таким образом, обязательства АО «Стройтрансгаз» по Договору считаются исполненными только после подписания указанных Актов. В период до момента подписания Актов, затраты на оплату тепловой энергии должен нести Подрядчик Фонда – АО «Стройтрансгаз» согласно договорным условиям. 

Исходя из приведенных выше условий заключенного сторонами договора, обязанность подрядчика по организации теплоснабжения объектов прекратилась с момента подписания Актов приемки законченного строительством объекта.

Таким образом, с момента подписания Актов объекты, являющиеся предметом договора, считаются созданными. Поскольку указанные объекты капитального строительства на этот момент также переданы во владение заказчику, на него переходит риск обеспечения сохранности объекта и несения расходов по его содержанию.

Фонд несет затраты на оплату тепловой энергии за последующие периоды. Так, определением Арбитражного суда Кемеровской области от 16.11.2022 по делу № А27-12400/2022 утверждено мировое соглашение, заключенное 31.10.2022 между акционерным обществом «Кемеровская генерация», г. Кемерово, Кемеровская область-Кузбасс (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, истец) и Фондом проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие», г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, ответчик) на следующих условиях:

«Акционерное общество «Кемеровская генерация», именуемое в дальнейшем «Истец», в лице директора Кемеровского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания» ФИО7, действующего на основании доверенности от 21,12.2020 г., и

Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие», именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице ФИО8, действующего на основании Устава, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании статей 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях урегулирования спора, возникшего в связи с обращением Истца в Арбитражный суд Кемеровской области с требованием о взыскании с Ответчика суммы задолженности за потребленную тепловую энергию и теплоноситель, убытков в полуторакратном размере стоимости тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя, неустойки за просрочку оплаты тепловой энергии и теплоносителя, госпошлины, уплаченной за рассмотрение настоящего искового заявления в отношении следующих объектов:

Интернат для обучающихся средней специальной музыкальной школы (75 человек), площадью 3098 кв.м., кадастровый номер 42:24:0201013:7263, начисления за период 16.12.2021 г. до 16.05.2022 г.;

Учебный корпус Хореографической академии (150 учащихся) с учебным театром, площадью 8150,1 кв.м., кадастровый номер 42:24:0201013:7266, начисления за период с 16.12.2021 г. до 16.05.2022 г.;

Интернат для учащихся (150 мест), площадью 4842 кв.м., кадастровый номер 42:24:0201013:7265, начисления за период с 16.12,2021 г. до 16.05.2022 г.;

Общеобразовательная школа (300 учащихся), площадью 9797 кв.м., кадастровый номер 42:24:0201013:7267, начисления за период с 17.12.2021 г. до 16.05.2022 г.;

Учебный корпус Средней специальной музыкальной школы (150 учащихся) с концертным залом, площадью 7680,7 кв.м., кадастровый номер 42:24:0201013:7269, начисления за период с 22.12.2021 г. до 16.05.2022 г.

Ответчик полностью признает сумму задолженности за потребленную тепловую энергию и теплоноситель в отношении объектов, указанных в п. 1 настоящего мирового соглашения за период с декабря 2021 года по май 2022 года включительно в размере 5 638 123,71 рублей.

Детализированный расчет объема и стоимости потребленной Ответчиком тепловой энергии приведен в Приложении к настоящему мировому соглашению.

Сумму задолженности в размере 5 638 123,71 рублей Ответчик погашает путем перечисления денежных средств на расчетный счет истца в срок до 23.12.2022 г.

Указанные в настоящем пункте денежные средства Ответчик оплачивает на расчетный счет Истца по следующим банковским реквизитам:

Место нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр- т Кузнецкий, д. 30

Почтовый адрес: 650036, 

<

...>

ИНН 

<

***>, КПП 420501001 р/с 

<

***>

КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНКЕ КЕМЕРОВО к/с 30101810200000000612 БИК 043207612

В платежном поручении в назначении платежа Ответчик указывает, что оплата производится по мировому соглашению по делу № А27-12400/2022.

Обязательство Ответчика по оплате денежных средств будут считаться исполненными с момента зачисления денежных средств на счет Истца.

Истец отказывается от требований об уплате убытков в полуторакратном размере стоимости тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя за период с декабря 2021 года по май 2022 года в размере 2 349 218,23 руб. и неустойки за период с декабря 2021 г. по май 2022 года в размере 164 172,01 руб.».

Акты приемки законченного строительством объекта по договору на выполнение проектных и изыскательских работ, строительство объекта капитального строительства от 18.09.2019 № 99920190000000000006/76509-КЕ-СМР были подписаны между АО «Стройтрансгаз» (Подрядчик) и АО «СТГ-Сибирь» (Субподрядчик) (т. 1, л.д. 239 – 242):

- объект «Интернат для обучающихся средней специальной музыкальной школы (75 человек)» - 25.10.2021;

- объект «Учебный корпус хореографической академии (150 учащихся) с учебным театром» - 15.11.2021;

- объект «Интернат для учащихся (150 мест) и учебным театром» - 15.11.2021;

- объект «Общеобразовательная школа (300 учащихся)» - 25.11.2021;

- объект «Учебный корпус Средней специальной музыкальной школы (150 учащихся) с концертным залом» - 14.12.2021.

Таким образом, обязательства АО «СТГ-Сибирь» по Договору считаются исполненными только после подписания указанных Актов. В период до момента подписания Актов, затраты на оплату тепловой энергии должен нести Субподрядчик – АО «СТГ-Сибирь» согласно условиям договора. 

Исходя из приведенных выше условий заключенного сторонами договора, обязанность субподрядчика по организации теплоснабжения объектов прекратилась с момента подписания Актов приемки законченного строительством объекта.

Таким образом, с момента подписания Актов объекты, являющиеся предметом договора, считаются созданными. Поскольку указанные объекты капитального строительства на этот момент переданы во владение подрядчику, на него переходит риск обеспечения сохранности объекта и несения расходов по его содержанию.

Акты окончательной сдачи-приемки выполненных работ между АО «СТГ-Сибирь» (Подрядчик) и ООО «СДС-Строй» (Субподрядчик) по договорам субподряда на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства от 20.02.2020  №№ ..384КЕ,..385КЕ, 386КЕ, 387КЕ, 388КЕ, от 21.02.2020 №№ 404КЕ, 406 КЕ, от 15.04.2020 №№ 1168КЕ, 1184КЕ, 1185КЕ, 1186КЕ с ООО «СДС-Строй» не подписаны. 

ООО «СДС-Строй» не представило в материалы дела доказательств передачи объектов в спорный период АО «СТГ-Сибирь», и прекращения, тем самым, бремени содержания результата выполненных строительных работ.

Таким образом, исходя из приведенных выше условий заключенных сторонами договоров, обязанность субподрядчика по организации теплоснабжения объектов в спорный период не прекратилась.

Исходя из изложенного, с Фонда подлежит взысканию задолженность за потребленную тепловую энергию и теплоноситель в общем размере 1 018 505 руб. 89 коп.: 

- объект «Интернат для обучающихся средней специальной музыкальной школы (75 человек)» - октябрь (46 229,47 руб.), ноябрь (217 680,84 руб.), декабрь (32 896,42 руб.);

- объект «Учебный корпус хореографической академии (150 учащихся) с учебным театром» - ноябрь (108 149,02 руб.), декабрь (113 619,09 руб.);

- объект «Интернат для учащихся (150 мест) и учебным театром» - ноябрь (91 053,65 руб.), декабрь (118 459,61 руб.);

- объект «Общеобразовательная школа (300 учащихся)» - ноябрь (43 175,45 руб.), декабрь (183 185,65 руб.);

- объект «Учебный корпус Средней специальной музыкальной школы (150 учащихся) с концертным залом» - декабрь (64 056,69 руб.).

Солидарно с ООО «СДС-Строй», АО «Стройтрансгаз» подлежит взысканию задолженность за потребленную тепловую энергию и теплоноситель в общем размере 3 310 602 руб. 42 коп.:

- объект «Интернат для обучающихся средней специальной музыкальной школы (75 человек)» - сентябрь (6 746,63 руб.), октябрь (180 717,05 руб.);

- объект «Учебный корпус хореографической академии (150 учащихся) с учебным театром» - сентябрь (7 980,12 руб.), октябрь (241 557,20 руб.), ноябрь (84 820,14 руб.);

- объект «Интернат для учащихся (150 мест) и учебным театром» - сентябрь (10 485,52 руб.), октябрь (297 377,0 руб.), ноябрь (81 249,52 руб.);

- объект «Общеобразовательная школа (300 учащихся)» - сентябрь (54 208,70 руб.), октябрь (1 436 830,49 руб.), ноябрь (362 230,36 руб.);

- объект «Учебный корпус Средней специальной музыкальной школы (150 учащихся) с концертным залом» - сентябрь (5 906,39 руб.), октябрь (197 985,17 руб.), ноябрь (210 060,28 руб.), декабрь (132 447,86 руб.).

Как следует из положений части 10 статьи 22 Закона о теплоснабжении, стоимость тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя, определяется в соответствии с действующими на дату взыскания тарифами на тепловую энергию, теплоноситель для соответствующей категории потребителей или ценами, не подлежащими регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом, с учетом стоимости услуг по передаче тепловой энергии и подлежит оплате потребителем или иным лицом, осуществившими бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, в пятнадцатидневный срок с момента получения соответствующего требования теплоснабжающей организации. В случае неоплаты в указанный срок потребителем или иным лицом, осуществившими бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, стоимости тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления, теплоснабжающая организация вправе прекратить подачу тепловой энергии, теплоносителя и взыскать с потребителя или иного лица, осуществивших бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, убытки в полуторакратном размере стоимости тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя.

Потребление тепловой энергии признается бездоговорным в случае потребления тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо с использованием теплопотребляющих установок, подключенных (технологически присоединенных) к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения (технологического присоединения), либо после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо после предъявления требования теплоснабжающей организации или ТСО о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем (пункт 29 статьи 2 Закона о теплоснабжении).

Бездоговорное потребление тепловой энергии и теплоносителя является фактическим основанием для возникновения кондикционного обязательства, заключающегося в неосновательном приобретении потребителем блага посредством самовольного подключения энергопринимающих устройств к объектам теплосетевого хозяйства и (или) в отсутствии соответствующего юридического основания – договора теплоснабжения или купли-продажи.

При этом способ определения объема обязательства потребителя при бездоговорном потреблении обусловлен спецификой отношений по снабжению энергией и теплоносителем по присоединенной сети, поскольку при непрерывности такого снабжения в отсутствие приборов учета у бездоговорного потребителя вычленить объем его потребления из общего объема потребления всех абонентов теплоснабжающей организации невозможно. В свою очередь, отсутствие возможности определения количества потребленной энергии и теплоносителя, то есть бесконтрольное потребление ресурса, обусловливает исчисление его количества как физически максимально возможного для пропускной способности сети.

Последствия бездоговорного потребления установлены в частях 8 – 10 статьи 22 Закона о теплоснабжении, в том числе в виде взыскания с потребителя или иного лица, осуществивших бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, убытков в полуторакратном размере стоимости тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя.

Размер заявленных на основании статьи 22 Закона о теплоснабжении убытков (повышенной платы за потребленную при отсутствии технологического присоединения к сетям истца) тепловую энергию определен истцом как 50 % от фактического объема потребления ответчиком тепловой энергии  за соответствующий  спорный период, определенный в свою очередь по показаниям приборов учета, установленных на объектах и зафиксировавших объем потребления тепловой энергии.

С учетом вышеизложенного, поскольку тепловая энергия, поставленная в сентябре – декабре 2021 года не была оплачена в пятнадцатидневный срок, установленный пунктом 10 статьи 22 Закона о теплоснабжении, требование истца об оплате убытков: с Фонда – в размере 424 377 руб. 46 коп., с ООО «СДС-Строй», АО «Стройтрансгаз», АО «СТГ-Сибирь» солидарно – в размере 3 310 602 руб. 42 коп. является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

Доводы ответчика2 о том, что поскольку к Фонду требования об оплате в добровольном порядке бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя от теплоснабжающей организации не поступали, счет-фактуры не предъявлялись, о заявленных требованиях Фонд узнал только в ноябре 2022 года после привлечения Фонда в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, следовательно позиция Истца о взыскании убытка в полуторакратном размере стоимости тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя, – не является обоснованной и подлежащей удовлетворению, судом отклоняются, как основанные на неверном толковании нормативного акта. Также отклоняются доводы ответчика1.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате тепловой энергии, потребленной в сентябре – декабре 2021 года, истцом заявлено требование о взыскании с ответчиков пени за период просрочки с 12.05.2022 по 28.12.2022 (сентябрь – ноябрь 2021 года), с 11.01.2022 по 28.12.2022 (декабрь 2021 года), рассчитанной на основании части 9.1 статьи 15 Закона о теплоснабжении: с Фонда в размере 86 529 руб. 16 коп.; солидарно с ООО «СДС-Строй», АО «Стройтрансгаз», АО «СТГ-Сибирь» – в размере 227 280 руб. 51 коп. неустойки.

Согласно правовой позиции, изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016), утверждённом Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016 (раздел «Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике», ответ на вопрос № 3), при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда подлежит применению ставка на день его вынесения. 

В соответствии с Указанием Банка России от 11.12.2015 № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России» значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату. С 19.09.2022 размер ключевой ставки составляет 7,5 % годовых (согласно Информации Банка России от 19.09.2022). 

Ответчики возражений на уточненный расчет пени не представили, арифметически с указанной суммой соглашались в ходе заседаний.

Расчет неустойки судом проверен, признан не верным. 

Согласно статье 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым – десятым пункта 1 статьи 63 данного Федерального закона.

Согласно абзацу 10 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

На основании пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

Согласно разъяснениям, приведенным в ответе на вопрос № 10 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 30.04.2020, одним из последствий введения моратория является прекращение начисления неустоек (штрафов и пеней) и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежных обязательств и обязательных платежей по требованиям, возникшим до введения моратория.

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Постановление № 497 вступило в силу со дня его официального опубликования 01.04.2022 (пункт 3).

Вопреки позиции истца, в силу части 2 статьи 1 Закона о банкротстве действие данного закона распространяется на юридические лица, которые могут быть признаны несостоятельными (банкротами) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, действие соответствующего моратория также подлежит применению к указанным лицам, которые могут быть признаны несостоятельными (банкротами), а не в отношении которых уже фактически были поданы соответствующие заявления о банкротстве, и не носит заявительного характера.

В силу указанного для применения моратория с 01.04.2022 не имеют правового значения обстоятельства того, что ответчиком не представлены доказательства того, что он действительно пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, что ответчик не является банкротом и что в отношении ответчика не подано заявление о банкротстве, как следует из информации с официального сайта единого федерального реестра сведений о банкротстве https://bankrot.fedresurs.ru.

В силу пункта 2 Постановления № 497 мораторий не распространяется на неисправных застройщиков, чьи объекты строительства включены в реестр проблемных объектов на дату введения моратория, а также в отношении должников, деятельность которых регулируется определенными законами и положениями, если такие должники включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень, либо на их аффилированных лиц.

Согласно расчету суда сумма неустойки составила: Фонд за период с 02.10.2022 по 28.12.2022 – 9 154 руб. 80 коп., за период с 11.01.2022 по 28.12.2022 – 17 682 руб. 02 коп.;  Строители за период с 02.10.2022 по 28.12.2022 – 57 468 руб., за период с 11.01.2022 по 28.12.2022 – 4 572 руб. 17 коп.

С учетом вышеизложенного, исковые требования подлежат удовлетворению частично.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчиков. 

 

Руководствуясь статьями 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Москва, в пользу акционерного общества «Кемеровская генерация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

<

...> 469 720 руб. 17 коп., в т.ч.: 1 018 505 руб. 89 коп. долга за потребленную тепловую энергию и теплоноситель за период октябрь – декабрь 2021 года, 424 377 руб. 46 коп. убытков, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии и теплоносителя за период октябрь – декабрь 2021 года, 26 836 руб. 82 коп. неустойки, а также 22 240 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью «СДС-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Кемерово, акционерного общества «Стройтрансгаз» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Москва, в пользу акционерного общества «Кемеровская генерация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

<

...> 752 060 руб. 26 коп., в т.ч.: 3 310 602 руб. 42 коп. долга за потребленную тепловую энергию и теплоноситель за период октябрь – декабрь 2021 года, 1 379 417 руб. 67 коп. убытков, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии и теплоносителя за период октябрь – декабрь 2021 года, 62 040 руб. 17 коп. неустойки, а также 40 760 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

В отношении акционерного общества «Стройтрансгаз-Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Кемерово, в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, через Арбитражный суд Кемеровской области.

 

Судья                                                                                                                       Г.М. Шикин