Арбитражный суд Московской области

  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

гор. Москва

 

«14» апреля 2023 года                                    

Дело № А41-1729/23

 

Резолютивная часть решения объявлена 11 апреля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 14 апреля 2023 года.     

 Арбитражный суд Московской области в составе судьи ЕА. Морозовой, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.А. Михайловым,

рассмотрев в открытом  судебном заседании  дело по исковому заявлению 

ООО "ИТС-Строй" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к АО "Красногорская теплосеть" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 915 192 руб. 67 коп., 

при участии в заседании: согласно протоколу

У С Т А Н О В И Л:

ООО "ИТС-Строй" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском  к АО "Красногорская теплосеть" о взыскании гарантийных удержаний в сумме 915 192 руб. 67 коп. по договорам № 32110247840 от 31.05.2021г., № 32110247934 от 31.05.2021г., № 32110122449 от 14.04.2021г., № 32110246140 от 31.05.2021г., расходов по уплате государственной пошлины  в размере 21 304 руб. 00 коп.

Представитель истца в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещался судом надлежащим образом, возражений и отзыв на иск не представил.

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, заслушав представителя истца, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

По материалам дела судом установлено, что в соответствии с условиями договора № 32110247840 от 31.05.2021г., заключенного между ООО «ИТС-Строй» и АО «Красногорская теплосеть», Подрядчик осуществил выполнение строительно-монтажных работ (подвод тепловой сети) по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системе теплоснабжения общеобразовательной школы на 825 мест в ЖК «Опалиха 03», расположенной по адресу: МО, г. о. Красногорск, вблизи г. Красногорск» (далее -Договор 1).

В рамках Договора 1 истец выполнил объем работ на общую сумму - 8 428 363, 46 рубля, о чем между сторонами 21.06.2021г. и 31.08.2021г. подписаны акт по форме КС-2.

В качестве исполнения пунктов 14.1 и 14.4.1. Договора Подрядчик внес на расчетный счет Заказчика 385 350,18 руб. (5 % начальной (максимальной) цены Договора, платежное поручение от 14 мая 2021г. № 699). Денежные средства до настоящего времени не возвращены Подрядчику.

В соответствии с условиями договора № 32110247934 от 31.05.2021г., заключенного между ООО «ИТС-Строй» и АО «Красногорская теплосеть», Подрядчик осуществил выполнение строительно-монтажных работ (подвод тепловой сети) по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системе теплоснабжения АО «Красногорская теплосеть» объекта капитального строительства - магазина по адресу: МО, Красногорский р-н, р. 

<

...>» (далее -Договор 2).

В рамках Договора 2 истец выполнил объем работ на общую сумму 1 582 353,73 рубля, о чем между сторонами 29.10.2021г. подписан акт о выполненных работах по форме КС-2, который не оплачен до настоящего времени.

В качестве исполнения пунктов 14.1 и 14.4.1. Договора Подрядчик внес на расчетный счет Заказчика 72 663,8 руб. (5 % начальной (максимальной) цены Договора, платежное поручение от 14 мая 2021г. № 698). Денежные средства до настоящего времени не возвращены Подрядчику.

В соответствии с условиями договора № 32110122449 от 14.04.2021г., заключенного между ООО «ИТС-Строй» и АО «Красногорская теплосеть» (в редакции дополнительного соглашения от 17.05.2021г.), Подрядчик осуществлял выполнение строительно-монтажных работ (подвод тепловой сети) по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системе теплоснабжения Школы на 550 мест по адресу: МО, Красногорский р-н, р. 

<

...>» (далее -Договор 3).

В рамках Договора 3 истец выполнил объем работ на общую сумму - 6 241 827,7 рублей, о чем между сторонами подписаны акты по форме КС-2.

В качестве исполнения пунктов 14.1 и 14.4.1. Договора Подрядчик внес на расчетный счет Заказчика 285 157,83 руб. (5 % начальной (максимальной) цены Договора, платежное поручение от 08 апреля 2021г. № 437). Денежные средства до настоящего времени не возвращены Подрядчику.

В соответствии с условиями договора № 32110246140 от 31.05.2021г., заключенного между ООО «ИТС-Строй» и АО «Красногорская теплосеть» (в редакции дополнительного соглашения от 17.05.2021г.), Подрядчик осуществлял выполнение строительно-монтажных работ (подвод тепловой сети) по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системе теплоснабжения   административного   здания,   расположенного   по   адресу:   Московская

область, г. Красногорск, мкр. «Чернево-1», ул. Ленина между домом 37 и домом 41 (земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010106:44)» (далее - Договор 4).

В рамках Договора 4 истец выполнил объем работ на общую сумму - 3 423 215,15 рублей, о чем между сторонами подписаны акты по форме КС-2.

В качестве исполнения пунктов 14.1 и 14.4.1. Договора Подрядчик внес на расчетный счет Заказчика 172 020,86 руб. (5 % начальной (максимальной) цены Договора, платежное поручение от 14 мая 2021г. № 700). Денежные средства до настоящего времени не возвращены Подрядчику.

Итого общий размер задолженности по всем четырем договорам подряда составляет - 915 192,67 рубля (385 350,18 рублей + 72 663,8 рублей + 285 157,83 рубля + 172 020,86 рублей).

В ввиду того, что договора 1,2,3 и 4 прекратили своё действие надлежащим исполнением со стороны Подрядчика, ООО «ИТС-Строй» 26.05.2022г. обратилось с соответствующими письмами в АО «Красногорская теплосеть» о возврате обеспечений, которое оставлено без удовлетворения (копии писем от 26.05.2022г. – представлены в  материалы дела).

В целях урегулирования спора в досудебном порядке в адрес ответчика была направлена претензия, которая оставлена последним без удовлетворения (копия претензии представлена в материалы дела).

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоящим иском в суд. 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры являются основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей.

Стороны заключили договор, по которому приняли на себя взаимные обязательства. Указанный договор не был оспорен, не был признан недействительным, по форме и содержанию соответствует требованиям гражданского законодательства Российской Федерации.

В соответствии с частями 1 и 4 статьи 421 ГК РФ юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иным правовым актом.

По смыслу части 1 и 2 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

На основании ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

Согласно статья 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями

При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

В соответствии со статьями 309 и 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, и в срок, определенный сторонами.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Судом установлено и не оспорено сторонами, что Договоры прекратили свое действие надлежащим исполнением со стороны Подрядчика, из чего следует, что сумма гарантийных удержаний должна была быть выплачена Подрядчику, что ответчиком произведено не было. Доказательств обратного суду не представлено.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих требований или возражений.

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.  

 Возражений ответчиком по заявленным требованиям не представлено, как и доказательств, опровергающих доводы истца. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что данные обстоятельства указывают на то, что у ответчика возникла обязанность по уплате гарантийного удержания в соответствии с условиями договоров, в настоящее время ответчик без наличия на то правовых оснований удерживает денежные средства истца.

Исковые требования подлежат удовлетворению. 

С учетом результатов рассмотрения дела, расходы на оплату услуг представителя,  расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска  возлагаются на ответчика на основании ст.ст.106, 110, 112 АПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с АО "Красногорская теплосеть" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "ИТС-Строй" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) денежные средства в размере 915 192 руб. 67 коп., расходы по уплате государственной пошлины  в размере 21 304 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

 

Судья                                                         Е.А. Морозова