6/2019-2666(1) 

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

 (резолютивная часть)

Дело № А04-6937/2018

г. Благовещенск

21 января 2019 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.Г. Осадчего, 

при ведении протокола и аудиопротоколирования секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление государственного  казенного учреждения Амурской области «Строитель» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Алмазтрансстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании выполнить работы по устранению дефектов, третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «СеверЭнергоСервис», 

руководствуясь статьями 110, 167-169 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Алмазтрансстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 60 календарных дней со дня вступления в  законную силу решения безвозмездно выполнить работы по устранению дефектов,  выявленных в гарантийный период в ходе эксплуатации жилых домов, а именно  выполнить следующие работы:  

Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями судей по делу на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код: 

1. Жилой дом тип А-1 № 7 (г. Тында, мкр. Таежный, Кольцевая, д. 5): 

- выполнить устройство вертикальных связей Св1, Св2, СвЗ (проект шифр  2011.008.1000.1207-АС);  

- устранить деформацию (вздутие) обшивки фасада жилого дома в осях 1-13; в  диапазоне отметок 0,000;3,065 (проект 2011.008.1000.1207-КР тип дома А-1), путем  замены деформированных (вздутых) листов обшивки фасада;  

- произвести ремонтно-восстановительные работы в квартирах М2, 3, 5, 8, 13, 17, 20  жилого дома:  

Квартира № 2: комната в осях 2-3; Б-В (проект 2011.008.1000.1207-КР тип дома А- 1):  

- произвести замену деформированного оконного блока ПВХ (двухкамерный  стеклопакет, 2-х створчатый, наклонно-поворотный);  

- устранить вертикальную трещину (толщиной до 10 мм) обшивки наружной стены  ГКЛ с правой стороны подоконника, путем замены деформированных листов ГКЛ  обшивки наружной стены с восстановлением внутренней отделки помещения;  

- устранить вертикальную трещину (толщиной до 5 мм) обшивки наружной стены  ГКЛ от верхнего левого угла оконного проема к потолку, путем замены деформированных  листов ГКЛ обшивки наружной стены с восстановлением внутренней отделки помещения;  

- устранить трещину (толщиной до 5 мм) обшивки внутренней стены ГКЛ в месте  примыкания откосов верхнего угла оконного проема, путем замены деформированных  листов ГКЛ обшивки наружной стены с восстановлением внутренней отделки помещения;  

- устранить отслоение левого вертикального откоса оконного блока, путем замены  деформированных листов ГКЛ обшивки откосов с восстановлением внутренней отделки  откоса.  

Квартира № 3: комната в осях 4-5; Б-В (проект 2011.008.1000.1207-КР тип домаА1):  

- произвести замену деформированного оконного блока ПВХ (двухкамерный  стеклопакет, 2-х створчатый, наклонно-поворотный);  

- устранить вертикальные трещину (толщиной до 5 мм) обшивки ГКЛ в левом и  правом углах помещения в месте примыкания наружной и внутренних стен, путем замены  деформированных листов ГКЛ обшивки наружной и внутренних стен с восстановлением  внутренней отделки помещения;  

- устранить вертикальные трещины (толщиной до 5 мм) обшивки ГКЛ внутренней  стены помещения, путем замены деформированных листов ГКЛ обшивки внутренней  стены с восстановлением внутренней отделки;  

- устранить вертикальные трещины (толщиной до 5 мм) обшивки ГКЛ перегородки  помещения, путем замены деформированных листов ГКЛ обшивки перегородки с  восстановлением внутренней отделки;  

- устранить вертикальную трещину (толщиной до 5 мм) обшивки наружной стены  ГКЛ от левого нижнего угла подоконника до пола, путем замены деформированных листов  ГКЛ обшивки наружной стены с восстановлением внутренней отделки помещения;  

- устранить вертикальную трещину (толщиной до 15 мм) обшивки наружной стены  ГКЛ от правого нижнего угла подоконника до пола, путем замены деформированных  листов ГКЛ обшивки наружной стены с восстановлением внутренней отделки помещения;  

- устранить трещину (толщиной до 5 мм) обшивки ГКЛ потолка (в осях 2-3; Б),  путем замены деформированных листов ГКЛ обшивки потолка с восстановлением  внутренней отделки помещения;  

- устранить вертикальную трещину (толщиной до 5 мм) обшивки ГКЛ колонны (в  осях 2-3; Б), путем замены деформированных листов ГКЛ обшивки колонны с  восстановлением внутренней отделки помещения;  

комната в осях 5-6; Б-В (проект 2011.008.1000.1207-КР тип домаА-1): 

- произвести замену деформированного оконного блока ПВХ (однокамерный  стеклопакет, 3-х створчатый, раздвижной);  

- устранить вертикальные трещины (толщиной до 5 мм) обшивки ГКЛ лоджии,  путем замены деформированных листов ГКЛ обшивки лоджии с восстановлением  внутренней отделки лоджии;  

- устранить вертикальные трещины (толщиной до 10 мм) обшивки ГКЛ колонн (в  осях 5; Б-В), путем замены деформированных листов ГКЛ обшивки колонн с  восстановлением внутренней отделки помещения.  

Квартира № 5: комната в осях 2-3; Б-В (проект 2011.008.1000.1207-КР тип домаА1):  

- произвести замену деформированного оконного блока ПВХ (двухкамерный  стеклопакет, 2-х створчатый, наклонно-поворотный);  

- устранить вертикальную трещину (толщиной до 15 мм) обшивкой наружной стены  ГКЛ с правой стороны подоконника, путем замены деформированных листов ГКЛ  обшивки наружной стены с восстановлением внутренней отделки помещения;  

- устранить вертикальную трещину (толщиной до 5 мм) обшивки наружной стены  ГКЛ от верхнего левого угла оконного проема к потолку, путем замены деформированных  листов ГКЛ обшивки наружной стены с восстановлением внутренней отделки помещения;  

- устранить вертикальную трещину (толщиной до 15 мм) ДСП обшивки наружной  стены по внутренней стороне стеновой панели с правой стороны подоконника, путем  замены деформированных листов ДСП обшивки наружной стены стеновой панели и  листов ГКЛ обшивки наружной стены с восстановлением внутренней отделки помещения;  

- устранить трещину (толщиной до 5 мм) в месте примыкания откосов верхнего  угла оконного проема, путем замены деформированных листов ГКЛ обшивки откосов с  восстановлением внутренней отделки откоса;  

- устранить трещину на стеклопакете оконного блока ПВХ, путем замены  треснутого стеклопакета (двухкамерный стеклопакет);  

- устранить отслоение подоконной доски от правого оконного откоса, путем замены  деформированной подоконной доски с восстановлением внутренней отделки откоса.  

Квартира № 8: комната в осях 1-2; Б-В (проект 2011.008.1000.1207-КР тип дома А- 1):  

- устранить трещину (толщиной до 5 мм) обшивки перегородки в местах  примыкания листов ГКЛ, путем замены деформированных листов ГКЛ обшивки стен с  восстановлением внутренней отделки помещения;  

- устранить вертикальную трещину (толщиной до 5 мм) обшивки ГКЛ в левом и  правом углах помещения в месте примыкания наружной и внутренних стен, путем замены  деформированных листов ГКЛ обшивки наружной и внутренних стен с восстановлением  внутренней отделки помещения;  

комната в осях 2-3; Б-В (проект 2011.008.1000.1207-КР тип дома А-1): 

- произвести замену деформированного оконного блока ПВХ (двухкамерный  стеклопакет, 2-х створчатый, наклонно-поворотный);  

- устранить вертикальную трещину (толщиной до 10 мм) обшивки наружной стены  ГКЛ с правой стороны подоконника, путем замены деформированных листов ГКЛ  обшивки наружной стены с восстановлением внутренней отделки помещения;  

- устранить вертикальную трещину (толщиной до 5 мм) обшивки наружной стены  ГКЛ от верхнего левого угла оконного проема к потолку, путем замены деформированных  листов ГКЛ обшивки наружной стены с восстановлением внутренней отделки помещения;  

- устранить вертикальную трещину (толщиной до 5 мм) обшивки стен ГКЛ в левом  и правом углах помещения в месте примыкания наружной и внутренних стен, путем  

замены деформированных листов ГКЛ обшивки наружной и внутренних стен с  восстановлением внутренней отделки помещения;  

комната в осях 3-4; Б-В (проект 2011.008.1000.1207-КР тип дома А-1):  

- устранить деформацию поворотно-откидной створки оконного блока ПВХ, путем  замены наклонно-поворотной створки оконного блока ПВХ (створка двухкамерного  стеклопакета).  

Квартира № 10: комната в осях 7-8; А-Б (проект 2011.008.1000.1207-КР тип дома А- 1):  

- произвести замену деформированного оконного блока ПВХ (двухкамерный  стеклопакет, 2-х створчатый, наклонно-поворотный).  

Квартира № 13: комната в осях 6-7; Б-В (проект 2011.008.1000.1207-КР тип дома А- 1):  

- устранить вертикальную трещину (толщиной до 5 мм) обшивки внутренней стены  ГКЛ от пола до потолка, путем замены листов ГКЛ обшивки внутренней стены с  восстановлением внутренней отделки помещения.  

Квартира № 17: 

- устранить намокание внутренней отделки помещения с/у, путем замены намокших  листов ГКЛ обшивки потолка и стен с восстановлением внутренней отделки помещения,  замены намокшего теплоизоляционного слоя в местах прохода инженерных коммуникаций  (канализация, вентиляция) через перекрытие 3-го этажа и восстановление  гидроизоляционного слоя перекрытия 3-го этажа;  

- устранить вертикальные трещины (толщиной до 5 мм) обшивки внутренней стены  ГКЛ от правого верхнего угла входной двери к потолку, путем замены деформированных  листов ГКЛ обшивки внутренней стены с восстановлением внутренней отделки  помещения;  

комната в осях 7-8; Б-В (проект 2011.008.1000.1207-КР тип дома А-1):  

- произвести замену деформированного оконного блока ПВХ (двухкамерный  стеклопакет, 2-х створчатый, наклонно-поворотный);  

- устранить вертикальные трещины (толщиной до 5 мм) обшивки ГКЛ в левом и  правом углах помещения в месте примыкания наружной и внутренних стен, путем замены  деформированных листов ГКЛ обшивки наружной и внутренних стен с восстановлением  внутренней отделки помещения;  

- устранить трещины (толщиной до 5 мм) обшивки наружной стены ГКЛ под  подоконником, путем замены деформированных листов ГКЛ обшивки наружной стены с  восстановлением внутренней отделки помещения;  

- устранить вертикальные трещины (толщиной до 5 мм) обшивки внутренней стены  и перегородки ГКЛ в местах примыкания листов ГКЛ, путем замены деформированных  листов ГКЛ обшивки внутренней стены и перегородки с восстановлением внутренней  отделки помещения;  

комната в осях 8-9; Б-В (проект 2011.008.1000.1207-КР тип дома А-1):  

- произвести замену деформированного оконного блока ПВХ (однокамерный  стеклопакет, 3-х створчатый, раздвижной);  

- устранить последствия намокания внутренней отделки лоджии, путем замены  намокших листов ГКЛ обшивки наружной стены с восстановлением внутренней отделки  помещения;  

комната в осях 9-10; Б-В (проект 2011.008.1000.1207-КР тип дома А-1):  

- произвести замену деформированного оконного блока ПВХ (двухкамерный  стеклопакет, 2-х створчатый, наклонно-поворотный);  

- устранить вертикальные трещины (толщиной до 5 мм) обшивки ГКЛ в левом и  правом углах помещения в месте примыкания наружной и внутренних стен, путем замены  деформированных листов ГКЛ обшивки наружной и внутренних стен с восстановлением  внутренней отделки помещения;  

Квартира № 20: комната в осях 12-13; Б-В (проект 2011.008.1000.1207-КР тип дома  А-1):  

- произвести замену деформированного оконного блока ПВХ (двухкамерный  стеклопакет, 2-х створчатый, наклонно-поворотный);  

- устранить вертикальную трещину (толщиной до 10 мм) обшивки наружной стены  ГКЛ с правой стороны подоконника, путем замены деформированных листов ГКЛ  обшивки наружной стены с восстановлением внутренней отделки помещения;  

- устранить вертикальную трещину (толщиной до 5 мм) обшивки наружной стены  ГКЛ от верхнего левого угла оконного проема к потолку, путем замены деформированных  листов ГКЛ обшивки наружной стены с восстановлением внутренней отделки помещения.  

2. Жилой дом тип А-2 № 5 (г. Тында, мкр. Таежный, Кольцевая, д. 29):  

- выполнить мероприятия по предотвращению образования конденсата на  профилированном настиле кровли в чердачном помещении, путем герметизации выходов  систем инженерных коммуникаций (канализация, вентиляция) в чердачное помещение,  

восстановление теплоизоляционного слоя систем инженерных коммуникаций  (канализация, вентиляция) в чердачном помещении;  

- выполнить восстановление гидроизоляционного слоя перекрытия 3-го этажа в  чердачном помещении;  

Квартира № 8: 

комната в осях 1-2; Б-В (проект АР 2011.008.1000.1205 тип дома А-2):  

- устранить последствия намокания обшивки ГКЛ и теплоизоляционного слоя  перегородки путем замены теплоизоляционного слоя и обшивки ГКЛ перегородки  

с восстановлением внутренней отделки помещения; 

комната в осях 2-3; Б-В (проект АР 2011.008.1000.1205 тип дома А-2):  

- устранить деформацию обшивки ГКЛ перегородки и потолка, путем замены  намокших листов ГКЛ обшивки перегородки и потолка с восстановлением внутренней  отделки помещения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алмазтрансстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6000 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Шестой арбитражный  апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.  

Судья А.Г. Осадчий