Арбитражный суд Пензенской области

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, e-mail:penza.info@arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

28 декабря 2017 года                                            Дело №А49-14666/2017

 

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Телегина А.П., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы им. С.А.Суркова с.Богословка (ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал» (ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 24.05.2017 г., рассчитанной за период с 11.07.2017 г. по 20.08.2017 г.,

руководствуясь ст.ст. 307, 309, 330, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст.110, 167-171, 227-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,   

 

РЕШИЛ:

Исковые требования муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы им. С.А.Суркова с.Богословка удовлетворить частично, судебные расходы распределить между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Арсенал» в пользу муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы им. С.А.Суркова с.Богословка неустойку в сумме 107808,99 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4173,57 руб.

 

В остальной части исковых требований отказать.

 

Возвратить муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средней общеобразовательной школе им. С.А.Суркова с.Богословка из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 313 руб.

 

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного  решения по заявлению стороны  -  со дня принятия решения в полном объеме.

 

Судья                                                                              А.П.Телегин