АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-29831/2024-52-221

г. Москва

10 июня 2024 года

Арбитражный суд города Москвы  

в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е., при ведении протокола секретарем судебного заседания Бабаевым А.С. рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело по исковому заявлению ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДЕПАРТАМЕНТА  КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ (119285, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.12.2008,  ИНН: 

<

***>)  

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «МИЛАНСТРОЙ» (127030,  РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ,  СУЩЁВСКАЯ УЛ., Д. 21, ЭТАЖ 5, ПОМЕЩ. I ОФИС 506, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 27.03.2006, ИНН: 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки (дефекты) зафиксированные в акте от 22.12.2023 по ул.  Удальцова: устранить локальное вспучивание / просадку плиточного покрытия тротуара S  = 205 кв.м.; устранить просадку верхнего оборудования люков; устранить локальную  просадку бортового камня; устранить повреждения МАФ (скамеек); устранить трещины в  асфальтобетонном покрытии вокруг люков; взыскании штрафа в размере 102 407,78 руб. по  контракту от 18.04.2022 № 15-02-22-ГКУДКР/22.  

при участии: 

от истца – ФИО1 на основании выданной доверенности от 26.12.2023 года;  паспорт, диплом.  

от ответчика – не явился, извещен. 

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «МИЛАНСТРОЙ» (ИНН:  

<

***>) в течение 1 месяца с даты вступления в силу судебного акта устранить  недостатки (дефекты) строительных работ по государственному контракту № 15-02-22- ГКУДКР/22 от 18.04.2022г. выявленные в период гарантийных обязательств по адресу: ул.  Удальцова, зафиксированные в акте от 22.12.2023:  

- устранить локальное вспучивание / просадку плиточного покрытия тротуара  S = 205 кв.м.;  

- устранить просадку верхнего оборудования люков; - устранить локальную просадку бортового камня; - устранить повреждения МАФ (скамеек); - устранить трещины в асфальтобетонном покрытии вокруг люков; 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МИЛАНСТРОЙ» (ИНН:  

<

***>) в пользу ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА  МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДЕПАРТАМЕНТА  КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ (ИНН: 

<

***>) штраф в размере  102 407,78 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МИЛАНСТРОЙ»  (ИНН:

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 10 072 руб.  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: Р.Е. Галиева