Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-162825/22-131-1520

г. Москва

15 декабря 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 ноября 2022 года

Полный текст решения изготовлен 15 декабря 2022 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Председательствующего судьи Жбанковой Ю.В., единолично,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Видановым А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истец МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ответчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПОЛИТРАНС"

о взыскании 3 411 574 руб. 13 коп.

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО1 по доверенности от 12.10.2022г. № 207/4/243д

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 11.03.2022г. № 2022-11

УСТАНОВИЛ:

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПОЛИТРАНС" о взыскании 3 411 574 руб. 13 коп. неустойки по государственного контракту № 2123187315891412222000617 на изготовление и поставку автопоезда специального АПС-1 для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2021 - 2023 годах от 09.06.2021 г.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме, представил возражения на отзыв ответчика.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по мотивам ранее представленного отзыва на иск.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, доводы отзыва на иск, исследовав и оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех имеющихся в деле доказательств, выслушав в судебном заседании полномочного  представителя истца, который поддержал свою позицию по делу, арбитражный суд пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, между (заказчик) и ответчиком (поставщик) был заключен государственный контракт № 2123187315891412222000617 на изготовление и поставку автопоезда специального АПС-1 (далее - товар) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2021 - 2023 годах от 09.06.2021г., в соответствии с пунктом 4.1 которого (в редакции дополнительного соглашения от 16 декабря 2021 г. № 2 к Контракту) цена Контракта составляет 849 108 607,60 руб.

Согласно подпункту 3.2.2 пункта 3.2. Контракта (в редакции дополнительного соглашения от 1 октября 2021 г. № 1 к Контракту) Поставщик обязан осуществить доставку товара Грузополучателю, предусмотренную на 2021 г., на сумму 347 721 990,40 руб. в количестве 30 шт. до 1 декабря 2021 г. и в количестве 1 шт. до 10 декабря 2021 г., т.е. срок поставки товара по 30 ноября 2021 г. и по 9 декабря 2021 г. включительно.

Согласно пункту 7.7. Контракта датой поставки товара является дата подписания Грузополучателем акта приёма-передачи товара.

Товар, предусмотренный к поставке в 2021 году (до 1 декабря 2021 г. и до 10 декабря 2021 г.), поставлен с просрочкой на сумму 347 721 990,40 руб., что подтверждают акты приёма-передачи товара, приложенные к исковому заявлению.

Просрочка исполнения обязательства за период с 1 декабря 2021 г. по 18 декабря 2021 г. составляет 18 дней.

В соответствии с пунктом 11.2. Контракта в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик требует уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Размер неустойки складывается из следующих показателей: (цена Контракта - сумма, пропорциональная объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком) х 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации х количество дней просрочки.

Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату выполнения обязательств представлена в Приложении исковому заявлению (далее - Приложение).

Согласно условий Контракта, Минобороны России в адрес Ответчика направлена претензия от 24 марта 2022 № 207/8/1215, которая оставлена без удовлетворения.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 2.1. Контракта - Поставщик обязуется в установленный Контрактом срок изготовить и поставить Заказчику Товар в количестве, комплектности, соответствующий качеству и иным требованиям, установленным Контрактом, путем его передачи Грузополучателю на условиях установленных Контрактом, а также, согласно п. 3.2.2. Контракта, оуществить доставку Товара следующим Грузополучателям:

01 октября 2021 года между Сторонами заключено Дополнительное Соглашение № 1 к Государственному Контракту.

Согласно п. 1. Дополнительного Соглашения, Стороны изложили пункт 3.2.2. Контракта в следующей редакции: «Количество товара поставляемого в 2021 году, изменить с 30 шт. на 31 шт. Срок поставки Товара в 2021 году установить: 30 штук до 01 декабря 2021 года,  1 штука до 10 декабря 2021 года».

16 декабря 2021 года между Сторонами заключено Дополнительное Соглашение № 2 к Государственному Контракту.

Согласно п. 1. Дополнительного Соглашения № 2, Стороны изменили пункт 4.1. Цену контракта до 849 108 607 руб. 00 коп.

Также Дополнительным Соглашением № 2 Стороны изменили пункт 4.2.1. Контракта и определили цену единицы Товара с доставкой до г. Екатеринбург в 2021 году  в размере 11 216 838 (одиннадцать миллионов двести шестнадцать тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 40 копеек.

Согласно п. 11.2. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

При этом, согласно сноски № 5 Контракта «Для целей Контракта под объемом фактически исполненных Поставщиком обязательств понимается количество фактически поставленного Поставщиком Товара, подтверждаемое подписанным Грузополучателем Актом приема-передачи Товара».

На основании изложенного, необоснованно рассчитана сумма неустойки исходя из стоимости всего контракта. 

Размер неустойки складывается из следующих показателей: 

Цена Контракта - сумма, пропорциональная объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком Х 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации Х количество дней просрочки. 

При этом цена Контракта в 2021 году составляет – 336 505 152 (триста тридцать шесть миллионов пятьсот пять тысяч сто пятьдесят два) рубля 30 единиц АПС поставленных с нарушением срока, один АПС поставлен 10 декабря 2021 года, то есть в установленные сроки.

Согласно п. 4.5. «Контракта Цена Контракта является ориентировочной, предельной. Цена Контракта установлена в объеме, не превышающем показатели ГОЗ-2021 и мероприятий Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы на основании  распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 марта 2021 г. № 614-р. Ориентировочная (уточняемая) цена Контракта по окончании ее срока действия, но не позднее 2 (двух) месяцев  до окончания срока поставки Товара или достижения 80 процентов технической готовности продукции подлежит переводу в фиксированную. Перевод цены в фиксированную осуществляется на основании представляемых Поставщиком в установленном порядке фактических и ожидаемых затрат на поставку Товара. Фиксированная цена подлежит согласованию с Заказчиком и оформляется протоколом согласования цены, который вводится в действие дополнительным соглашением   к Контракту».

Согласно п. 7.1. Контракта «Доставка Товара в место поставки осуществляется видом транспорта, указанным в нормативно-технической документации на Товар, по выбору Поставщика. Во время доставки Товара Поставщик должен обеспечить качество и безопасность Товара посредством выполнения требований Контракта, нормативно-технической документации на Товар, ГОСТ, ТУ, в том числе регламентирующих условия перевозки Товара, и требований Заказчика. Все расходы по доставке Товара в место поставки несет Поставщик».

Согласно п. 7.2. Контракта доставка Товара Грузополучателю допускается только после перевода ориентировочной цены единицы Товара в фиксированную цену путем оформления дополнительного соглашения к Контракту.

06 октября 2021 года в адрес Заказчика Исполнителем был направлен комплект расчетно–калькуляционных материалов для перевода ориентировочной цены в фиксированную по государственному контракту.  Письмо Заказчика, об утверждение фиксированной цены за единицу Товара, Исполнитель получил только 01 декабря 2021 года. После чего приступил к организации отгрузки АПС.    

 Дополнительное Соглашение № 2 к Государственному Контракту, устанавливающее фиксированную цену на товар и, как следствие, разрешающее Поставщику отгрузку товара, было заключено только 16 декабря 2021 года.  При этом сроки поставки Товара не изменялись. 

Таким образом, согласно условиям Государственного Контракта в редакции Дополнительных Соглашений ООО ПКФ «Политранс» должно производить отгрузку Товара только при установлении фиксированной цены и подписания Дополнительного соглашения. 

Свои обязательства ООО ПКФ «Политранс» выполнило в полном объеме, до подписания Дополнительного соглашения № 2. В период с 09 декабря 2021 по 17 декабря 2021 года Товар в количестве 31 штука был полностью отгружен, о чем имеются подписанные сторонами Акты приема передачи Товара. Данный факт свидетельствует о добросовестном отношении Поставщика к исполнению своих обязательств.   

Таким образом, иск подлежит удовлетворению в размере 1 026 340 руб.  71 коп.

Уменьшение размера неустойки в силу ст. 333 ГК РФ является правом суда при наличии обстоятельств, свидетельствующих о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. Исходя из названной правовой нормы, условий договора, обстоятельств спора и представленных доказательств, суд пришел к выводу об отсутствии в данном случае оснований для применения ст. 333 ГК РФ и уменьшения подлежащей взысканию неустойки.

Госпошлина  по иску распределяется в соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ.

С учетом изложенного, на основании  ст.ст. 12, 307, 309, 310, 330, 331, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 4, 27, 65, 67, 68, 71, 102, 110, 121, 123, 171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПОЛИТРАНС" (адрес: 454090, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 08.10.2002)  в пользу МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (адрес: 119019, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 27.02.2003) неустойку 1 026 340 руб.  71 коп. 

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПОЛИТРАНС" (адрес: 454090, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 08.10.2002)  в доход федерального бюджета Российской Федерации  расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 263 руб. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия. 

Судья                                                                          Ю.В.Жбанкова