АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть объявлена 19.09.2024 г.)

Дело № А82-20608/2023

г. Ярославль

14 октября 2024 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Бессоновой И.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Паличевой Л.А., помощником судьи Дыбцыной Е.А.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление муниципального казенного учреждения «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Ярдорремстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о   взыскании   1129785.12  руб.

третьи лица: Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля, общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания Крепыш», общество с ограниченной ответственностью «Компания Открытый спорт», Контрольно-счетная палата Ярославской области, Прокурора Ярославской области в интересах публичного образования - города Ярославля в лице мэрии г. Ярославля

при участии:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 28.09.2022 г.;

от ответчика – ФИО2 – представитель по доверенности от 15.12.2023 г.

от третьих лиц - не явились

установил:

Прокурор Ярославской области в интересах публичного образования - города Ярославля в лице мэрии г. Ярославля обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Ярдорремстрой" о взыскании 1 129 785 руб. 12 коп. в качестве ущерба.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 29.05.023 г.  к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены муниципальное казенное учреждение «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля, Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля, общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания Крепыш», общество с ограниченной ответственностью «Компания Открытый спорт».

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 24.07.2023 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Контрольно-счетная палата Ярославской области.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 21.09.2023 г. в качестве соистца привлечено муниципальное казенное учреждение «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 04.12.2023 г. судом выделены в отдельное производство для отдельного рассмотрения требования муниципального казенного учреждения «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля о взыскании процентов в размере 96 078 руб. 15 коп., о продолжении начисления процентов по день фактического исполнения обязательств.

В рамках дела А82-20608/2023 судом рассматриваются требования муниципального казенного учреждения «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля о взыскании процентов в размере 96 078 руб. 15 коп., о продолжении начисления процентов по день фактического исполнения обязательств.

Истец в судебном заседании требования поддержал.

Ответчик против удовлетворения иска возражал, поддержал доводы, изложенные в отзыве на иск, указал, что по результатам выполненных ответчиком по Контракту работ в адрес Муниципального казенного учреждения «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля направлены Акты выполненных работ по форме КС - 2. Результат выполненных по контракту в полном объеме работ передан ответчиком и принят Муниципальным казенным учреждением «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля. Муниципальным казенным учреждением «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля приняты без замечаний выполненные ответчиком по контракту работы, в том числе оборудование, установленное в благоустроенной части прилегающей территории в границах улиц Чкалова и Щапова в Ленинском районе города Ярославля. Заказчиком на расчетный счет ответчика за выполненные по Контракту работы перечислены денежные средства в размере 15 924 141 рубль 03 копейки. Поскольку цена Контракта составляет 18 694 750 рублей 97 копеек, а Заказчиком в счет цены Контракта уплачено ответчику 15 924 141 рубль 03 копейки, доводы истца о том, что Заказчиком оплата произведена в полном объеме и в объеме цены контракта, является несостоятельным. Решением Арбитражного суда Ярославской области от 01 июня 2024 года по делу №А82-369/2023 взыскать с муниципального казенного учреждения "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ярдорремстрой" 2 150 659,32 руб. неосновательного обогащения, 59 806,01 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. При таких обстоятельствах и поскольку муниципальным казенным учреждением "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля обязательства по оплате цены контракта не исполнены заявленные требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворению не подлежат.

Третьи лица 1-3 в заседание не явились, извещены.

Третье лицо 4 в заседание не явилось, в ходе судебного рассмотрения спора направляло позицию на иск, требования истца поддержало.

Третье лицо 5 в заседание не явилось, в ходе судебного рассмотрения спора направляло позицию на иск, требования истца поддержало.

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 19.09.2024 г. до 15 час. 20  мин.

Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда.

После перерыва судебное заседание продолжено без участия представителей сторон.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

19.07.2021 г. между муниципальным казенным учреждением «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Ярдорремстрой" (Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 36-Е-21 на выполнение работ  по установке многофункционального спортивного комплекса, с благоустройством прилегающей территории в границах улиц Чкалова и Щапова, в Ленинском районе города Ярославля, согласно п.п. 1.1, 1.2, 2.1 которого Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по установке многофункционального спортивного комплекса, с благоустройством прилегающей территории в границах улиц Чкалова и Щапова, в Ленинском районе города Ярославля (далее – работы, объект), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. Виды и объемы выполняемых работ определяются в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1 к Контракту). Цена Контракта составляет -  19 956 460 (девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей, включая НДС. Валютой Контракта является рубль Российской Федерации. Источник финансирования: бюджет города Ярославля. Оплата осуществляется за счет средств бюджета Ярославской области на 2021 год, бюджета города Ярославля на 2021 год в рамках муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории города Ярославля» на 2021-2023 годы.

Во исполнение условий контракта ответчиком осуществлена поставка оборудования, произведен монтаж, выполненные работы Заказчиком оплачены, что подтверждается платежными поручениями № 285902 от 30.08.2022 г., № 285901 от 30.08.2022 г., № 285900 от 30.08.2022 г., № 285903 от 30.08.2022 г., № 285904 от 30.08.2022 г.

Контрольно-счетной палатой Ярославской области проведена проверка законного и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию приоритетных проектов в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе», в муниципальном казенном учреждении «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля за период с 01.01.2021г. по 30.11.2022г.

Прокуратурой Ленинского района г. Ярославля проведена проверка исполнения законодательства при проведении работ по благоустройству парка «Юбилейный» города Ярославля, проверкой установлено, что в рамках реализации указа Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!» по направлению «приоритетные проекты» между муниципальным казенным учреждением «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля (далее — Заказчик, Учреждение), действующее от имени города Ярославля, и обществом с ограниченной ответственностью «Ярдорремстрой» (далее -Подрядчик) по результатам электронного аукциона 19.07.2021 заключен муниципальный контракт № 36-Е-21 на выполнение работ по установке многофункционального спортивного комплекса с благоустройством прилегающей территории в границах улиц Чкалова и Щапова в Ленинском районе города Ярославля (далее - Контракт). Цена контракта составляет 19956460 рублей (пункт 2.1 Контракта). Срок выполнения работ по контракту 15 сентября 2021 года (пункт 4.1 Контракта). 

В ходе проверки было установлено, что локальным сметным расчетов предусмотрено 22 позиции спортивного оборудования, тренажеров, на общую сумму 3 556265,12 руб. спортивный комплекс 1760*1760*440» - 1 шт., 

«Спортивный комплекс 4120*3530*2590» - 1 шт., 

«Спортивный комплекс 4620*4620*2290» - 1 шт., 

«Спортивный комплекс универсальный 7,2*6,1*2,6» - 1 шт.,  

«Брусья двойные для отжимания разноуровневые 3,27*0,86*1,4» - 1 шт., 

«Стол теннисный антивандальный» - 2 шт.,

«Велосипед 1090*810*1200» - 1 шт., 

«Жим 1100*775*1916» - 1 шт.,

 «Жим ногами 1100*550*1090» - 1 шт., 

«Баттерфляй 1050*886*1940» - 1 шт., 

«Жим вертикальная тяга 1,66*0,75*1,8» - 1 шт., 

«Вело-Степпер 1,5*0,51*1,2» - 1 шт., 

«Твистер-маятник  1,2*03,64*1,28» - 1 шт.,

«Жим ногами брусья 1590*602*1470» - 1 шт., 

«Рукоход 3,8*1,5*2,6» -1 шт., 

«Брусья разноуровневые 3 * 1 * 1,5» - 1 шт., 

«Брусья наклонные 3,2*0,8*1,2» - 1 шт., 

«Рули 1*1,1*1,59» -1 шт. 

«Скейт-парк SK 24-9» - 1 шт., 

«Жим вниз 1,3*0,82*1,8» - 1 шт.,

«Тяни, толкай 560*1200*1900» - 1 шт.,

«Жим на брусьях» с изменяемой нагрузкой  1,06*0,52*1,19» - 1 шт.

Установлено, что предусмотренного контрактом оборудования фактически установлено 4 единицы: «Брусья двойные для отжимания разноуровневые 3,27*0,86*1,4» - 1 шт., «Рукоход 3,8*1,5*2,6» -1 шт., «Брусья разноуровневые 3 * 1 * 1,5» - 1 шт., «Брусья наклонные 3,2*0,8*1,2» - 1 шт. на общую сумму 188 785 руб. Остальное оборудование заменено на иное, не предусмотренное контрактом, отличающееся по техническим и эксплуатационным характеристикам и стоимости. 

Фактическим ответчиком осуществлена поставка оборудования на общую сумму 2 426 480 руб., заказчиком фактически оплачено за оборудование 3 556 265 руб. 12 коп.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 28.12.2023 г. с общества с ограниченной ответственностью "Ярдорремстрой" в пользу муниципального казенного учреждения «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля взыскано 1 129 785 руб. 12 коп. неосновательное обогащение.

Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции от 20.03.2024 г. Определение Арбитражного суда Ярославской области от 04.12.2023 по делу № А82-8748/2023 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью «Ярдорремстрой» без удовлетворения. Решение Арбитражного суда Ярославской области от 28.12.2023 по делу № А82-8748/2023 оставлено без изменения, а апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Ярдорремстрой», первого заместителя прокурора Ярославской области в интересах публичного образования - города Ярославля в лице мэрии г. Ярославля без удовлетворения.

Указывая на то, что на стороне ответчика имелось пользование чужими денежными средствами, истец обратился в суд с настоящим исковым требованием.

Изучив материалы дела, суд считает требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Истец просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму неосновательного обогащения.

По расчету истца сумма процентов составила 96 078 руб. 15 коп. за период с 30.08.2022г. по 20.09.2023 г., 

Ответчик, возражая против удовлетворения требований, указывает на отсутствие неосновательного обогащения на стороне ответчика.

Из материалов дела следует, что стоимость фактически выполненных работ по контракту, указанная в актах выполненных работ  составила 18 694 549 руб. 17 коп., оплата произведена платежными поручениями № 285900 от 30.08.2022г. на сумму 15 602 711,14 руб., № 285901 от 30.08.2022г. на сумму 321 429,89 руб.

Платежными поручениями № 285903 от 30.08.2022г. на сумму 1 742 597,51 руб.,   № 285902 от 30.08.2022г. на сумму 997 823 руб., № 285904 от 30.08.2022г. на сумму 29 987,63 руб. произведено удержание и перечисление в бюджет удержанных неустоек.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 28.12.2023 г. установлена необоснованность перечисления Агентством Обществу 1 129 785 руб. 12 коп., денежные средства взысканы с Общества.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 01.06.2024г. по делу № А82-369/2023 установлено наличие неосновательного обогащения на стороне Агентства в части удержанных неустоек, взыскано с Агентства в пользу Общества 2 150 659,32 руб. 

Так как перечисление Агентством денежных средств, в том числе и в обоснованной, и в необоснованной части произведено одновременно (30.08.2022г.), при этом сумма необоснованного пользования Агентством денежными средствами, установленная решением суда, превышает сумму неосновательного пользования Обществом денежными средствами, оснований для взыскания процентов с ответчика суд не усматривает. Требование удовлетворению не подлежит, так как фактического пользования чужими денежными средствами в указанный истцом период на стороне ответчика не имелось.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, - через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

И.Ю. Бессонова