РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 03 марта 2025 года по делу № А33-34049/2023 Красноярск  

03.03.2025 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в течение 30 дней со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу исполнить мероприятия согласно техническим условиям, являющимся неотъемлемой частью договора технологического присоединения № 20.2400.6170.19 от 04.09.2019, а именно:  

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Истца;  

- проектирование, строительство новых и реконструкция существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов Истца, а именно, запроектировать и построить ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ТП 939 до границы земельного участка Истца (способ прокладки линии, марку и сечение провода определить проектом), также выполнить монтажные и пусконаладочные работы средств АИСС УЭ в точках технологического присоединения электроустановок потребителя к электрическим сетям филиала (на границе балансовой принадлежности).  

Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Сибирь" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Плитпром» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 238 859.40 руб. неустойки, 13 777 руб. расходов по оплате госпошлины.  

В случае неисполнения ответчиком решения суда по настоящему делу взыскать с публичного акционерного общества "Россети Сибирь" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Плитпром» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) на основании статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации денежные средства в размере 10 000 руб. за каждый день неисполнения до дня фактического исполнения решения суда.  

 Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Плитпром» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета госпошлину, уплаченную по платёжному поручению от 15.11.2023 № 231 в сумме 4 517 руб.  

 Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Л.В. Мозолькова