16_1630031  

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 

Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-5327/2023

г. Южно-Сахалинск

6 февраля 2024 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Веретенникова И.Н.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика»  

муниципального образования «Холмский городской округ» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Инновационное  

строительство» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о возложении обязанности устранить недостатки выполненных работ третьи лица: ФИО2, ФИО3 при участии: от истца: ФИО4 по доверенности № 265 от 19.10.2023; в отсутствии ответчика, третьих лиц. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Инновационное  

строительство» (ИНН 

<

***>) в течении 30 календарных дней с даты  

вступления решения суда в законную силу исполнить гарантийные обязательства  

по муниципальному контракту № 19-193/268 от 19.08.2019, а именно: произвести  работы по устранению причин образования темных пятен под оконными проемами  в жилых комнатах, восстановлению герметичности оконных проемов, устранить  причины появления темного налета на окнах; устранить причины образования  трещин в санузле, произвести работы по устранению трещин в санузле,  восстановить герметичность входной двери, а в случае невозможности произвести  ее замену, заменить порог балконного выхода в 

<

...>;  

- устранить подтеки на стене между кухней и санузлом, произвести работы по  устранению повреждения угла стены в прихожей, устранить причины вспучивания  стены в спальной комнате и произвести работы по ее восстановлению в 

<

...>.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инновационное  строительство» в доход федерального бюджета 6 000 (шесть тысяч) рублей  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном  объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников