6/2023-21435(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-19984/2021

г. Ярославль

13 февраля 2023 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Танцевой В.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, ФИО2  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ  КИРОВСКОГО РАЙОНА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к РЕГИОНАЛЬНОМУ ФОНДУ СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

об обязании устранить недостатки третье лицо - ООО "Артем" (ИНН 

<

***>) 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных  домов Ярославской области в течение 45 дней с даты вступления решения в законную силу  устранить недостатки капитального ремонта кровли многоквартирного дома № 27 корп.2 по  ул. Свободы в г. Ярославле в соответствии с Заключением судебной экспертизы № 856/1-316.1, а именно устранить:  

- Неровность основания для укладки водоизоляционного слоя и отклонения  поверхности вдоль уклона;  

- Дефекты укладки водоизоляционного слоя; 

Дефекты примыкания водоизоляционного слоя к конструкциям круглого сечения;  отсутствие защитных патрубков, зонтов, наличие вздутия водоизоляционного слоя в местах  примыканий;  

- Вздутия на поверхности водоизоляционного слоя; - Отсутствие герметичного примыкания листов фартуков парапета между собой; 

- Дефекты узла примыкания к смежному зданию: ненадлежаще подготовленное  основание (наклейка водоизоляционного слоя выполнена по кирпичной кладке без  выравнивания поверхности): отсутствие переходного бортика, слоя усиления фартука и  краевой рейки;  

-  Приклеивание водоизоляционного слоя в водосточных лотках по неподготовленному  основанию (наклейка водоизоляционного слоя выполнена по кирпичной кладке без  выравнивания поверхности);  

- Несоответствие конструкции деревянных дверных блоков выхода на кровлю  нормативным требованиям: отсутствие элементов верхней обвязки, отсутствие уплотнения  притворов;  

 - Дефекты в виде подтеков на лакокрасочном покрытии: в месте устройства монтажного  шва имеется искривление линий окраски;  

 - Отслоение защитного лакокрасочного покрытия вертикальных лестниц, коррозия  стальных элементов, обусловленная ненадлежаще подготовленным основанием, загрязнение  в виде битумных пятен с последующим нанесением окрасочного слоя;  

- Ненадлежаще подготовленное основание наружных стен и вентшахт для нанесения  окрасочного слоя: зерна и включения высотой более 1 мм, раковины, незачищенный  шпатлевочный слой; подтеки на окрасочном слое;  

- Отслоение штукатурного слоя наружных стен вентшахт от основания. 

 Взыскать с Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных  домов Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  акционерного общества "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского  района" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку на случай  неисполнения судебного акта - решения Арбитражного суда Ярославской области от в  размере 3 000 руб. за каждый день просрочки в течение 30 дней после наступления срока  исполнения обязательства, с 31-ого дня производить начисление неустойки в размере 5 000  руб. в день до момента фактического исполнения судебного акта.  

Взыскать с Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных  домов Ярославской области в пользу акционерного общества "Управляющая организация  многоквартирными домами Кировского района" 6 000 руб. в возмещение расходов по уплате  госпошлины.  

Исполнительные листы выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в  полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской  области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного  документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья В.А. Танцева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 04.02.2022 5:54:04

Кому выдана Танцева Виктория Андреевна