130/2020-40824(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-100/2020

г. Салехард

24 сентября 2020 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Антоновой Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению Администрации поселка Тазовский (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Ленар»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об устранении недостатков строительства  многоквартирного дома,  

при участии в судебном заседании: от истца – представитель не явился; от ответчика – представитель не явился; 

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования Администрации поселка Тазовский (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) удовлетворить.  

Обществу с ограниченной ответственностью «ЛенАр» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по  договору № 119 от 01.06.2016 в период гарантийных сроков, а именно:  

- теплоизоляция вентиляционной шахты; - замена либо утепление слухового окна; - теплоизоляция слухового окна; - устройство козырька над входом в тепловой узел;  -оборудование окон замками безопасности; 

- закрепление выключателей, закрепление приборов отопления в квартирах;  

- наладка работы системы вентиляции, в том числе установка вентиляционных  

каналов на кровле здания; 

- установка индивидуальных пожарных извещателей;  - наладка системы освещения в местах общего пользования;  

- установка поквартирных приборов учета; 

- выполнение работ по благоустройству и озеленению прилегающей территории  

в соответствии с проектной документацией; - установка почтовых ящиков; - выполнение внутренней отделки; - устранение протечек кровли; 

- установка снегозадержателей и ограждения кровли;  

- завершение работ по устройству теплового пункта, распределительного щита  

на воду; - подключение квартир к тепловым счетчикам; - работы по регулированию окон; 

- работы по дополнительному утеплению вентиляционных коробов в чердачном  

помещении; - работы по устройству освещения чердачного помещения; - устройство деревянных перил на лестничных пролетах; 

- опломбирование приборов тепловой энергии, подключение датчиков  

температуры на обратном трубопроводе. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛенАр» (629601,  

Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>,  

строение 1, дата регистрации - 06.02.2008, ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  

доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  

(изготовления в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого  

автономного округа. 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  

документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  

соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

Е.В. Антонова

Судья 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 08.06.2020 6:05:09

Кому выдана Антонова Елена Викторовна