АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-22865/2021

г. Тюмень

27 января 2022 года

18 января 2022 года Судом вынесено решение по данному делу в виде резолютивной части (л.д. 59). По заявлению истца, поступившему в Суд 24 января 2022 года, мотивированное решение изготовлено 27 января 2022 года.

Судья арбитражного суда Тюменской области Лоскутов В.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства в помещении арбитражного суда Тюменской области по адресу: 

<

...> кабинет 419, дело по иску

Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства»

К обществу с ограниченной ответственностью «Вавилон Констракшен»

О взыскании неустойки в размере 9 948, 27 рублей

установил:

Заявлен иск о взыскании неустойки (л.д. 3-7, 30-34). 

На основании пункта 5 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в порядке упрощенного производства, на что было указано в определении о принятии искового заявления от 29 ноября 2021 года (л.д. 1), о чем стороны извещены надлежащим образом в соответствии со статьями 121 и 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (л.д. 2 на обороте), ответчик отзыв на исковое заявление не представил.

Исследовав материалы дела, Суд находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, по следующим основаниям.

14 апреля 2021 года между истцом (Заказчик) и ответчиком (Подрядчик) был заключен контракт № 16001.21.022 на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого помещения: квартира № 16 в жилом доме по ул. Школьная, 13, в соответствии с которым ответчик обязался по заданию истца выполнить в соответствии с требованиями и условиями контракта работы по капитальному ремонту указанной квартиры и сдать результат работ истцу, а истец обязался принять эти работы в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом, то есть в размере 294 763, 53 рублей (л.д. 12-18, 35-46).

Согласно пункту 3.1. контракта, срок выполнения работ в течение семидесяти календарных дней с момента передачи объекта по акту приема-передачи объекта, соответственно срок выполнения работ – 12 июля 2021 года.

В соответствии с актом приема-передачи объекта производителю работ для производства капитального ремонта (реконструкции) от 26 апреля 2021 года, истец передал ответчику объект для производства работ, предусмотренный контрактом (л.д. 19, 47).

26 июля 2021 года истец вручил ответчику уведомление о нарушении условий контракта № 55-08-526/21 от 26 июля 2021 года, с требованием выполнить работы в полном объеме с предоставлением исполнительной документации (л.д. 22, 51-52).

02 сентября 2021 года истец вручил ответчику претензию № 55-08-6212/21 от 02 сентября 2021 года, с требованием оплатить неустойку в размере 2 746, 21 копейку в течение тридцати календарных дней с даты направления претензии (л.д. 23, 53-54).

07 сентября 2021 года истец вручил ответчику повторное уведомление № 55-08-6420/21 от 02 сентября 2021 года, с требованием выполнить работы в полном объеме с предоставлением исполнительной документации (л.д. 23, 55-56).

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктом 10.5. контракта, в случае просрочки исполнения ответчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств, предусмотренных контрактом, истец направляет ответчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения ответчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом соответствующим отдельным этапам исполнения контракта и исполненных ответчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок исчисления пени.

На основании данного пункта контракта, истцом начислена неустойка в размере 9 948, 27 рублей за период с 13 июля 2021 года по 24 ноября 2021 года, согласно расчету, указанному в исковом заявлении, исходя из ключевой ставки Банка России в размере 7, 5 % годовых, действующей с 22 октября 2021 года по 20 декабря 2021 года.

В соответствии с часть 5 статьи 34 Федерального Закона Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пеня за просрочку подрядчиком исполнения своих обязательств контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Следовательно, при добровольной уплате названных пени, ее размер по общему правилу подлежит исчислению по ставке, действующей на дату фактического платежа, при этом закон не содержит прямого указания на применимую ставку в случае взыскания пени в судебном порядке.

Принимая во внимание, что по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, взыскание неустойки направлено на компенсацию потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением должником своих обязательств, при расчете неустойки должна быть применена ставка, позволяющая максимальным образом обеспечить защиту права кредитора и покрыть его инфляционные и иные потери.

С учетом данных обстоятельств, применительно к данному спору, Суд считает возможным произвести расчет неустойки с учетом изменения ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды начисления неустойки.

Учитывая вышеизложенное, Суд считает обоснованным начисление неустойки за период с 13 июля 2021 года по 25 июля 2021 года в размере 702, 52 рублей (294 763, 53 рублей х 13 дней х 1/300 х 5, 5%); за период с 26 июля 2021 года по 12 сентября 2021 года в размере 3 129, 41 рублей (294 763, 53 рублей х 49 дней х 1/300 х 6, 5%); за период с 13 сентября 2021 года по 24 октября 2021 года в размере 2 785, 52 рублей (294 763, 53 рублей х 42 дня х 1/300 х 6, 75%) и за период с 25 октября 2021 года по 24 ноября 2021 года в размере 2 284, 42 рублей (294 763, 53 рублей х 31 день х 1/300 х 7, 75%), то есть всего с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 8 901, 87 рублей.

Так как истец при подаче искового заявления был освобожден от оплаты государственной пошлины, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина взыскивается с ответчика в доход бюджета Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 181-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

Р     Е     Ш     И     Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вавилон Констракшен» в пользу муниципального казенного учреждения «Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства» неустойку в размере 8 901 рубль 87 копеек, начисленную за период с 13 июля 2021 года по 24 ноября 2021 года на основании пункта 10.5 муниципального контракта № 16001.21.21.022 на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого помещения: квартира № 16 в жилом доме по улице Школьная, 13 от 14 апреля 2021 года.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вавилон Констракшен» в доход бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 2 000 рублей.

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объеме, в Восьмой арбитражный апелляционный суд,  путем подачи жалобы через Арбитражный суд Тюменской области.

 

Судья

Лоскутов В.В.